АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А19-16405/2018

г. Иркутск

21 ноября 2018 года

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Кириченко С.И.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению УПРАВЛЕНИЯ ПО  КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ  ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 665830,  

<

...>)  к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВР" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>; юридический адрес: 664081, 

<

...>)  

о взыскании 1 090 142,84 рублей. 

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВР" 

в пользу УПРАВЛЕНИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ  АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 150 000 руб. – штраф.  

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВР"  выполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 25.08.2017 №  2000017060 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий:  

1. По адресу: 

<

...> на территории многоквартирных домов № 25,  26, 27, 28, 32, 34, 38, следующие работы:  

- закрепить декоративное ограждение; 

- восстановить разрушенные бордюрные камни;  

-восстановить повреждение опорного механизма (пружина) малой архитектурной формы  «Машинка»;  

-устранить разрушение бетона для крепления элементов благоустройства; 

-восстановить повреждения ограждения корта из сетки-рабица, образовавшиеся в  результате некачественно выполненного крепления;  

-отрегулировать дверцы корта; - закрепить ограждение площадки ТКО; - восстановить вертикальную планировку; - убрать от строительного мусора территорию; - закрепить декоративную планку борта корта; 

- засыпать грунтом отверстия для крепления элементов благоустройства.  

 2. По адресу: 

<

...> на территории многоквартирных домов   № 14, 18,19, 20, следующие работы:  

-засыпать грунтом отверстия для крепления элементов благоустройства;  -убрать от строительного мусора территорию;  

-восстановить разрушение асфальтобетонного покрытия; 

-выполнить работы по заделке отверстий в местах отбора проб асфальтобетона;  -на спортивном комплексе для детей до 12 лет закрепить канат;  

-на детской площадке закрепить ограждение; 

-на спортивном комплексе для детей старше 12 лет закрепить лестницу;  -устранить просадку колодца.  

3. По адресу: 

<

...> на территории многоквартирных домов   № 21,22 следующие работы:  

-восстановить разрушение бордюрного камня; -восстановить разрушение бетона для крепления элементов благоустройства; 

- засыпать грунтом отверстия для крепления элементов благоустройства;  - восстановить разрушение асфальтобетонного покрытия;  

- убрать от строительного мусора территорию; 

-выполнить работы по заделке отверстий в местах отбора проб асфальтобетона.  

4. По адресу: 

<

...> на территории многоквартирных домов №  18,19, 21, 22, 23, 37, следующие работы:  

-засыпать грунтом отверстия для крепления элементов благоустройства;  -восстановить разрушение асфальтобетонного покрытия;  

-выполнить крепление теннисного стола с верхним слоем асфальтобетонного покрытия. 

5. По адресу: г. Ангарск, 60 квартал, на территории многоквартирных домов № : 1,  2, 27, 28, следующие работы:  

- засыпать грунтом отверстия для крепления элементов благоустройства; - выполнить работы по заделке отверстий в местах отбора проб; 

- восстановить разрушение бетона в местах крепления элементов благоустройства. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВР" 

выполнить работы в течении месяца со вступления решения суда в законную силу. 

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВР" в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 500 руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца после его принятия, и по истечении этого срока вступает в законную силу.  

Судья С.И. Кириченко