Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

22. 04. 2024 года.                                           Дело № А40-309933/23-43-2439

Резолютивная часть решения объявлена 17. 04. 2024 года.

Решение изготовлено в полном объеме 22. 04. 2024 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

АО " МТУ Сатурн " (ОГРН 

<

***>) к ООО " Фалкор " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 9 281 375 руб. 90 коп. – долга,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № юр-132 от 10.11.2023 г., от ответчика – не явился.  

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителя, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 9 281 375 руб. 90 коп. – долга, на основании статей 8, 50, 309-310, 328, 330, 702, 703, 753 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении с учётом заявления об уточнении суммы искового требования, представил истребованные судом документы не в полном объеме, предъявил подлинники документов, имеющихся в материалах дела в виде копий; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на исковое заявление, истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил, расчет истца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва и представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Из материалов дела усматривается, что между АО «МТУ Сатурн» (Истец, Субподрядчик) и ООО «ФАЛКОР» (Ответчик, Подрядчик) заключены Договоры субподряда:

Договор №22-168Д от 24.06.2022г. «Капитальный ремонт фельдшерско- акушерского пункта по адресу: 

<

...>».

Договор № 22-169 от 24.06.2022г. «Капитальный ремонт фельдшерско- акушерского пункта по адресу: 

<

...>».

Договор № 22-170Д от 24.06.2022г. «Капитальный ремонт фельдшерско- акушерского пункта по адресу: 

<

...>».

Работы выполнялись во исполнение обязательств Ответчика по Государственным контрактам, в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» (п.п.1.2 договоров - идентичны во всех договорах).

Работы выполнены Истцом по всем договорам без замечаний со стороны Ответчика, оформлены Актами по ф. КС-2 и справками о стоимости работ по ф. КС- 3, но оплачены Ответчиком частично.

Договор №22-168Д от 24.06.2022г «Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта по адресу: 

<

...> (дополнительные работы)».

Цена договора - 5 288 576,23 руб. в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 14.02.2023 г.

Цена договора является ориентировочной. Окончательная цена договора определяется по объему фактически выполненных работ на основании подписанных сторонами Актов (ф.КС-2) и Справок (ф.КС-3). (п.п.2.2 договора).

Срок выполнения работ- 30 сентября 2023г. - в редакции Дополнительного соглашения №7 от 20.07.2023г.

Работы приняты Ответчиком на основании следующих отчетных документов: Справка ф. КС-3 № 1 от 10.01.2023г. на сумму 660 156,66 руб. (с НДС) и Акты1 ф. КС-2 № 1 на сумму 101 683,03 руб., КС-2 № 2 на сумму 28 885,85 руб., КС-2 № 3 на сумму 130 209,68руб., КС-2 № 4 на сумму 71 955,42 руб., КС-2 № 5 на сумму 11 326,09 руб., КС-2 № 6 на сумму 32 142,98 руб., КС-2 № 7 на сумму 16 851,32руб., КС-2 № 8 на сумму 23 574,54 руб., КС-2 № 9 на сумму 3 968,06 руб., КС-2 № 10 на сумму 129 433,58 руб., Справка ф.КС-3 № 1 от 14.02.2023г. на сумму 510 322,76 руб. (с НДС) и Акт ф. КС-2 №1 на 510 322,76 руб., Справка ф.КС-3 № 6 от 09.03.2023г. на сумму 470 995,97руб. (С НДС) и Акт ф. КС-2 № 3 на сумму 52 730,02 руб., КС-2 № 3 на сумму 180 999,45 руб., КС-2 № 2 на сумму 141 662,13 руб., КС-2 № 3 на сумму 17 105,04 руб., Справка ф.КС-3 № 7 от 14.06.2023г. на сумму 304 140,44 руб. (С НДС) и Акт ф. КС-2 № 4 на сумму 2 109,40 руб., КС-2 № 3 на сумму 200 662,64 руб., КС-2 № 2 на сумму 1 171,11 руб., КС-2 № 2 на сумму 32 562,37 руб., КС-2 № 2 на сумму 10 586,80 руб., КС-2 № 4 на сумму 6 358,05 руб. Всего на сумму: 1 945 615,83 руб.

Работы выполненные и предъявленные Ответчику: Справка ф. КС-3 № 7 от 08.08.2023г. на сумму 28 639,28руб. (С НДС) и Акт ф.КС-2 на сумму 28 639,28руб. (С НДС).

Документы были направлены Ответчику письмом №МС/ОУП - 1759 от 29.08.2023г., Ответчик не вернул данный документ подписанным, и не дал мотивированный отказ от принятия работ.

Согласно п.п.5.5 договора, Истец обязан в течение 3 рабочих дней принять работы и подписать Акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ (ф.КС-3) или дать мотивированный отказ от их подписания. В случае, если в указанный срок документы не подписаны или не дан мотивированный отказ от их подписания, работы считаются выполненными Истцом надлежащим образом и принятыми ответчиком к оплате.

Таким образом, АО «МТУ Сатурн» принял к учету, в том числе, работы на сумму 28 639,28 руб.

Итого работы по Договору №22-168Д от 24.06.2022г. выполнены на сумму 1 974 255,11руб.

Авансирование работ не проводилось.

Оплата по Договору №22-168Д от 24.06.2022г:

Срок оплаты выполненных работ- в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами актов по ф. КС-2 и КС-3 (п. п. 2.5 Договора).

Оплачено Ответчиком: п. п. № 17 от 29.08.2023г.. на сумму 28 639,28 руб., п. п. № 12 от 11.07.2023г. на сумму 286 000,00 руб. Итого оплачено на сумму 314 639,28руб.

Задолженность по оплате работ по Договору № 22-168Д от 24.06.2022г.: 1 974 255,11руб. - 314 639,28руб.= 1 659 615,83руб.

В соответствии с п.п.2.5 договора, п.1, ст.711 ГК РФ, срок оплаты по выполненным работам наступил.

Соблюдение претензионного порядка: Претензия № МС/ППР-1918 от 21.09.2023г., Претензия № МС/ППР-2132 от 20.10.2023г., письмо об оплате задолженности № МС/ОУП-1939 от 26.09.2023г.

Договор № 22-169 от 24.06.2022г. «Капитальный ремонт фельдшерско- акушерского пункта по адресу: 

<

...>».

Цена договора: 4 935 811,63 руб. - в редакции Дополнительного соглашения № 6 от 26.05.2023г.

Цена договора является ориентировочной. Окончательная цена договора определяется по объему фактически выполненных работ на основании подписанных сторонами Актов (ф.КС-2) и Справок (ф.КС-3). (п.п.2.2 договора).

Срок выполнения работ- 30 июня 2023г. (в редакции дополнительного соглашения № 6 от 26.05.2023г.).

Работы приняты Ответчиком на основании следующих отчетных документов: Справка ф. КС-3 № 1 на сумму 273 846,29 руб. (С НДС) и Акты ф. КС-22 № 1 на сумму 37 380,16 руб., КС-2 № 1 на сумму 190 825,08 руб., Справка ф. КС-3 № 2 на сумму 358 675,22 руб. (С НДС) и Акты ф. КС-2 № 3 на сумму 108 624,15 руб., КС-2 № 4 на сумму 3 973,04 руб., КС-2 № 5 на сумму 160 797,97 руб., КС-2 № 6 на сумму 25 500,86 руб., Справка ф. КС-3 № 1на сумму 1 512 210,55 руб. руб. (С НДС) и Актом ф. КС-2 № 1 на сумму 1 512 210,55 руб. (С НДС), Справка ф. КС-3 №5 на сумму 208 258,65руб. (С НДС) и Акты ф. КС-2 № 2 на сумму 34 666,79 руб., КС-2 № 3 на сумму 3 298,42 руб., КС-2 на сумму 127 395,82 руб., КС-2 № 3 на сумму 8 187,85руб., Справка ф. КС-3 № 1 на сумму 482 386,74 руб. (с НДС) и Акт ф. КС-2 на сумму 482 386,74 руб. (С НДС), Справка ф. КС-3 № 6 на сумму 476 360,62 руб. ( с НДС) и Акты ф. КС-2 № 4 на сумму на сумму 148 143,56 руб., КС-2 № 4 на сумму 179 105,97 руб., КС-2 № 4 на сумму 69 717,66 руб., Справка ф. КС-3 № 7 на сумму 217 688,88 руб. (С НДС) и Акт ф. КС-2 № 3 на сумму 217 688,88 руб. (С НДС). Всего на 3 529 426,95 руб.

Работы выполненные и предъявленные Ответчику: Справка ф. КС-3 № 7 от 08.08.2023г. и Акт ф.КС-2 № 5 на сумму 26 983,20 руб.

Документы были направлены Ответчику письмом №МС/ОУП - 1759 от 29.08.2023г., Ответчик не вернул данный документ подписанным, и не дал мотивированный отказ от принятия работ.

Согласно п.п.5.5 договора, Истец обязан в течение 3 рабочих дней принять работы и подписать Акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ (ф.КС-3) или дать мотивированный отказ от их подписания. В случае, если в указанный срок документы не подписаны или не дан мотивированный отказ от их подписания, работы считаются выполненными Истцом надлежащим образом и принятыми ответчиком к оплате.

Таким образом, АО «МТУ Сатурн» принял к учету, в том числе, работы на сумму 26 983,20 руб.

Итого работы по Договору № 22-169Д от 24.06.2022г. выполнены на сумму 3 556 410,15 руб.

Оплачено Ответчиком: п. п. № 16 от 29.08.2023г. на сумму 26 983,20 руб., п. п. № 7 от 10.06.2023г. на сумму 475 000,00 руб., п. п. № 5 от 01.02.2023г. на сумму 358 675,22 руб., п. п. № 21 от 31.10. 2022г. на суму 24 000,00 руб. Итого оплачено на сумму 884 658,42 руб.

Задолженность по оплате работ по Договору № 22-169Д от 24.06.2022г.: 3 556 410,15 руб.- 884 658,42 руб. = 2 671 751,73руб.

В соответствии с  п.п.2.5 договора, п.1, ст.711 ГК РФ, срок оплаты по выполненным работам наступил.

Соблюдение претензионного порядка: Претензия № МС/ППР-1918 от 21.09.2023г., Претензия № МС/ППР-2132 от 20.10.2023г., письмо об оплате задолженности № МС/ОУП-1939 от 26.09.2023г. Ответа со стороны Ответчика не последовало.

Договор № 22-170Д от 24.06.2022г. «Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта по адресу: 

<

...>».

Цена договора - 9 822 696,16 руб. в редакции Дополнительного соглашения № 6 от 26.05.2023г.

Цена договора является ориентировочной. Окончательная цена договора определяется по объему фактически выполненных работ на основании подписанных сторонами Актов (ф.КС-2) и Справок (ф.КС-3). (п.п.2.2 договора).

Срок выполнения работ - 30 июня 2023г. - в редакции Дополнительного соглашения №6 от 26.05.2023г. 

Работы приняты Ответчиком на основании следующих отчетных документов: Справка ф. КС-3 № 1 от 03.09.2022г. на сумму 338 873,92 (с НДС) и Акты ф.КС-2 на сумму 35 131,46 руб., КС-2 на сумму 247 263,47 руб., Справка ф. КС-3 №2 от 10.01.2023г. на сумму 734 684,90 (с НДС) и Акты ф.КС-2 №3 на сумму 148 086,85 руб., КС-2 № 4 на сумму 170 180,82руб., КС-2 № 5 на сумму 21 146,73 руб., КС-2 № 6 на сумму 259 018,40 руб., КС-2 № 7 на сумму 13 804,63 руб., Справка ф. КС-3 №1 от 14.02.2023г. на сумму 3 998 140,04руб. (с НДС) и Акт ф.КС-2 № 1 на сумму 3 998 140,04руб. (С НДС), Справка ф. КС-3 №7 от 09.03.2023г. на сумму 217 005,92руб. (с НДС) и Акт ф.КС-2 №2 на сумму 7 582,89 руб., КС-2 на сумму 158 467,68 руб., КС-2 № 3 на сумму 14 787,69 руб., Справка ф. КС-3 №7 от 22.05.2023г. на сумму 542 177,47руб. (с НДС) и Акт ф.КС-2 № 6 на сумму 18 706,00руб., КС-2 № 3 на сумму 77 969,19 руб., КС-2 № 3 на сумму 149 911,67руб., КС-2 №4 на сумму 205 227,70 руб. Итого работ на сумму: 5 830 882,25 руб.

Работы выполненные и предъявленные Ответчику: Справка ф. КС-3 № 8 от 08.08.2023г. и Акт ф.КС-2 № 5 на сумму 26 924,70 руб.

Документы были направлены Ответчику письмом №МС/ОУП - 1759 от 29.08.2023г., Ответчик не вернул данный документ подписанным, и не дал мотивированный отказ от принятия работ.

Согласно п.п.5.5 договора, Истец обязан в течение 3 рабочих дней принять работы и подписать Акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ (ф.КС-3) или дать мотивированный отказ от их подписания. В случае, если в указанный срок документы не подписаны или не дан мотивированный отказ от их подписания, работы считаются выполненными Истцом надлежащим образом и принятыми ответчиком к оплате.

Таким образом, АО «МТУ Сатурн» принял к учету, в том числе, работы на сумму 26 924,70 руб.

Итого работы по Договору № 22-170Д от 24.06.2022г. выполнены на сумму 5 857 806,95 руб.

Оплачено Ответчиком: п. п. № 15 от 29.08.2023г. на сумму 26 924,70 руб., пп № 6 от 07.06.2023г. на сумму 542 000,00 руб., п. п. № 22 от 31.10.2023г. на сумму 338 873,91 руб. Итого оплачено на сумму 907 798,61 руб.

Задолженность по оплате работ по Договору № 22-170Д от 24.06.2022г.: 5 857 806,95 руб.- 907 798,61 руб. = 4 950 008,34руб.

В соответствии с п.п.2.5 договора, п.1, ст.711 ГК РФ, срок оплаты по выполненным работам наступил.

Соблюдение претензионного порядка: Претензия № МС/ППР-1918 от 21.09.2023г., Претензия № МС/ППР-2132 от 20.10.2023г., письмо об оплате задолженности № МС/ОУП-1939 от 26.09.2023г. Ответа со стороны Ответчика не последовало.

Как следует из пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса РФ установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком, в размере, предусмотренном сметой, в срок и порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Согласно п.4 ст.753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно ч. 1 ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Статья 753 ГК РФ предусматривает возможность составления одностороннего акта. Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку. Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Требование истца о взыскании долга  в сумме 9 281 375 руб. 90 коп. – законное, обоснованное, соответствует условиям договоров, заключенных сторонами, подтверждено, имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика, в соответствии со ст. ст. 106, 110, 112 АПК РФ. 

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 49, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО " Фалкор " (ОГРН 

<

***>) в пользу АО " МТУ Сатурн " (ОГРН 

<

***>) 9 281 375 руб. 90 коп. – долга и расходы по уплате госпошлины в сумме 69 407 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья

О.В. Романов