Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-104564/2019

06 декабря 2019 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  03 декабря 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  06 декабря 2019 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Дороховой Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, дата регистрации: 22.01.1993, место регистрации: Россия, 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 1)

к дачному некоммерческому партнерству «Лемболовская твердыня-1» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, дата регистрации: 15.11.2006, место регистрации: Россия, 188654, Ленинградская область, 

<

...>)

о взыскании задолженности

 

при участии

- от истца: не явился, извещен

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее – ПАО «Ленэнерго») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с дачного некоммерческого партнерства «Лемболовская твердыня-1»  (далее – ДНП «Лемболовская твердыня-1») 

- 12 205 652 рублей 66 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.10.2011 № ОД-ПРЭС-11-6967/4408-Э/11 за период с 08.10.2012 по 27.04.2019,

- 7 389 рублей 43 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения  платежа № 1 за период с 18.10.2011 по 30.12.2011,

- 823 732 рублей 98 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения  платежа № 2 за период с 08.12.2011 по 27.04.2019,

- 525 085 рублей 18 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения  платежа № 3 за период с 10.04.2012 по 27.04.2019. 

 

В соответствии с пунктом 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» и частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд завершил предварительное судебное заседание и начал рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы сторон, арбитражный суд установил следующее.

Из материалов дела следует, что между ПАО «Ленэнерго» (сетевая организация) и ДНП «Лемболовская твердыня-1» (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.10.2011 № ОД-ПРЭС-11-6967/4408-Э/11, в соответствии с которым сетевая организация в соответствии с действующим законодательством обязуется осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) заявителя к электрическим сетям по техническим условиям (далее — услуга), а заявитель - оплатить услугу в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

В соответствии с пунктом 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской Области от 25.02.2011 № 22-п и составляет 4 417 920 рублей 00 копеек, включая НДС 18 % - 673 920 рублей 00 копеек и уплачивается в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в размере 441 792 рубля 00 копеек в течение 15 дней со дня заключения договора;

б)  30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в размере1 325 376 рублей 00 копеек в течение 60 дней со дня заключения договора;

в)  20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в размере 883 584 рубля 00 копеек в течение 180 дней со дня заключения договора;

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в размере1 325 376 рублей 00 кореек в течение 15 дней со дня подписания Сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности Сторон;

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в размере 441 792 рублей 00 копеек в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов натехнологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации

ДНП «Лемболовская твердыня-1» оплату услуги по технологическому присоединению осуществило с нарушением сроков, что послужило основанием к начислению процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения платежей.

В связи с неисполнением обязательств по договору, в адрес ДНП «Лемболовская твердыня-1» в целях соблюдения претензионного порядка урегулирования спора направлена претензия от 20.12.2016 № ЛЭ/16-02/6642. Претензия оставлена без ответа, что послужило основанием к обращению в суд.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно статье 26 Закона об электроэнергетике по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Правила № 861 определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, регламентируют процедуру технологического присоединения, устанавливают существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с пунктами 3 и 6 Правил № 861 сетевая организация на основании заявки обязана заключить с заявителем договор на технологическое присоединение, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств заявителя мероприятия по технологическому присоединению.

Существенные условия договора указаны в пункте 16 Правил № 861. К ним относятся в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых сторонами договора, указываемых в технических условиях, которые являются неотъемлемой частью такого договора, размер платы, определяемый в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 19 Правил N 861 по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы: акт об осуществлении технологического присоединения; акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. Соответственно, составление указанных документов подтверждает факт технологического присоединения и окончания мероприятий (услуг) по технологическому присоединению. Однако данные документы на момент вынесения оспариваемого постановления не были выданы заявителю, а также при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций не представлены.

Указанные документы в дело не представлены. 

Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с пунктом 12 Технических условий к договору срок их действия составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Дата заключения договора: 07.10.2011. Срок технических условий истек 07.10.2013.

Выполнение истцом (исполнителем) обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению обусловлено исполнением ответчиком (заказчиком) встречного обязательства по внесению в установленные сроки платы за подключение (пункт 1 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Право же требовать внесения предварительной оплаты по договору законом не предусмотрено.

Ленэнерго в период действия договора с требованием об оплате, извещениями о приостановлении работ или требованиями о возмещении убытков к заявителю не обращалось.

В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. 

Условия подключения выдаются исполнителем вместе с проектом договора о подключении, являются его неотъемлемой частью, по истечении которого они теряют силу. Стороны не предпринимали мер по исполнению договора в период его действия. 

Инициативы о дальнейшем продлении технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора,  заявитель не проявил, новые технические условия уполномоченным органом не выдавались. Срок действия условий подключения истек – 07.10.2013. Правовых оснований к расторжению договора, который прекратил свое действие в связи с истечением срока действия, у истца не имелось.

На основании изложенного суд пришел к выводу, что требование об оплате не обеспечено доказательствами выполнения работ, доказательствами продления срока действия прекращенного договора, намерением сторон продолжить сотрудничество по подключению объекта к сетям.

При принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в состав судебных расходов входит государственная пошлина.В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии с частью 5 статьи 15, часть 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт, выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Дорохова Н.Н.