АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-48127/2019

23 октября 2019 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 16 октября 2019 года

Полный текст решения изготовлен 23 октября 2019 года

Арбитражный   суд  Свердловской области в составе судьи  Т.С.Зыряновой,  при  ведении протокола судебного заседания  помощником судьи С.А.Щаповой,   рассмотрел  в  судебном заседании  дело по  иску  публичного акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу  с ограниченной ответственностью «Гормонтажстрой»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  о взыскании 510973руб. 34коп., 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 08.07.2019г.

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Отводов суду не заявлено (ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Истец обратился в  арбитражный суд с иском к ответчику о взыскании пеней  в размере  510973руб. 34коп.,  начисленных за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда на выполнение ремонтных работ №z18_426 от 27.06.2018г. 

Определением от 15.08.2019 г. арбитражный суд в порядке, установленном ст.ст. 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял исковое заявление к производству и назначил дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании. 

В предварительном судебном заседании истец заявленные требования поддержал.

Ответчик в предварительное  судебное заседание явку не обеспечил.

19.09.2019г. от ответчика в суд поступил отзыв на исковое заявление, содержащий ходатайство о применении положений   ст.333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отзыв приобщен к материалам дела, ходатайство принято судом к рассмотрению.  

Определением  от 19.09.2019г.  дело назначено к судебному разбирательству. 

 Истец в судебном  заседании 16.10.2019г. заявленные требования  поддержал,  представил  возражения  на  ходатайство  о применении  положений ст.333 Гражданского кодекса Российской  Федерации.  

 Ответчик явку в судебное  заседание не обеспечил.

  Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

установил:

Между Публичным акционерным обществом «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» (далее – заказчик, истец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Гормонтажстрой» (далее – подрядчик, ответчик) заключён договор подряда на выполнение ремонтных работ № z18_426 от 27.06.2018 г. (далее - договор).

В соответствии с п. 1.1. договора подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить ремонт ограждения периметра на участке №23, расположенный по адресу: 

<

...>, согласно Техническому заданию (приложение № 1 к Договору) и Локальному сметному расчету № 1 (приложение № 2 к Договору), утвержденных Заказчиком, и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить обусловленную договором цену за выполненные работы.

Согласно   п. 3.1. договора стоимость работ составляет   7 270 000 руб.

В соответствии с п.2.1 договора срок начала выполнения  работ – 15 июля  2018 года.  В силу п. 2.2. договора срок окончания выполнения работ - не позднее 19 октября  2018 года.

 Проанализировав условия данного договора, суд пришел к выводу, что по своей  правовой  природе он является договором строительного подряда.

 Соответственно, правоотношения сторон по данному договору регулируются § 1 и § 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 Согласно ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

 В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

 Как  следует  из материалов дела,  предусмотренные  договором работы выполнены  на общую сумму 6 454 947, 26 руб., в том числе: на сумму 4 389 368,76 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ  формы   КС-2  № 1 от 19.12.2018г.;    на   сумму   2 065 578,50 руб.,  что  подтверждается актом о приемке  выполненных работ формы  КС-2   № 2 от 20.02.2019г.

В соответствии с соглашением от 01.03.2019 г. подрядчик и заказчик согласились, что работы по договору выполнены подрядчиком частично на сумму 6 454 947,26 руб. и расторгли  договор по взаимному соглашению.

Заказчик взятые на себя обязательства по оплате выполненных работ исполнил, что подтверждается платежными поручениями № 45427 от 27.12.2018 г. и № 48475 от 11.03.2016 г.

  Нарушение  подрядчиком сроков выполнения  работ по договору послужило основанием для направления заказчиком  в его  адрес претензии с требованием  об уплате неустойки.

 Поскольку претензия оставлена ответчиком  без удовлетворения,  заказчик  обратился  в арбитражный суд с рассматриваемым  иском.

 Существо требования истца о взыскании неустойки составляет применение ответственности за просрочку исполнения договорного обязательства.

В силу п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

  По своей правовой природе неустойка представляет собой средство упрощенной компенсации потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением должником своих обязательств. 

  На основании указанного, исходя из правовой сути средств обеспечения обязательств, в частности неустойки, для применения к лицу штрафных санкций необходимо установить ничем не обусловленную вину контрагента в неисполнении либо ненадлежащем исполнении.

          В силу пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" при обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно ст. 331 Гражданского кодекса Российской Федерации  соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Согласно п. 8.9 Договора в случае нарушения Подрядчиком сроков начала, окончания и /или промежуточных сроков производства работ, а так же сроков устранения недостатков работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты пени в размере 0,1% от цены невыполненной работы за каждый день допущенной просрочки.

Просрочка  выполнения работ подтверждена документально.  (ст.65 АПК РФ). 

Согласно расчету истца  пени составляют - 510 973, 34 руб., исходя из следующего: 4 389 368,76 руб. * 0,1% * 59 дней (с 20.10.2018 г. по 18.12.2018 г.) = 258 972,76 руб., 2 065 578,50 руб. * 0,1 % * 122 дня (с 20.10.2018 г. по 19.02.2019 г.) = 252 000,58 руб., где: 4 389 368,76 руб. - стоимость работ по договору, 2 065 578,50 руб. - стоимость работ по договору, 0,1% - размер пени по п.8.9 договора, 59 и 122 дня просрочки соответственно.

Представленный расчет неустойки судом проверен, является  верным. 

Не оспаривая  арифметический  расчет неустойки, ответчик заявил ходатайство о снижении размера неустойки на основании ст. 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации.

Согласно ст. 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Правила о снижении размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ применяются также в случаях, когда неустойка определена законом (пункт 78 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

В пункте 71 этого же Постановления разъяснено, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

В соответствии с пунктами 73, 74, 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.).

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000 N 263-О, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Критериями для установления несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства. При этом суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела.

В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 13.01.2011 N 11680/10, учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права.

Таким образом, понятие несоразмерности носит оценочный характер.

В данном случае суд не усмотрел оснований для применения   положений  ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании следующего. 

Согласно ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Принимая на себя обязательство путем заключения договора, ответчик принимает на себя все риски, связанные с нарушением обязательств  при исполнении договора, в частности и  условие о штрафных санкциях. Какого-либо спора или разногласий по условию о размере неустойки, либо оснований применения пеней, у ответчика при заключении договора не имелось. Таким образом, ответчик, заключая договор, был осведомлен о размере ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства и как субъект предпринимательской деятельности принял на себя все риски, связанные с нарушением условий договора при его исполнении (ст. 2 ГК РФ). 

 Суд отмечает, что согласованный в договоре размер неустойки (0,1%) является обычно применяемым в деловом обороте. 

Доказательств  явной несоразмерности неустойки  последствиям нарушения обязательств в нарушение статьи 65 АПК РФ   ответчиком не представлено. Каких-либо иных обстоятельств, позволяющих правомерно уменьшить   размер  взыскиваемой суммы неустойки, ответчиком не приведено. Следовательно, предусмотренных законом оснований для снижения неустойки у суда не имеется.

Принимая во внимание изложенное,   требование истца о взыскании  неустойки  подлежит удовлетворению в заявленном  размере -  510973руб. 34коп.  на основании ст.330  Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гормонтажстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 510973руб. 34коп., а также в возмещение расходов по государственной пошлине 13219руб. 00 коп. 

2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

3. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

СудьяТ.С. Зырянова