АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, 

<

...> 

Тел./ факс 

<

***>, 32-85-38 сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-4559/2023

г. Белгород

07 ноября 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 27 октября 2025 года Полный текст решения изготовлен 07 ноября 2025 года  

Арбитражный суд Белгородской области  

 в составе судьи Танделовой З.М., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио и видеозаписи секретарём судебного заседания Хахалевой И.Н.,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Министерства строительства Белгородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ООО "РЕМСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 36 354 929,50 руб.  

 и иску ООО "РЕМСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

 к Министерству строительства Белгородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>  

о признании фактически выполненными работы и взыскании 7 126 561 руб. 06 коп третьи лица: ООО "КапСтрой31" ООО "ВЕК", ООО "Тагор"  

при участии в судебном заседании:  

от Министерства строительства Белгородской области: представитель ФИО1, доверенность от 16.01.2025, диплом,  

 от ООО "РЕМСТРОЙ": ФИО2, доверенность от 21.02.2025, диплом, 

 от третьего лица ООО "КапСтрой31": не явился, извещен надлежащим образом; от третьего лица ООО "ВЕК": не явился, извещен надлежащим образом;  

от третьего лица ООО "Тагор": не явился, извещен надлежащим образом 

УСТАНОВИЛ:

10.05.2023 истец - ГУП "Белгородский областной Фонд поддержки ИЖС" обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "РЕМСТРОЙ" третье лицо: Министерство строительства Белгородской области (далее - ответчик) о взыскании 36 354 929,50 руб. неосвоенного аванса на объектах строительства по государственным контрактам № 1-Рем от 05.05.2022, № 2-Рем от 05.05.2022, № 3-Рем от 05.05.2022, № 4 – Рем от 31.05.2022, № 5-Рем от 03.06.2022, № 6-Рем от 06.05.2022, № 7-Рем от 05.05.2022, № 8-Рем от 03.06.2022, № 9-Рем от 20.05.2022, № 10-Рем от 20.05.2022, № 11-Рем от 20.05.2022, № 12-Рем от 20.05.2022, № 13-Рем от 02.06.2022, № 14-Рем от 03.06.2022, № 15-Рем от 08.06.2022, № 16-Рем от 02.06.2022, заключенным между истцом и ответчиком на строительство в Белгородской области 16 индивидуальных жилых домов на земельных согласно списку, расторгнутых до завершения строительства индивидуальных жилых домов истцом в одностороннем порядке.  

Исковое заявление принято к производству под номером А08-4559/2023. 

12.01.2024 ООО "РЕМСТРОЙ" обратилось в арбитражный суд с самостоятельным иском к ГУП "Белгородский областной Фонд поддержки ИЖС" обратилось и Министерству строительства Белгородской области о признании фактически выполненными им работ на дату расторжения государственных контрактов в сумме 56 629 928,58 руб., взыскании задолженности по оплате работ по контрактам № 1-Рем от 05.05.2022г., № 2-Рем от 05.05.2022г., № 3-Рем от 05.05.2022г., № 4-Рем от 31.05.2022г., № 5-Рем от 03.06.2022г., № 6-Рем от 06.05.2022г., № 7-Рем от 05.05.2022г., № 3-Рем от 3.06.2022г., № 9-Рем от 20.05.2022г., № 10-Рем от 20.05.2022г., № 11-Рем от 20.05.2022г., № 12-Рем от 20.05.2022г., № 13-Рем от 02.06.2022г., № 14-Рем от 03.06.2022г., № 15-Рем от 08.06.2022г., № 16-рем от 02.06.2022. в сумме 6 127 584,08 руб. и расходов понесенные ООО «РЕМСТРОЙ» на технологическое присоединение к инженерным сетям в рамках государственных контрактов № 1-Рем от 05.05.2022г., № 2-Рем от 05.05.2022т., № 3-Рем от 05.05.2022г., № 4- Рем от 31.05.2022г., № 5-Рем от 03.06.2022г., № 6-Рем от 06.05.2022г., № 7-Рем от 05.05.2022г., № 8-Рем от 03.06.2022г., № 9-Рем от 20.05.2022г., № 10-Рем от 20.05.2022г., № 11-Рем от 20.05.2022г., № 12-Рем от 20.05.2022г., № 13-Рем от 02.06.2022г., № 14-Рем от 03.06.2022г., № 15-Рем от 08.06.2022г., № 16-Рем от 02.06.2022г. в сумме 998 976,98 руб.  

Исковое заявление принято к производству под номером А08-170/2024. 

Определением от 27.01.2025 удовлетворено заявление о процессуальном правопреемстве с заменой истца ГУП "Белгородский областной Фонд поддержки ИЖС" на Министерство строительства Белгородской области с исключением его из числа третьих лиц.  

Определением от 04.03.2025 по ходатайству ответчика к участию в деле привлечены в качестве третьих лиц без самостоятельных требований ООО "КапСтрой31" (ИНН 

<

***>, 

<

...>), ООО "ВЕК" (ИНН 

<

***>, 

<

...>/10), ООО "Тагор" (ИНН 

<

***>, Белгородская обл., п. дубовое, мкр. Западный, ул. Шоссейная, д.2, пом. 6).  

Определением от 14.03.2025 дела А08-4559/2023 и N А08-170/2024 объединены в одно производство для совместного рассмотрения.  

В суде представители сторон свои иски поддержали, во встречных просили  

отказать по основаниям, указанным в текстах исковых заявлений и отзывах на  

него. 

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились.  

Исследовав и оценив материалы дела и доводы сторон, суд приходит к следующему.  

Министерство строительства Белгородской области на основании соглашения от 20.01.2022 возложило свои полномочия государственного заказчика по заключению и исполнению государственных контрактов на ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» (далее - ГУП "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИЖС", Заказчик).  

На основании части 6 статьи 15 Федерального закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) между Министерством строительства Белгородской области в лице ГУП "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИЖС" и ООО "РЕМСТРОЙ" заключены следующие государственные контракты:  

05.05.2022 государственный контракт № 1-Рем на выполнение проектно- изыскательских, строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> площадью 72 кв. м., на земельном участке с кадастровым номером 31:23:0102010:266», цена которого составила 5 640 001  

рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке – 20 % (далее - Контракт № 1-Рем);  

05.05.2022 государственный контракт № 2-Рем на выполнение проектно- изыскательских, строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская обл., Алексеевский г.о., 

<

...>, площадью 72 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 31:23:0102012:361», цена которого составила 5 640 001 рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке - 20% (далее – Контракт № 2-Рем);  

05.05.2022 государственный контракт № 3-Рем на выполнение проектно- изыскательских, строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Дружбы, 1/5, площадью 72 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 31:27:0302005:12», цена которого составила 4 724 659 рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке - 20 % (далее –Контракт № 3-Рем);  

31.05.2022 государственный контракт № 4-Рем на выполнение проектно- изыскательских, строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская обл., Алексеевский г.о., 

<

...>, площадью 108 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 31:23:0102012:357», цена которого составила 7 688 531 рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке - 20 % (далее – Контракт № 4-Рем);  

03.06.2022 государственный контракт № 5-Рем на выполнение проектно- изыскательских, строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> з/у 27, площадью 108 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 31:26:2001003:142», цена которого составила 7 688 531 рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке - 20 % (далее – Контракт № 5-Рем);  

06.05.2022 государственный контракт № 6-Рем на выполнение проектно- изыскательских, строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Белгородская область, г.о. Алексеевский, г. Алексеевка, мкр. Крылатский, ул. Центральная, 44, площадью 90 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 31:23:0101005:280», цена которого составила 6 577 156 рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке – 20 % (далее – Контракт № 6-Рем);  

05.05.2022 государственный контракт № 7-Рем на выполнение проектно- изыскательских, строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, площадью 90 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 31:26:1104003:1607», цена которого составила 6 577 156 рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке - 20 % (далее – Контракт № 7-Рем);  

03.06.2022 государственный контракт № 8-Рем на выполнение проектно- изыскательских, строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, площадью 90 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 31:26:1104003:1605», цена которого составила 5 577 156 рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по налоговой ставке - 20 % (далее – Контракт № 8-Рем);  

20.05.2022 государственный контракт № 9-Рем на выполнение проектно- изыскательских, строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> з/у 25, площадью 90 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 31:26:2001003:143», цена которого составила 6 577 156 рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по налоговой ставке - 20 % (далее – Контракт № 9-Рем);  

20.05.2022 государственный контракт № 10-Рем на выполнение проектно- изыскательских, строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> з/у 21, площадью 90 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 31:26:2001003:144», цена которого составила 6 577 156 рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по налоговой ставке - 20 % (далее – Контракт № 10-Рем);  

20.05.2022 государственный контракт № 11-Рем на выполнение проектно- изыскательских, строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> з/у 20, площадью 90 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 31:26:2001003:148», цена которого составила 6 577 156 рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по налоговой ставке - 20 % (далее – Контракт № 11-Рем);  

20.05.2022 государственный контракт № 12-Рем на выполнение проектно- изыскательских, строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство  

индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, площадью 90 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 31:26:1104003:1604», цена которого составила 6 577 156 рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по налоговой ставке - 20 % (далее – Контракт № 12-Рем);  

02.06.2022 государственный контракт № 13-Рем на выполнение проектно- изыскательских, строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> з/у 23, площадью 126 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 31:26:2001003:144», цена которого составила 8 959 745 рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по налоговой ставке - 20 % (далее – Контракт № 13-Рем);  

03.06.2022 государственный контракт № 14-Рем на выполнение проектно- изыскательских, строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> з/у 22, площадью 162 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 31:26:2001003:149», цена которого составила 11 038 160 рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по налоговой ставке - 20 % (далее – Контракт № 14-Рем);  

08.06.2022 государственный контракт № 15-Рем на выполнение проектно- изыскательских, строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, площадью 126 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 31:23:0305001:47», цена которого составила 8 959 745 рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по налоговой ставке - 20 % (далее – Контракт № 15-Рем);  

02.06.2022 государственный контракт № 16-Рем на выполнение проектно- изыскательских, строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, площадью 90 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 31:23:0603012:14», цена которого составила 6 577 156 рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по налоговой ставке - 20 % (далее – Контракт № 16-Рем).  

В соответствии с пунктом 14.2. Контрактов расторжение контракта допускается по соглашению сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта в случаях, когда  

такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.  

В соответствии с пунктом 14.3. Контрактов Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.  

Пунктом 14.4.1. Контрактов установлено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контрактов в случае, если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что завершение ее к сроку становится явно невозможным (задержка сроков завершения работ по сравнению с Графиком выполнения работ превышает 1 (один) месяц).  

Заказчик, посчитав, что Подрядчик ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по контрактам, реализуя свое право на односторонний отказ от исполнения Контрактов, предусмотренное условиями Контрактов, руководствуясь положениями гражданского законодательства, статьей 95 Закона о контрактной системе, 30.12.2022 принял решения об одностороннем отказе от исполнения указанных выше Контрактов.  

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Белгородской области от 06 мая 2024 года по делу № А08-10033/2024 в иске ООО "РЕМСТРОЙ" о признании недействительными решений ГУП "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИЖС" от 30.12.2022 г. об одностороннем отказе от исполнения государственных контрактов № 1-Рем от 05.05.2022 г., № 2-Рем от 05.05.2022 г., № 3-Рем от 05.05.2022 г., № 4-Рем от 31.05.2022 г., № 5-Рем от 03.06.2022 г., № 6-Рем от 06.05.2022 г., № 7-Рем от 05.05.2022 г., № 8-Рем от 03.06.2022 г., № 9-Рем от 20.05.2022 г., № 10-Рем от 20.05.2022 г., № 11-Рем от 20.05.2022 г., № 12-Рем от 20.05.2022 г., № 13-Рем от 02.06.2022 г., № 14-Рем от 03.06.2022 г., № 15-Рем от 08.06.2022 г., № 16-Рем от 02.06.2022 отказано.  

Этим же решением установлено, что работы не были завершены ни по одному из вышеназванных контрактов, что явилось основанием расторжения контрактов.  

Вышеназванные обстоятельства являются преюдициального установленными для рассматриваемого дела и в силу ст.69 АПК РФ не нуждаются в новом доказывании.  

ООО «РЕМСТРОЙ» указывает, что в рамках исполнения обязательств по вышеперечисленным. государственным контрактам фактически выполнило объем работ работы на общую сумму 69 497 202,58 руб., согласно перечню работ, указанному в актах о приемке выполненных работ:  

по государственному контракту № 1-Рем: - по акту о приемке выполненных работ № 2 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 1 756 130,92 - по акту о приемке выполненных работ № 3 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 542653,99 руб.;  

по государственному контракту № 2-Рем: - по акту о приемке выполненных работ № 2 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 2190621,21 - по акту о приемке выполненных работ № 3 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 542653,99 руб.;  

 по государственному контракту № 3-Рем: - по акту о приемке выполненных работ № 1 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 1739537,30 - по акту о приемке выполненных работ № 2 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 359505,46 руб.;  

по государственному контракту № 4-Рем: - по акту о приемке выполненных работ № 2 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 4223525,30 - по акту о приемке выполненных работ № 3 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 774808,54 руб.;  

по государственному контракту № 5-Рем: - по акту о приемке выполненных работ № 1 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 5133334,09 - по акту о приемке выполненных работ № 2 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 777865,25 руб.;  

по государственному контракту № 6-Рем: - по акту о приемке выполненных работ № 2 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 1717185,95 - по акту о приемке выполненных работ № 3 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 447097,14 руб.;  

по государственному контракту № 7-Рем: - по акту о приемке выполненных работ № 2 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 2076221,02 - по акту о приемке выполненных работ № 3 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 447097,14 руб.;  

по государственному контракту № 8-Рем: - по акту о приемке выполненных работ № 2 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 2557212,38 - по акту о приемке выполненных работ № 3 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 651349,90 руб.;  

 по государственному контракту № 9-Рем: - по акту о приемке выполненных работ № 2 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 2522658,70 - по акту о приемке выполненных работ № 3 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 651349,90 руб.;  

 по государственному контракту № 10-Рем: - по акту о приемке выполненных работ № 2 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 2580871,21 - по акту о приемке выполненных работ № 3 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 651349,90 руб.;  

по государственному контракту № 11-Рем: - по акту о приемке выполненных работ № 2 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 2186841,92 - по акту о приемке выполненных работ № 3 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 651349,90 руб.;  

 по государственному контракту № 12-Рем: - по акту о приемке выполненных работ № 2 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 2556256,53 - по акту о приемке выполненных работ № 3 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 651349,90 руб.;  

по государственному контракту № 13-Рем: - по акту о приемке выполненных работ № 2 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 3531777,67 - по акту о приемке выполненных работ № 3 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 1124387,04 руб.;  

по государственному контракту № 14-Рем: - по акту о приемке выполненных работ № 2 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 4331080,33 - по акту о приемке выполненных работ № 3 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 1150146,33руб. руб.;  

по государственному контракту № 15-Рем: - по акту о приемке выполненных работ № 2 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 3037542,11 - по акту о приемке выполненных работ № 3 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 632084,27 руб.;  

по государственному контракту № 16-Рем: - по акту о приемке выполненных работ № 2 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 1947186,39 -по акту о приемке выполненных работ № 3 (КС-2) от 12.01.2023 г. на сумму 651349,90 руб.;  

 Между тем, основанием возникновения обязанности по оплате выполненных работ является сдача результата работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом.  

Преюдициально установлено, что на момент расторжения контрактов подрядчиком работы не выполнены, доказательства их выполнения не представлены, что послужило основанием для расторжения контрактов в одностороннем порядке.  

Фактически Подрядчик предъявил заявленные требования об оплате работ по контрактам после их расторжения.  

Работы по договору подряда не могут считаться сданными подрядчиком заказчику, поскольку сдача выполненных работ после расторжения контрактов не предусмотрена нормами действующего законодательства, в связи с чем у заказчика не возникает обязанности по приемке результата работ после расторжения контрактов.  

Доказательства сдачи спорных работ, а также каких-либо иные документы которые бы могли подтвердить факт сдачи выполненных работ, их объем и стоимость до расторжения государственных контрактов подрядчиком не представлено и в деле отсутствуют.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ и пунктом 2 статьи 453 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.  

При расторжении договора обязательства сторон прекращаются. 

При изложенных обстоятельствах, суд пришел к выводу о необоснованности заявленного иска ООО "РЕМСТРОЙ".  

В соответствии с нормами статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 данного Кодекса.  

В пункте 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении" так же разъясняется, что при расторжении договора сторона не лишена права истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.  

Таким образом, заказчик вправе требовать возврата неотработанного аванса в качестве неосновательного обогащения, если к моменту расторжения договора им не получено встречное исполнение обязательства по выполнению работ, равное по стоимости сумме перечисленного аванса.  

Факт перечисления денежных средств авансом в испрашиваемом размере на момент действия контрактов подтверждается материалами дела: платежными поручениями и не оспаривается сторонами, доказательств возврата указанной суммы, ответчиком суду не представлено.  

При таких обстоятельствах, с ООО "РЕМСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Министерства строительства Белгородской области к ООО "РЕМСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) следует взыскать 36 354 929,50 руб. неосвоенного аванса на объектах строительства, указанных в государственных контрактах № 1-Рем от 05.05.2022, № 2-Рем от 05.05.2022, № 3- Рем от 05.05.2022, № 4 – Рем от 31.05.2022, № 5-Рем от 03.06.2022, № 6-Рем от 06.05.2022, № 7-Рем от 05.05.2022, № 8-Рем от 03.06.2022, № 9-Рем от 20.05.2022, № 10-Рем от 20.05.2022, № 11-Рем от 20.05.2022, № 12-Рем от 20.05.2022, № 13-Рем от 02.06.2022, № 14-Рем от 03.06.2022, № 15-Рем от 08.06.2022, № 16-Рем от 02.06.2022.  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О  

применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств: если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ.  

Заказчик от уплаты госпошлины при подаче иска освобождён законом.  

Поскольку иск о взыскании неотработанного аванса удовлетворен в полном  

объеме, государственная пошлина по иску относится на ответчика и подлежит  

взысканию с него в доход федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск Министерства строительства Белгородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> удовлетворить.  

Взыскать с ООО "РЕМСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Министерства строительства Белгородской области к ООО "РЕМСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 36 354 929,50 руб. неосвоенного аванса на объектах строительства, указанных в государственных контрактах № 1-Рем от 05.05.2022, № 2-Рем от 05.05.2022, № 3- Рем от 05.05.2022, № 4 – Рем от 31.05.2022, № 5-Рем от 03.06.2022, № 6-Рем от 06.05.2022, № 7-Рем от 05.05.2022, № 8-Рем от 03.06.2022, № 9-Рем от 20.05.2022, № 10-Рем от 20.05.2022, № 11-Рем от 20.05.2022, № 12-Рем от 20.05.2022, № 13-Рем от 02.06.2022, № 14-Рем от 03.06.2022, № 15-Рем от 08.06.2022, № 16-Рем от 02.06.2022.  

Отказать ООО "РЕМСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в иске к Министерству строительства Белгородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> о признании фактически выполненными работы и взыскании 7 126 561 руб. 06 коп  

Взыскать с ООО "РЕМСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 588 549 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Танделова З. М.