АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

432068, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14

Тел. (8422)33-46-08 Факс (8422)32-54-54  E-mail info@ulyanovsk.arbitr.ru Интернет: www.ulyanovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

арбитражного суда первой инстанции

Дело №А72-13077/2022

г. Ульяновск

12 декабря  2022 года

Резолютивная часть решения объявлена  05.12.2022

В полном объеме решение изготовлено 12.12.2022

 

Арбитражный суд Ульяновской области  в составе судьи И.С.Абдуловой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев   в  судебном заседании дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Аврора-Малыкла», Ульяновская область, Мелекесский район, с.Старая Сахча (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная школа с. Ерыклинск Муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», Ульяновская область, Мелекесский район, с. Ерыклинск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 2 146 440 руб. 33 коп.

 

при участии представителей:

от  истца -  не явился, заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителя;

от ответчика - не явился, извещен; 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Аврора-Малыкла» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная школа с. Ерыклинск Муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» о взыскании задолженности в сумме 2 146 440 руб. 33 коп.,  составляющих: 128 512 руб.31 коп. – основной долг по договору подряда № 4092 от 10.07.2019,  69 477 руб. 13 коп. -  пени за период с 15.08.2019 по 05.09.2022; 389 451 руб. 75 коп. -  основной долг по договору подряда № 4093 от 18.07.2019,   101 308 руб. 27 коп. -   пени за период с 27.08.2019 по 05.09.2022; 393 649 руб. 79 коп. – основной долг по договору подряда № 4094 от 25.07.2019, 101 724 руб.  44 коп. -   пени за период с 03.09.2019 по 05.09.2022; 390 731 руб. 48 коп. – основной долг по договору подряда № 4095 от 01.08.2019, 100 684 руб. 39 коп. -  пени за период с 06.09.2019 по 05.09.2022; 374 704 руб. 87 коп. – основной долг по договору подряда № 4096 от 05.08.2019,  96 195 руб. 90 коп. -  пени за период с 10.09.2019 по 05.09.2022 и расходы по госпошлине в сумме 33 732 руб. 00 коп.

Определением от 14.09.2022 исковое заявление принято судом к производству.

Протокольным определением от 24.11.2022 судом удовлетворено ходатайство  истца об увеличении исковых требований, истец просил взыскать с ответчика: 128 512 руб. 31 коп. – основной долг по договору подряда № 4092 от 10.07.2019, 85 877 руб. 13 коп. -  неустойка за период с 15.08.2019 по 05.09.2022; 389 451 руб. 75 коп. -  основной долг по договору подряда № 4093 от 18.07.2019, 107 837 руб. 16 коп. -   неустойка за период с 27.08.2019 по 05.09.2022; 393 649 руб. 79 коп. – основной долг по договору подряда № 4094 от 25.07.2019, 108 300 руб.  28 коп. -    неустойка за период с 03.09.2019 по 05.09.2022; 390 731 руб. 48 коп. – основной долг по договору подряда № 4095 от 01.08.2019, 107 201 руб. 67 коп. -  неустойка за период с 06.09.2019 по 05.09.2022; 374 704 руб.87 коп. – основной долг по договору подряда № 4096 от 05.08.2019, 102 430 руб. 68 коп. -  неустойка за период с 10.09.2019 по 05.09.2022, а также истец просил взыскать с ответчика пени за период с 06.09.2022  по день вынесения решения судом.

Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела  извещены надлежащим образом.

Дело в  судебном заседании рассматривается в отсутствие представителей  сторон в порядке ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по имеющимся в деле  материалам.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими  частичному удовлетворению. При этом  суд  исходит  из  следующего.

Как следует из материалов дела, между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Аврора-Малыкла» (Подрядчик) и Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Основная школа с.Ерыклинск Муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» (Заказчик) подписаны договоры подряда:

№ 4092 от 10.07.2019, по условиям которого Подрядчик по заданию Заказчика обязался выполнить работы по ремонту кровли здания МБОУ «Основная школа с.Ерыклинск муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»: устройство утепления покрытия второго слоя толщ. 50 мм минплитами М-175, устройство первого слоя стяжки из ЦСП (далее - работы) в соответствии с условиями договора и локальной сметой №4092, являющейся неотъемлемой частью договора и передать их Заказчику, а Заказчик - принять выполненные работы и оплатить их (п.1.1 договора). Стоимость работ по договору составляет 399 054 руб. 69  коп., НДС не предусмотрен, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (п.2.1 договора);

№ 4093 от 18.07.2019, по условиям которого Подрядчик по заданию Заказчика обязался выполнить работы по ремонту кровли здания МБОУ «Основная школа с.Ерыклинск муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»: устройство стяжки из плит ЦСП (далее - работы) в соответствии с условиями договора и локальной сметой №4093, являющейся неотъемлемой частью договора и передать их Заказчику, а Заказчик - принять выполненные работы и оплатить их (п.1.1 договора). Стоимость работ по договору составляет 394 451 руб. 75  коп., НДС не предусмотрен, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (п.2.1 договора);

№ 4094 от 25.07.2019, по условиям которого Подрядчик по заданию Заказчика обязался выполнить работы по ремонту кровли здания МБОУ «Основная школа с.Ерыклинск муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»: устройство стяжки из плит ЦСП - второй слой, огрунтовка, устройство кровли (далее - работы) в соответствии с условиями договора и локальной сметой №4094, являющейся неотъемлемой частью договора и передать их Заказчику, а Заказчик - принять выполненные работы и оплатить их (п.1.1 договора). Стоимость работ по договору составляет 398 649 руб. 79  коп., НДС не предусмотрен, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (п.2.1 договора);

№4095 от 01.08.2019, по условиям которого Подрядчик по заданию Заказчика обязался выполнить работы по ремонту кровли здания МБОУ «Основная школа с.Ерыклинск муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»: устройство кровли в 2 слоя из наплавляемых материалов (далее - работы) в соответствии с условиями договора и локальной сметой №4095, являющейся неотъемлемой частью договора и передать их Заказчику, а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их (п.1.1 договора). Стоимость работ по договору составляет 395 731 руб. 48  коп., НДС не предусмотрен, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (п.2.1 договора);

№ 4096 от 05.08.2019, по условиям которого Подрядчик по заданию Заказчика обязался выполнить работы по ремонту кровли здания МБОУ «Основная школа с.Ерыклинск муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»: устройство примыканий, мелких покрытий из оцинкованной стали, установка аэраторов, устройство кровли (далее - работы) в соответствии с условиями договора и локальной сметой №4096, являющейся неотъемлемой частью договора и передать их Заказчику, а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их (п.1.1 договора). Стоимость работ по договору составляет 379 704 руб. 87  коп., НДС не предусмотрен, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (п.2.1 договора).

Согласно пунктам 2.2 указанных договоров подряда оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, после подписания актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2 и КС-3) и предоставления счета-фактуры, в течение 30 календарных дней, при отсутствии у Заказчика претензий по срокам и качеству выполненных работ.

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 2 ст. 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд (ст. 768 ГК РФ).

В части 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» указано, что контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

В соответствии со ст. 711, 720 ГК РФ основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Во исполнение условий вышеназванных договоров подряда истец выполнил для ответчика работы в полном объеме, что подтверждается актами о приемке выполненных работ формы КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанными обеими сторонами без замечаний.

Ответчиком оплата за выполненные работы по договорам произведена не в полном объеме. 

Истцом в адрес ответчика направлены претензии (исх. №№ 77, 78, 79, 80, 81 от 20.06.2022) с требованием погасить задолженность в обще размере 1 677 050 руб. 20 коп., которые оставлены последним без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящим исковым заявлением о взыскании задолженности в судебном порядке.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о судебном процессе, исковые требования не оспорил, доказательств оплаты не представил.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Поскольку ответчик не исполнил обязательства по оплате выполненных работ, доказательств оплаты не представил, исковые требования не оспорил, требования истца о взыскании основного долга законны, обоснованы и подлежат удовлетворению в общей  сумме 1 677 050 руб. 20 коп. (128 512 руб. 31 коп. – основной долг по договору подряда №4092 от 10.07.2019, 389 451 руб. 75 коп. -  основной долг по договору подряда № 4093 от 18.07.2019, 393 649 руб. 79 коп. – основной долг по договору подряда № 4094 от 25.07.2019, 390 731 руб. 48 коп. – основной долг по договору подряда №4095 от 01.08.2019, 374 704 руб.87 коп. – основной долг по договору подряда № 4096 от 05.08.2019).

Истец также просит взыскать с ответчика пени за период с 15.08.2019  по  день фактического вынесения решения суда.

В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктами 10.1, 10.2 вышеуказанных договоров подряда предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Согласно уточненному расчету истца, размер пени в связи с просрочкой оплаты подрядных работ по вышеуказанным договорам, исходя из ключевой ставки Банка России в размере 7,5% годовых, составляет:

85 877 руб. 13 коп. -  пени за период с 15.08.2019 по 05.09.2022 за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № 4092 от 10.07.2019,

107 837 руб. 16 коп. - пени за период с 27.08.2019 по 05.09.2022 за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № 4093 от 18.07.2019,

108 300 руб.  28 коп. - пени за период с 03.09.2019 по 05.09.2022 за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № 4094 от 25.07.2019,

107 201 руб. 67 коп. - пени за период с 06.09.2019 по 05.09.2022 за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № 4095 от 01.08.2019,

102 430 руб. 68 коп. - пени неустойка за период с 10.09.2019 по 05.09.2022 за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № 4096 от 05.08.2019.

Ответчиком расчет пени, произведенный истцом, не оспорен, контррасчет не представлен. 

В тоже время, проверив расчет истца, суд находит его неверным.

При расчете неустойки истцом не учтено, что Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2022 года № 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" с 01.04.2022 в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, сроком на 6 месяцев, то есть до 01.10.2022.

В связи с чем, из периода начисления пени подлежит исключению период действия вышеуказанного моратория, то есть с 01.04.2022 по 01.10.2022.

По расчету суда размер пени за период с 15.08.2019 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 05.12.2022, исходя из ключевой ставки Банка России в размере 7,5% годовых, составляет: 472 655 руб. 52 коп., в том числе:  

82 889 руб. 24 коп. (80 800 руб. 91 коп. - пени  за период с 15.08.2019 по 31.03.2022 + 2 088 руб. 33 коп. – пени с 02.10.2022 по 05.12.2022) за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № 4092 от 10.07.2019,

98 782 руб. 40 коп. (92 453 руб. 81 коп. - пени  за период с 27.08.2019 по 31.03.2022 + 6 328 руб. 59 коп. – пени с 02.10.2022 по 05.12.2022) за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № 4093 от 18.07.2019,

99 147  руб.  92 коп. (92 751 руб. 11 коп. - пени  за период с 03.09.2019 по 31.03.2022 + 6 396 руб. 81 коп. – пени с 02.10.2022 по 05.12.2022) за  просрочку исполнения обязательств по договору подряда № 4094 от 25.07.2019,

98 117 руб. 17 коп. (91 767 руб. 78 коп. - пени  за период с 06.09.2019 по 31.03.2022 + 6 349 руб. 39 коп. – пени с 02.10.2022 по 05.12.2022) за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № 4095 от 01.08.2019,

93 718 руб. 79 коп. (87 629 руб. 84 коп. - пени  за период с 10.09.2019 по 31.03.2022 + 6 088 руб. 95 коп. – пени с 02.10.2022 по 05.12.2022) за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № 4096 от 05.08.2019.

Указанная сумма пени подлежит к взысканию с ответчика в пользу истца.

Таким образом, исковые требования подлежат частичному удовлетворению в общей сумме 2 149 705 руб. 72 коп., в остальной части исковые требования суд оставляет без удовлетворения.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Поскольку исковые требования удовлетворены частично, расходы по госпошлине следует возложить на стороны пропорционально размеру удовлетворенным требованиям, и, учитывая увеличение истцом размера исковых требований в процессе рассмотрения спора, с ответчика следует взыскать в пользу истца 33 340 руб. 00 коп. в возмещение расходов по госпошлине, с истца  - в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 212 руб. 00 коп.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176, 177, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

                                                              Р Е Ш И Л :

 

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа с. Ерыклинск Муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Специализированый застройщик «Аврора-Малыкла» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1 677 050 руб. 20 коп. – основной долг, 472 655 руб. 52 коп. – пени за просрочку платежа за период с 15.08.2019 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 05.12.2022, 33 340 руб. 00 коп. – в возмещение расходов по госпошлине. 

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Специализированый застройщик «Аврора-Малыкла»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 212 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия.

Решение может  быть обжаловано  в  арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, установленные ст. ст. 257-259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Судья                                                                                                 И.С.Абдулова