АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело №А65-17916/2020 

Дата принятия решения – 14 декабря 2020 года 

Дата объявления резолютивной части – 09 декабря 2020 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи  Трифоновой Ю.Ю., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис-Бурение", Чувашская Республика, г.Чебоксары; (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Группа "Волга", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о расторжении договора подряда №0083/6/2029/37-ССБ от 27.07.2019, о взыскании 1073963.55 руб. долга 

при участии: 

от истца – не явился, извещен; 

от ответчика – ФИО1, представитель по доверенности от 19.10.2020 г., диплом ВСА 0436524.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-Бурение", Чувашская Республика, г.Чебоксары; (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) первоначально обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Группа "Волга", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о расторжении договора подряда №0083/6/2029/37-ССБ от 27.07.2019, о взыскании 1 073 963.55 руб. долга. 

Все стороны судебного разбирательства о времени и месте судебного заседания 09.12.2020 извещены в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Истец не явился, извещен надлежащим образом. От истца через сервис подачи документов «Мой Арбитр» (https://my.arbitr.ru) поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.  Суд определил рассмотреть дело в отсутствие истца. 

Истец через сервис подачи документов «Мой Арбитр» (https://my.arbitr.ru) направил заявление о частичном отказе от исковых требований в части взыскания долга в размере 330 087,93 руб., в связи с погашением данной суммы ответчиком по платежному поручению №1466 от 21.09.2020.

В силу п. 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ  арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Суд в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ принял отказ  исковых требований в части взыскания 330 087,93 руб., производство в указанной части прекратил.

С учетом отказа от части исковых требований, судом рассмотрены требования истца о расторжении договора подряда №0083/6/2029/37-ССБ от 27.07.2019, о взыскании 743 875,62  руб. долга. 

Ответчик исковые требования не признал, по основаниям указанным в отзыве на исковое заявление, согласно которого в части требования о расторжении договора не соблюден порядок расторжения договора, в части требования о взыскании долга - требуемая сумма является гарантийным удержанием, обязательство по выплате которого не наступило. 

Заявлений и ходатайств не поступило.

Как следует из искового заявления, между сторонами был заключен договор строительного подряда. Истец выполнил работы, ответчик в полном объеме стоимости работ не оплатил. Претензия истца оставлена  ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием  для обращения в суд с настоящим иском. 

Исследовав материалы настоящего дела в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд не находит правовые основания для  удовлетворения иска.

Как следует из материалов дела, 27.06.2019 между истцом ( субподрядчик) и ответчиком ( подрядчик) был заключен договор подряда №0083/6/2029/37-ССБ, по условиям которого Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика, выполнить строительно-монтажные Работы на Объекте, указанном в п. 1.8, настоящего Договора, в соответствии с Проектно-сметной документацией, а Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить оговоренную настоящим Договором цену, согласно п.4.1 Договора.       Субподрядчик выполняет Работы, указанные в п.2.1 Договора, собственными силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных организаций.

Сроки выполнения Работ определяются в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №17 к настоящему Договору), при этом срок завершения всех Работ по Договору «30» августа 2020г. ( пункт 3.1 договора).       

При этом, датой завершения Работ по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта формы №КС-11 (по форме Приложения № 11) либо «Акта окончательной приемки выполненных работ по договору подряда» (Приложение №45) по усмотрению Подрядчика, либо, в случае расторжения Договора или дополнительных соглашений к нему, либо в случае исключения (уменьшения) объемов Работ по Договору или дополнительным соглашениям к нему - дата подписания Сторонами Акта приемки объекта незавершенного строительства по форме КС-12 (по форме Приложения №9) ( пункт 3.2 договора).  

Пунктом 4.1 договора стороны согласовали, что окончательной Ценой Договора является стоимость фактически выполненного Субподрядчиком объема Работ. Стоимость Работ определяется в соответствии с Методикой определения стоимости строительно-монтажных работ (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора, а также в соответствии с действующим законодательством. Увеличение объема Работ и/или Цены Договора Стороны оформляют дополнительным соглашением.

Оплата выполненного за месяц Субподрядчиком и принятого Подрядчиком объема Работ производится Подрядчиком в размере 100% от их стоимости с учетом ранее выплаченного аванса за выполнение Работ, а также поставленных материалов и оказанных услуг Подрядчиком Субподрядчику в отчетном периоде в рамках настоящего Договора, при условии предоставления Субподрядчиком безусловной и безотзывной банковской гарантии исполнения условий Договора по форме Приложения №33 к Договору, банка-гаранта, предварительно согласованного с Подрядчиком, на общую сумму 5% (пять процентов) от стоимости выполненного месячного объема Работ. Срок действия данных банковских гарантий должен превышать на 90 календарных дней срок завершения Работ, казанный в п. 3.1. настоящего Договора. 

В случае отсутствия банковской гарантии, указанной в п.4.10. Договора, 5% (пять процентов) стоимости выполненного за месяц объема Работ, будут удержаны Подрядчиком в качестве обеспечительного платежа согласно ст. 381.1 ГК РФ для формирования гарантийного фонда исполнения Субподрядчиком условий Договора до момента предоставления указанной в п. 4.10 банковской гарантии, либо до наступления срока на 90 дней превышающего дату завершения Работ. ( пункты 4.10, 4.11 договора).

Пунктом 4.11 договора сторонами обусловлено, что  окончательный расчет за выполненные Работы по Объекту производятся Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после полного завершения его строительства, включая устранение выявленных Дефектов/Недостатков, недоделок, на основании подписания Сторонами «Акта окончательной приемки выполненных работ по договору подряда» (Приложение №45), при условии: подписания Сторонами до подписания Акта окончательной приемки выполненных работ по договору подряда на дату фактического завершения Работ актуализированного Графика выполнения строительно-монтажных работ (по форме Приложения №17), составленного с учетом зачета взаимных просрочек исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, который с момента подписания его Сторонами заменяет собой предыдущий График выполнения строительно-монтажных работ к Договору; подписания Сторонами до подписания Акта окончательной приемки выполненных работ по договору подряда дополнительного соглашения к настоящему Договору с указанием в нем обновленной даты срока действия настоящего Договора, определяемого, исходя из расчета 24 месяца от даты подписания Акта окончательной приемки выполненных работ по договору подряда плюс 2 (два) месяца; предоставления Субподрядчиком безусловной и безотзывной банковской гарантии выполнения обязательств Субподрядчика на Гарантийный срок (п. 13.2.Договора) банка-гаранта, предварительно согласованного с Подрядчиком, по форме Приложению № 34 к Договору на сумму в размере 5% (пяти процента) от стоимости всех Работ по Договору, скорректированной с учетом положений п. 4.1 статьи 4 Договора. Срок действия указанной банковской гарантии составляет 24 месяца от даты подписания Акта окончательной приемки выполненных работ по договору подряда плюс 2 (два) месяца. В случае увеличения Гарантийного срока в соответствии с условиями настоящего Договора, Субподрядчик обязан предоставить новые банковские гарантии исполнения гарантийных обязательств со сроком их действия с учетом увеличения Гарантийного срока без заключения дополнительного соглашения Сторон к Договору.

В случае отсутствия банковской гарантии, указанной в п.4.11. Договора, 5% (пять процентов) от стоимости всех Работ по Договору, скорректированной с учетом положений п. 4.1 статьи 4 Договора, будут удержаны Подрядчиком для формирования гарантийного фонда выполнения обязательств Субподрядчика на Гарантийный срок до момента предоставления указанной в п. 4.11 банковской гарантии, либо до наступления срока на 24 месяца превышающего дату фактического оформления «Акта окончательной приемки выполненных работ по договору подряда» (Приложение №45) плюс два месяца ( пункт 4.11.1 договора).  

Истец во исполнение договора представил ответчику  справку о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.09.2019 на сумму 3 722 530,80 руб.,  №2 от 31.10.2019 на сумму 1 797 183,60 руб., №3 от 30.11.2019 на сумму 5 979 735,60 руб., №4 от 31.12.2019 на сумму 3 378 062,40 руб., которые ответчик принял и подписал.  Всего истцом выполнены работы на сумму 14 877 512,40 руб., что ответчиком не оспаривается.

Ответчик перечислил истцу платежным поручением №77 от 12.05.2020 сумму в размере 300 000 руб., платежным поручением №594 от 31.12.2019 сумму в размере 800 000 руб., платежным поручением №812 от 01.06.2020 сумму в размере 500 000 руб., платежным поручением №1466 от 21.09.2020 сумму в размере 330 087,93 руб., кроме того универсальными передаточными документами ответчик переел истцу материалы на сумму 12 275 371,26 руб., что сторонами не оспаривается.

Соглашением о погашении взаимной задолженности №8  по состоянию на 29.02.2020 стороны, руководствуясь ст. 410 ГК РФ, пришли к соглашению о зачете взаимных требований на сумму 12 687 462,06 руб.. (Двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят два рубля 06 копеек).

Истцом в материалы дела представлена претензия №45 от 28.02.2020, направление которой подтверждается чек ордером об отправке почтового отправления от29.02.2020, получение ответчиком 11.03.2020 подтверждается уведомлением о вречении почтового отправления. Данное обстоятельство ответчиком не оспаривается.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик, в нарушение обязательств по договору, не оплатил сумму гарантийного удержания, в связи с чем истец предъявил требование о расторжении договора и взыскании стоимости выполненных работ.

Арбитражный суд на основании п.1 ст.133, п. 1 ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса РФ с учетом обстоятельств, приведенных в обоснование иска, самостоятельно определяет характер спорного правоотношения, возникшего между сторонами по делу, а также нормы законодательства, подлежащие применению (аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 ноября 2010 года № 8467/10).

Исходя из предмета и условий договора подряда №0083/6/2029/37-ССБ от 27.07.2019, арбитражный суд приходит к выводу о его правовой квалификации как договора подряда, подпадающего в сферу правового регулирования главы 37 Гражданского кодекса РФ.

Согласно части  5 статьи 4 Арбитражного процессуального  кодекса  Российской Федерации, спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом, либо договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов. Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным законом.

Истцом в материалы дела представлена претензия №45 от 28.02.2020, направленная ответчику  29.02.2020 и полученная им 11.03.2020, что подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления, ответчиком не оспаривается. 

При таких обстоятельствах суд находит претензионный  порядок в части взыскания суммы долга соблюденным. 

В части требования о расторжении договора подряда №0083/6/2029/37-ССБ от 27.07.2019, суд исходит из нижеследующего. 

Пунктом 4.12 договора сторонами предусмотрено, что в случае расторжения Договора, в случае непредставления банковской гарантии выполнения обязательств Субподрядчика на Гарантийный срок,  5% (пять процентов) от стоимости всех Работ по Договору будут удержаны Подрядчиком для формирования гарантийного фонда исполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных в Договоре на Гарантийный срок, до момента предоставления указанной в п. 4.12 банковской гарантии, либо до истечения Гарантийного срока, указанного в п. 13.2. Договора плюс два месяца.

Согласно пункта 13.2 договора, продолжительность Гарантийного срока на результат Работ, выполненных по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Сторонами Акта приёмки законченного строительством Объекта формы № КС-11. Предельный срок обнаружения Дефектов/Недостатков составляет 5 (пять) лет в соответствии со ст. 756 ГК РФ.

Вместе с тем, согласно ст. 452 Гражданского кодекса РФ, требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Согласно ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что  истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.

Ответчиком прямо заявлено о не соблюдении истцом предусмотренного законом порядка в части расторжения договора.

Истец представил суду претензию №45 от 28.02.2020, из текста которой усматривается наличие требования об уплате стоимости выполненных работ. Уведомления о расторжении договора данная претензия не содержит. Доказательств, подтверждающих подтверждение соблюдения предусмотренного порядка в материалы дела не представлено. 

При таких обстоятельствах суд считает  требование истца в части расторжения договора подряда №0083/6/2029/37-ССБ от 27.07.2019 подлежащим оставлению без рассмотрения.

Пунктом 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с п. 4 ст.753 Гражданского кодекса Российской Федерации по общему правилу сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Ст.746 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 настоящего Кодекса.

Исходя из правового единства положений ст. 746, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, условий договора и правовой позиции, изложенной Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 8 Информационного письма от 24.01.2000 года № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Факт выполнения истцом работ, предусмотренных вышеуказанными договорами, сторонами не оспаривается, как и не оспаривается размер не выплаченного гарантийного удержания. 

В материалы дела представлены двухсторонняя справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.09.2019 на сумму 3 722 530,80 руб.,  №2 от 31.10.2019 на сумму 1 797 183,60 руб., №3 от 30.11.2019 на сумму 5 979 735,60 руб., №4 от 31.12.2019 на сумму 3 378 062,40 руб.. Всего истцом выполнены работы на сумму 14 877 512,40 руб..

Пунктом 4.14 договора стороны обусловили, что размер генподрядных отчислений, выплачиваемых Субподрядчиком Подрядчику за оказанные услуги, составляет 5% от расшифровки объема выполненных строительно-монтажных работ по форме Приложения к акту Н-А4. Оплата за указанные генподрядные услуги производится путем удержания Подрядчиком исчисленных сумм генподрядных отчислений из сумм, подлежащих перечислению Субподрядчику за выполненные в течение отчетного периода Работы.

Стороны подписали оказание генподрядных услуг универсальным передаточным документом №300919/59 от 30.09.2019 на сумму 97 974 руб., универсальным передаточным документом №3110019/92 от 31.10.2019 на сумму 45 110,40 руб., универсальным передаточным документом №301119/85 от 30.11.2019 на сумму 180 741,60 руб., универсальным передаточным документом №311219/28 от 31.12.2019 на сумму 88 264,80 руб..

Ответчик перечислил истцу платежным поручением №77 от 12.05.2020 сумму в размере 300 000 руб., платежным поручением №594 от 31.12.2019 сумму в размере 800 000 руб., платежным поручением №812 от 01.06.2020 сумму в размере 500 000 руб..

Универсальными передаточными документами ответчик передал истцу материалы на сумму 12 275 371,26 руб., что сторонами не оспаривается.

Соглашением о погашении взаимной задолженности №8  по состоянию на 29.02.2020 стороны, руководствуясь ст. 410 ГК РФ, пришли к соглашению о зачете взаимных требований на сумму 12 687 462,06 руб.. (Двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят два рубля 06 копеек).

 Двухсторонним актом сверки взаимных расчетов за период 01.01.2020 по 10.04.2020 стороны определили по состоянию на 10.04.2020 задолженность в пользу ООО "СТРОИСЕРВИС-БУРЕНИЕ" 1 873 963,55 руб. (Один миллион восемьсот семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят три рубля 55 копеек).

Ответчик перечислил истцу платежным поручением №1466 от 21.09.2020 сумму в размере 330 087,93 руб..

Согласно пункта 4.10 договора оплата производится в размере 100%, при условии предоставления безусловной и безотзывной банковской гарантии, на общую сумму 5% (пять процентов) от стоимости выполненного объема. 

В случае отсутствия банковской гарантии, указанной в п.4.10. Договора, 5% (пять процентов) стоимости выполненного за месяц объема Работ, будут удержаны Подрядчиком в качестве обеспечительного платежа согласно ст. 381.1 ГК РФ для формирования гарантийного фонда исполнения Субподрядчиком условий Договора до момента предоставления указанной в п. 4.10 банковской гарантии, либо до наступления срока на 90 дней превышающего дату завершения Работ  ( пункт  4.11 договора).

В материалах дела доказательств предоставления банковской гарантии истцом не представлено. Акта приёмки законченного строительством Объекта формы № КС-11 сторонами так же в материалы дела не представлен.

Согласно представленных истцом справок о стоимости выполненных работ и затрат, работы выполнены 30.09.2019 на сумму 3 722 530,80 руб.,  31.10.2019 на сумму 1 797 183,60 руб., 30.11.2019 на сумму 5 979 735,60 руб., 31.12.2019 на сумму 3 378 062,40 руб.. 

Исковое заявление подано истцом 03.08.2020.

Между тем, пунктом 13.2 договора, стороны определили, что продолжительность Гарантийного срока на результат Работ, выполненных по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Сторонами Акта приёмки законченного строительством Объекта формы № КС-11. 

Таким образом,  поскольку на дату рассмотрения настоящего спора, срок оплаты 5 % от гарантийного удержания  не наступил, суд полагает, что оснований для удовлетворения иска не имеется. 

На основании изложенного ,суд отказывает в удовлетворении иска.

В порядке распределения судебных расходов, суд руководствуется правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Истцом при подаче иска оплачена госпошлина в отношении материальных требований в размере  23 740 руб. 

Судом принят отказ от иска в размере 330 087,93 руб., заявленный истцом в связи с погашением ответчиком данной суммы после возбуждения производства по делу, в связи с чем сумма госпошлины по данному требованию подлежит возмещению ответчиком. 

Вопрос о выдаче справки о возврате суммы госпошлины по не имущественному требованию, оставленному судом без рассмотрения, судом не рассматривается, ввиду отсутствия оплаты данного требования.

Руководствуясь статьями 110, 148, 150, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

Р Е Ш И Л :

Отказ от исковых требований в части взыскания 330 087,93 руб. долга принять, производство в указанной части прекратить.

Исковые требования  в части расторжения договора подряда №0083/6/2029/37-ССБ от 27.07.2019 оставить без рассмотрения.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная Группа "Волга", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 18.04.2017) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис-Бурение", юридический адрес: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ак. ФИО2, 

<

...> пом. 28 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 29.09.2008) возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 5 862 руб..

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья

А.Э. Шарипова