Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-3742/2020

14 октября 2020 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 07.10.2020

Решение изготовлено в полном объеме 14.10.2020

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Гуляевой А. В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Акимовой А.Ю.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению публичного акционерного общества "Якутскэнерго" (ИНН 1435028701, ОГРН 1021401047260) к обществу с ограниченной ответственностью "Строй-Академия" (ИНН 1435256440, ОГРН 1121435009376) о расторжении договора и взыскании 20 585, 34 рублей,

при участии представителей:

от истца: ФИО2 по доверенности № И0007129 от 16.12.2019, представлен диплом,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 20.08.2020, представлен диплом,

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "Якутскэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Строй-Академия" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о расторжении договора и взыскании 20 585, 34 рублей.

В судебном заседании ответчиком представлен отзыв на исковое заявление.

Представитель ответчика заявил ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании для предоставления дополнительных документов.

Представитель истца по ходатайству ответчика возражает.

Ходатайство судом удовлетворено, в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  объявлен перерыв в судебном заседании до 12 час. 00 мин. 07.10.2020.  Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда в сети «Интернет». 

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, при ведении протокола тем же секретарем судебного заседания, при участии представителей:

от истца: ФИО4 по доверенности от 06.10.2020, представлен диплом.

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 20.08.2020, представлен диплом.

В материалы дела от ответчика поступили пояснения по обстоятельствам дела в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представленные документы судом приобщены в материалы дела в порядке ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Представитель истца поддерживает исковые требования.

Представитель ответчика с исковыми требованиями не согласен.

Судом установлены обстоятельства дела.

02.11.2018 между ПАО АК «Якутскэнерго» (Сетевая организация) и ООО «Строй-Академия» (Заявитель) заключен договор №2224 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя: «Многоквартирные жилые дома с магазинами и теплой автостоянкой», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: «Многоквартирные жилые дома с магазинами и теплой автостоянкой» Вилюйский тр. 3 км., г.Якутска (пункт 2 Договора).

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границ участка Заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты Заявителя (пункт 3 Договора).

В соответствии с пунктом 4 Договора Технические условия для присоединения к электрическим сетям приведены в Приложении №1.

Срок действия технических условий составляет 4 года со дня заключения настоящего договора.

Согласно пункту 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истекает 31 мая 2021 года.

Согласно п. 8 договора заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях (приложение 1);

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

В силу пункта 10 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с утвержденной постановлением Правления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 26.12.2017 №740 и составляет 24 782 692,89 руб., в том числе НДС 3 780 410,78 руб.

В приложении №3 к договору утвержден график платежей с учетом Протокола разногласий: 247 826,93 руб. - 1 процент платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; 247 826,93 руб. - 1 процент платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора; 1 239 134,64 руб. - 5 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора; 3 717 403,93 руб. – 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 380 дней со дня заключения настоящего договора; 3 717 403,93 руб. – 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 440 дней со дня заключения настоящего договора; 3 717 403,93 руб. – 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 560 дней со дня заключения настоящего договора; 7 434 807,86 руб. - 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 4 460 884,74 руб. - 18 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с пунктом 14 Договора настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.

Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 15 Договора).

Дополнительным соглашением №1 от 27.02.2019 к договору №2224 от 02.11.2018 стороны установили, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с утвержденной постановлением Правления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 26.12.2017 №740 и составляет 25 202 738,53 руб., в том числе НДС 4 200 456,42 руб. Сторонами также согласован новый график платежей: 247 826,93 руб. - 1 процент платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; 247 826,93 руб. - 1 процент платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора; 1 260 136,93 руб. - 5 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора; 3 780 410,78 руб. – 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 380 дней со дня заключения настоящего договора; 3 780 410,78 руб. – 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 440 дней со дня заключения настоящего договора; 3 780 410,78 руб. – 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 560 дней со дня заключения настоящего договора; 7 560 821,56 руб. - 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 4 536 492,94 руб. - 18 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения, 8 400,90 руб. – разница оплаты (НДС 120%-118%) срок оплаты – в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Платежными поручениями №129 от 31.01.2019 на сумму 247 826,93 руб., №234 от 26.02.2019 на сумму 247 826,93 руб. ответчиком произведена частичная оплата, всего на сумму 495 653,86 руб.

В ходе исполнения обязательства по договору ПАО «Якутскэнерго» понесло следующие затраты в размере 516 239,20 руб. по подготовке сетевой организацией технических условий и их согласование:

- 39 807,20 руб. за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ) по п.1 Приложению №2 к договору №2224 от 02.11.2018;

- 12 432 руб. за выкопировку топоосновы земельного участка;

- 464 000 руб. за проектную и рабочую документацию.

Сетевая организация, ссылаясь на неисполнение заявителем обязательств по договору, направила в адрес последнего уведомление №215/1823 от 25.02.2020 о расторжении договора с приложением соглашения о расторжении договора. 

05.03.2020 истцом направлена претензия с требованием оплатить разницу между  оплаченной ответчиком суммой и фактически понесенными затратами в размере 20 585,34 руб. в течение 30 дней со дня подписания настоящего соглашения.

В соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.

Пунктом 2 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен порядок расторжения договора: требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением 05.06.2020.

Из материалов дела усматривается, что уведомление от 25.02.2020 №215/1823 направлено ответчику 27.02.2020, претензия от 05.03.2020 №215/2204 - 05.03.2020.

Таким образом, досудебный порядок урегулирования спора истцом соблюден.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон N 35-ФЗ), пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона N 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил N 861).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (определение Верховного Суда РФ от 19.01.2018 N 310-ЭС17-11570).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (п. 15 договора).

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами или договором.

В силу пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной, а также в случаях, предусмотренных Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии со статьей 452 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу об отсутствии каких-либо доказательств существенных нарушений условий договора со стороны ответчика.

В обоснование своих доводов истец утверждает, что ответчик не исполнил свои обязательства по договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, в связи с чем, просит расторгнуть данный договор.

В силу пункта 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательств.

В спорном договоре стороны не указали срок действия договора. Стороны предусмотрели срок действия технических условий - 4 года со дня заключения договора и срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 31.05.2021.

Кроме того, срок действия технических условий от 02.11.2018 №2224 составляет 4 года, и на дату рассмотрения настоящего спора данный срок не истек.

Из возражений ответчика следует, что интерес в исполнении договора ответчиком не утрачен, на сегодняшний день строительство объекта продолжается, объект еще не сдан.

В подтверждение данных доводов  ответчиком представлены: разрешение на строительство от 29.06.2018 №14-RU14301000-124-2018, разрешение на строительство от 31.05.2019 №14-RU-14301000-58-2019, выписка из общего журнала  строительных работ на объекте, с записями о производстве работ по состоянию на 01.10.2020, акт проверки строительства объекта от 01.09.2020 №04-08-507-20 УГСЖН РС(Я).

Таким образом, в рассматриваемом случае истец не доказал, что расторжение спорного договора соответствует балансу интересов сторон и является экономически целесообразным, а также факт утраты для него и для ответчика экономического интереса к договору. При этом суд учитывает интерес ответчика к сохранению договорных обязательств, частичную оплату услуг в размере 495 653,86 руб., а также недоказанность наступления значительных негативных последствий для истца при сохранении договорных отношений с ответчиком. 

Суд отмечает, что нарушение сроков оплаты не является основанием для расторжения спорного договора, при этом истец вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности за несвоевременное исполнение ответчиком своих обязательств, установленных условиями Договора.

Расторжение договора, влекущее такие серьезные последствия для сторон, как прекращение правоотношений, является крайней мерой, применяемой к недобросовестному контрагенту в случае, когда все другие средства воздействия исчерпаны, и сохранение договорных отношений становится нецелесообразным и невыгодным для другой стороны (Определение Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 03.12.2013 N ВАС-17232/13 по делу N А56-47877/2012). 

С учетом вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что требование истца о расторжении договора удовлетворению не подлежит.

Принимая во внимание, что договор между сторонами не расторгнут, суд отказывает в удовлетворении требования истца о взыскании затрат, понесенных при исполнении договора, в размере 20 585,34 руб.

Ссылка на представление документов, подтверждающих фактические затраты сетевой организации по выполнению мероприятий до границ участка заявителя, подлежит отклонению как не имеющая правового значения, поскольку истец не обосновал ссылками на какие-либо правовые нормы, в том числе нормы Закона №35-ФЗ и Правил №861, из которых бы следовала обязанность заказчика оплатить расходы исполнителя, превышающие стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанную с применением регулируемой ставки тарифа. 

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2017 N 304-ЭС16-16246 по делу №А45-12261/2015, расходы, подлежащие возмещению сетевой компании со стороны заказчика, не должны превышать стоимость услуг, рассчитанную с применением ставки тарифа.

С учетом изложенного, требования истца о возмещении 20 585,34 руб. понесенных затрат удовлетворению не подлежат.

При подаче искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в размере 8 000 руб., что подтверждается платежным поручением №24458 от 18.05.2020.

Суд, руководствуясь ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, относит расходы по уплате государственной пошлины на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Судья

                            А.В. Гуляева