1892/2019-58002(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-31428/2018

г. Казань

14 марта 2019 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе  председательствующего судьи Воробьева Р.М., руководствуясь ст.ст. 110, 167, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АЗС-Строй», г.Альметьевск  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Татнефть-АЗС Центр», г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в  размере 1 320 377,71 руб., штраф в размере 1 845 897,42 руб., расходы по государственной  пошлине в размере 44 831 руб.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «АЗС-Строй» в месячный срок  после вступления решения в силу но объекте - АЗС № 181, расположенной по адресу:  

<

...> лесхоза: выполнить работы по  устройству однорядного одностороннего барьерного ограждения на переходно-скоростных  полосах (торможения и разгона) предусмотрено ограждение высотой 0,75м (-11ДО-0.75-2.0-1.0)  в количестве 530 пм.; выполнить работы по устройству однорядного двухстороннего  барьерного ограждения на зеленом островке (газоне), ограждающем территорию АЗС от  автодорожной магистрали высотой 0,75м (11ДД - ТУ 5216-001-05765820-2007/300- 0.75 - 2.0- 0.95) в количестве 79 пм; выполнить работы по отсыпке обочин из щебня М800 фр.40-70мм по  способу заклинки ГОСТ 8267-93h=0,2м шириной 3,00м с уклоном 40%о в сторону оврага на  площади 1445м2 по присыпным обочинам из песка на переходно-скоростных полосах (разгона  и торможения); выполнить работы по устройству дорожной разметки термопластиком (линии,  стрелы и др.обозначения) определенные рабочим проектом 07-ПИР/2015-ПЗУ «Транспортная  схема с расстановкой дорожных знаков М1:500» лист 7, утвержденного ДИ и ОД № 2 ГИБДД  МВД РФ исх. № 15774и от 08.10.15г. на усовершенствованном покрытии дороги переходно- скоростных полос (разгона и торможения) и на территории АЗС; выполнить работы по  благоустройству территории; устранить следующие недостатки: заменить уличные камеры  AKS-1903 V IP РОЕ наружной системы видеонаблюдения на предусмотренные рабочим  проектом 07-ПИР/2015-ИОСЗ-ВН видеокамеры Polyvision PN9-IP2-V12PL/PN-M2-V12IRMPA- IP со встроенным блоком грозозащиты; заменить установленные вдоль переходно-скоростных  полос торможения и разгона, на территории АЗС и под навесами ТРК светодиодные  светильники неизвестного производителя неизвестной марки (не проектной) на  предусмотренные рабочим проектом 07-ПИР/2015-ИОС1-ЭС лист 17 светодиодные  светильники производства «Ферекс» типа ДКУ 01-130-50-Ш на территории АЗС, типа ДКУ 01- 208-50-Ш на ПСП и типа ДВУ 02-80-50-ДПО под навесами ТРК; выполнить  усовершенствованное асфальтобетонное покрытие дороги в соответствии с рабочим проектом  07-ПИР/2015-ПЗУ «План благоустройства территории М1:500» с устройством пандусов  высотой 0,2 м на въезде и выезде с территории АЗС и пандусов высотой 0,15 м на въезде и  выезде с площадки АЦ, общее количество 53 пм.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья Р.М. Воробьев