43/2023-19986(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru, тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07 E-mail: info@kurgan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А34-12337/2021

г. Курган

22 февраля 2023 года

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Желейко Т.Ю.,  при ведении протокола судебного заседания в письменном виде с использованием  средств аудиозаписи помощником судьи Жилиной Н.В., рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению Комитета по строительству и  архитектуре Администрации города Шадринска (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к закрытому акционерному обществу «Курганстальмост» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

о возложении обязанности, 

третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «КОМБИНАТ КАРКАСНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>),  

при участии до перерыва: после перерыва: данные в протоколе, 

Руководствуясь статьями 167 – 171, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

иск удовлетворить. 

Обязать закрытое акционерное общество «Курганстальмост» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение двух месяцев с даты вступления решения в  законную силу за свой счет устранить выявленные в период гарантии недостатки в  выполненных работах по муниципальному контракту № 53/2018 от 06.11.2018, а  именно:  

- устранить следы протечек крыши в групповых комнатах на первом, втором  этажах, в помещениях общего пребывания (спортивный зал, лестничная клетка,  коридоры, в помещении технического этажа) путем расчистки поверхности, обработки  противогрибковыми составами (т.к. имеется грибок и плесень (что недопустимо для  детского сада) от постоянного намокания), провести ремонт штукатурки стен,  шпатлевание стен с последующей окраской в 2 раза, в соответствии с существующими  цветами стен;  

- устранить горизонтальные, вертикальные и крутые (угол падения 45-80  градусов) наклонные трещины в гипсокартонных перегородках в помещениях 2 этажа  (архив, комната безопасности, вестибюль, групповая № 7) путем расшивки трещин с  последующим шпатлеванием и окраской в 2 раза в соответствии с существующими  цветами стен;  

- устранить вертикальные трещины в коридоре 1-го этажа в местах примыкания  внутренних и наружных стен путем расчистки поверхности, расшивки трещин,  шпатлеванием поверхности с последующей окраской в 2 раза в соответствии с  существующими цветами стен;  

- в коридоре 2-го этажа устранить сквозные горизонтальные трещины в  кирпичной перегородке (ширина раскрытия составляет до 1,5 мм, глубинной более 150  мм) путем расчистки поверхности, заделке и расшивке трещин, шпатлеванием  поверхности стен и с последующей окраской в 2 раза в соответствии с существующими  цветами стен;  

- в помещении архива на стенах из ГВЛ плит, в районе расположения дверного  проема, устранить сквозные наклонные трещины с шириной раскрытия до 1,5 мм.,  путем расчистки поверхности, расшивки трещин, шпатлеванием поверхности стен и с  последующей окраской в 2 раза в соответствии с существующими цветами стен;  

- в комнате безопасности в кирпичных перегородках имеются сквозные  горизонтальные трещины, трещины в местах примыкания перегородок с межэтажными  перекрытиями. Для их устранения необходимо выполнить расчистку поверхности,  заделку и расшивку трещин, шпатлеванием поверхности стен и потолков с  последующей окраской в 2 раза;  

- в групповой комнате № 7 устранить горизонтальную сквозную трещину в  кирпичной перегородке, в районе дверного проема, входа в групповую, вертикальные и  горизонтальные трещины в перегородках путем выполнения расчистки поверхности,  заделке и расшивке трещин, шпатлеванием поверхности стен и с последующей  окраской в 2 раза в соответствии с существующими цветами;  

- в санузле группы № 7 устранить сквозную трещину в кирпичной перегородке  путем выполнения расчистки поверхности, заделке и расшивке трещин с  восстановлением керамической плитки;  

- в кабинете методиста устранить трещины в окрасочных слоях внутренней  отделки путем выполнения расчистки поверхности, заделке и расшивке трещин,  шпатлеванием поверхности стен и с последующей окраской в 2 раза в соответствии с  существующими цветами;  

- на лестничной клетке входа № 2 устранить горизонтальные и вертикальные  трещины путем выполнения расчистки поверхности, заделке и расшивке трещин,  шпатлеванием поверхности стен и с последующей окраской в 2 раза в соответствии с  существующими цветами;  

- устранить следы протечек крыши на стенах и перекрытии путем расчистки  поверхности, обработки противогрибковыми составами (т.к. имеется грибок и плесень  (что недопустимо для детского сада) от постоянного намокания) провести ремонт  штукатурки стен и потолка, шпатлевание стен и потолка с последующей окраской в 2  раза, в соответствии с существующими цветами, устранить протекание кровли;  

-в помещении пищеблока на втором этаже в местах прохода трубопроводов  инженерных систем через межэтажное перекрытие устранить следы залива из выше  расположенного технического этажа путем устранения протечек кровли, герметизацией  щелей, с расчисткой поверхности, подготовкой поверхности, выполнить шпатлевание  потолка с последующей окраской в 2 раза в соответствии с существующими цветом  потолка;  

- устранить деформацию трубопровода стояка системы канализации путем  замены трубы;  

- на поверхности межэтажного перекрытия в помещении игровой комнаты  групповой № 5 имеется повреждение окрасочного слоя возникшие от протечки.  Необходимо восстановить окрасочный слой с расчисткой поверхности, с выполнением  шпатлевания потолка с последующей окраской в 2 раза в соответствии с  существующим цветом;  

- в помещениях техподполья устранить трещины в стяжке пола путем заделки и  расшивки трещин;  

- подключить водосточную воронку № 3 к электрической схеме подогрева; 

- устранить механическое повреждение водоизоляционного ковра длиной 70 мм  путем заклеивания кровельным материалом;  

- убрать с крыши скопления строительного мусора. 

Взыскать с закрытому акционерному обществу «Курганстальмост» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. 00 коп.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления его в полном объёме).  

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Курганской области. 

Судья Т.Ю. Желейко  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 17.12.2021 8:22:12

Кому выдана Желейко Татьяна Юрьевна