1/2024-16703(1) 

 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-11875/2023

г. Благовещенск

21 февраля 2024 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Ивановой Е.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление государственного казенного  учреждения управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к акционерному обществу «Дорожное эксплуатационное предприятие № 197»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки, о взыскании штрафа в размере 10 000 руб., судебной  неустойки  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

исковые требования государственного казенного учреждения управление  автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) удовлетворить – обязать акционерное общество «Дорожное эксплуатационное  предприятие № 197» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) устранить в безвозмездном  порядке в срок не позднее 01.06.2024 выявленные на участке автомобильной дороги  «Ровное - Усть-Ивановка - Петропавловка» км 8+360 - км 11+360 в период гарантийного  срока недостатки работ, выполненных по государственному контракту от 02.06.2021  

 № К.2021.1069, а именно разрушения верхнего слоя покрытия из ЩМА - 15 в виде провала  (просадки) на участках км 8+500 лево, км 9+130 право ось (поперечные трещины на карте),  км 9+200 лево, км 9+550, км 9+570 лево, км 10+300 путем срезки асфальтобетонного  покрытия в местах образования дефектов, розливом вяжущих материалов и укладки ЩМА  - 15, а также заделать места отбора кернов из покрытия на участках км 8+400 право, км  9+750 право смесью ЩМА-15.  

Взыскать с акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие   № 197» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу государственного казенного  учреждения управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку (штраф) по государственному контракту от  02.06.2021 № К.2021.1069 в размере 10 000 руб., судебные издержки (почтовые расходы) в  размере 315,50 руб.  

Взыскать с акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие   № 197» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу государственного казенного  учреждения управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в случае неисполнения решения суда по настоящему  делу, судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда  по настоящему делу по день фактического исполнения судебного акта.  

В остальной части требования о присуждении судебной неустойки отказать. 

Взыскать с акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие   № 197» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 8 000 руб.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход  бюджета ходатайство взыскателя не требуется.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья Е.В.Иванова