107_36971264 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(в порядке статьи 176 АПК РФ) 

 

Дело № А40-103914/23-107-800

19 сентября 2023 года

г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при  ведении протокола помощник судьи А.Э. Гогиберидзе, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело № А40-103914/23-107-800 по иску ООО "ОТК-ГРУПП"  (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) к ответчику АО "МОСПРОМСТРОЙ" (ИНН:  

<

***> ОГРН: 

<

***>) о взыскании суммы 50 % гарантийного удержания  по договору № ППТ1-4/0036-2019/МПС от 03.06.2019 в размере 1 020 949,42 р.,  неустойки в размере 102 094,90 р., процентов за пользование чужими денежными  средствами в размере 147 233,50 р., встречного иска АО "МОСПРОМСТРОЙ" к ООО  "ОТК-ГРУПП" о взыскании суммы неустойки за нарушение срока сдачи работ по  договору № ППТ1-4/0036-2019/МПС от 03.06.2019 за период с 12.11.2019 по 15.07.2022  в размере 17 887 033,87 р., при участии представителя истца: ФИО1,  доверенность от 08.07.2023, паспорт, диплом, представителей ответчика: ФИО2,  доверенность от 10.02.2023, паспорт, диплом,  

РЕШИЛ:

Отказать ООО "ОТК-ГРУПП" в удовлетворении первоначального иска к АО  "МОСПРОМСТРОЙ" о взыскании суммы 50 % гарантийного удержания по договору №  ППТ1-4/0036-2019/МПС от 03.06.2019 в размере 1 020 949,42 р., неустойки в размере  102 094,90 р., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере  147 233,50 р.  

Удовлетворить встречные исковые требования АО "МОСПРОМСТРОЙ" к ООО  "ОТК-ГРУПП" частично.  

Взыскать с ООО "ОТК-ГРУПП" в пользу АО "МОСПРОМСТРОЙ" сумму  неустойки за нарушение срока сдачи работ по договору № ППТ1-4/0036-2019/МПС от  03.06.2019 за период с 12.11.2019 по 03.11.2021 в размере 12 721 029,98 р.,  государственную пошлину в размере 79 962 р.  

В остальной части отказать в удовлетворении требований. Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течении месяца со дня принятия.  

СУДЬЯ М.В. Ларин