5/2017-108777(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-10827/2017

г. Владивосток

03 июля 2017 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску администрации  Артемовского городского округа (ИНН 

<

***> , ОГРН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Примстройлюкс" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки работ 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью  «Примстройлюкс» безвозмездно в 10-дневный срок с даты вступления в  законную силу решения Арбитражного суда Приморского края устранить  недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту № 14/55 А- 1 от 03.02.2011г., осуществив ремонтные работы на кровле  многоквартирного дома, расположенного но адресу: 

<

...>, в соответствии с требованиями СПиП [1-26-76  «Строительные нормы и правила кровли», СП 17.13330.201 1 «Свод  правил кровли», а именно:  

 1. восстановить целостность кровельного покрытия над  квартирой № 20 длиной 0,2 м;  

 2. восстановить целостность кровельного покрытия над квартирой №  19 длиной 0,4 м.;  

 3. восстановить целостность кровельного покрытия над квартирой №  13 общей площадью 1,35 м;  

 4. восстановить целостность кровельного покрытия над квартирой №  12 общей площадью 0.3 м;  

 5. восстановить целостность кровельного покрытия над квартирой №  8 общей площадью 1 м;  

 6. восстановить прочность сцепления кровельного ковра с  основанием над квартирой № 7 длиной 1 м;  

 7. восстановить целостность кровельного покрытия над квартирой   № 6 длиной 0,15м;  

 8. восстановить прочность сцепления кровельного ковра с  основанием на примыкании к вентиляционной шахте над квартирой № 6  длиной 0,4 м;  

 9. восстановить прижимные свойства рейки вентиляционной шахты  над квартирой № 6;  

 10. восстановить целостность кровельного покрытия над лестничной  клеткой первого подъезда длиной 0.15 м.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Примстройлюкс»  в доход федерального бюджета 6000 рублей  государственной пошлины по иску.  

 Выдать исполнительные листы после вступления решения в  законную силу.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  

округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу. 

Судья Плеханова Н.А.