Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

город  Волгоград

« 19 » января 2023 г.

Дело № А12-25886/2022

 

Резолютивная часть решения объявлена 16 января 2023 года. 

Полный текст решения изготовлен 19 января 2023 года.  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Стрельниковой Н.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николенко И.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску администрации Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «ГОРСВЕТ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  об обязании

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, доверенность 

установил:

администрация Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области (далее – истец, администрация) обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ГОРСВЕТ» (далее – ответчик, ООО «ГОРСВЕТ») в котором, с учетом уточнений в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просит:

1. обязать общество с ограниченной ответственностью «ГОРСВЕТ» в течении 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, устранить за свой счет недостатки работ путем:

произвести демонтаж и переукладку 1200 м2 тротуарной плитки, уложенной по Контракту №03292000622200000180001 от 28.02.2020, Акт о приемке выполненных работ №1 от 27.11.2020) в х. Вихлянцевский;

произвести демонтаж и переукладку 1019 м2 тротуарной плитки, по Контракту №03292000622200000160001 от 26.02.2020, Акт о приемке выполненных работ №1 от 24.11.2020) в х. Беспаловский.

2. Взыскать с ответчика в пользу истца штраф, начисленный в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком, исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом в размере:

по Контракту №03292000622200000180001 - 5000 руб.;

по Контракту №03292000622200000160001 - 5000 руб.

Ответчик, извещенный о времени и месте проведения судебного заседания, не явился.

Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

В ходе судебного заседания представитель истца поддержал требования.

Ответчик письменный мотивированный отзыв на иск в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил, возражений по существу иска не заявил.

Изучив представленные документы, оценив доводы истца, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, постановлением администрации Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района от 10.01.2020г. №13 была утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год».

Между администрацией Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ГОРСВЕТ» (Подрядчик) по итогам проведения аукциона заключен муниципальный контракт №03292000622200000180001 от 28.02.2020 г. на выполнение работ по благоустройству х. Вихлянцевский, центральная часть (далее – Контракт №03292000622200000180001).

В соответствии с п. 1.1 Контракта №03292000622200000180001, Подрядчик обязуется собственными силами, своевременно на условиях настоящего Контракта выполнить работы по благоустройству х. Вихлянцевский, центральная часть (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Состав и объем работ определяется Приложением № 1 (Сметная документация) и Приложением № 2 (Техническое задание) к контракту.

Согласно Техническому заданию к контракту работы должны производиться в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил, Государственных стандартов и технических условий; экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

При выполнении работ на Объекте все применяемые материалы, оборудование и комплектующие должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, ТУ, СНиП и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Согласно п. 2.1 Контракта, цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации. Цена Контракта №03292000622200000180001 составляет 2317130,00 руб. 

Согласно п. 5.1. Контракта №03292000622200000180001, Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работ предусмотренных контрактом. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Контракте цели и влияют на качество работ.

Согласно п. 5.2. Контракта №03292000622200000180001, Подрядчик направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче, исполнительную документацию в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае, если на данные работы требуется исполнительная документация), документы указанные в п. 2.4.2 настоящего Контракта и надлежащим образом заверенные копии сертификатов на используемые материалы и оборудование. Все документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работ.

Согласно п. 2.4.2 Контракта №03292000622200000180001, документы, являющиеся основанием для оплаты (предоставляются в двух экземплярах):

акт о приемке выполненных работ формы КС-2;

справка формы КС-3;

счёт, счет-фактура (при наличии).

Акты на скрытые работы (при наличии скрытых работ);

Разделом 6.1.1 контракта №03292000622200000180001установлены гарантии качества по сданным работам.

Согласно п. 6.1.1. Контракта №03292000622200000180001, гарантийные обязательства: Гарантийный срок на выполненные работы указан в Приложением № 2 к Контракту (Техническое задание).

Согласно Техническому заданию к контракту гарантийный срок на выполненные работы составляет: не менее 36 месяцев с даты подписания Заказчиком документов о приемке. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок на применяемые материалы должен быть не менее срока, установленного производителем (заводом изготовителем).

Согласно п. 3.4.3 контракта №03292000622200000180001 Подрядчик обязан своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

Согласно п. 5.6 контракта №03292000622200000180001 Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан уведомить об этом Подрядчика в течение 3 рабочих дней после их обнаружения.

Акт приемки работ по форме КС-2 подписан сторонами 27.11.2020 г. 

Таким образом, начало течения гарантийного срока необходимо исчислять с указанной даты.

Между администрацией Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ГОРСВЕТ» (Подрядчик) по итогам проведения аукциона заключен муниципальный контракт №03292000622200000160001 от 26.02.2020 на выполнение работ по благоустройству х.Беспаловский, центральная часть (далее – Контракт №03292000622200000160001).

В соответствии с п. 1.1 Контракта №03292000622200000160001, Подрядчик обязуется собственными силами, своевременно на условиях настоящего Контракта выполнить работы по благоустройству х.Беспаловский, центральная часть (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Состав и объем работ определяется Приложением № 1 (Сметная документация) и Приложением № 2 (Техническое задание) к контракту.

Согласно Техническому заданию к контракту работы должны производиться в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил, Государственных стандартов и технических условий; экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

При выполнении работ на Объекте все применяемые материалы, оборудование и комплектующие должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, ТУ, СНиП и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Согласно п. 2.1 Контракта, цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации. Цена Контракта №03292000622200000160001 составляет 2383810,00 руб. 

Согласно п. 5.1. Контракта №03292000622200000160001, Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работ предусмотренных контрактом. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Контракте цели и влияют на качество работ.

Согласно п. 5.2. Контракта №03292000622200000160001, Подрядчик направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче, исполнительную документацию в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае, если на данные работы требуется исполнительная документация), документы указанные в п. 2.4.2 настоящего Контракта и надлежащим образом заверенные копии сертификатов на используемые материалы и оборудование. Все документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работ.

Согласно п. 2.4.2 Контракта №03292000622200000160001, документы, являющиеся основанием для оплаты (предоставляются в двух экземплярах):

акт о приемке выполненных работ формы КС-2;

справка формы КС-3;

счёт, счет-фактура (при наличии).

Акты на скрытые работы (при наличии скрытых работ);

Разделом 6.1.1 контракта №03292000622200000160001 установлен гарантийный срок по сданным работам.

Согласно п. 6.1.1. Контракта №03292000622200000180001, гарантийные обязательства: Гарантийный срок на выполненные работы указан в Приложением № 2 к Контракту (Техническое задание).

Согласно Техническому заданию к договору гарантийный срок на выполненные работы составляет: не менее 36 месяцев с даты подписания Заказчиком документов о приемке. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок на применяемые материалы должен быть не менее срока, установленного производителем (заводом изготовителем).

Согласно п. 3.4.3 контракта №03292000622200000160001 Подрядчик обязан своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

Согласно п. 5.6 контракта №03292000622200000160001 Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан уведомить об этом Подрядчика в течение 3 рабочих дней после их обнаружения.

Акт приемки работ по форме КС-2 подписан сторонами 24.11.2020г. 

Таким образом, начало течения гарантийного срока необходимо исчислять с указанной даты.

В 2021 году контрольно-счетной палатой Волгоградской области (далее КСП) была проведена проверка реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», принятого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», за 2020 год на территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области (акт проверки от 16.06.2021 №81).

25.08.2022 Контрольно-счетной палатой Волгоградской области проведена повторная проверка с целью проверки принятых мер по устранению выявленных ранее нарушений.

Проверкой установлено следующее.

Согласно своду правил «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий. Правила проектирования, строительства и эксплуатации» (далее - СТО 46505580-002- 2020) при приемке работ по мощению следует контролировать высотные отметки, ровность покрытия, ширину швов, а также их заполнение.

СТО 46505580-002-2020 приведены следующие контролируемые параметры при устройстве покрытий из камней/плит:

Бортовые камни:

прямолинейность линии бортового камня на участках длиной 3 м ±5 мм;

превышение одного бортового камня над другим - ±5 мм;

Разность высот:

между смежными камнями плитами с плоской поверхностью - ±2 мм;

между камнями/плитами с рельефной поверхностью - ±5 мм;

рядом с желобами -+3...10 мм;

рядом со встраиваемыми элементами -+3...5 мм;

рядом с прилегающими покрытиями -+3...5 мм;

Наклон (для плит) - ± 0,4 %;

Ширина шва:

камни мощения толщиной до 12 см - 3...5 мм;

камни мощения толщиной от 12 см - 5.. .8 мм;

плиты мощения толщиной до 12 см - 3.. .5 мм;

плиты мощения толщиной более 12 см - 5... 10 мм.

Таким образом, уровень мощения должен быть выше бортовых камней или водосборных устройств на 3-10 мм - для естественного стока воды с тротуарного покрытия. Поверхность покрытия должна иметь результирующий общий уклон в сторону водоприемных устройств не менее 2,5 %, на поверхности покрытия не должно быть местных углублений, в которых может застаиваться вода. Проектные прямолинейные швы в натуре не должны иметь видимых отклонений от прямой линии. Ширина межплиточных швов для стандартных камней мощения (толщиной до 12 мм) составляет 3-5 мм, при этом швы должны быть заполнены песком на всю высоту.

Примыкания к канализационным люкам, водосборным лоткам, каким-либо другим встроенным в покрытие элементам, изменение направления рисунка мощения должны быть выполнены с учетом правил выполнения подрезки тротуарной плитки:

для камней мощения: наименьшая сторона отрезанного камня должна быть не менее 1/3 от целого камня;

для плит: в отрезанных элементах соотношение длины и ширины - не более 2х, оставшаяся короткая сторона минимум п два раза должна превышать толщину элемента;

обрезанные камни/плиты не должны иметь острых углов (менее 45 градусов).

Неточно подогнанные или плохо закрепленные доборные элементы (части плитки после подрезки) под действием внешних нагрузок могут потерять устойчивое положение и быть вынесены с дорожного покрытия. Это может нарушить заклинку соседних камней и способствовать разрушению всего покрытия.

КСП в 2021 году обследование фактически выполненных работ по благоустройству общественных территорий было установлено:

в х. Вихлянцевский:

работы по укладке 1245 м2 тротуарной плитки выполнены ООО «ГОРС'ВЕТ» с нарушениями технологии укладки тротуарной плитки, в результате покрытие имеет поверхность в виде «волн» с многочисленными просадками, швы выполнены неравномерно, сопряжения примыкающих тропинок выполнено в разных уровнях, уложенное покрытие нуждается в проведении ремонтновосстановительных работ.

2. в х. Беспаловский:

работы по укладке 1019 м2 тротуарной плитки выполнены ООО «ГОРСВЕТ» с нарушениями технологии укладки тротуарной плитки, в результате покрытие имеет поверхность в виде «волн» с многочисленными просадками, швы выполнены неравномерно, уложенное покрытие нуждается в проведении ремонтно-восстановительных работ;

Меры по устранению недостатков покрытия из тротуарной плитки в х. Беспаловский и х. Вихлянцевский в рамках гарантийных обязательств работы ООО «Горсвет» не проводились. На территории площадью 1200 м2 ремонтно-восстановительных работы не проводились. Покрытие имеет поверхность в виде «волн» с многочисленными просадками, швы выполнены неравномерно, отсутствует прямолинейность швов, не соблюден уровень мощения по отношению к бортовым камням.

Проведенным 25.08.2022 обследование выполненных работ по благоустройству центральной части х. Беспаловский установлено:

Тротуарные дорожки площадью 1019 м2 находятся в неудовлетворительном состоянии. Покрытие имеет поверхность в виде «волн» с многочисленными просадками, швы выполнены неравномерно, отсутствует прямолинейность швов, не соблюден уровень мощения по отношению к бортовым камням.

По истечении 2-х летних сезонов с благоприятными погодными условиями Подрядчиком не приняты меры по устранению недостатков работ в рамках гарантийных обязательств.

Заказчиком 24.11.2021, 05.07.2022 и 01.09.2022 направлялись Подрядчику Претензии с требованием устранить выявленные нарушения.

Добровольно указанные недостатки Подрядчик не устранил. 

На основании статьи 65 АПК РФ, ответчик не доказал иное.

Сам по себе факт подписания заказчиком форм КС-2 и КС-3 без замечаний не лишает заказчика права предъявлять претензии к качеству работ в рамках гарантийного срока, который не истек.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу статьи 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 722 ГК РФ,  в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

В силу части 1 статьи 723 ГК РФ, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

В соответствии с п. 1 ст. 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока.

Согласно статье 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможности эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик.

Предельный срок обнаружения недостатков по договорам подряда по правилам статьи 756 Гражданского кодекса Российской Федерации составляет пять лет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные данной статьей.  

По смыслу названых правовых норм, в пределах гарантийного срока устанавливается презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ, выявленные в пределах гарантийного срока.

Иными словами, в случае заявления заказчиком о недостатках работы, обнаруженных в пределах срока гарантии подрядчика, бремя доказывания возникновения недостатков по основаниям, не связанным с действиями подрядчика, возлагается на последнего.

В силу части 5 статьи 720 ГК РФ при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Своим правом о назначении судебной экспертизы ответчик в порядке ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не воспользовался.

Ходатайства о назначении по делу экспертизы с целью определения качества выполненных работ сторонами при рассмотрении настоящего дела заявлено не было.

Иными словами, в случае заявления заказчиком о недостатках работы, обнаруженных в пределах срока гарантии подрядчика, бремя доказывания возникновения недостатков по основаниям, не связанным с действиями подрядчика, возлагается на последнего.

Доказательств устранения в полном объеме выявленных дефектов в материалы дела не представлено.

На основании принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 АПК РФ, а также положений статьи 65 АПК РФ лицо, не реализовавшее свои процессуальные права, в том числе и на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий несовершения им соответствующих процессуальных действий.

Поскольку надлежащие доказательства наличия недостатков в выполненных ответчиком и принятых истцом работах представлены в материалы дела, ответчиком, в свою очередь, доказательств того, что указанные недостатки произошли не по его вине, не представлены, суд приходит к выводу о правомерности исковых требований. 

Таким образом, требования истца об обязании ответчика безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по контрактам обоснованы и подлежат удовлетворению.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено, что в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (ч.4 ст. 34 Закона №44-ФЗ).

Ответственность сторон установлена в разделе 7 Контрактов. 

Согласно пункта 7.1 контрактов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность.

Определение размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

Пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждённых Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, установлено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Согласно расчету истца сумма штрафа по контракту №03292000622200000180001 составляет 5 000 руб., штрафа по контракту №03292000622200000160001 составляет 5 000 руб. 

Расчет штрафа судом проверен, признан верным. Право истца на взыскание штрафа ответчиком не оспаривается.

Оснований для применения норм ст. 333 ГК РФ судом не установлено

Поскольку судом установлен факт ненадлежащего исполнения ответчиком принятых на себя по условиям контрактов обязательств, в связи с выявленными недостатками в результатах работы ООО «Горсвет», возникшими и выявленными в пределах гарантийного срока, исковое требование истца о взыскании с него начисленных штрафных неустоек подлежит удовлетворению в полном объеме.

С учетом изложенного, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и взыскиваются в доход федерального бюджета Российской Федерации, поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче иска на основании статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд

Р  Е  Ш  И  Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ГОРСВЕТ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту №03292000622200000180001 от 28.02.2020 за счет собственных средств в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу устранить недостатки (дефекты) работ на объекте в х. Вихлянцевский, а именно:

- произвести демонтаж и переукладку 1200 м2 тротуарной плитки (Акт о приемке выполненных работ №1 от 27.11.2020).

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ГОРСВЕТ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту №03292000622200000160001 от 26.02.2020 за счет собственных средств в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу устранить недостатки (дефекты) работ на объекте в х. Беспаловский, а именно:

- произвести демонтаж и переукладку 1019 м2 тротуарной плитки (Акт о приемке выполненных работ №1 от 24.11.2020).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГОРСВЕТ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу администрации Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) штраф в размере 10 000 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГОРСВЕТ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину 8 000 руб.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                        Стрельникова Н.В.