34/2018-91485(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-7655/2018

г. Хабаровск

09 июля 2018 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Лесниковой О.Н.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства города Комсомольска-на-Амуре» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, место нахождения: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск- на-Амуре, ул. Кирова, д.41)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Импульс» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680007, 

<

...>, оф. 203Б)  

об обязании устранить недостатки работ по муниципальному контракту   № 1 от 25.01.2016 г.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Импульс» в  течение 21 календарного дня с момента вступления в законную силу решения  

суда безвозмездно устранить недостатки строительно-монтажных работ по  муниципальному контракту № 1 от 25.01.2016г. на выполнение работ по  строительству объекта «Жилой дом № 54 по ул. Пионерской в микрорайоне   № 16» в г. Комсомольске-на-Амуре с соблюдением требований проектной  документации (шифр 06/10/14п), действующих строительных норм и правил  ГОСТ 6810-2002, СниП 3.04.01-87, СниП 3.03.01-87, МДС 12-30.2006, ГОСТ  52749-2007, а именно в доме 54 по ул. Пионерской г. Комсомольска-на- Амуре в квартире № 4:  

Кухня - устранить обледенение в нижних притворах окна и утеплить  оконный проем, в том числе произвести работы по демонтажу откосов  оконного блока и подоконника, работы по заделке щелей, работы по  заполнению монтажных швов пенным утеплителем, далее провести работы  по восстановлению оконных откосов, отрегулировать запорную арматуру  оконных блоков, заменить уплотнительные резинки.  

Комната (зал): 

- устранить обледенение в нижних притворах окна, в том числе  произвести работы по демонтажу откосов оконного блока и подоконника,  работы по заделке щелей, работы по заполнению монтажных швов пенным  утеплителем, далее провести работы по восстановлению оконных откосов,  отрегулировать запорную арматуру оконных блоков, заменить  уплотнительные резинки;  

- на стене под подоконником произвести работы по частичной замене  штукатурного и окрасочного слоя, включая предварительные работы по  обработке стен противогрибковым составом, произвести замену и оклейку  обоев;  

Угловая комната слева: 

- стена справа от входа в месте примыкания стен произвести работы по  частичной замене штукатурного и окрасочного слоя, включая  предварительные работы по обработке стен противогрибковым составом,  произвести замену и оклейку обоев;  

- устранить обледенение в нижних притворах окна, в том числе  произвести работы по демонтажу откосов оконного блока и подоконника,  работы по заделке щелей, работы по заполнению монтажных швов пенным  утеплителем, далее провести работы по восстановлению оконных откосов, а  также отрегулировать запорную арматуру оконных блоков, заменить  уплотнительные резинки;  

-на стене справа от окна произвести работы по частичной замене  штукатурного и окрасочного слоя, включая предварительные работы по  обработке стен противогрибковым составом, произвести замену и оклейку  обоев;  

Кладовая - по стенам справа и слева, в местах примыкания стен и  потолка произвести работы по частичной замене штукатурного и  окрасочного слоя, включая предварительные работы по обработке стен  противогрибковым составом, восстановить отделку помещения в  соответствии с проектом (шифр 06/10/14п);  

Угловая комната справа: 

-произвести работы по демонтажу откосов оконного и балконного блока,  подоконника, работы по заделке щелей, работы по заполнению монтажных  швов пенным утеплителем, далее провести работы по восстановлению  оконных и балконных откосов, отрегулировать запорную арматуру оконных  блоков, заменить уплотнительные резинки;  

-заменить неисправный механизм балконной двери; -на стене слева от окна произвести замену и оклейку обоев. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Импульс» в  доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья О.Н. Лесникова