Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-13643/2021

29 июня 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  24 июня 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  29 июня 2021 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Стрельчук У.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания единой энергетической системы" (адрес:  Россия, 117630, МОСКВА, АКАДЕМИКА ЧЕЛОМЕЯ 5А, -, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "СтройМонтажИнвест" (адрес:  Россия 115114, Москва, 1-й Кожевнический 

<

...>, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании

 

при участии

- от истца: ФИО2, дов. от 11.06.2021

- от ответчика: не явился, извещен 

 

установил:

публичное акционерное общество «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с  общества с ограниченной ответственностью Группа компаний «СтройМонтажИнвест» (далее – ответчик) 46 951 912 руб. неустойки за нарушение обязательств по договору от 28.05.2018 № 624/ИД.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, представителя для участия в судебном заседании не направил; отзыв не представил.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в его отсутствие.

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил, что между сторонами заключен договор от 28.05.2018 № 624/ИД на выполнение комплекса работ (РД, СМР, НПР) по 1 этапу в части переустройств газопроводов, нефтепроводов, сопутствующих кабелей связи по титулу «Строительство ПС 500 кВ Белобережная с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская-Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская-Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская-Брянская».

Общая стоимость работ по договору составила 148 581 758,20 руб.

Срок выполнения работ, с учетом дополнительного соглашения от 27.06.2019 № 1, не позднее 31.07.2019.

Нарушение сроков выполнения работ явилось основанием для начисления ответчику, предусмотренной пунктом 21.2.1 договора неустойки, размер которой по состоянию на 11.02.2021 составил 46 951 912 руб.

Поскольку ответчик претензию с требованием уплатить неустойку оставил без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

 В соответствии с положениями статей 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств можно обеспечивать неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 ГК РФ).

Материалами дела подтверждается, нарушение сроков выполнения работ, в связи с чем у истца возникло право на взыскание неустойки. 

Проверив расчет, суд признал его обоснованным, рассчитанным в соответствии с условиями договора и подлежащим применению.

Ответчик расчет не оспорил; ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ не заявил.

На основании изложенного требования истца подлежат удовлетворении в полном объеме с отнесением на ответчика расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью Группа компаний «СтройМонтажИнвест» в пользу публичного акционерного общества «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы» 46 951 912 руб. неустойки за нарушение обязательств по договору от 28.05.2018 № 624/ИД; 200 000 руб. в качестве возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                                    Стрельчук У.В.