﻿

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

http://kostroma.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А31-3132/2021

г. Кострома

07 декабря 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 ноября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 07 декабря 2021 года.

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Хомяка Николая Георгиевича, при ведении протокола судебного заседания секретарем Комисаровой В.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области (ИНН 4401009390, ОГРН 1024400515820) к федеральному государственному унитарному предприятию "Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний" (ОГРН 1020700688832, ИНН 0708006803) о взыскании 1 448 350 руб. 36 коп. пени за просрочку исполнения обязательств по контракту (с учетом уточнения),   

при участии в заседании:

от истца:  Самсонов А.В. (доверенность от 15.07.2021),

от ответчика: не явился, извещен;

установил следующее:    

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области (далее – истец, УФСИН по КО)  обратилось в арбитражный суд с иском к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – ответчик, предприятие) о взыскании 1 749 151 руб. 17 коп. пени за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту на выполнение полного комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Исправительная колония № 7» (пос. Бычиха, Костромская обл.) строительство общежития на 100 мест» № 1818320804012001411000031/401 от 12.12.2018.

В судебном заседании по правилам статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 17.11.2021 года до 16 час. 10 мин.

В судебном заседании истец уточнил заявленные требования и просил взыскать с ответчика 1 448 350 руб. 36 коп. пени за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту на выполнение полного комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Исправительная колония № 7» (пос. Бычиха, Костромская обл.) строительство общежития на 100 мест» № 1818320804012001411000031/401 от 12.12.2018.

Уточнение принято судом.

Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, представил отзыв на уточненные требования, в соответствии с которым против удовлетворения заявленных требований возражал, в случае удовлетворения исковых требований просил применить положения статьи 333 ГК РФ и снизить размер неустойки.

Суд, руководствуясь частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), рассмотрел дело в отсутствие представителя ответчика. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

12.12.2018 между управлением (государственный заказчик) и предприятием (генеральный подрядчик) заключен государственный контракт № 401 (далее – контракт), по условиям которого генеральный подрядчик обязался в установленный графиком срок выполнить комплекс работ по строительству и вводу   в эксплуатацию объекта – «Исправительная колония № 7 (пос. Бычиха, Костромская область) строительство общежития на 100 мест», сдать результат работ, а государственный заказчик обязался создать условия для выполнения работ, осуществить их приемку и оплатить за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств (пункт 1.1 договора). 

Цена Контракта составила 39 728 829,00 рублей (пункт 2.1 контракта). 

Пунктом 2.10 контракта предусмотрено, что этапом выполнения работ считается объем работ, выполненный генподрядчиком и принятый заказчиком в очередной месяц, подтвержденные актами выполненных работ (формы КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), в соответствии с графиком выполнения работ.

Из условий пункта 3.9. контракту следует, что оплата выполненных генподрядчиком работ осуществляется в сроки и в размерах, которые установлены графиком оплаты выполненных работ, являющимся неотъемлемой частью контракта (приложение №4), с учетом графика выполнения работ, исходя из объема работ и цены Контракта, после подписания соответствующих актов о приемке выполненных работ. 

Датой начала производства работ, указанных в пункте 1.1 договора является следующая за датой подписания государственного контракта (пункт 5.1. договора). 

В соответствии с пунктом 5.2 договора, контракт исполняется поэтапно в соответствии с графиком исполнения контракта. 

В рамках каждого отдельного этапа исполнения контракта Подрядчик обязан выполнять работы и сдавать их Заказчику по частям – по завершении каждого отчетного периода, оплата в котором предусмотрена графиком оплаты (приложение № 4). Отчетный период - это период с 21-го числа предшествующего периода по 20-ое число включительно текущего периода, если иное не установлено настоящим абзацем. Первый отчетный период этапа № 1 представляет собой период с даты, следующей за датой заключения Контракта по 20-ое число включительно первого этапа, в котором заключен контракт. Первый отчетный период этапа № 2 представляет собой период с 20 числа текущего с заключением контракта месяца по 20.12.2018 включительно. Последний отчетный месяц этапа № 12 представляет собой период с 20.11.2019 по 31.11.2019 г. включительно (пункт 5.3 контракта). 

Сроки завершения работ по каждому отдельному этапу исполнения Контракт и по каждому отчетному периоду являются промежуточными сроками. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы (пункт 5.4 контракта). 

Пунктом 16.4 контракта, предусмотрено, что в случае просрочки Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Генеральному подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Генеральным подрядчиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и установлена Контрактом в размере, указанном в настоящем пункте (пункт 16.8 контракта). 

По утверждению истца, ответчик выполнял работы с нарушением графика их выполнения работ, что является основанием для начисления ответчику пени за просрочку выполнения отдельных этапов работ. 

28.01.2021 года истцом ответчику была направлена претензия с требованием оплаты начисленной суммы пени в добровольном порядке. (л.д. 8 том 1)

Требование истца ответчик оставил без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. 

Ответчик, возражая против исковых требований, указал, что истец не своевременно передал площадку под строительство, проектно-сметная документация была передана ответчику с многочисленными нарушениями, в связи с чем, несвоевременное выполнение работ ответчиком произошло по вине истца. 

Оценив представленные в дело доказательства на основании статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд приходит к следующим выводам. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота.

В силу статьи 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В соответствии с положениями статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

Сдача результата работ подрядчиком, и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

В соответствии со статьей 329 (пунктом 1) ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В статье 330 (пункте 1) ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу части 4 статьи 34 Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно пункту 6 статьи 34 Закон № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (пункт 7 статьи 34 Закон № 44-ФЗ).

Из совокупности условий контракта, содержащихся в пунктах 2.10, 5.2., 5.3., 5.4., несвоевременное выполнения генподрядчиком отдельных этапов работ, начальные и конечные сроки которых согласованы сторона в приложении №2 к контракту, является основанием для привлечения Ответчика к ответственности в виде пени за просрочку исполнения таких обязательств, расчет которой определен как положениями Закона №44-ФЗ, так и пунктом 16.8. Контракта   

Представленными в материалы дела актами приемки выполненных работ (формы КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) от  25.12.2019 № 3, от 20.03.2020 года № 4, от 15.05.2020 года № 5, от 23.06.2020 года № 6, от 22.07.2020 года № 7, от 22.09.2020 года № 8, от 30.09.2020 года № 9, от 11.11.2020 года № 10, от 20.11.2020 № 11, от 17.12.2020 № 12, от 24.12.2020 № 13, (л.д. 35-104 том 1) подтверждается, что ответчик в нарушение согласованного графика выполнения работ допустил просрочку отдельных этапов работ, что, в свою очередь, является основанием  для привлечения последнего к ответственности в виде пени. 

Фактическое выполнение ответчиком работ, и приемка заказчиком данных работ сторонами не оспаривается. 

Доводы ответчика относительно несвоевременности передачи заказчиком строительной площадки, проектно-сметной документации, геодезической основы, нарушения сроков регистрации журналов работ, недостатков проектной документации были предметом рассмотрения Арбитражного суда Костромской области в рамках дела № А31-4182/2020, указанным доводам дана надлежащая оценка, что в свою очередь повлекло частичное удовлетворение заявленных требований (часть 2 статьи 69 АПК РФ).

Между тем, в рассматриваемом случае истцом предъявлены к взысканию пени за последующие периоды.

Оценивая доводы сторон, относительно порядка начисления пеней применительно к условиям заключенного контракта и фактическим обстоятельствам дела, суд приходит к выводу, что истцом неправомерно производится начисления неустойки на всю стоимость отдельного этапа выполнения работ, без учета частично принятых в рамках такого этапа объемов работ, что противоречит положениям статей 309, 330, 753 ГК РФ и условиям пункта 16.8 контракта.

Кроме того, суд отмечает, что при определении в соответствии с пунктом 16.8 контракта размера неустойки в отношении частично принятых работ надлежит применять ставку рефинансирования (ключевую ставку) ЦБ РФ, действующую в момент принятия таких работ.

С учетом указанных обстоятельства размер пеней за просрочку выполнения отдельных этапов работ по контракту подлежит определению следующим образом:

1. Разборка проездов, п. 1 (Акт о приемке выполненных работ № 13 от 24.12.2020) - период просрочки с 01 декабря 2019 года по 24 декабря 2020 года составляет 390 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

2 258 * 4,25%/300 * 390 = 124 рубля 75 копеек.

2. Перенос ограждения, п. 2 (Акт о приемке выполненных работ № 11 от 20.11.2020) - период просрочки с 01 декабря 2019 года по 20 ноября 2020 года составляет 356 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

31 546 * 4,25%/300 * 356 = 1 590 рублей 97 копеек.

3. Демонтаж тепловых сетей, п. 3 (Акт о приемке выполненных работ № 10 от

11.11.2020) - период просрочки с 01 декабря 2019 года по 11 ноября 2020 года составляет 347 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

43 842 * 4,25%/300 * 347 = 2 155 рублей 20 копеек.

4. Общестроительные работы выше отм. + 0,000. (стены, перегородки, перемычки, вентканалы и вентшахты, монолитное перекрытие, монолитное покрытие, кровля, окна, оконные решетки, двери, наружная отделка, внутренняя отделка, полы, лестницы, короб зашивки стояков, подпольный канал, вход № 1-4)

Часть работ на сумму 2 096 937 рублей 11 копеек была выполнена 25 декабря 2019 года (Акт о приемке выполненных работ № 3 от 25 декабря 2019 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 25 декабря 2019 года составляет 25 дней, ставка рефинансирования - 6,25%.

18 411 395,34 * 6,25%/300 * 25 = 95 892 рубля 68 копеек.

Часть работ на сумму 2 989 988 рублей 66 копеек была выполнена 20 марта 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 4 от 20 марта 2020 года).

Период просрочки с 26 декабря 2019 года по 20 марта 2020 года составляет 86 дней, ставка рефинансирования - 6,0%.

16 314 458,23 * 6,0%/300 * 86 = 280 608 рублей 68 копеек.

Часть работ на сумму 1 872 904 рубля 57 копеек была выполнена 15 мая 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 5 от 15 мая 2020 года).

Период просрочки с 21 марта 2020 года по 15 мая 2020 года составляет 56 дней, ставка рефинансирования - 5,5%.

13 324 469,57 * 5,5%/300 * 56 = 136 797 рублей 89 копеек.

Часть работ на сумму 1 557 768 рублей 00 копеек была выполнена 23 июня 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 6 от 23 июня 2020 года).

Период просрочки с 16 мая 2020 года по 23 июня 2020 года составляет 39 дней, ставка рефинансирования - 4,5%.

11 451 565 * 4,5%/300 * 39 = 66 991 рубль 66 копеек.

Часть работ на сумму 3 417 763 рубля 00 копеек была выполнена 22 июля 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 7 от 22 июля 2020 года).

Период просрочки с 24 июня 2020 года по 22 июля 2020 года составляет 29 дней, ставка рефинансирования - 4,5%.

9 893 797 * 4,5%/300 * 29 = 43 038 рублей 02 копейки.

Часть работ на сумму 2 926 618 рублей 00 копеек была выполнена 22 сентября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 8 от 22 сентября 2020 года).

Период просрочки с 23 июля 2020 года по 22 сентября 2020 года составляет 62 дня, ставка рефинансирования - 4,25%.

6 476 034 * 4,25%/300 * 62 = 56 881 рубль 16 копеек.

Часть работ на сумму 2 053 629 рублей 00 копеек была выполнена 11 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 10 от 11 ноября 2020 года).

Период просрочки с 23 сентября 2020 года по 11 ноября 2020 года составляет 50 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

3 549 416 * 4,25%/300 * 50 = 25 141 рубль 69 копеек.

Часть работ на сумму 936 625 рублей 00 копеек была выполнена 20 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 11 от 20 ноября 2020 года).

Период просрочки с 12 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года составляет 9 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

1 495 787 * 4,25%/300 * 9 = 1 907 рублей 13 копеек.

Часть работ на сумму 524 982 рублей 00 копеек была выполнена 17 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 12 от 17 декабря 2020 года).

Период просрочки с 21 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года составляет 27 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

559 162 * 4,25%/300 * 27 = 2 138 рублей 79 копеек.

Часть работ на сумму 34 180 рублей 00 копеек была выполнена 24 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 13 от 24 декабря 2020 года).

Период просрочки с 18 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года составляет 7 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

34 180 * 4,25%/300 * 7 = 33 рубля 90 копеек.

5. Внутренние сети водопровода, (хоз-питьевой водопровод, горячее водоснабжение, изоляционные работы, строительные работы), п. 6.

Часть работ на сумму 245 166 рублей 00 копеек была выполнена 30 сентября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 9 от 30 сентября 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 30 сентября 2020 года составляет 305 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

406 248 * 4,25%/300 * 305 = 17 553 рубля 30 копеек.

Часть работ на сумму 161 082 рубля 00 копеек была выполнена 11 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 10 от 11 ноября 2020 года).

Период просрочки с 01 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года составляет 42 дня, ставка рефинансирования - 4,25%.

161 082 * 4,25%/300 * 42 = 958 рублей 44 копейки.

6. Внутренние сети канализации, (сантехнические работы, строительные работы, земляные работы), п. 7.

Часть работ на сумму 154 317 рублей 00 копеек была выполнена 30 сентября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 9 от 30 сентября 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 30 сентября 2020 года составляет 305 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

282 483 * 4,25%/300 * 305 = 12 205 рублей 62 копейки.

Часть работ на сумму 124 882 рубля 00 копеек была выполнена 11 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 10 от 11 ноября 2020 года).

Период просрочки с 01 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года составляет 42 дня, ставка рефинансирования - 4,25%.

128 166 * 4,25%/300 * 42 = 762 рубля 59 копеек.

Часть работ на сумму 3 284 рубля 00 копеек была выполнена 17 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 12 от 17 декабря 2020 года).

Период просрочки с 12 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года составляет 36 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

3 284 * 4,25%/300 * 36 = 16 рублей 75 копеек.

7. Вентиляция, (система В-1,2,3,4,5,6,7,8,9 система ВЕ- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), п. 8

Часть работ на сумму 159 903 рубля 00 копеек была выполнена 17 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 12 от 17 декабря 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 17 декабря 2020 года составляет 383 дня, ставка рефинансирования - 4,25%.

173 476 * 4,25%/300 * 383 = 9 412 рублей 52 копейки.

Часть работ на сумму 13 573 рубля 00 копеек была выполнена 24 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 13 от 24 декабря 2020 года).

Период просрочки с 18 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года составляет 7 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

13 573 * 4,25%/300 * 7 = 13 рублей 46 копеек.

8. Отопление, (сантехнические работы, строительные работы), п. 9.

Часть работ на сумму 355 325 рублей 00 копеек была выполнена 30 сентября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 9 от 30 сентября 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 30 сентября 2020 года составляет 305 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

436 076 * 4,25%/300 * 305 = 18 842 рубля 12 копеек.

Часть работ на сумму 80 751 рубль 00 копеек была выполнена 11 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 10 от 11 ноября 2020 года).

Период просрочки с 01 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года составляет 42 дня, ставка рефинансирования - 4,25%.

80 751 * 4,25%/300 * 42 = 480 рублей 47 копеек.

9. ИТП, (сантехнические работы, изоляционные работы), п. 10.

Часть работ на сумму 164 599 рублей 00 копеек была выполнена 11 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 10 от 11 ноября 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 11 ноября 2020 года составляет 347 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

318 280 * 4,25%/300 * 347 = 15 646 рублей 11 копеек.

Часть работ на сумму 153 681 рубль 00 копеек была выполнена 17 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 12 от 17 декабря 2020 года).

Период просрочки с 12 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года составляет 36 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

153 681 * 4,25%/300 * 36 = 783 рубля 77 копеек.

10. Пожарная сигнализация, п. 11.

Часть работ на сумму 148 039 рублей 00 копеек была выполнена 20 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 11 от 20 ноября 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 20 ноября 2020 года составляет 356 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

187 742 * 4,25%/300 * 356 = 9 468 рублей 45 копеек.

Часть работ на сумму 39 703 рубля 00 копеек была выполнена 17 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 12 от 17 декабря 2020 года).

Период просрочки с 21 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года составляет 27 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

39 703 * 4,25%/300 * 27 = 151 рубль 86 копеек.

11. Оповещение о пожаре, п. 12.

Часть работ на сумму 51 634 рубля 00 копеек была выполнена 20 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 11 от 20 ноября 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 20 ноября 2020 года составляет 356 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

53 103 * 4,25%/300 * 356 = 2 678 рублей 16 копеек.

Часть работ на сумму 1 469 рублей 00 копеек была выполнена 17 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 12 от 17 декабря 2020 года).

Период просрочки с 21 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года составляет 27 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

1 469 * 4,25%/300 * 27 = 5 рублей 62 копейки.

12. Охранная сигнализация, п. 13.

Часть работ на сумму 223 539 рублей 00 копеек была выполнена 20 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 11 от 20 ноября 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 20 ноября 2020 года составляет 356 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

272 187 * 4,25%/300 * 356 = 13 727 рублей 30 копеек.

Часть работ на сумму 48 648 рублей 00 копеек была выполнена 17 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 12 от 17 декабря 2020 года).

Период просрочки с 21 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года составляет 27 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

48 648 * 4,25%/300 * 27 = 186 рублей 08 копеек.

13. Видеонаблюдение, п. 14.

Часть работ на сумму 86 669 рублей 00 копеек была выполнена 20 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 11 от 20 ноября 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 20 ноября 2020 года составляет 356 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

97 522 * 4,25%/300 * 356 = 4 918 рубль 36 копеек.

Часть работ на сумму 10 853 рубля 00 копеек была выполнена 17 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 12 от 17 декабря 2020 года).

Период просрочки с 21 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года составляет 27 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

10 853 * 4,25%/300 * 27 = 41 рубль 51 копейка.

14. Технологическое оборудование, (немонтируемое оборудование, монтируемое оборудование), п. 15.

Часть работ на сумму 392 702 рубля 00 копеек была выполнена 11 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 10 от 11 ноября 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 11 ноября 2020 года составляет 347 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

1 803 606 * 4,25%/300 * 347 = 88 662 рубля 27 копеек.

Часть работ на сумму 369 364 рубля 00 копеек была выполнена 20 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 11 от 20 ноября 2020 года).

Период просрочки с 12 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года составляет 9 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

1 410 904 * 4,25%/300 * 9 = 1 798 рублей 90 копеек.

Часть работ на сумму 1 041 540 рублей 00 копеек была выполнена 17 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 12 от 17 декабря 2020 года).

Период просрочки с 21 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года составляет 27 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

1 041 540 * 4,25%/300 * 27 = 3 983 рубля 89 копеек.

15. Электроосвещение, (монтажные работы), п. 16.

Часть работ на сумму 63 929 рублей 00 копеек была выполнена 22 июля 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 7 от 22 июля 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 22 июля 2020 года составляет 235 дней, ставка рефинансирования - 4,5%.

213 082 * 4,5%/300 * 235 = 7 511 рублей 14 копеек.

Часть работ на сумму 44 775 рублей 00 копеек была выполнена 11 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 10 от 11 ноября 2020 года).

Период просрочки с 23 июля 2020 года по 11 ноября 2020 года составляет 112 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

149 153 * 4,25%/300 * 112 = 2 366 рублей 56 копеек.

Часть работ на сумму 98 408 рублей 00 копеек была выполнена 20 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 11 от 20 ноября 2020 года).

Период просрочки с 12 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года составляет 9 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

104 378 * 4,25%/300 * 9 = 133 рубля 08 копеек.

Часть работ на сумму 5 970 рублей 00 копеек была выполнена 24 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 13 от 24 декабря 2020 года).

Период просрочки с 21 ноября 2020 года по 24 декабря 2020 года составляет 34 дня, ставка рефинансирования - 4,52%.

5 970 * 4,25%/300 * 34 = 28 рублей 76 копеек.

16. Электрооборудование, (монтажные работы), п. 17.

Часть работ на сумму 19 834 рублей 00 копеек была выполнена 22 июля 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 7 от 22 июля 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 22 июля 2020 года составляет 235 дней, ставка рефинансирования - 4,5%.

556 544 * 4,5%/300 * 235 = 19 618 рублей 18 копеек.

Часть работ на сумму 246 938 рублей 00 копеек была выполнена 11 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 10 от 11 ноября 2020 года).

Период просрочки с 23 июля 2020 года по 11 ноября 2020 года составляет 112 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

536 710 * 4,25%/300 * 112 = 8 515 рублей 80 копеек.

Часть работ на сумму 114 595 рублей 00 копеек была выполнена 20 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 11 от 20 ноября 2020 года).

Период просрочки с 12 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года составляет 9 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

289 772 * 4,25%/300 * 9 = 369 рублей 50 копеек.

Часть работ на сумму 175 177 рублей 00 копеек была выполнена 24 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 13 от 24 декабря 2020 года).

Период просрочки с 21 ноября 2020 года по 24 декабря 2020 года составляет 34 дня, ставка рефинансирования - 4,52%.

175 177 * 4,25%/300 * 34 = 843 рубля 77 копеек.

17. Автоматизация ИТП, (электрооборудование, монтажные изделия, кабели и провода), п. 18.

Часть работ на сумму 30 113 рублей 00 копеек была выполнена 20 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 11 от 20 ноября 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 20 ноября 2020 года составляет 356 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

43 285 * 4,25%/300 * 356 = 2 183 рубля 00 копеек.

Часть работ на сумму 13 172 рубля 00 копеек была выполнена 17 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 12 от 17 декабря 2020 года).

Период просрочки с 21 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года составляет 27 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

13 172 * 4,25%/300 * 27 = 50 рублей 38 копеек.

18.Внутренние сети связи, (телефонизация, радиовещание), п. 19.

Часть работ на сумму 38 991 рубль 00 копеек была выполнена 20 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 11 от 20 ноября 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 20 ноября 2020 года составляет 356 дней, ставка рефинансирования - 4,25%

52 549 * 4,25%/300 * 356 = 2 650 рублей 22 копейки.

Часть работ на сумму 13 558 рублей 00 копеек была выполнена 17 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 12 от 17 декабря 2020 года).

Период просрочки с 21 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года составляет 27 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

13 558 * 4,25%/300 * 27 = 51 рубль 86 копеек.

19.Наружные электрические сети 0,4 Кв от РЩ-0,4 до здания, (монтажные работы, земляные работы, разработка и восстановление тротуара), п. 21.

Часть работ на сумму 54 340 рублей 00 копеек была выполнена 23 июня 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 5 от 23 июня 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 23 июня 2020 года составляет 206 дней, ставка рефинансирования - 4,5%.

60 379 * 4,5%/300 * 206 = 1 865 рублей 71 копейка.

Часть работ на сумму 7 411 рублей 00 копеек была выполнена 24 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 13 от 24 декабря 2020 года).

Период просрочки 24 июня 2020 года по 24 декабря 2020 года составляет 184 дня, ставка рефинансирования - 4,25%.

7 411 * 4,25%/300 * 184 = 193 рубля 18 копеек.

20. Наружное освещение, п. 23 (Акт о приемке выполненных работ № 12 от

17.12.2020) - период просрочки с 01 декабря 2019 года по 17 декабря 2020 года составляет 383 дня, ставка рефинансирования - 4,25%.

34 727 * 4,25%/300 * 383 = 1 884 рубля 23 копейки.

21. Наружные сети связи, п. 24 (Акт о приемке выполненных работ № 12 от

17.12.2020) - период просрочки с 01 декабря 2019 года по 17 декабря 2020 года составляет 383 дня, ставка рефинансирования - 4,25%.

27 595 * 4,25%/300 * 383 = 1 497 рублей 26 копеек.

22. Хоз-питьевой водопровод, -В1- (земляные работы, сантехнические работы, строительные работы, изоляционные работы), п. 25.

Часть работ на сумму 67 553 рубля 00 копеек была выполнена 11 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 10 от 11 ноября 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 11 ноября 2020 года составляет 347 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

86 124 * 4,25%/300 * 347 = 4 233 рубля 71 копейка.

Часть работ на сумму 18 571 рубль 00 копеек была выполнена 17 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 12 от 17 декабря 2020 года).

Период просрочки с 12 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года составляет 36 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

18 571 * 4,25%/300 * 36 = 94 рубль 71 копейка.

23. Наружные сети бытовой канализации, -К1- (земляные работы, сантехнические работы, строительные работы), п. 26 (Акт о приемке выполненных работ № 10 от 11.11.2020) - период просрочки с 01 декабря 2019 года по 11 ноября 2020 года составляет 347 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

100 859 * 4,25%/300 * 347 = 4 958 рублей 06 копеек.

24. Внеплощадочные тепловые сети, от т. А до т.АА (сантехнические работы, узлы трубопроводов, реконструкция существующих опор, опоры, изоляционные работы), п. 27.

Часть работ на сумму 262 208 рублей 00 копеек была выполнена 22 сентября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 8 от 22 сентября 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 22 сентября 2020 года составляет 297 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

693 257 * 4,25%/300 * 297 = 29 168 рублей 79 копеек.

Часть работ на сумму 431 049 рублей 00 копеек была выполнена 11 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 10 от 11 ноября 2020 года).

Период просрочки с 23 сентября 2020 года по 11 ноября 2020 года составляет 50 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

431 049 * 4,25%/300 * 50 = 3 053 рубля 26 копеек.

25. Надземные тепловые сети, (сантехнические работы, узлы трубопроводов, опоры, сбросной колодец, изоляционные работы), п. 28 (Акт о приемке выполненных работ № 10 от 11.11.2020) - период просрочки с 01 декабря 2019 года по 11 ноября 2020 года составляет 347 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

107 405 * 4,25%/300 * 347 = 5 279 рублей 85 копеек.

26. Благоустройство территории, (проезды, отмостка), п. 30.

Часть работ на сумму 143 271 рубль 00 копеек была выполнена 20 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 11 от 20 ноября 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 20 ноября 2020 года составляет 356 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

257 942 * 4,25%/300 * 356 = 13 008 рублей 87 копеек.

Часть работ на сумму 114 671 рубль 00 копеек была выполнена 24 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 13 от 24 декабря 2020 года).

Период просрочки с 21 ноября 2020 года по 24 декабря 2020 года составляет 34 дня, ставка рефинансирования - 4,25%.

114 671 * 4,25%/300 * 34 = 552 рубля 33 копейки.

27. Ограждение территории, (земляные работы, фундаменты, ограждение, отмостка, окраска металлоконструкций), п. 32.

Часть работ на сумму 337 857 рублей 00 копеек была выполнена 11 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 10 от 11 ноября 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 11 ноября 2020 года составляет 347 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

560 357 * 4,25%/300 * 347 = 27 546 рублей 21 копейка.

Часть работ на сумму 145 804 рубля 00 копеек была выполнена 20 ноября 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 11 от 20 ноября 2020 года).

Период просрочки с 12 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года составляет 9 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

222 500 * 4,25%/300 * 9 = 283 рубля 69 копеек.

Часть работ на сумму 76 696 рублей 00 копеек была выполнена 17 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 12 от 17 декабря 2020 года).

Период просрочки с 21 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года составляет 27 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

76 696 * 4,25%/300 * 27 = 293 рубля 36 копеек.

Размер пеней в отношении невыполненных работ, которые не были в полном объеме приняты по актам выполненных работ, но были предусмотрены графиком выполнения работ, по контракту подлежит определению следующим образом:

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, (на территории, в здании, универсальная кабина для МГН, душевая для МГН, ограждение пандуса), п. 20 (работы не завершены).

Часть работ на сумму 42 583 рубля 00 копеек была выполнена 17 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 12 от 17 декабря 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 17 декабря 2020 года составляет 383 дня, ставка рефинансирования - 4,25%.

121 414 * 4,25%/300 * 383 = 6 587 рублей 72 копейки.

Часть работ на сумму 2 219 рублей 00 копеек была выполнена 24 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 13 от 24 декабря 2020 года).

Период просрочки с 18 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года составляет 7 дней, ставка рефинансирования - 4,25%.

78 831 * 4,25%/300 * 7 = 78 рублей 17 копеек.

Не выполнены работы на сумму 76 612 рублей 00 копеек.

Период просрочки с 25 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года составляет 7 дней, ставка рефинансирования - 7,5%.

76 612 * 7,5%/300 * 7 = 134 рубля 07 копеек.

2. Озеленение, п. 31 (работы не выполнены) - период просрочки с 01 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года составляет 397 дней, ставка рефинансирования - 7,5%.

27 901 * 7,5%/300 * 397 = 2 769 рублей 17 копеек.

3. Малые формы, (площадка для сушки белья, малые формы), п. 33 (работы не выполнены) - период просрочки с 01 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года составляет 397 дней, ставка рефинансирования - 7,5%.

55 266 * 7,5%/300 * 397 = 5 485 рублей 15 копеек.

4. Вертикальная планировка, п. 29 (работы не завершены).

Часть работ на сумму 30 189 рублей 00 копеек была выполнена 17 декабря 2020 года (Акт о приемке выполненных работ № 12 от 17 декабря 2020 года).

Период просрочки с 01 декабря 2019 года по 17 декабря 2020 года составляет 383 дня, ставка рефинансирования - 4,25%.

465 483 * 4,25%/300 * 383 = 25 256 рублей 33 копейки.

Не выполнены работы на сумму 435 294 рубля 00 копеек.

Период просрочки с 18 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года составляет 14 дней, ставка рефинансирования - 7,5%.

435 294 * 7,5%/300 * 14 = 1 523 рубля 53 копейки.

Общий размер неустойки, подлежащий взысканию с Ответчика в связи с просрочкой выполнения отдельных этапов работ и не выполненных работ согласно графику выполнения работ, составляет 1 095 669 руб. 71 коп.

Ответчик в своем отзыве ссылался на применение норм статьи 333 ГК РФ, считает размер взыскиваемой неустойки явно несоразмерной последствиям нарушения обязательства.

В силу пункта 1 статьи 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Право снижения размера неустойки как имущественной ответственности предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Вместе с тем, решение суда о снижении неустойки не может быть произвольным. Уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий не должно допускаться, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст. 1 ГК РФ), а также с принципом состязательности (ст. 9 АПК РФ).

Как разъясняется в пункте 71 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление №7) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 ГК РФ только при наличии обоснованного заявления со стороны ответчика, являющегося или коммерческой организацией, или индивидуальным предпринимателем, или некоммерческой организацией при осуществлении ею приносящей доход деятельности. 

В соответствии с пунктом 73 вышеуказанного Постановления №7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

В пункте 75 Постановления № 7 разъяснено, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ).

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период.

Критериями для установления несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др. (п. 2 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 №17 "Обзор практики применения арбитражными судами ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации").

Исследовав представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд считает, что правовые основания для снижения размера неустойки отсутствуют, поскольку ходатайство ответчика о снижении неустойки,  не содержит правового мотивированного обоснования для уменьшения размера начисленной неустойки, исключительных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости снижения неустойки, не установлено, доказательств несоразмерности последствиям нарушения обязательств Ответчиком не представлены.

В силу положений статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Таким образом, заявленные требования о взыскании с ответчика пени признаются судом правомерными и обоснованными и подлежат удовлетворению частично.

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований по правилам статьи 110 АПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь со статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия "Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний" (ОГРН 1020700688832, ИНН 0708006803) в пользу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области (ИНН 4401009390, ОГРН 1024400515820) 1 095 669 руб. 71 коп. неустойки.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия "Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний" (ОГРН 1020700688832, ИНН 0708006803) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 20 791 руб. 51 коп.

Ответчику предлагается добровольно уплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда в порядке, установленном в статье 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации и представить доказательства ее уплаты в арбитражный суд. 

При уплате государственной пошлины в платежном документе надлежит указывать следующий код бюджетной классификации (КБК) - 182 1 08 01000 01 1060 110.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.

Судья                                                   Н. Г. Хомяк