АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-4933/2023

город Саранск

28 мая 2024 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А.  при ведении протокола судебного заседания секретарем Петрушковой К.Н.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  

к обществу с ограниченной ответственностью "СК Термодом"  

об обязании устранить недостатки в выполненных работах и взыскании  3396400 руб. 45 коп. штрафов, 159520 руб. стоимости внесудебной экспертизы,  с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с  ограниченной ответственностью «СК Байкал», индивидуального  предпринимателя ФИО1, общество с ограниченной  ответственностью «Вулькано» и общество с ограниченной ответственностью  «Первая проектная компания»,  

при участии представителей: от истца: ФИО2, по доверенности № 923 от 08.04.2024, 

от ответчика: ФИО3, по доверенности от 22.01.2024,  от третьих лиц: не явились,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

1. Обязать в течение трех месяцев со дня вступления настоящего решения  в законную силу устранить недостатки выполненных работ в рамках  муниципальных контрактов № 08095000003190008320001 от 17.06.2019,  

 № 08095000003190019750001 от 23.09.2019 на выполнение работ по  строительству объекта: «Детский сад комбинированного вида «Красная  шапочка» и прилегающей к нему территории, расположенных по адресу:  Республика Мордовия, 

<

...>», а именно:  

устранить трещины на оштукатуренных и окрашенных поверхностях стен  помещений №№ 2, 25, 21 (2 этаж), помещений №№ 2, 22, 23, (1 этаж), на  лестничных пролетах 1 и 2 этажа, путем расшивки (расчистки) трещин, заделки  трещин цементной штукатуркой, проклейки трещин серпянкой (шириной 5 см),  шпаклевке трещин по серпянке, грунтовки стен, окраске стен в два слоя;  

в местах устранения трещин на оштукатуренных и окрашенных  поверхностях стен помещений №№ 2, 6, 12, 14, 15, 19, 21-23, 44, 49, 46 (1 этаж),  помещений №№ 1, 2, 21, 22, 25-30, 33 (2 этаж), провести грунтовку стен,  окраску стен в два слоя.  

устранить обратную тягу в системе вентиляции в помещениях №№ 6,12  (1 этаж), в помещении № 19 (2 этаж);  

устранить уступы до 2 мм между смежными керамическими плитками  напольными в помещении № 22 (1 этаж), путем демонтажа плитки,  выравнивания пола цементно-песчаным раствором, монтажа плитки;  

устранить отслоение керамической плитки от основания пола в  помещении № 21 (2 этаж);  

устранить трещины в настенной керамической плитке в помещениях №№  24-26, 28, 29, 45 (1 этаж), №№ .11,16,17, 10 (2 этаж) путем демонтажа  дефектной плитки (20x30) и монтажа новой плитки;  

устранить просветы в кровельном покрытии; 

устранить просадки асфальтобетонного покрытия тротуаров и отмостки  со всех сторон здания;  

устранить просадки асфальтобетонного покрытия проезда со стороны  фасада в осях «Е-А» по оси «1»;  

устранить отклонения ограждения от вертикали со стороны фасада в осях  «9-1» - 18 пог. м., по горизонтали со стороны фасада в осях «9-1» - 33 пог. м.;  

устранить течь воды из вентиляционной щахты дымоудаления;  заменить полотенцесушители.  

2. Установить для общества с ограниченной ответственностью «СК  «Термодом» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебную неустойку в  пользу Администрации Чамзинского муниципального района Республики  

Мордовия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) на случай неисполнения в  установленный срок настоящего решения в размере 1000руб. за каждый день  просрочки исполнения судебного акта.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК  «Термодом» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) штраф в размере 679280руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК «Термодом»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  госпошлину в сумме 45982руб.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.А. Кшняйкин