12022/2022-312346(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-13172/2021

г. Оренбург

19 сентября 2022 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Третьякова  Н.А. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Ильинская основная общеобразовательная школа Кувандыкского  городского округа Оренбургской области» (с.Ильинка, Кувандыкский  район, Оренбургская область, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Железобетон 2005»  (с.Медногорск, Оренбургская область, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) об обязании устранить недостатки работ, выполненных по  гражданско-правовому договору № 0353300267619000002 от 10.09.2019,  взыскании судебной неустойки в размере 10000 руб. за каждый день  неисполнения судебного акта.  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Железобетон  2005» в течение 1 (одного) месяца после вступления в законную силу  решения суда устранить недостатки работ, выполненных по гражданско-правовому договору № 0353300267619000002 от 10.09.2019, а именно:  выполнить следующие виды работ в указанном объеме:  

- разборка покрытый кровель: из рулонных материалов в количестве  831м2;  

- разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков,  сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. в количестве 47,1 м;  

- устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм в количестве 260 м2; 

- огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  кровельный ковер: битумной грунтовкой с её приготовлением в количестве  831м2;  

- устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя  в количестве 831м2;  

- устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  стенам и парапетам высотой: до 600 мм в количестве 105,15 м;  

- устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)  из листовой оцинкованной стали в количестве 27,34 м2.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Железобетон  2005» в пользу муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Ильинская основная общеобразовательная школа  Кувандыкского городского округа Оренбургской области» судебную  неустойку в размере 500 руб. за каждый день неисполнения судебного акта в  части устранения недостатков работ.  

В удовлетворении остальной части требований отказать.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Железобетон 2005» в пользу муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Ильинская основная  общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа  Оренбургской области» судебные расходы по оплате экспертизы в размере  40000 руб.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Железобетон 2005» в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6000 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Оренбургской области.  

Судья Н.А.Третьяков 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 06.12.2021 8:54:19

 Кому выдана Третьяков Николай Анатольевич