АРБИТРАЖНЫЙ СУД  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А32-57887/2021

г. Краснодар

07 июля 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 21.06.2022. Полный текст решения  изготовлен 07.07.2022.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Семушина А.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кваша В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ПАО «Россети Кубань» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ООО «Краснодарэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.09.2018 № 21106-18-00467304-1 за период с 19.09.2019 по 18.09.2020 в размере 638 779,07 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1 по доверенности 

от ответчика – ФИО2 по доверенности 

У С Т А Н О В И Л:

ПАО «Россети Кубань» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Краснодарэнерго» (далее – ответчик) о взыскании неустойки за период с 19.09.2019 по 18.09.2020 в размере 638 779,07 руб. Требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.09.2018 № 21106-18-00467304-1.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 14.06.2022 до 21.06.2022, публичное извещение о котором было опубликовано в сети интернет http://krasnodar.arbitr.ru/ согласно требованиям п.13 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках».

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал по заявленным требованиям.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ПАО «Россети Кубань» (сетевая организация) и ООО «Краснодарэнерго» (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.09.2018 № 21106-18-00467304-1, согласно которому сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) «КТП 6/0,4 кВ НС-11-6-1067п/1000 кВА, расположенной на земельном участке с к/н 23:43:0124041:3434, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 940 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется  технологическое присоединение 6 (кВ);

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 500 кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (п. 1 договора).

В соответствии с п. 10 размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.12.2017 № 66/2017-Э и составляет 686 483,88 руб., в том числе НДС 18%.

В соответствии с п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

Дополнительным соглашением от 16.03.2021 стороны согласовали, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору продлевается до 01.03.2021 включительно. 

Дополнительным соглашением от 16.03.2021 стороны изложили п. 5 договора в следующей редакции: «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению осуществляется сторонами в срок до 01.07.2021».

В соответствии с п. 4 договора в редакции дополнительного соглашения от 16.03.2021 технические условия № 03-06-1206-20 являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий до 28.11.2022. 

В обоснование исковых требований истец указывает, что ответчик в нарушение п. 8 договора о выполнении мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, в предусмотренный договором срок не уведомил. 

Нарушение условий вышеуказанного договора в части своевременного осуществления мероприятий по технологическому присоединению послужило истцу основанием для начисления неустойки и обращения в арбитражный суд с настоящим иском. 

Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения в суд с заявленными исковыми требованиями. 

При решении вопроса об обоснованности заявленных требований, суд руководствуется следующим.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон № 35-ФЗ), п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По названному договору сетевая организация обязуется реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятия по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, по согласованию с системным оператором технических условий, обеспечения готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, по урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Заказчик вносит сетевой организации плату по договору с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (п. 1 ст. 26 Закона № 35-ФЗ, п.п. 16, 17 Правил № 861).

Согласно пп. «в» п. 16 Правил № 861 договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в качестве существенных условий должен содержать положения об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб., уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 руб., уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Постановлением Правительства от 28.07.2017 № 895 п. 17 типовой формы договора изложен в следующей редакции: 

«Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки».

Аналогичные условия согласованы сторонами в п. 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.09.2018 № 21106-18-00467304-1.

Факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по договору подтверждается материалами дела и заявителем не оспаривается, в связи с этим требование о взыскании неустойки заявлено истцом правомерно.

Как было сказано ранее, в соответствии с п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора, т.е. до 17.09.2019. 

Дополнительным соглашением от 16.03.2021 стороны согласовали, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору продлевается до 01.03.2021 включительно.

Расчет неустойки производится сетевой организацией следующим образом. 

698 119,2 руб. (сумма договора с учетом ставки НДС 20%) х 366 (количество дней просрочки с 19.09.2019 по 18.09.2020) х 0,25% = 638 779,07 руб. 

Суд, проверив расчет истца, признал его составленным арифметически и методологически верно.

В настоящем случае изменение размера стоимости услуг по договору обусловлено положениями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», согласно которому с 01.01.2019 ставка налога на добавленную стоимость, предусмотренная п. 3 ст. 164 НК РФ, повышается с 18% до 20%.

Пунктом 4 ст. 5 Федерального закона предусмотрено, что ставка НДС в размере 20 процентов применяется в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных начиная с 01.01.2019.

Согласно материалам дела, акт об осуществлении технологического присоединения подписан сторонами 02.04.2021. 

Доводы ответчика о том, что сроки проведения мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств согласованы дополнительным соглашением к договору и продлены до 01.03.2021 включительно, отклоняются судом на основании следующего. 

В соответствии с ч. 3 ст. 453 ГК РФ, в случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

Сетевой организацией начислена спорная неустойка за период, когда действовала иная редакция договора в части срока выполнения мероприятий по техническому присоединению.

Так как срок исполнения обязательства был сторонами изменен только после наступления первоначального установленного сторонами срока исполнения обязательства, суд пришел к выводу, что у ответчика имелась просрочка исполнения обязательства.

Доводы ответчика в части того, что уже 28.12.2020 истцом был установлен факт выполнения ответчиком мероприятий технических условий также отклоняются судом, так как истцом предъявлена ко взысканию неустойка по 18.09.2020. 

В обоснование возражений ответчик также указывает, что дополнительным соглашением от 22.10.2020 стороны согласовали, что с момента подписания данного соглашения и до полного снятия мер по режиму повышенной готовности в Краснодарском крае, штрафные санкции за несвоевременное выполнение мероприятий, указанных в п. 5 договора, не начисляются.

Однако истцом предъявлен ко взысканию период неустойки с 19.09.2019 по 18.09.2020, дополнительное соглашение от 22.10.2020 заключено сторонами за пределами периода рассчитанной неустойки по договору. 

Коннтарсчет ответчика отклоняется судом как необоснованный и противоречащий материалам дела. 

Таким образом, суд полагает заявленные истцом требования о взыскании с ответчика неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 АПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «Краснодарэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ПАО «Россети Кубань» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за период с 19.09.2019 по 18.09.2020 в размере 638 779,07 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 776 руб. 

Выдать ПАО «Россети Кубань» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 488 руб., уплаченной на основании платежного поручения от 23.11.2021 № 3478. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края.

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке, если было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья   А.В.Семушин