13_3438410  

 

Арбитражный суд Мурманской области  ул. Академика Книповича,20, г.Мурманск,183038, http://murmansk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

дело № А42-9258/2022

город Мурманск

22 декабря 2022 года

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области  

решил:

обязать предпринимателя ФИО1 в срок до 1 июня 2023  года безвозмездно исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту  от 29 июня 2020 года и выполнить на территории центрального кладбища города  Кандалакша Мурманской области, следующие восстановительные работы по ремонту  городского воинского мемориала:  

- расчистка и заделка швов покрытия стен гранитной плиткой объектов № 1 - № 7  водонерастворимыми составами – 958,6 п.м.;  

- демонтаж облицовки стен из гранитных плит (объекты № № 1, 2, 4) – 3,8 м2; 

- облицовка стен гранитными плитками (объекты № № 1, 2, 4) – 3,8 м2.  

Взыскать с предпринимателя ФИО1 в доход федерального  бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня  принятия.  

Судья Лесной И.А.