Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-22814/2018

23 мая 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  15 мая 2018 года. Полный текст решения изготовлен  23 мая 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Орловой Е.А.,

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сидоровой А.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "НВХ РУС",

(место нахождения:  194361, п Левашово, Санкт-Петербург, ш Горское, 165/литера Д, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"

(место нахождения:  196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 1.081.360 руб. 39 коп., 

при участии:

от истца: адвокат Стогов А.Г. по дов. от 16.02.2018 г. №30,  

от ответчика: представитель ФИО1 по дов. от 22.12.2017 г. №532-17,  

 

установил:

Истец – общество с ограниченной ответственностью «НВХ РУС», обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ответчику – публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Ленэнерго», о взыскании 1.081.360 руб. 39 коп. неустойки и 23.814 руб. возмещения расходов по оплате госпошлины. 

Истец поддержал заявленные исковые требования. 

Ответчик против удовлетворения иска возражал, поддержал доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, ответчика, арбитражный суд установил, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Арбитражный суд установил:

Между АО «Санкт-Петербургские электрические сети» и ООО «НВХ РУС» (далее -Истец) были заключены договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11605/15-459/15/TIJI от 23.12.2015г. (далее - Договор) и два дополнительных соглашения к Договору (далее - ДС): ДС №1 от 30.12.2016г., ДС №2 от 11.04.2017г.

18.09.2017 г. ООО «НВХ РУС», АО «Санкт-Петербургские электрические сети» и ПАО «Ленэнерго» (далее - Ответчик) заключили Соглашение о замене стороны в договоре №11605/15-459/15/ТП (№ ОД-СП6-25184-15/47427-Э-15) от 23.12.2015 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее по тексту «Соглашение»).

В соответствии с Соглашением к ПАО «Ленэнерго» перешли все обязательства АО «Санкт-Петербургские электрические сети», в том числе, по возврату Заявителю денежных средств в размере 29 286 420,00 руб. s срок нф позднее 05.06.2017г.

Данная сумма была перечислена АО «Санкт-Петербургские электрические сети» на расчетный счет Истца только 02.11.2017 г.

Дополнительным соглашением от 30.11.2017 г. стороны установили, что перечисление денежных средств АО «Санкт-Петербургские электрические сети» на расчетный счет Истца считается исполнением со стороны ПАО «Ленэнерго».

Таким образом, именно ПАО «Ленэнерго» допущено нарушение срока возврата денежных средств в соответствии с Соглашением.

Согласно правилам статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст.395 ГК РФ при нарушении сроков возврата денежных средств с должника могут быть взысканы проценты за просрочку платежа.

Сумма неустойки, рассчитанная истцом составила 1.081.360 руб. 39 коп. за период с 06.06.2017 г. по 02.11.2017 г. 

Принимая во внимание вышеизложенное, исковые требования подлежат удовлетворению, с отнесением расходов по госпошлине, на основании статьи 110 АПК РФ, на Ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в пользу общества с ограниченной ответственностью «НВХ РУС» 1.081.360 руб. 39 коп. неустойки и 23.814 руб. расходов по оплате госпошлины. 

 

 Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                          Орлова Е.А.