АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-360/2019

г. Чебоксары

21 июня 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 июня 2019 года. Полный текст решения изготовлен 21 июня 2019 года. 

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе: судьи Данилова А.Р.,

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания ФИО1 и 

помощником судьи Ивановской С.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройсфера»

(

<

...>, ОГРН 

<

***>),

к администрации города Канаш Чувашской Республики

(

<

...> Победы, д. 24, ОГРН 

<

***>),

о понуждении заключить дополнительное соглашение

и встречному иску 

администрации города Канаш Чувашской Республики

(

<

...> Победы, д. 24, ОГРН 

<

***>),

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройсфера»

(

<

...>, ОГРН 

<

***>),

о понуждении выполнить работы, 

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - 

акционерного общества «Головной проектно-изыскательский институт «Чувашгражднпроект»,

при участии

представителя истца ФИО2 на основании доверенности от 01.11.2017, 

представителя ответчика ФИО3 на основании доверенности от 14.01.2019 № 11, ФИО4 на основании доверенности от 16.01.2019 № 14,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройсфера» (далее – Общество, истец) обратилось в арбитражный суд с иском к администрации города Канаш Чувашской Республики (далее – Администрация, ответчик) о понуждении в течение 5 дней с момента вступления в законную силу решения заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 03.08.2017 № 16 о продлении срока действия договора до 01.07.2019. 

Требование основано на статье 450 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивировано тем, что ввиду изменения ответчиком проектно-сметной документации выполнить работы в установленные контрактом сроки не представляется возможным. 

Определением суда от 14.02.2019 к производству принят встречный иск Администрации о понуждении Общества выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом, в соответствии с техническим заданием и взыскании 1525209 руб. 60 коп. пеней за период с 01.01.2019 по 15.01.2019. 

Встречные требования основаны на статьях 309, 310, 719, 720 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы уклонением истца от выполнения работ по муниципальному контракту от 03.08.2017 № 16. 

Протокольным определением от 09.04.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Головной проектно-изыскательский институт «Чувашгражднпроект» (далее – третье лицо). 

Определением суда от 21.06.2019 требование Администрации о взыскании 1525209 руб. 60 коп. пеней за период с 01.01.2019 по 15.01.2019 выделено в отдельное производство, делу присвоен номер А79-7059/2019. 

В заявлении от 13.06.2019 Общество заявило отказ от иска. 

Администрация в заявлении от 19.06.2019 № 4099 требование уточнило, просило обязать Общество выполнить следующие работы:

№ п/п

Наименование работ

Виды, характеристики, описание

Объемы работ

Дата окончания  работ

1

Блок емкостей механической очистки  и обработки осадка

Устройство блока емкостей механической очистки и обработки осадка предусматривается в монолитном железобетонном исполнении. Общие габариты 33×27 м, строительная глубина 5,3м.

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

2

Блок емкостей биологической очистки секции 1

Устройство блока емкостей биологической очистки из монолитного железобетона. Общие габариты 45×27, строительная глубина 5,3 м.

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

3

Блок емкостей биологической очистки секции 2

Устройство блока емкостей биологической очистки из монолитного железобетона. Общие габариты 45×27, строительная глубина 5,3 м.

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

4

Производственно-вспомогательное здание

Площадь застройки - 194,3 м²; Этажность -1; Количество этажей - 1; Строительный объем - 1225,7 м3; Общая площадь здания (в пределах внутренней поверхностей наружных стен-182,0 м²; Архитектурная высота - 7,87 м; Пожарная высота - 0,84 м. Здание с размерами в осях 10,20 х 16,0 м. Максимальная высота (по коньку) – 7,82 м. Расходно – хранилищные баки типа Еврокуб на металлическом поддоне емкостью 1м3 – 3 шт. Насос – дозатор GRUNDFOS DME 375-10 B в количестве 1 рабочий + 1 резервный.

1 здание

до 22 июля 2019 года

5

Иловая площадка, песковая площадка и площадка обезвоженного осадка

Устройство песковой площадки размером 6х8 м; площадки временного складирования осадка размером 50х20 м; иловой площадки размером 25х12 м из монолитного железобетона.

3 сооружения

до 22 июля 2019 года

6

Здание решеток

Площадь застройки - 58,7 м²; Этажность -1; Количество этажей - 1; Строительный объем - 267,9 м3; Общая площадь здания (в пределах внутренней поверхностей наружных стен) -54,7 м²; Архитектурная высота - 5,05 м; Пожарная высота - 1,35 м.  здание с размерами в осях 6,0 х 9,0 м. Максимальная высота (по коньку) – 4,90 м. Грузовые ворота (3х3м), площадью 37,7 м2; установка грабельных решеток - 2 шт. (1 рабочая + 1 резервная) РГЭ 900x900-6(Н); шнековых транспортеров безосевого типа ТШ (б) Э-220-4,0 - 2 шт.; шнекового обезвоживателя ПШЭ-200 – 2 шт.

1 сооружение

до 10 июля 2019 года

7

Насосная станция опорожнения

Площадь застройки - 24,8 м²; Этажность -1; Количество этажей- 2; Строительный объем - 144,0 м3; Общая площадь здания (в пределах внутренней поверхностей наружных стен) - 17,8 м²; Архитектурная высота- 3,88 м; Пожарная высота- 0,89 м. Здание с размерами в осях 4,5 х 4,2 м. Максимальная высота (по коньку) – 3,58 м.

1 здание

до 01 июля 2019 года

8

Насосная станция  (реконструкция)

Площадь застройки - 116,0 м²; Этажность - 1; Количество этажей - 2; Строительный объем - 1134,5 м3; Общая площадь здания (в пределах внутренней поверхностей наружных стен) - 151,9 м²; Архитектурная высота- 7,44 м; Пожарная высота- 1,28 м. Здание одноэтажное, кирпичное, диаметром 10,8 м.

1 здание

до 10 июля 2019 года

9

Здание воздуходувной станции 

Площадь застройки - 96,5 м²; Этажность -1; Количество этажей- 1; Строительный объем - 530,7 м3; Общая площадь здания (в пределах внутренней поверхностей наружных стен) - 92,1 м; Архитектурная высота- 6,05 м; Пожарная высота- 1,20 м. Здание – однопролетное с размерами в осях 6,0 х 15,0 м. Максимальная высота (по коньку) – 5,95 м; установка воздуходувок многоступенчатых турбокомпрессоров ТВ-175-1, 6 (1 рабочая, 1резервная).

1здание

до 22 июля 2019 года

10

Контактные резервуары 

Устройство контактных резервуаров – 3 шт. В качестве контактных резервуаров принимаются емкости стеклопластиковые объемом 100 м3. Количество емкостей –3 шт.

3 сооружения

до 22 июля 2019 года

11

Блок емкостей биологической очистки 

Устройство блока емкостей из монолитного железобетона размерами 36,0 х48 м.

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

12

Биореактор доочистки 

Устройство монолитного железобетон\ного резервуара размерами 14,0 х17,0 м.

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

13

Приемная камера 

Устройство монолитной железобетонной камеры размерами L×B×H=1,6×1,6×1,5(Н) м.

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

14

Распределительный лоток  

Устройство монолитного железобетонного лотка объемом бетона в сооружении -50,1 м3; установка шиберных щитовых затворов – 7 шт.

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

15

Насосная станция избыточного ила 

Устройство корпуса насосной станции из стеклопластика в габаритах D=1200 мм, H=3800 мм.

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

16

Колодец с расходомером 

Установка колодца: -1шт. Ø 2м

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

17

Дренажная насосная станция

Устройство дренажной насосной станции из стеклопластика в габаритах D=1200 мм, H=3800 мм. Расход КНС 7м3/ч

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

18

Комплектная трансформаторная подстанция 

Установка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки 2КТП-400 киоскового типа напряжением 6/0,4 кВ мощностью 2×400 кВА.

2 сооружения

до 22 июля 2019 года

19

Административно-бытовой корпус

Площадь застройки - 182,9 м²; Этажность -1; Количество этажей – 1; Строительный объем - 758,3 м3; Общая площадь -151,4 м²; Архитектурная высота - 5,06 м; Пожарная высота - 1,5 м. Здание с  металлическим каркасом с размерами в осях 8,8 х 17,76 м. Максимальная высота (по коньку) – 4,91 м. Площадь венткамеры 9,6 м.

1 здание

до 22 июля 2019 года

20

Воздушная линия 6кВ

Подвеска самонесущих проводов – 1145 м СИП-3-10 кВ  1х70мм2, железобетонных опор – 80 шт.

1145 м

до 10 июля 2019 года

21

Кабельная линия 6кВ

Прокладка кабеля в трубах -265 м, прокладка кабеля в траншеях – 905 м. Кабель ААБл-6кВ 3Х95ММ2. Продавливание футляра методом ГНБ – 60 м

1170 м

до 10 июля 2019 года

22

Кабельная линия 0,4кВ

Прокладка кабеля в трубах – 3120 м, прокладка кабеля в траншеях – 1612 м, Кабель АПвБШп-1кВ

4732 м

до 10 июля 2019 года

23

Наружное освещение

Установка опор железобетонных -31 шт., светильников – 32 шт., подвеска проводов -890 м  СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0

890 м

до 01 июля 2019 года

24

Наружные сети водоснабжения

Устройство колодцев: - 4шт. Ø 1,5м, трубопроводов - 559,8 м труба ПЭ100 SDR17 Ø63; методом ГНБ - 58,2 м труба ПЭ100 SDR17 Ø63, футляров – 14 м стальная труба Ø 273.

618 м

до 01 июля 2019 года

25

Наружные сети самотечной канализации К1

Устройство колодцев -20 шт. Ø 1,5 м; - 7 шт. Ø 2м;  - 1шт. Ø 2,5 м; трубопроводов:

- 12 м трубы безнапорной муфтовой из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 Ø 400;

- 4 м трубы безнапорной муфтовой из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 Ø 500;

-76 3м трубы безнапорной муфтовой из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 Ø 630;

-36 м труба ПЭ 100 SDR 17 Ø 630

923 м

до 22 июля 2019 года

26

Напорная канализация К1Н

Устройство колодцев: -2 шт. Ø 1,5м; - 2шт. Ø 2 м.; трубопроводов:

-31 м трубы ПЭ 100 SDR17 Ø 225;

-24 м трубы ПЭ 100 SDR17 Ø 315;

- 1152 м трубы ПЭ 100 SDR17 Ø 500

1207 м

до 22 июля 2019 года

27

Головная насосная станция

Площадь застройки - 95,9 м²; Этажность -1; Количество этажей - 1; Строительный объем - 436,3 м3; Общая площадь здания- 91,6 м²; Архитектурная высота - 5,05 м; Пожарная высота- 1,20 м. Здание с размерами в осях 6,0 х 15,0 м. Максимальная высота (по коньку) – 5,00 м.

1 здание

до 22 июля 2019 года

28

Наружная канализация К1 (внутриплощадочные сети)

Устройство колодцев:  – 1 шт.  Ø 1 м; трубопроводов:

- 16 м трубы безнапорной муфтовой из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 Ø 160

16 м

до 22 июля 2019 года

29

Очищенная обеззараженная вода

Устройство колодцев - 2шт.  Ø 2 м; трубопроводов: - 43 м труба ПЭ 100 SDR 17 Ø 630

43 м

до 22 июля 2019 года

30

Внутриплощадочные сети трубопроводов

Устройство колодцев: -27 шт.  Ø 1 м; -7шт.  Ø 1,5 м; - 4шт. Ø 2 м. Система К14 – 63 м стальная труба Ø 325.Система К15 - 28,8 м стальная труба Ø 325; 96 м стальная труба Ø530; 33 м стальная труба Ø 630. Система К16 – 3 м труба НПВХ SDR21 Ø 110Система К17 - 5,5 м труба ПЭ 80 SDR 17,6 Ø 630Система И6 – 42 м труба ПЭ 80 SDR 17,6 Ø 160Система И8 – 115 м стальная труба Ø 159; 8 м труба ПЭ 80 SDR 17,6 Ø 110Система И8н – 4 м стальная труба Ø 159Система И11 – 326 м труба ПЭ 80 SDR 17,6 Ø 160Система И12 – 11 м труба ПЭ 80 SDR 17,6 Ø 630Система И15 – 344 м труба ПЭ 80 SDR 17,6 Ø 225;  130 м труба ПЭ 80 SDR 17,6 Ø 160Система В3 – 563 м труба ПЭ 80 SDR 17,6 Ø 63Система К14 - 62,5 м стальная труба Ø 530; 142 м стальная труба Ø 426; 28 м стальная труба Ø 219; 

14 м стальная труба Ø 159.

2019 м

до 01 июля 2019 года

31

Вертикальная планировка

Разработка и перемещение грунта

37341 м3

до 22 июля 2019 года

32

Вертикальная планировка подъездной дороги

Разработка и перемещение грунта

849 м3

до 22 июля 2019 года

33

Дорожное покрытие

Устройство покрытия проезда из дорожных плит, шириной 3-4,5 м; подъездной дороги из монолитного бетона

3569 м2

до 22 июля 2019 года

34

Озеленение участка

Устройство газонов с подсыпкой растительной земли 0,15 м и торфа -0.03м и посевом трав

14892 м2

до 22 июля 2019 года

35

Ограждение участка

Установка металлических оград по железобетонным столбам из сетчатых панелей, с установкой ворот - 2шт.

813 м

до 22 июля 2019 года

36

Пусконаладочные работы очистных сооружений

Произвести пробный пуск и пусконаладочные работы очистных сооружения

1 комплекс работ

до 22 августа 2019 года

37

Пусконаладочные работы

Произвести комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования

1 комплекс работ

до 22 августа 2019 года

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение встречного искового требования судом принято. 

В судебном заседании представитель истца поддержал заявление об отказе от иска, встречное требование признал. 

Представители ответчика относительно принятия судом отказа от иска не возразили, встречное требование просили удовлетворить. 

Третье лицо, будучи надлежащим образом извещено о времени и месте судебного заседания, полномочного представителя в суд не направило.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в его отсутствие. 

Выслушав представителей сторон и изучив материалы дела, арбитражный суд установил. 

Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Отказ Общества от иска не противоречит закону и не нарушает права третьих лиц. 

В связи с чем отказ подлежит принятию судом, производство по первоначальному иску прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Встречный иск Администрации подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

Как усматривается из материалов дела, Администрация (заказчик) и Общество (подрядчик) заключили муниципальный контракт от 03.08.2017 № 16, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по объекту капитального строительства «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 тыс. куб.м./сутки в г. Канаш Чувашской Республики, а заказчик обязался работы принять и оплатить. 

Цена контракта определена в размере 320798626 руб. 60 коп. (пункт 2.2 контракта). 

Пунктом 3.1 контракта установлен следующий срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.12.2018 (включительно) в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ. 

Предметом иска Администрации является требование о понуждении Общества выполнить работы по муниципальному контракту. 

Согласно пункту 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В силу пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию (пункт 2 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 1 статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.

В подпункте «б» пункта 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотрено, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом и по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Такая возможность сторонами предусмотрена в пункте 15.2.2 контракта. 

Ввиду наличия недостатков в первоначально разработанной проектно-сметной документации третьим лицом для ответчика разработана откорректированная проектно-сметная документация № 4692/2018-ПЗ. 

Откорректированная проектно-сметная документация получила положительные заключения государственной экспертизы № 21-1-1-3-010705-2019 и № 21-1-0390-19 и утверждена распоряжением администрации города Канаш Чувашской Республики от 20.06.2019 № 617. 

Согласно дорожной карте ответчик согласился выполнить работы в соответствии с измененной технической документацией. Данную позицию он подтвердил и в судебном заседании. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается защита гражданских прав путем присуждения к исполнению обязанности в натуре. 

Поскольку требование Администрации о понуждении выполнить работы основано на нормах действующего гражданского законодательства, подтверждено представленными в материалы дела доказательствами и признано Обществом, встречный иск ответчика подлежит удовлетворению в полном объеме. 

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с тем, что государственная пошлина в сумме 6000 руб. по первоначальному иску подлежит возврату истцу из федерального бюджета, а государственная пошлина по встречному иску в сумме 6000 руб. подлежит взысканию с истца в федеральный бюджет, арбитражный суд не рассматривает вопрос о возврате и взыскании государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 151, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

производство по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройсфера» прекратить. 

Встречный иск администрации города Канаш Чувашской Республики удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройсфера» выполнить следующие работы: 

№ п/п

Наименование работ

Виды, характеристики, описание

Объемы работ

Дата окончания  работ

1

Блок емкостей механической очистки  и обработки осадка

Устройство блока емкостей механической очистки и обработки осадка предусматривается в монолитном железобетонном исполнении. Общие габариты 33×27 м, строительная глубина 5,3м.

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

2

Блок емкостей биологической очистки секции 1

Устройство блока емкостей биологической очистки из монолитного железобетона. Общие габариты 45×27, строительная глубина 5,3 м.

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

3

Блок емкостей биологической очистки секции 2

Устройство блока емкостей биологической очистки из монолитного железобетона. Общие габариты 45×27, строительная глубина 5,3 м.

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

4

Производственно-вспомогательное здание

Площадь застройки - 194,3 м²; Этажность -1; Количество этажей - 1; Строительный объем - 1225,7 м3; Общая площадь здания (в пределах внутренней поверхностей наружных стен-182,0 м²; Архитектурная высота - 7,87 м; Пожарная высота - 0,84 м. Здание с размерами в осях 10,20 х 16,0 м. Максимальная высота (по коньку) – 7,82 м. Расходно – хранилищные баки типа Еврокуб на металлическом поддоне емкостью 1м3 – 3 шт. Насос – дозатор GRUNDFOS DME 375-10 B в количестве 1 рабочий + 1 резервный.

1 здание

до 22 июля 2019 года

5

Иловая площадка, песковая площадка и площадка обезвоженного осадка

Устройство песковой площадки размером 6х8 м; площадки временного складирования осадка размером 50х20 м; иловой площадки размером 25х12 м из монолитного железобетона.

3 сооружения

до 22 июля 2019 года

6

Здание решеток

Площадь застройки - 58,7 м²; Этажность -1; Количество этажей - 1; Строительный объем - 267,9 м3; Общая площадь здания (в пределах внутренней поверхностей наружных стен) -54,7 м²; Архитектурная высота - 5,05 м; Пожарная высота - 1,35 м.  здание с размерами в осях 6,0 х 9,0 м. Максимальная высота (по коньку) – 4,90 м. Грузовые ворота (3х3м), площадью 37,7 м2; установка грабельных решеток - 2 шт. (1 рабочая + 1 резервная) РГЭ 900x900-6(Н); шнековых транспортеров безосевого типа ТШ (б) Э-220-4,0 - 2 шт.; шнекового обезвоживателя ПШЭ-200 – 2 шт.

1 сооружение

до 10 июля 2019 года

7

Насосная станция опорожнения

Площадь застройки - 24,8 м²; Этажность -1; Количество этажей- 2; Строительный объем - 144,0 м3; Общая площадь здания (в пределах внутренней поверхностей наружных стен) - 17,8 м²; Архитектурная высота- 3,88 м; Пожарная высота- 0,89 м. Здание с размерами в осях 4,5 х 4,2 м. Максимальная высота (по коньку) – 3,58 м.

1 здание

до 01 июля 2019 года

8

Насосная станция  (реконструкция)

Площадь застройки - 116,0 м²; Этажность - 1; Количество этажей - 2; Строительный объем - 1134,5 м3; Общая площадь здания (в пределах внутренней поверхностей наружных стен) - 151,9 м²; Архитектурная высота- 7,44 м; Пожарная высота- 1,28 м. Здание одноэтажное, кирпичное, диаметром 10,8 м.

1 здание

до 10 июля 2019 года

9

Здание воздуходувной станции 

Площадь застройки - 96,5 м²; Этажность -1; Количество этажей- 1; Строительный объем - 530,7 м3; Общая площадь здания (в пределах внутренней поверхностей наружных стен) - 92,1 м; Архитектурная высота- 6,05 м; Пожарная высота- 1,20 м. Здание – однопролетное с размерами в осях 6,0 х 15,0 м. Максимальная высота (по коньку) – 5,95 м; установка воздуходувок многоступенчатых турбокомпрессоров ТВ-175-1, 6 (1 рабочая, 1резервная).

1здание

до 22 июля 2019 года

10

Контактные резервуары 

Устройство контактных резервуаров – 3 шт. В качестве контактных резервуаров принимаются емкости стеклопластиковые объемом 100 м3. Количество емкостей –3 шт.

3 сооружения

до 22 июля 2019 года

11

Блок емкостей биологической очистки 

Устройство блока емкостей из монолитного железобетона размерами 36,0 х48 м.

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

12

Биореактор доочистки 

Устройство монолитного железобетон\ного резервуара размерами 14,0 х17,0 м.

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

13

Приемная камера 

Устройство монолитной железобетонной камеры размерами L×B×H=1,6×1,6×1,5(Н) м.

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

14

Распределительный лоток  

Устройство монолитного железобетонного лотка объемом бетона в сооружении -50,1 м3; установка шиберных щитовых затворов – 7 шт.

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

15

Насосная станция избыточного ила 

Устройство корпуса насосной станции из стеклопластика в габаритах D=1200 мм, H=3800 мм.

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

16

Колодец с расходомером 

Установка колодца: -1шт. Ø 2м

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

17

Дренажная насосная станция

Устройство дренажной насосной станции из стеклопластика в габаритах D=1200 мм, H=3800 мм. Расход КНС 7м3/ч

1 сооружение

до 22 июля 2019 года

18

Комплектная трансформаторная подстанция 

Установка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки 2КТП-400 киоскового типа напряжением 6/0,4 кВ мощностью 2×400 кВА.

2 сооружения

до 22 июля 2019 года

19

Административно-бытовой корпус

Площадь застройки - 182,9 м²; Этажность -1; Количество этажей – 1; Строительный объем - 758,3 м3; Общая площадь -151,4 м²; Архитектурная высота - 5,06 м; Пожарная высота - 1,5 м. Здание с  металлическим каркасом с размерами в осях 8,8 х 17,76 м. Максимальная высота (по коньку) – 4,91 м. Площадь венткамеры 9,6 м.

1 здание

до 22 июля 2019 года

20

Воздушная линия 6кВ

Подвеска самонесущих проводов – 1145 м СИП-3-10 кВ  1х70мм2, железобетонных опор – 80 шт.

1145 м

до 10 июля 2019 года

21

Кабельная линия 6кВ

Прокладка кабеля в трубах -265 м, прокладка кабеля в траншеях – 905 м. Кабель ААБл-6кВ 3Х95ММ2. Продавливание футляра методом ГНБ – 60 м

1170 м

до 10 июля 2019 года

22

Кабельная линия 0,4кВ

Прокладка кабеля в трубах – 3120 м, прокладка кабеля в траншеях – 1612 м, Кабель АПвБШп-1кВ

4732 м

до 10 июля 2019 года

23

Наружное освещение

Установка опор железобетонных -31 шт., светильников – 32 шт., подвеска проводов -890 м  СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0

890 м

до 01 июля 2019 года

24

Наружные сети водоснабжения

Устройство колодцев: - 4шт. Ø 1,5м, трубопроводов - 559,8 м труба ПЭ100 SDR17 Ø63; методом ГНБ - 58,2 м труба ПЭ100 SDR17 Ø63, футляров – 14 м стальная труба Ø 273.

618 м

до 01 июля 2019 года

25

Наружные сети самотечной канализации К1

Устройство колодцев -20 шт. Ø 1,5 м; - 7 шт. Ø 2м;  - 1шт. Ø 2,5 м; трубопроводов:

- 12 м трубы безнапорной муфтовой из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 Ø 400;

- 4 м трубы безнапорной муфтовой из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 Ø 500;

-76 3м трубы безнапорной муфтовой из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 Ø 630;

-36 м труба ПЭ 100 SDR 17 Ø 630

923 м

до 22 июля 2019 года

26

Напорная канализация К1Н

Устройство колодцев: -2 шт. Ø 1,5м; - 2шт. Ø 2 м.; трубопроводов:

-31 м трубы ПЭ 100 SDR17 Ø 225;

-24 м трубы ПЭ 100 SDR17 Ø 315;

- 1152 м трубы ПЭ 100 SDR17 Ø 500

1207 м

до 22 июля 2019 года

27

Головная насосная станция

Площадь застройки - 95,9 м²; Этажность -1; Количество этажей - 1; Строительный объем - 436,3 м3; Общая площадь здания- 91,6 м²; Архитектурная высота - 5,05 м; Пожарная высота- 1,20 м. Здание с размерами в осях 6,0 х 15,0 м. Максимальная высота (по коньку) – 5,00 м.

1 здание

до 22 июля 2019 года

28

Наружная канализация К1 (внутриплощадочные сети)

Устройство колодцев:  – 1 шт.  Ø 1 м; трубопроводов:

- 16 м трубы безнапорной муфтовой из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 Ø 160

16 м

до 22 июля 2019 года

29

Очищенная обеззараженная вода

Устройство колодцев - 2шт.  Ø 2 м; трубопроводов: - 43 м труба ПЭ 100 SDR 17 Ø 630

43 м

до 22 июля 2019 года

30

Внутриплощадочные сети трубопроводов

Устройство колодцев: -27 шт.  Ø 1 м; -7шт.  Ø 1,5 м; - 4шт. Ø 2 м. Система К14 – 63 м стальная труба Ø 325.Система К15 - 28,8 м стальная труба Ø 325; 96 м стальная труба Ø530; 33 м стальная труба Ø 630. Система К16 – 3 м труба НПВХ SDR21 Ø 110Система К17 - 5,5 м труба ПЭ 80 SDR 17,6 Ø 630Система И6 – 42 м труба ПЭ 80 SDR 17,6 Ø 160Система И8 – 115 м стальная труба Ø 159; 8 м труба ПЭ 80 SDR 17,6 Ø 110Система И8н – 4 м стальная труба Ø 159Система И11 – 326 м труба ПЭ 80 SDR 17,6 Ø 160Система И12 – 11 м труба ПЭ 80 SDR 17,6 Ø 630Система И15 – 344 м труба ПЭ 80 SDR 17,6 Ø 225;  130 м труба ПЭ 80 SDR 17,6 Ø 160Система В3 – 563 м труба ПЭ 80 SDR 17,6 Ø 63Система К14 - 62,5 м стальная труба Ø 530; 142 м стальная труба Ø 426; 28 м стальная труба Ø 219; 

14 м стальная труба Ø 159.

2019 м

до 01 июля 2019 года

31

Вертикальная планировка

Разработка и перемещение грунта

37341 м3

до 22 июля 2019 года

32

Вертикальная планировка подъездной дороги

Разработка и перемещение грунта

849 м3

до 22 июля 2019 года

33

Дорожное покрытие

Устройство покрытия проезда из дорожных плит, шириной 3-4,5 м; подъездной дороги из монолитного бетона

3569 м2

до 22 июля 2019 года

34

Озеленение участка

Устройство газонов с подсыпкой растительной земли 0,15 м и торфа -0.03м и посевом трав

14892 м2

до 22 июля 2019 года

35

Ограждение участка

Установка металлических оград по железобетонным столбам из сетчатых панелей, с установкой ворот - 2шт.

813 м

до 22 июля 2019 года

36

Пусконаладочные работы очистных сооружений

Произвести пробный пуск и пусконаладочные работы очистных сооружения

1 комплекс работ

до 22 августа 2019 года

37

Пусконаладочные работы

Произвести комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования

1 комплекс работ

до 22 августа 2019 года

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

А.Р. Данилов