110/2018-96996(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-14194/2017

г. Хабаровск

18 июля 2018 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  Муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства города Комсомольска-на-Амуре» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>; место нахождения: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск- на-Амуре, ул. Кирова, д.41)  

к Акционерному обществу «Дальметаллургстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>; место нахождения: 681000, 

<

...>)  

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно  предмета спора: Муниципальное унитарное предприятие проектный  институт «Комсомольскгорпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  место нахождения: 681000, 

<

...>)  

об устранении недостатков выполненных работ 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить. 

Обязать Акционерное общество «Дальметаллургстрой» в течение 30  календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу  безвозмездно устранить недостатки выполненных строительно-монтажных  работ по муниципальному контракту № 23 от 04.11.2015 «на выполнение  работ по строительству объекта «Жилой Дом № 55/2 по ул. Пионерской в  Центральном округе» в г. Комсомольске-на-Амуре с соблюдением  требований проектной документации (шифр 14170-01), действующих  строительных норм и правил ГОСТ 23166-99, ГОСТ 21519-84, ГОСТ 6810- 2002, СниП 3.04.01-87, СниП 3.03.01-87, МДС 12-30.2006, а именно в доме   № 55/2 по ул. Пионерской г. Комсомольска-на-Амуре:  

Квартира № 4: 

- в помещении коридора и кухни на потолке по линии шва между  плитами перекрытия произвести работы по замене штукатурного и  окрасочного слоя, восстановить чистовую отделку;  

Квартира № 9: - отрегулировать запорный механизм балконной двери из ПВХ, - в помещении ванной - заменить неисправный смеситель, 

- в жилых помещениях квартиры, кухне в местах примыкания стен и  потолка произвести работы по частичной замене штукатурного и  окрасочного слоя, включая предварительные работы по обработке стен  противогрибковым составом, произвести замену и оклейку обоев;  

Квартира № 10: 

- во всех помещениях в местах примыкания потолка и стен произвести  работы по частичной замене штукатурного и окрасочного слоя, включая  предварительные работы по обработке стен и потолка противогрибковым  составом, произвести замену и оклейку обоев;  

Квартира № 12: 

- в ванной комнате - произвести работы по замене штукатурного и  окрасочного слоя, включая предварительные работы по обработке стен и  потолка противогрибковым составом,  

- в помещениях квартиры (коридор, кухня, жилая комната) в местах  примыкания потолка и стен произвести работы по замене штукатурного и  окрасочного слоя, включая предварительные работы по обработке стен  противогрибковым составом, произвести замену и оклейку обоев;  

Квартира № 19: 

- в ванной комнате - произвести работы по замене штукатурного и  окрасочного слоя, включая предварительные работы по обработке стен и  потолка противогрибковым составом,  

- в помещениях квартиры (коридор, кухня, жилая комната) в местах  примыкания потолка и стен произвести работы по замене штукатурного и  окрасочного слоя, включая предварительные работы по обработке стен  противогрибковым составом, произвести замену и оклейку обоев,  

- в коридоре - выполнить работы по устранению неисправности  электропроводки группы освещения.  

Взыскать с Акционерного общества «Дальметаллургстрой» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Д.Л. Малашкин