АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, г. Томск, пр-кт Кирова, д. 10, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: info@tomsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

г. Томск                                                                                                          Дело № А67-6324/2024

22.08.2024

 

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Е.И. Бутенко, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Н.В. Завгородской, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Департамента лесного хозяйства Томской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Лесоустроитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить нарушения лесного законодательства,

при участии в заседании:

от истца – не явился (извещен),

от ответчика – не явился (извещен), 

 

У С Т А Н О В И Л:

Департамент лесного хозяйства Томской области (далее – Департамент, истец) обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Лесоустроитель» (далее – ООО «Лесоустроитель», ответчик) со следующими требованиями:

1) Обязать ООО «Лесоустроитель» провести следующие мероприятия по лесовосстановлению на территории лесного участка, арендованного по договору аренды частей лесного участка № 14/08/14 от 19.06.2014, в течение года (лесокультурного сезона) со дня вступления решения суда в законную силу:

- комбинированное лесовосстановление на площади 17,9 га в Томской области, Шегарском районе, Шегарском лесничестве, Шегарском участковом лесничестве, урочище «Каргалинское» в квартале 18 выделе 26 (0,6 га), квартале 10 выделе 19 (6,3 га), квартале 10 выделе 22 (3,2 га), квартале 10 выделе 24 (1,9 га), квартале 7 выделе 16 (2 га), в Томской области, Шегарском районе, Шегарском лесничестве, Шегарском участковом лесничестве, урочище «Шегарское» в квартале 33 выделе 10 (3,9 га);

2) В случае неисполнения решения суда в установленный срок взыскать с ООО «Лесоустроитель» в пользу Департамента судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда до момента фактического исполнения решения суда.

Исковые требования мотивированы невыполнением ответчиком, являющимся арендатором участка лесного фонда, мероприятий по лесовосстановлению на арендованном участке.

Определением от 15.07.2024 исковое заявление принято к производству.

Ответчик отзыва на исковое заявление не представил.

В судебное заседание стороны своих представителей не направили, возражений относительно рассмотрения дела в их отсутствие не заявили, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом. Судебное заседание проведено в отсутствие представителей сторон в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, оценив доводы лиц, участвующих в деле, руководствуясь положениями статей 9, 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению, при этом основывая свои выводы на следующем.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу статей 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований и возражений.

Из положений части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно пунктам 1, 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в заключении договора, а его условия определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

На основании пункта 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Частью 1 статьи 71 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) предусмотрено, что лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду на основании соответствующего договора аренды.

Согласно части 4 статьи 71 ЛК РФ к договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом и Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено ЛК РФ.

При этом нормы лесного законодательства являются специальными, имеют приоритет перед нормами Гражданского кодекса и Земельного кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, между Департаментом лесного хозяйства Томской области (арендодатель) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (арендатор) заключен договор аренды частей лесного участка № 14/08/14 от 19.06.2014 (далее – договор аренды).

По условиям пункта 1.1 договора аренды арендодатель обязуется предоставить, а арендатор обязуется принять во временное пользование за плату части лесного участка, относящегося к землям лесного фонда, расположенного в Томской области, Шегарском районе, Шегарском лесничестве, с условным номером 70-70-07/129/2008-539, определенные в пункте 1.2 договора (далее – части лесного участка).

Согласно пункту 1.2 договора аренды части лесного участка общей площадью 6453 га, предоставляемые в аренду по договору, имеют:

- часть лесного участка площадью 3147 га: Томская область, Шегарский район, Шегарское лесничество, Шегарское участковое лесничество, урочище «Шегарское»

<

...>, 28-33, номер учетной записи в государственном лесном реестре 11105-2014-04;

- часть лесного участка площадью 3306 га: Томская область, Шегарский район, Шегарское лесничество, Шегарское участковое лесничество, урочище «Каргалинское», кварталы 2, 3, 7-10, 16-18, 33, 34; урочище «Гусевское сельское», кварталы 69, 78, 83, номер учетной записи в государственном лесном реестре 11106-2014-04.

Части лесного участка предоставляются для заготовки древесины. Среднегодовой объём использования лесов: 8788 кбм.

В соответствии с пунктом 1.3 договора аренды схемы расположения частей лесного участка (план лесного участка или план части лесного участка), их количественные и качественные характеристики приводятся в приложениях № 1-3.

Арендатору передаются части лесного участка для использования в целях и объёмах согласно пункту 1.2 договора и приложению № 4. Объемы использования лесов в год вступления договора аренды частей лесного участка в силу и в год прекращения действия договора аренды частей лесного участка устанавливаются с учетом срока его действия в указанные годы (пункт 1.4 договора аренды).

В силу пункта 3.4 договора аренды арендатор обязан:

а) использовать части лесного участка по назначению: для целей, указанных в договоре, в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором;

б) вносить арендную плату в размерах и в сроки, которые установлены договором;

в) разработать и представить арендодателю проект освоения лесов в течение трех месяцев со дня заключения договора аренды части лесного участка;

г) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию;

д) представлять арендодателю информацию, полученную при проведении лесоустроительных работ на частях лесного участка;

е) осуществлять на частях лесного участка меры противопожарного обустройства лесов, охрану лесов от пожаров, незаконных рубок, а также защиту от вредителей и болезней леса;

з) осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия), лесовосстановление и уход за лесами, а также иные лесохозяйственные работы на арендованных частях лесного участка на условиях, в объёмах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении № 7 к договору;

и) приводить части лесного участка в прежнее состояние в следующих случаях:

- при уничтожении верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог;

- при сносе возведенных временных построек, сооружений и других объектов;

л) ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять оперативную информацию о выполненных мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов и отчеты в установленном порядке об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, лесоразведении (1-ВЛ, 1-ОЗЛ, 1-ИЛ) по формам, указанным в приложении № 8 к договору, в Шегарское лесничество (местонахождение: 636162, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Школьная, 68);

о) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами Российской Федерации, Правилами заготовки древесины, Правилами ухода за лесами, Правилами лесовосстановления, Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами пожарной безопасности в лесах и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

п) в случае невыполнения арендатором в текущем году противопожарных, санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по лесовосстановлению (или лесоразведению) и уходу за лесом (в соответствии с проектом освоения лесов); объёмы невыполненных работ с согласия арендодателя могут переноситься на следующий год;

р) при изменении лесохозяйственного регламента или условий договора аренды, а также при необходимости актуализации объемов работ по охране, защите и воспроизводству лесов на частях лесного участка, при внесении изменений в действующее законодательство, если указанные изменения требуют внесения изменений в проект освоения лесов предоставить арендодателю разработанные в установленном порядке изменения в проект освоения лесов с положительным заключением государственной экспертизы в течение шести месяцев с даты внесения наступления вышеперечисленных обстоятельств.

Согласно пункту 4.1 договора аренды за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

В соответствии с пунктом 7.1 договора аренды договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, и действует 49 лет.

10.11.2015 между индивидуальным предпринимателем ФИО1 (арендатор) и ООО «Лесоустроитель» (новый арендатор) заключен договор переуступки (перенайма) права аренды части лесного участка, находящегося в государственной (муниципальной) собственности № 10/11/15 от 10.11.2015 (далее – договор переуступки), по условиям которого арендатор, с согласия арендодателя, обязуется передать новому арендатору права, обязанности и ответственность, предусмотренные договором аренды частей лесного участка, находящегося в государственной (муниципальной) собственности № 14/08/14 от 19.06.2014, заключенного между арендатором и арендодателем на основании протокола аукциона № 13 от 29.05.2014, часть лесного участка, относящегося к землям лесного фонда (далее – участок), а новый арендатор обязуется принять переданные ему права, обязанности и ответственность, предусмотренные договором аренды частей лесного участка № 14/08/14 от 19.06.2014 (п. 1.1 договора переуступки).

Части лесного участка переданы ООО «Лесоустроитель» по акту приема-передачи от 10.11.2015.

Таким образом, в настоящее время арендатором по договору аренды частей лесного участка № 14/08/14 от 19.06.2014 является ООО «Лесоустроитель».

Постановлением Губернатора Томской области от 18.10.2012 № 128 утверждено Положение о Департаменте лесного хозяйства Томской области, в соответствии с которым указанный департамент является исполнительным органом государственной власти Томской области, входящим в систему исполнительных органов государственной власти Томской области и финансируемым за счет средств областного бюджета. Департамент лесного хозяйства Томской области является правопреемником в сфере лесного хозяйства Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области. К числу функций Департамента относится предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование; осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного контроля (надзора); реализация установленных ЛК РФ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов (подпункты «а», «л» подпункта 8, подпункт 9 пункта 9 указанного Положения).

Как указал истец, при анализе отчета об использовании лесов (по форме 1-ИЛ) за 2021 год, отчетов о воспроизводстве лесов и лесоразведении (по форме № 1-ВЛ) за 2022-2023 гг., представленных ООО «Лесоустроитель», был выявлен факт нарушения ответчиком требований лесного законодательства, выраженный в непроведении части мероприятий по лесовосстановлению на арендованной территории площади лесов, нуждающихся в лесовосстановлении. Так, ответчиком на территории Томской области, Шегарского района, Шегарского лесничества, Шегарского участкового лесничества, урочищ «Каргалинское» и «Шегарское» не выполнены лесовосстановительные мероприятия на общей площади 17,9 га, из них: комбинированное лесовосстановление на площади 17,9 га в Томской области, Шегарском районе, Шегарском лесничестве, Шегарском участковом лесничестве, урочище «Каргалинское» в квартале 18 выделе 26 (0,6 га), квартале 10 выделе 19 (6,3 га), квартале 10 выделе 22 (3,2 га), квартале 10 выделе 24 (1,9 га), квартале 7 выделе 16 (2 га), в Томской области, Шегарском районе, Шегарском лесничестве, Шегарском участковом лесничестве, урочище «Шегарское» в квартале 33 выделе 10 (3,9 га).

Полагая, что на основании статей 61, 62 Лесного кодекса Российской Федерации у ответчика имеется обязанность по проведению мероприятий по лесовосстановлению на площади арендованных земельных участков равных площади вырубленных лесных насаждений на территории данных лесных участков для осуществления заготовки древесины, Департамент обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Конституции Российской Федерации земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

С учетом особого значения лесного фонда лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения нормативные правовые акты основываются на принципах, перечисленных в статье 1 ЛК РФ. К числу таких принципов отнесены, в частности принципы сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду; обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах;  сохранение лесов, в том числе посредством их охраны, защиты, воспроизводства, лесоразведения; платность использования лесов.

Лесное законодательство регулирует отношения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесоразведения (лесные отношения) (часть 1 статьи 3 ЛК РФ).

В силу частей 1 и 5 статьи 12 ЛК РФ освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесного комплекса. При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются:

1) управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, включая установление видов и параметров разрешенного использования лесов;

2) проведение мероприятий по сохранению лесов и по лесоустройству;

3) проведение мероприятий по сохранению природных ландшафтов, природных объектов и природных комплексов;

4) проведение мероприятий по благоустройству лесов и лесных участков.

Мероприятия по сохранению лесов, в том числе работы по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению, осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ, и лицами, которые используют леса и (или) на которых данным Кодексом возложена обязанность по выполнению таких работ (часть 1 статьи 19 ЛК РФ).

В соответствии со статьей 25 ЛК РФ одним из видов использования лесов является заготовка древесины, а статьей 29 данного Кодекса регламентирован порядок использования лесов для заготовок древесины.

В силу статьи 88 ЛК РФ лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, а также лица, использующие леса на основании сервитута или публичного сервитута, составляют проект освоения лесов в соответствии со статьей 12 настоящего Кодекса. Состав проекта освоения лесов, порядок его разработки и внесения в него изменений устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки утвержден Приказом Минприроды России от 16.11.2021 № 864, пунктом 10 которого установлено, что подраздел Проекта освоения лесов «Заготовка древесины» должен содержать, в том числе, сведения об установленном объеме заготовки древесины на лесном участке.

Согласно статье 61 ЛК РФ вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое включает в себя лесовосстановление; оно осуществляется, в том числе, лицами, на которых данным Кодексом возложена обязанность по лесовосстановлению.

Статьей 62 ЛК РФ предусмотрено, что лесовосстановление осуществляется на основании проекта лесовосстановления лицами, осуществляющими рубки лесных насаждений, естественным, искусственным или комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их биологического разнообразия.

Естественное лесовосстановление происходит вследствие природных процессов и осуществления мер содействия естественному лесовосстановлению, включающих сохранение жизнеспособного укоренившегося подроста и молодняка основных лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, уход за подростом основных лесных древесных пород, минерализацию поверхности почвы, а также иные мероприятия, предусмотренные правилами лесовосстановления.

Искусственное лесовосстановление представляет собой деятельность, связанную с выращиванием лесных насаждений, в том числе посев, посадку саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, агротехнический уход за лесными насаждениями (рыхление почвы, уничтожение или предупреждение появления нежелательной растительности и другие мероприятия, направленные на повышение приживаемости саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород и улучшение условий их роста), а также иные мероприятия, предусмотренные правилами лесовосстановления, до момента отнесения земель, на которых осуществляется искусственное лесовосстановление, к землям, на которых расположены леса.

Комбинированное лесовосстановление представляет собой сочетание естественного и искусственного лесовосстановления (части 2-4 статьи 62 ЛК РФ).

Аналогичные положения содержатся в Правилах лесовосстановления, утвержденных Приказом Минприроды России от 29.12.2021 № 1024 (далее – Правила) на основании части 7 статьи 62 ЛК РФ.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Правил лесовосстановление осуществляется на основании проекта лесовосстановления лицами, осуществляющими рубки лесных насаждений в соответствии с ЛК РФ, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 29.1, статьей 30, частью 4.1 статьи 32 ЛК РФ.

Вышеуказанными нормами для лиц, осуществляющих рубки лесных насаждений в соответствии с ЛК РФ, установлена обязанность по выполнению работ по лесовосстановлению в установленный срок после рубки лесных насаждений. Следовательно, обстоятельством, в силу которого у указанных лиц наступает обязанность по выполнению данных работ, является сам факт использования лесов с рубкой лесных насаждений.

Нормы Лесного кодекса Российской Федерации, регламентирующие вопросы воспроизводства лесов, носят императивный и обязательный характер, подлежат исполнению вне зависимости от включения положений о воспроизводстве лесов в гражданско-правовые договоры и не могут быть изменены (исключены) сторонами условиями договора.

По общему правилу обязанность по лесовосстановлению распространена на всех лиц (за исключением перечисленных в законе случаев), осуществляющих рубки лесных насаждений на основании проекта освоения лесов вне зависимости от гражданско-правового основания предоставления лесного участка и целей использования лесов.

Указанные выводы соответствуют правовой позиции, изложенной в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2022 № 304-ЭС22-3799, от 23.08.2022 по делу № 307-ЭС22-5959.

Согласно условиям договора аренды частей лесного участка № 14/08/14 от 19.06.2014, заключенного с ответчиком, части лесного участка предоставлены ответчику для заготовки древесины.

Осуществление ответчиком рубки лесных насаждений для заготовки древесины подтверждается отчетом об использовании лесов за 2021 год и ответчиком не оспаривается. Частичное выполнение мероприятий по лесовосстановлению подтверждается отчетами о воспроизводстве лесов и лесоразведении за 2022-2023 годы.

Расчет невыполненных ответчиком мероприятий по лесовосстановлению в рамках договора аренды приведен истцом в соответствующей таблице (т. 1, л.д. 63).

Поскольку ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлены доказательства выполнения в полном объеме мероприятий по лесовосстановлению на арендованном участке, требования Департамента об обязании ответчика провести мероприятия по лесовосстановлению на арендованной территории являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Также истцом было заявлено требование о присуждении судебной неустойки в размере 2 000 руб. за каждый день неисполнения ответчиком решения суда до момента фактического исполнения решения суда об обязании провести мероприятия по лесовосстановлению.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 28, 31, 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее – судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки (пункт 1 статьи 330, статья 394 ГК РФ).

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Из изложенного выше следует, что судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом, в целях дополнительного воздействия на должника.

Размер судебной неустойки определяется судьей по своему внутреннему убеждению с учетом обстоятельств дела и исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды должником из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую – сумма в большем размере и т.д.).

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определяя размер судебной неустойки, суд не связан требованиями и возражениями сторон. Исходя из фактических обстоятельств спора, требований разумности, справедливости и обеспечения баланса интересов сторон, суд полагает возможным определить размер судебной неустойки в 2 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда до момента его фактического исполнения.

Поскольку истец был освобожден от уплаты государственной пошлины на основании подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации, по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по иску относится на ответчика и подлежит взысканию в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Лесоустроитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного года (лесокультурного сезона) со дня вступления настоящего решения суда в законную силу провести мероприятия по лесовосстановлению на арендованной по договору аренды частей лесного участка № 14/08/14 от 19.06.2014 территории:

- комбинированное лесовосстановление на площади 17,9 га в Томской области, Шегарском районе, Шегарском лесничестве, Шегарском участковом лесничестве, урочище «Каргалинское» в квартале 18 выделе 26 (0,6 га), квартале 10 выделе 19 (6,3 га), квартале 10 выделе 22 (3,2 га), квартале 10 выделе 24 (1,9 га), квартале 7 выделе 16 (2 га), в Томской области, Шегарском районе, Шегарском лесничестве, Шегарском участковом лесничестве, урочище «Шегарское» в квартале 33 выделе 10 (3,9 га).

В случае неисполнения обществом с ограниченной ответственностью «Лесоустроитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) настоящего решения в установленный срок взыскивать с общества с ограниченной ответственностью «Лесоустроитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Департамента лесного хозяйства Томской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда до момента его фактического исполнения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лесоустроитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

 

Судья                                                                                                                      Е.И. Бутенко