АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 

http://kostroma.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь 

Р Е Ш Е Н И Я

 

 «02» марта 2021 года по результатам рассмотрения дела № А31-13694/2020 

по исковому заявлению администрации муниципального района город  Нерехта и Нерехтский район Костромской области (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Яравтодор» (ИНН  

<

***> , ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки в работах,  выполненных по муниципальному контракту, 934 287 руб.35 коп. штрафа,  

суд первой инстанции в составе председательствующего: судьи Паниной  С.Л.  

(фамилия, инициалы) 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 – 171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Яравтодор» (ИНН  

<

***> , ОГРН 

<

***>) исполнить гарантийное обязательство в  рамках муниципального контракта 01413000266190000200001 от 08 мая 2019  года, а именно:  

1.1. Безвозмездно устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного  срока по муниципальному контракту № 01413000266190000200001 от 08 мая 2019  года:  

- произвести доуплотнение покрытия из щебня с расклинцовкой на всем протяжении участка автомобильной дороги; 

- произвести подсыпку и уплотнение земляного полотна у съезда на ПК  1+99, у водопропропускной трубы на ПК11+02, в районе д. Малое Андрейково  ПК25+00-ПК32+00;  

- произвести подсыпку, уплотнение и планировку обочин на всем  протяжении участка автомобильной дороги;  

- продольных профиль кюветов довести до проектных отметок,  ликвидировав места застоя воды на всем протяжении участка автомобильной  дороги;  

- произвести подсыпку и уплотнение берм дорожных знаков на всем  протяжении участка автомобильной дороги;  

- восстановить основание под бетонного укрепление и непосредственно  бетонное укрепление оголовков водопропускных труб на ПКО+20, ПК11+02;  

- произвести оштукатуривание в местах шелушения бетонного укрепления  оголовков водопропускных труб на ПКЗ1+00;  

- произвести замену стойки и балки барьерного ограждения; 

- произвести засыпку трубы гофрированной очистных сооружений у  водопропускной трубы на ПК 11+02;  

- произвести замену трубы гофрированной очистных сооружений у  водопропускной трубы на ПК 11+02;  

- произвести обратную засыпку бетонного быстротока у водопропускной  трубы на ПК 11+02;  

- произвести восстановление водобойного колодца бетонного быстротока у  водопропускной трубы на ПК 11+02(справа);  

- произвести засыпку под бетонной плитой быстротока у водопропускной  трубы на ПК 11+02;  

- произвести гидроизоляцию швов между лотками быстротока у  водопропускной трубы на ПК 11+02;  

- очистить вход и выход водопропускной трубы на съезде ПК42+85; 

- довести до проектных геометрических параметров укрепление кюветов  щебнем на всем протяжении участка автомобильной дороги.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Яравтодор» (ИНН  

<

***> , ОГРН 

<

***>) в пользу администрации муниципального  района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 934 287 руб.35 коп. штрафа.  

Исполнительные листы выдаются по ходатайству взыскателя или по его  ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Яравтодор» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 27 686 рублей.  

Исполнительный лист выдать по истечении 10 дней после вступления решения  в законную силу при отсутствии в деле информации о том, что государственная  пошлина уплачена ее плательщиком добровольно.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия, а со дня  вступления решения в законную силу – в кассационном порядке в Арбитражный  суд Волго-Вятского округа в течение двух месяцев, при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Костромской области.  

 Судья С.Л. Панина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.04.2020 11:20:20

 Кому выдана Панина Светлана Леонидовна