Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-28048/2019

18 декабря 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  05 декабря 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  18 декабря 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем П.Е. Голушко

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (адрес:  Россия 191104, Санкт-Петербург, ул.Некрасова, д.14, ОГРН:  1034700559398);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (адрес:  Россия 188641, г ВСЕВОЛОЖСК, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ВСЕВОЛОЖСКИЙ р-н, ул ПРИЮТИНСКАЯ 13/ЛИТЕР А/1 ЭТАЖ ПОМЕЩЕНИЕ 2, ОГРН:  1089848004025);

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 20.11.19,

- от ответчика: ФИО2 по доверенности от 20.06.19,

установил:

ГКУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" предъявило иск о взыскании с ООО "ЭНЕРГО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 3 782 854 руб. 34 коп. неосновательного обогащения.

Ответчик предъявил встречный иск о взыскании 4 180 636 руб. 00 коп. неосновательного обогащения, 109 813 руб. 28 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, за период с 25.05.19 по 01.10.19 с последующим начислением по день фактической уплаты.

Встречный иск принят к рассмотрению совместно с первоначальным на основании ст. 132 АПК РФ.

Судом установлено:

Между сторонами был заключён государственный контракт №965141 от 04.06.18 на выполнение работ по объекту: «Строительство здания поисково-спасательной службы» по адресу: 

<

...>.

27.05.19 стороны заключили соглашение о расторжении контракта.

ГКУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" – заказчик считает, что им оплачено 12 034 606 руб. 10 коп., работы выполнены на сумму 8 251 751 руб. 76 коп., поэтому неотработанный аванс составляет 3 782 854 руб. 34 коп., который он просит взыскать.

Подрядчик - ООО "ЭНЕРГО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" представил акт контрольного обмера фактически выполненных строительно-монтажных работ от 24.05.19, подписанный представителями заказчика.

Согласно сметам №1 и №02-01-01 от 08.08.19, составленным ООО "ЭНЕРГО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" исходя из сметных расценок по государственному контракту, стоимость дополнительно выполненных работ составляет 4 180 636 руб. 00 коп. Дополнительные работы до настоящего времени не оплачены.

Суд производит зачёт встречных однородных требований.

В результате зачёта на стороне ГКУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" имеется неосновательное обогащение, возникшее в связи с неоплатой работ, выполненных ООО "ЭНЕРГО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" в размере 397 781 руб. 66 коп. 

На сумму неосновательного обогащения подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами за 130 заявленных во встречном иске дней за период с 25.05.19 по 01.10.19 в сумме 9 917 руб. 30 коп., а со 02.10.19 проценты подлежат взысканию по ключевой ставке ЦБ РФ по день фактической уплаты суммы неосновательного обогащения.

Руководствуясь статьями 395, 1102, 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В удовлетворении первоначального иска отказать в связи с проведением взаимозачёта.

Взыскать с Государственного Казённого Учреждения "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 397 781 руб. 66 коп. неосновательного обогащения и 9 917 руб. 30 коп. процентов за пользование чужими денежными средствам, а со 02.10.19 проценты за пользование чужими денежными средствами по ключевой ставке банка, действовавшей в соответствующий период до фактической уплаты суммы неосновательного обогащения, 

Взыскать с Государственного Казённого Учреждения "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" в доход федерального бюджета 10 956 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части встречного иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.