Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-24137/2022

14 июля 2022 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  12 июля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  14 июля 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Аммо А.М.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ООО "ТОРСИОН" 

ответчик: ООО "СтройСиндикат" 

о взыскании

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 10.12.2021

- от ответчика: ФИО2 по доверенности от 30.01.2022

установил:

ООО "ТОРСИОН" обратилось с иском к ООО "СтройСиндикат" о взыскании задолженности за выполненные по Договор подряда № 23 от 23.04.2021 г. работы в размере 3 270 455,44 руб., а также неустойки за нарушение сроков оплаты в размере 488 533,15 руб., а всего 3 758 988,59 руб.

В порядке статьи 49 АПК РФ истец уменьшил размер исковых требований.

Ответчик представил отзыв на иск.

Суд установил следующее.

Между ООО «СтройСиндикат» (далее – Заказчик, Ответчик) и ООО «ТОРСИОН» (далее – Подрядчик, Истец) заключен Договор подряда № 23 от 23.04.2021 г. (далее – Договор подряда).

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (п. 2 ст. 740 ГК РФ).

В соответствии с п. 1.1. Договора подряда (в редакции Протокола разногласий от 24.04.2021 г. (приложение № 10) к Договору подряда) настоящий Договор устанавливает условия выполнения по заданию Заказчика строительно-монтажных и пусконаладочных работ (далее по тексту - Работы) на объекте Заказчика: «Выполнение работ по завершению реконструкции государственного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 434 Курортного района Санкт-Петербурга со строительством пристройки для размещения бассейна по адресу: 

<

...>, Литера А», (далее по тексту – Объект). 

Подрядчик обязуется выполнить работы на Объекте и сдать результат выполнения работ Заказчику, а Заказчик – принять результат работ и оплатить его в соответствии с настоящим Договором.

Работы осуществляются для следующих систем:

- Диспетчеризация - 06/ПЗ-19-АДИС;

- Автоматика противопожарной защиты - 06/ПЗ-19-АППЗ;

- Автоматическая пожарная сигнализация - 06/ПЗ-19-АПС;

- Система радиофикации - 06/ПЗ-19-РФ;

- Структурированная кабельная сеть - 06/ПЗ-19-СКС;

- Система контроля и управления доступом - 06/ЗП-19-СКУД (в том числе НСС);

- Система охранного видеонаблюдения - 06/ЗП-19-СОВН (в том числе НСС);

- Система охранной и тревожной сигнализации - 06/ЗП-19-СОТС;

- Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 06/ЗП-19-СОУЭ;

- Система часофикации - 06ЗП-19– ИОС 5.3

(далее – Системы).

Подрядчик осуществляет корректировку рабочей документации вышеперечисленных систем. Заказчик после получения корректировки от Подрядчика согласовывает ее с СПб ГКУ «ФКСР», СПб ГКУ «ГМЦ» и иными согласующими органами. В случае поступления от СПб ГКУ «ФКСР», СПб ГКУ «ГМЦ» и иных согласующих органов замечаний, Заказчик передает их Подрядчику для устранения.

Заказчиком и Подрядчиком согласованы сроки начала и окончания выполнения работ.

Согласно п. 2.1. Договора подряда (в редакции Протокола разногласий от 24.04.2021 г. к Договору подряда) начало выполнения работ по настоящему Договору: в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения аванса Подрядчиком.

Согласно п. 2.2. Договора подряда (в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 28.05.2021 г. к Договору подряда) срок окончания выполнения работ по настоящему Договору - 31 августа 2021 г.

В соответствии с п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Как следует из п. 3.1. Договора подряда (в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 09.08.2021 г. (приложение № 26) стоимость Работ определена Сторонами в 35 157 473 руб. 24 коп. В стоимость Работ включена закупка Подрядчиком необходимого для производства Работ оборудования и материалов, отраженных в Ведомости договорной цены. При приеме к учету стоимости выполненных работ применить к расценкам понижающий коэффициент К=0,8265643. Итоговая Стоимость Работ по договору составляет 29 059 912 руб. 26 коп.

Кроме того, в Дополнительном соглашении № 5 от 09.09.2021 г. Стороны согласовали необходимость выполнения Подрядчиком дополнительных работ по следующим Системам:

- Наружные Сети Связи;

- Система коллективного телевизионного приема (эфирное телевидение).

Срок начала выполнения дополнительных работ «09» сентября 2021 г., срок окончания выполнения дополнительных работ «17» сентября 2021 г. (п. 2 Дополнительного соглашения № 5 от 09.09.2021 г.).

Общая стоимость дополнительных работ составляет 356 170 руб. 83 коп. (п. 5 Дополнительного соглашения № 5 от 09.09.2021 г.).

Также Стороны согласовали, что к указанным дополнительным работам не будет применяться понижающий коэффициент, установленный в Дополнительном соглашении № 4 от 09.09.2021 г. (п. 6 Дополнительного соглашения № 5 от 09.09.2021 г.).

Сметная стоимость по каждой Системе отражена в соответствующем локальном сметном расчете (приложение № 14 - № 24, № 27- № 28).

Также Сторонами подписан сводный сметный расчет стоимости строительства (приложение № 30).

Подрядчиком работы выполнены и переданы Заказчику. В соответствии с Актами выполненных работ по форме № КС-2 (приложение № 31 – № 52) и Справками о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 (приложение № 53 – № 54) стоимость выполненных Подрядчиком работ составляет 28 170 455 руб. 44 коп.

В соответствии с п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

В соответствии с п. 3.2.2. Договора подряда оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (ф. КС-3).

Заказчик в нарушение принятых на себя обязательств, произвел оплату выполненных Работ не в полном объеме, задолженность Заказчика перед Подрядчиком составляет 3 040 931,02 руб. (с учетом уточнения исковых требований).

В соответствии с п. 7.5. Договора подряда в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штрафную неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора до момента окончательной оплаты работ. Основанием для начисления и взыскания штрафной неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Подрядчика. В случае отсутствия письменной претензии со стороны Подрядчика штрафная неустойка считается не начисленной и не уплачивается.

Согласно расчету истца, размер неустойки составляет 480 729,32 руб.

17.12.2021 г. в адрес Ответчика была направлена претензия № б/н от 17.12.2021 г. с предложением перечислить денежные средства.

В соответствии с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 г. № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» по общему правилу, при соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора только в отношении суммы основного долга в случае его обращения в суд с требованием о взыскании суммы основного долга и неустойки такой порядок считается соблюденным в отношении обоих требований.

Ответчик претензию оставил без ответа и без удовлетворения. 

В целях взыскания задолженности с Ответчика, Истец был вынужден обратиться за юридической помощью.

Между Истцом и Адвокатом индивидуальной практики Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов ФИО1 (далее – Адвокат) заключено Соглашение об оказании юридической помощи № 157 от 21.02.2022 г. (далее – Соглашение № 157).

В соответствии с п. 1.1 Соглашения № 157 Доверитель (ООО «ТОРСИОН») поручает, а Адвокат принимает к исполнению поручение по представлению интересов Доверителя в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по вопросу взыскания с ООО «СтройСиндикат» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженности за выполненные работы по Договору подряда № 23 от 23.04.2021 г. в размере 3 270 455 руб. 44 коп., а также неустойки за нарушение сроков оплаты.

Размер вознаграждения Адвоката за выполнение поручения, указанного в п. 1.1. Соглашения, определен Сторонами в сумме 50 000 руб. (п. 3.1. Соглашения № 157).

Оплата вознаграждения адвоката в размере 50 000 руб. была произведена платежным поручением № 63 от 24.02.2022 г.

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные Истцом, не являются чрезмерно завышенными, находятся в разумных пределах, соответствуют сложившимся в Санкт-Петербурге уровню оплаты услуг адвокатов, а также соотносятся со сложностью дела, объемом оказанных представителем услуг и другими обстоятельствами.

В отзыве на иск ответчик просит применить статью 333 ГК РФ и уменьшить сумму неустойки ввиду несоразмерности.

Суд не усматривает оснований для уменьшения неустойки, поскольку она рассчитана с учетом ограничения, установленного договором, а ставка для расчета является обычной и наиболее распространенной.

Расходы на представителя подлежат взысканию в размере 30 000 руб., исходя из характера дела и отсутствия возражений ответчика по существу требований.

Расходы на уплату госпошлины относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с ООО "СтройСиндикат" (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "ТОРСИОН" (ОГРН 

<

***>) 3 040 931,02 руб. задолженности по договору №23 от 23.04.2021, 480 729,32 руб. неустойки, всего 3 521 660,34 руб., 30 000 руб. в возмещение расходов на оплату юридических услуг, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 40 608,00 руб.

Возвратить ООО "ТОРСИОН" (ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 1 187,00 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.