АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А06-2206/2024

г. Астрахань

20 сентября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 сентября 2024 года

            Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи Аюповой А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кулиной А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Акционерного общества "Газпром газораспределение" о признании незаконным и отмене постановления Управления федеральной антимонопольной службы России по Астраханской области по делу об административном правонарушении от 21.02.2024 № 030/04/9.21-1335/2023, о прекращении производства по делу об административном правонарушении,

при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО1,

            В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ в судебном заседании 10.09.2024 объявлялся перерыв до 16.08.2024.

при участии до перерыва:

от заявителя: ФИО2 - представитель по доверенности  № 2024-50 от 11.07.2024 года;

от заинтересованного лица: ФИО3 – представитель по доверенности №27 от 19.08.2024г.,

от третьего лица: не явилась, извещена;

при участии после перерыва: 

от заявителя: ФИО2 - представитель по доверенности  № 2024-50 от 11.07.2024 года;

от заинтересованного лица: ФИО4 – представитель по доверенности от 14.06.2024 года № 22; 

от третьего лица: не явилась, извещена.

 

             Акционерное общество "Газпром газораспределение" обратилось в арбитражный суд с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области о признании незаконным и отмене постановления Управления федеральной антимонопольной службы России по Астраханской области по делу об административном правонарушении от 21.02.2024 № 030/04/9.21-1335/2023, о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечения срока привлечения к административной ответственности,

         В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании по ходатайству представителя антимонопольного органа объявлялся перерыв до 16 сентября 2024 года. 

         До и после перерыва третье лицо ФИО1 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом в соответствии с требованиями статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Информация о движении дела, в том числе о перерыве, размещена на официальном интернет-сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru

      В соответствии с требованиями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие возражений, дело рассмотрено без участия в судебном заседании указанного лица.

     Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования по основаниям,  изложенным в заявлении, и дополнении к заявлению.

     Представитель УФАС по АО возражал против удовлетворения заявленных требований, просил суд отказать в их удовлетворении.

     Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд,

                                                                УСТАНОВИЛ:

         Как следует из материалов дела, в УФАС по АО 23.11.2023 поступила жалоба ФИО1 на бездействие АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ», выразившееся в нарушении порядка осуществления мероприятий по подключению объекта ФИО1, расположенного по адресу: Астраханская обл.. г. Астрахань, Трусовский район, ул. Трактористов, 40, кадастровый номер 30:12:040568:249 к сети газораспределения.

      Усмотрев в действиях Общества состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена  частью 1 статьи  9.21 КоАП РФ, 06.02.2023 УФАС по АО составило в отношении Общества протокол об административном правонарушении № 030/04/9.21-1335/2023. 

      21.02.2024 на основании указанного протокола об административном правонарушении и других материалов, УФАС по АО вынесло в отношении Общества постановление о назначении административного наказания по делу № 030/04/9.21-1335/2023 об административном правонарушении о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.

        Общество не согласилось с вынесенным постановлением антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности и обжаловало его в судебном порядке.         

         Изучив обстоятельства дела, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ в совокупности представленные доказательства, суд считает требование Общества подлежащим удовлетворению, исходя из следующего.

          В соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

          Квалификация административного правонарушения (проступка) предполагает наличие состава правонарушения. В структуру состава административного правонарушения входят следующие элементы: объект правонарушения, объективная сторона правонарушения, субъект правонарушения, субъективная сторона административного правонарушения.

        Частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение субъектом естественной монополии установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям.

      Объективную сторону указанного административного правонарушения образует нарушение субъектом естественной монополии установленного порядка подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям.

       Субъектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.21 КоАП РФ, является субъект естественной монополии, обеспечивающий подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям.

       Субъективная сторона может быть выражена как в форме умысла, так и в форме неосторожности.

       Указание на форму вины применительно к юридическим лицам не может расцениваться как несовместимое с их качественными характеристиками как субъектов права. Вместе с тем, использование широкого подхода к определению виновности юридического лица предполагает, что невозможность установления конкретной формы вины не исключает привлечение юридического лица к ответственности (Постановления Конституционного Суда РФ от 14.04.2020 N 17-П, от 21.07.2021 N 39-П).

        Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства определен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержден Правилами № 1547, которые вступили в законную силу 18.10.2021 (далее - Правила № 1547). 

       По смыслу пункта 10 Правил № 1547 заявитель вправе представлять заявку о подключении исполнителю в офисе исполнителя, либо через личный кабинет заявителя, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), либо через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или через региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее -региональный портал) при наличии технической возможности приема соответствующих заявок, либо письмом, направляемым в адрес исполнителя. 

       Единый оператор газификации, региональный оператор газификации и исполнитель обязаны обеспечить принятие в электронном виде заявок о подключении и прилагаемых документов от заявителей. 

       Региональный оператор газификации по результатам рассмотрения полученной заявки о подключении, но не позднее одного рабочего дня со дня регистрации заявки о подключении направляет заявителю уведомление о принятии в работу указанной заявки посредством личного кабинета заявителя на официальном сайте регионального оператора газификации, а исполнителю - заявку о подключении и приложенные к ней документы и сведения (за исключением случая, когда исполнителем является региональный оператор газификации). 

      Согласно пункту 61 Правил №1547 мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем (кроме случая, указанного в пункте 12 настоящих Правил), а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем (кроме случая, указанного в пункте 90 настоящих Правил). В соответствии с пунктом 119 Правил № 1547 в целях подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации заявитель направляет на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявку о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по типовой форме согласно приложению № 7 (далее - заявка о догазификации). 

       Согласно пункту 121 Правил № 1547 (в редакции, действующей в спорный период) срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

      Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяемый программой газификации, не может выходить за пределы 2022 года, за исключением случаев, когда:              

для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем; 

для подключения домовладений, расположенных в населенных пунктах, в которых газораспределительные сети будут проложены после 1 января 2022 г.; 

для подключения домовладений требуется осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) со сроком, определенным в соответствии с пунктом 122 настоящих Правил, выходящим за пределы 2022 года. 

        В соответствии с пунктом 122 Правил № 1547 в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать: 

30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка; 

100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров; 

135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров; 

200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 200 до 500 метров; 

один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров. 

        Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен не более чем: 

на 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа; на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров; 

на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения; 

на 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности; 

на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения с автомобильными дорогами регионального или федерального значения, железными дорогами, водными преградами, проведения лесоустроительных работ и (или) прокладке газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, и (или) в границах зон охраны памятников историко-культурного наследия. 

         Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на 70 дней (200 дней - для случаев, для которых настоящим пунктом предусмотрено продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 200 дней). 

        В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению). 

       В соответствии с пунктом 123 Правил № 1547 для случаев, указанных в пункте 121 настоящих Правил, в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил. 

       При этом, согласно пункту 58 Правил № 1547 в случае если мероприятия по подключению (технологическому присоединению), выполняемые заявителем, не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный заключенным договором о подключении, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен по инициативе заявителя (за исключением случая установления срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в соответствии с пунктом 57 настоящих Правил). 

       Для продления указанного срока заявитель не позднее чем за 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, направляет исполнителю письменное предложение о внесении изменений в договор о подключении, предусматривающее продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

        Как следует из материалов дела, между ФИО1 и АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ» подписан договор № ТП-АСО-143/21-ДГ от 03.02.2022 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения. Согласно пункту 3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет до 31.12.2022.

       29.12.2022 между ФИО1 и АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ» было подписано дополнительное соглашение № 1 к Договору ТП-АСО-143/21-ДГ от 03.02.2022 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

       Согласно пункту 1 дополнительного соглашения № 1 от 29.11.2022 к договору № ТП-АСО-143/21-ДГ от 03.02.2022 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 730 дней со дня заключения договора, то есть до 03.02.2024 года.

        К указанной дате срок выполнения мероприятий по подключению, предусмотренный договором и дополнительным соглашениями, истек. Однако, мероприятия по подключению (технологическому присоединению) Обществом не исполнены. 

        Между тем, в силу части 1 статьи 1.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

        В свою очередь, срок давности привлечения к административной ответственности за совершение рассматриваемого по делу административного правонарушения в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ составляет один год.

       Из разъяснений, приведенных в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", следует, что срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется по общим правилам исчисления сроков - со дня, следующего за днем совершения административного правонарушения (за днем обнаружения правонарушения).Невыполнение предусмотренной правовыми актами обязанности к установленному сроку свидетельствует о том, что административное правонарушение не является длящимся.

         В пункте 19 постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 27.01.2003 № 2 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" также предусмотрено, что административные правонарушения, выражающиеся в невыполнении обязанности к конкретному сроку, не могут быть рассмотрены в качестве длящихся.

        Как было указано выше, согласно пункту 3 вышепоименованного Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет до 31.12.2022. Кроме того, последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения.  В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем такого подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день. Поскольку 31.12.2022г. являлся выходным днем, соответственно, с учетом новогоднего периода, первым рабочим днем было 09.01.2023 года.

        Из совокупного анализа вышеприведенных норм, в частности вышеуказанного пункта 122 Правил № 1547, арбитражный суд приходит к выводу о том, что годичный срок давности привлечения заявителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ следует исчислять с даты истечения срока подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства, предусмотренного пунктом 3 вышепоименованного Договора, то есть после 09.01.2023.

        В силу пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае истечения установленных статьей 4.5 КоАП РФ сроков давности привлечения к административной ответственности.

      Аналогичная правовая позиция содержится в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 16.06.2009 № 9-П, определении Конституционного Суда Российской Федерации от 15.07.2010 № 1109-О-О, а также в пункте 13.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и в пункте 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.01.2003 № 2 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

       Как установлено арбитражным судом, оспариваемое постановление по делу об административном правонарушении было вынесено антимонопольным органом 21.02.2024, то есть, с пропуском предусмотренного ст. 4.5 КоАП РФ годичного срока.

      Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд установил, что вменяемое Обществу правонарушение длящимся не является, т.к. вышеприведенными нормами соответствующая обязанность возлагалась на Общество к определенному сроку.

       Следовательно, предусмотренный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности, составляющий один год, истек к моменту вынесения административным органом оспариваемого постановления, в связи с чем, оно подлежит признанию его незаконным и отмене.

       При этом, суд обращает внимание, что Арбитражный процессуальный кодекс РФ не предполагает прекращение производства по делу об административном правонарушении арбитражным судом в случае признания незаконным и отмены постановления о привлечении к административной ответственности.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области о привлечении к административной ответственности по делу №030/04/9.21-1335/2023 от 21.02.2024 об административном правонарушении признать незаконным и отменить.

             Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»

Судья

А.Н. Аюпова