АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-10064/2024

г. Чебоксары

31 января 2025 года

Резолютивная часть решения оглашена 28.01.2025.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Кисаповой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Александровой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

закрытого акционерного общества "Чувашгипроводхоз", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Россия 428024, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, пр. И.Я.Яковлева д. 19

к  обществу с ограниченной ответственностью "Поволжская строительно-инжиниринговая компания", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Россия 428000, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, ул. Гагарина Ю. зд. 55, пом. 26

о взыскании 2 403 874 руб. 64 коп.,

с участием в деле в качестве 3-го лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора автономного учреждения «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики».

при участии:

от истца: ФИО1 по доверенности  от 03.08.2022

установил:

закрытое акционерное общество «Чувашгипроводхоз» обратилось в суд с иском к  обществу с ограниченной ответственностью «Поволжская строительно-инжиниринговая компания» о взыскании 2 141 402 руб.50 коп. долга, 262 472 руб.14 коп. пени за период с 01.07.2024 по 14.11.2024 и далее по день оплаты долга.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением обязательств по договорам №5607 от 01.03.2024, №5627 от 28.03.2024.

В судебном заседании представитель истца иск поддержал.

Ответчик не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд установил следующее.

01 марта 2023 г. между сторонами заключен договор № 5607 на выполнение инженерно-геологических изысканий.

В соответствии с п. 1.1. Договора истецпринял на себя обязательства выполнить инженерно-геологические изыскания на объекте: «Строительство подпорных стен комплексной застройки микрорайона «Дубрава парк» г. Чебоксары» в установленные сроки и в соответствии с Заданием на выполнение инженерно-геологических изысканий (Приложение № 1 к Договору).

Согласно п. 1.3. Договора результатом работ являются: материалы инженерно-геологических изысканий (Технический отчет с пояснительной запиской), отвечающие требованиям Задания на выполнение инженерно-геологических изысканий получившая положительное заключение государственной экспертизы (Приложение № 1 к Договору).

Сроки выполнения работ согласованы сторонами в Календарном плане (Приложения № 3 к Договору) (п. 1.4. Договора).

В соответствии с п. 2.1. Договора стоимость Работ составляет 2 222 805 рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен (Приложение № 2 к Договору).

Авансовый платеж произведен ответчиком 30.11.2023 г. в размере 1 111 402 руб. 50 коп.

28 июня 2024 г. Исполнитель передал Заказчику результаты выполненных работ - Письмом № 01/ от 28 июня 2024 г.

28  марта  2023   г.   между  закрытым   акционерным   обществом  «Институт «Чувашгипроводхоз» (далее - Исполнитель, истец) и обществом с ограниченной ответственностью  «Поволжская   строительно-инжиниринговая   компания»   (далее  -аказчик, ответчик) заключен договор № 5627 на выполнение инженерно-геологических изысканий (далее - Договор).

В соответствии   с п. 1.1. Договора Исполнитель принял на себя обязательства ыполнить инженерно-геологические изыскания на объекте: «Сети хозяйственно-бытовой канализации микрорайона «Дубрава парк» г. Чебоксары» (далее - Работы в установленные сроки и в соответствии с Заданием на выполнение инженерно-геологических изысканий (Приложение № 1 к Договору).

Согласно п. 1.3. Договора результатом работ являются: материалы инженерно-геологических изысканий (Технический отчет), отвечающие требованиям Задания на выполнение инженерно-геологических изысканий получившая положительное заключение государственной экспертизы (Приложение № 1 к Договору).

Сроки выполнения работ согласованы сторонами в Календарном плане (Приложения № 3 к Договору) (п. 1.4. Договора).

В соответствии с п. 2.1. Договора стоимость Работ составляет 1 450 000 рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен (Приложение № 2 к Договору).

Авансовый платеж произведен ответчиком 28.03.2024 г. в размере 420 000 руб. 00 коп.

03 июля 2024 г. Исполнитель передал Заказчику результаты выполненных работ - накладная от 03 июля 2024 г.

Оплата по договорам должна быть произведена в соответствии с Календарным планом, но не позднее 30.06.2024 г. по договору № 5607 от 01.03.2024 г., не позднее 30.07.2024 г. по договору № 5627 от 28.03.2024 г..

Оплата по договорам ответчиком не произведена в установленные сроки, в связи с чем истец обратился к ответчику с претензиями № 02-28/113 от 08.08.2024 г., № 02-28/114 от 08.08.2024 г.

Поскольку оплата до настоящего момента не произведена, истец обратился с настоящим иском в суд.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 769 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Согласно статье 773 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок.

Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан принять результаты выполненных работ и оплатить их (пункт 1 статьи 774 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ответчик доказательства оплаты работ не представил в связи с чем 

На основании пункта 1 статьи 329 Кодекса исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 Кодекса).

При несвоевременной оплате выполненных работ Заказчиком, Исполнитель вправе требовать от Заказчика пени в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа. 

Расчет неустойки судом проверен и признан обоснованным в заявленном размере.

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению как основанные на законе и обоснованные материалами дела.

Расходы по госпошлине суд относит на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества ограниченной ответственностью "Поволжская строительно-инжиниринговая компания" в пользу закрытого акционерного общества "Чувашгипроводхоз" 2`141`402 (Два миллиона сто сорок одна тысяча четыреста два) руб.50 коп. долга, 262`472 (Двести шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят два) руб.14 коп. пени за период с 01.07.2024 по 14.11.2024 и далее по день оплаты долга, 97`116 (Девяносто семь тысяч сто шестнадцать)  руб.00 коп. расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

Н.В. Кисапова