Арбитражный суд Калининградской области  Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236016  

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru http://www.kaliningrad.arbitr.ru Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А21-13776/2018

г. Калининград

09 апреля 2019 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО «Аркада» в месячный срок со дня вступления решения суда в законную  силу устранить за счет собственных средств строительные недостатки (дефекты) в  выполненных работах по капитальному ремонту кровли и водосточной системы  многоквартирного дома расположенного по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул.  Луначарского, д. 24, а именно произвести следующие работы:  

- выполнить демонтаж металлочерепицы - 65,3 кв. м.*1,2; - выполнить демонтаж пленки подкровельной - 65,3 кв. м.; 

- выполнить демонтаж обрешетки толщиной до 25 мм - 65,3 кв. м.;  - выполнить монтаж новой обрешетки толщиной 25 мм - 65,3 кв. м.;  

- выполнить покрытие древесины антипиреном «Пирилакс СС-2» при помощи  аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной  эффективности по нормам пожарной безопасности (НПБ) 251 - 130,6 кв. м.;  

- выполнить монтаж пленки подкровельной типа ЮТАКОН - 65,3 кв. м.; 

- выполнить устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам с учетом  нового материала - 65,3 кв. м.;  

- демонтировать слуховое окно (с сохранением) - 1 шт.; - выполнить монтаж слухового окна с устройством деревянного каркаса - 1 шт.; - выполнить замену водосточных желобов - 20 м.; - выполнить замену стальных листов на фронтоне - 4,5 кв. м. Исковое требование Администрации Советского городского округа о взыскании с ООО «Аркада» 1 140 844 руб. штрафа оставить без рассмотрения. 

Взыскать с ООО «Аркада» в доход федерального бюджета 6000 руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в  Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Т.В.Пахомова