АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д. 20, тел. (843) 291-04-15

http://faspo.arbitr.ru   e-mail: info@faspo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда кассационной инстанции

Ф06-20616/2022

Дело № А65-8699/2021

г. Казань

22 июля 2022 года

Резолютивная часть постановления объявлена 21 июля 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 июля 2022 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Мельниковой Н.Ю., 

судей  Топорова А.В., Желаевой М.З.,

при участии представителя:

ответчика – ФИО1 (доверенность от 12.07.2022),

в отсутствие:

истца  – извещен надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу  общества с ограниченной ответственностью «Тимер Лэнд Плюс»

на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01.02.2022 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2022

по делу № А65-8699/2021

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Тимер Лэнд Плюс» к обществу с ограниченной ответственность «Центр экспертизы и геоизысканий» о взыскании убытков

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Тимер Лэнд Плюс» (далее – ООО «Тимер Лэнд Плюс», истец, заявитель) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственность «Центр экспертизы и геоизысканий» (далее – ООО «Центр экспертизы и геоизысканий», ответчик)  о взыскании убытков в размере 839 790 руб.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 01.02.2022 по делу № А65-8699/2021 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2022 решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01.02.2022 оставлено без изменения.

Не согласившись с решением арбитражного суда и постановлением арбитражного апелляционного суда ООО «Тимер Лэнд Плюс» обратилось в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить, полностью  и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований ООО «Тимер Лэнд Плюс» о взыскании убытков в размере 839 790 руб. по основаниям, изложенным в жалобе.

В частности  заявитель  кассационной  жалобы  указывает на процессуальные  нарушения  судом первой  инстанции, выразившиеся в  непредоставлении ему  достаточного времени  для ознакомления  с заключением судебной  экспертизы и не отложением  дела, также  заявитель указывает  на допущенные экспертом  нарушения  при проведении  судебной экспертизы.

От ООО «Центр экспертизы и геоизысканий» поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения 

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, заслушав представителя ответчика,  проверив в соответствии с пунктом 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) правильность применения судами первой и  апелляционной инстанций   норм материального и процессуального права, суд округа приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы ввиду следующего.

Арбитражными судами первой  и апелляционной инстанций установлено, что между истцом (заказчик) и ответчиком (проектировщик) заключен договор подряда на выполнение проектных работ  от 09.01.2020 № 28-01/20ПД, по условиям которого заказчик поручает и оплачивает, а проектировщик принимает на себя обязательства по разработке проектной документации, в части корректировки раздела проектной документации «ПОС" - проект организации строительства, по объекту – «Бизнес-Парк «Азинский» (пр. Победы, 173) класса В+ в 

<

...> очередь строительства, 2-й этап, в соответствии с выданным заданием на проектирование, утвержденное заказчиком.

Согласно пункту 3.1 договора цена работ составляет – 80 000 руб.

Выполнение работ подтверждается представленным в материалы дела актом выполненных работ  от 22.01.2020 № 3 (л.д 6 т. 2). Истец свои обязательства по оплате выполнил в полном объеме, что подтверждается платежным поручением от 23.01.2020 № 76 (л.д. 5 т. 2).

Между сторонами было заключено дополнительное соглашение от 24.03.2020, в соответствии с пунктом 1.1. которого заказчик поручает и оплачивает, а проектировщик принимает на себя обязательства по разработке проектной документации по объекту «Бизнес-парк «Азинский» (пр. Победы д. 173) класса В+ в 

<

...> очередь строительства, 2-й этап», корректировка раздела рабочей документации «КЖ» -(конструкции железобетонные), с последующей корректировкой раздела «КР» (конструктивные решения) стадии «П» (проектная документация) для последующего прохождения экспертизы проектной документации, в части: корректировка монолитной стены вдоль оси «26»; внесение изменений в схему свай и ростверков по оси «26» и в «первый блок секции» в соответствии с выданным заданием на проектирование от заказчика (исполнительная схема и письмо - задание входящий № 20 от 23.03.2020).

Результатом выполненных работ по вышеуказанным пунктам является: внесение изменений в геометрические размеры монолитной стены - определяется проектным решением (расчетом); внесение изменений в расположение свай, свай дублеров и изменение конфигурации ростверков - определяется проектным решением (расчетом); выполнение расчета и проверка технической возможности.

Ответчик передал истцу проектную документацию 12.03.2020 по акту приема-передачи, также проектная документация передана по акту приема-передачи от 16.04.2020 и от 22.04.2020.

Впоследствии в апреле 2020 года ответчиком истцу передана проектная документация с вариантом усиления шпунтового ограждения.                    В указанном варианте усиления шпунтового ограждения ответчик указал на выявленные несоответствия и отклонения от проекта при производстве монтажных работ, указав, каким образом необходимо усилить шпунтовое ограждение. Ответчик 29.04.2020 передал истцу расчет шпунтового ограждения и расчет шпунтового ограждения по сечению 2-2- с отклонениями.

Исковые требования истца мотивированы тем, что при проведении работ произошла просадка грунта.

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что причиной обрушения являются существенные отклонения от представленных проектных решений при выполнении строительно-монтажных работ.

В связи с просадкой грунта и разрушения близлежащих гаражей, истец обратился к ФГБОУВО «КазГАСУ» для определения причины обрушения грунта.

Согласно заключения экспертизы основной причиной выявленных чрезмерных горизонтальных деформаций ограждения котлована, а также вертикальных и горизонтальных деформаций окружающего грунтового массива, приведших к потере несущей способности и устойчивости окружающего грунтового массива, и как следствие, к чрезмерным недопустимым деформациям, повреждениям и разрушениям зданий близлежащей застройки (зданий гаражей), являются ошибки, допущенные при проектировании ограждения котлована, отсутствие указаний по способу погружения труб, и отсутствие предусмотренного нормами геотехнического прогноза влияния устройства котлована на окружающую застройку. Усматривается, что в проекте 01-04/19Р-КЖ были допущены ошибки при проектировании котлована, а именно отсутствие указаний по способу погружения труб, и отсутствие предусмотренного нормами геотехнического прогноза влияния устройства котлована на окружающую застройку.

Вследствие чего, как считает истец, им понесены убытки в размере 511 710 руб., составившие стоимость устранения образовавшихся последствий ошибочного проектирования ответчиком.

Проведенные по устранению последствий работы состояли в использовании техники, найма рабочих, приобретении расходных материалов, мониторинга: вызов геодезиста по 5000 руб.*6 раз = 30 000 руб., мониторинг существующих зданий – 80 000 руб., срезка шпунтов 135 000 руб., компрессор 8 час. по 800 руб./1 час = 6400 руб., кран – 35 200 руб., экскаватор 51 200 руб., самосвал – 8800 руб., рабочие – 42 000 руб., шпунт 3200 руб., фанера – 21 330 руб., резка шпунтов 6000 руб., компрессор 6400 руб., восстановление обрушения грунта – 38 400 руб., рейка от невелира - 3000 руб., работы экскаватора погрузчика – 39 200 руб.

Расходы по экспертизе составили 328 080 руб., что подтверждается договором № ОФДСиИГ/4-20 от 06.07.2020, актом сдачи-приемки № 1 от 21.07.2020, счетом-фактурой № 0000-0139/2 от 21.07.2020, платежными поручениями № 474 от 08.07.2020 и № 478 от 24.07.2020.

После обрушения грунта истцом ответчику были направлены письма № 7а от 21.04.2020, № 08А от 23.04.2020, № 09А от 24.04.2020., № 12А от 28.04.2020, № 10А от 24.04.2020, № 5А от 21.04.2020 (л.д. 7-13, т. 2), а также досудебная претензия № 2212 от 22.12.2020 с требованием возместить понесенные убытки. Неисполнение требований, указанных в претензии, явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Арбитражные  суды   квалифицировали отношения сторон как регулируемые нормами главы 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи  702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно части 1 статьи 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия или новую технологию, а также техническую и (или) конструкторскую документацию на них, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (часть 1 статьи 769 ГК РФ).

В силу части 1 статьи 778 ГК РФ к договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ применяются положения параграфа 1 главы 37 настоящего Кодекса, если это не противоречит правилам настоящей главы, а также особенностям предмета договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (часть 1 статьи 720 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 721 ГК РФ качество, выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно статье 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Ответственность, установленная статьей 15 ГК РФ, является гражданско-правовой, привлечение к которой возможно при доказанности совокупности нескольких условий: наличия противоправного деяния (действия, бездействия), наличия вреда и причинно-следственной связи между противоправным деянием и наступившими последствиями (убытками), а также вины лица, ответственного за убытки.

Недоказанность одного из необходимых оснований возмещения убытков исключает возможность удовлетворения исковых требований.

Согласно части 4 статьи 720 ГК РФ заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

Арбитражным  судом  первой  инстанции установлено, что истец не известил ответчика о проведении досудебного обследования с привлечением ФГБОУВО «КазГАСУ», чем нарушил положения части 4 статьи 720 ГК РФ.

Для разрешения вопросов, требующих специальных познаний, судом первой инстанции по делу назначена судебная экспертиза, производство которой было поручено экспертам общества с ограниченной ответственностью «Институт независимых экспертиз» ФИО2, ФИО3 и ФИО4 с постановкой следующих вопросов

1). Соответствует ли качество проектной документации (01-04/19-Р-КЖ; 01-04/19-ППОС; проектная документация - вариант усиления шпунтового ограждения (стадия Р), выполненная ООО «Центр экспертизы и геоизысканий», условиям Договора подряда №28-01/20ПД на выполнение проектных работ от 09.01.2020, дополнительным соглашениям, нормативным требованиям?

2) Если в проектной документации выявлены недостатки - повлекли ли они отклонения/деформацию шпунтового ограждения котлована?

3) Установить причины отклонения/деформации шпунтового ограждения котлована? Является ли отсутствие указаний по способу погружения труб, и отсутствие предусмотренного нормами (пп.9.33-9.39 [5]) геотехнического прогноза влияния устройства котлована на окружающую застройку» причиной чрезмерных горизонтальных деформаций ограждения котлована, а также вертикальных и горизонтальных деформаций окружающего грунтового массива, приведших к потере несущей способности и устойчивости окружающего грунтового массива?

4) Установить соответствуют ли работы, выполненные при осуществлении строительно-монтажных работ указаниям проектной документации (01-04./19- Р-КЖ, 01- 04/19-П-ПОС), проектной документации - вариант усиления шпунтовогоограждения (стадия Р), выполненной ООО «Центр экспертизы и геоизысканий», имелось ли в ходе проведения работ (до и после обрушения) фактическое отклонение от проектов при производстве работ на основании представленной исполнительной и технической документации? Являются ли данные отклонения допустимыми?

5) Установить стоимость устранения последствий отклонения/деформации шпунтового ограждения котлована?

По результатам проведенной экспертизы в материалы дела представлено экспертное заключение №01-22, в котором экспертом даны ответы на поставленные судом вопросы.

Согласно ответу на первый вопрос проектные решения раздела ПОС на стадии Проектная документация выполнены в полном объеме и соответствуют требованиям технических регламентов, строительных правил, «Положению о составе разделов проектной документации», утвержденного Постановлением Правительства от 16.02.200  № 87 и договору подряда № 28-01/20ПД на выполнение проектных работ от 09.01.2020 Строительные конструкции измененной части рабочей документации (усиления шпунтового ограждения (стадия Р, 01-04/19-Р-КЖ) соответствуют требованиям статьи15 Федерального закона Технический регламент  «О безопасности зданий и сооружений» (№384-ФЗ от 30.12.2009), геологическим изысканиям и совместимы с решениями, в отношении которых ранее была проведена экспертиза.

Согласно ответу на второй вопрос проектные решения раздела ПОС на стадии Проектная документация выполнены в полном объеме и соответствуют требованиям технических регламентов, строительных правил, «Положению о составе разделов проектной документации», утвержденного Постановлением Правительства от 16.02.200  №87 и договору подряда № 28-01/20ПД на выполнение проектных работ от 09.01.2020 Строительные конструкции измененной части рабочей документации (усиления шпунтового ограждения (стадия Р, 01-04/19-Р-КЖ) соответствуют требованиям статьи 15 Федерального закона Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» (№ 384-ФЗ от 30.12.2009), геологическим изысканиям и совместимы с решениями, в отношении которых ранее была проведена экспертиза.

Согласно ответу на третий вопрос в  представленной в материалах дела проектной документации сведения о способе погружения труб присутствует в достаточном объеме, наличие данных сведений не является причиной отклонения/деформации шпунтового ограждения котлована. В соответствии с Протоколом № 128: П.12. Геотехнический прогноз отправить генподрядчику – ООО «УК «Столица», запись от 25.05.2020. Заказчиком ООО «УК «Столица» был выполнен геотехнический прогноз и передан генподрядчику, но в материалах дела заключение по геотехническому прогнозу отсутствует. Экспертами сделать вывод о потере несущей способности и устойчивости окружающего грунтового массива в соответствии с геотехническим прогнозом не представляется возможным».

Согласно ответу на четвертый вопрос эксперты определили, что сваи по оси 26 загрузили не на проектную отметку, и со сдвижкой относительно оси свай, что не соответствует проектной документации. По результатам обследования конструкций, был выполнен расчет 2-х сертифицированных программных комплексах. В плоской постановке в комплексе программ GeoSoft программой GeoWall и трехмерной постановке задачи – Midas GTS NX. Геологическое строение принято из отчета ИГИ на объекте «Бизнес-Парк» по ул. Проспект Победы 159 в г. Казань», выполненного ООО «ВАН» в 2018г. По результатам расчетов установлено, что несущая способность подпорной стены по консольной схеме не обеспечена при недобивке свай. На основании чего, можно утверждать, что выявленные отклонения при производстве работ от проектной документации являются не допустимыми. Поэтому было принято решение по усилению шпунтового ограждения – несколько вариантов. Протокол производственного совещания № 95 от 17.04.2020 принято решение и согласовано сторонами о том, что не производить работы по забивке свай и раскопки шпунтовых свай до выдачи ООО «ЦЭГ» проектных решений по усилению шпунтового ограждения. Протокол согласован тремя сторонами: представителями ООО «УК «Столица», ООО «УК «Экострой», ООО «ЦЭГ». В апреле выполнен проект усиления шпунтового ограждения, который был согласован заказчиком. Проект усиления шпунтового ограждения подрядчиком не был выполнен, вместо этого подрядчик выполнил действия, согласование которых с заказчиком и проектной организацией отсутствует. Шпунты в количестве 9 шт. (№ 20-29) были срезаны, что не соответствует проектным решениям и данное действие недопустимо.

Согласно ответу на пятый вопрос в соответствии с представленным письмом Адвоката Игнатьевой Е.С., представителя истца по доверенности от 25.11.2021 на запрос экспертов представить исполнительную документацию по выполнению работ по усилении. Шпунтового ограждения, ООО «Тимер Ленд Плюс» работы по усилению шпунтового ограждения не проводил. То есть работы по устранению последствий отклонения/деформации шпунтового ограждения котлована, согласованные с заказчиком и лицом, осуществляющий авторский надзор, не проводились. Поэтому стоимость не выполненных работ экспертами не определялась. Срезка шпунтов в количестве 9 шт. (№20-29), выполненное в рамках работ, заявленных в исковом заявлении о взыскании убытков вследствие некачественного исполнения обязательств, не соответствует проектным решениям. Данное действие недопустимо, так как не соответствует работам, необходимым для восстановления работоспособного состояния шпунтового ограждения, то есть устранения последствий отклонения/деформации шпунтового ограждения котлована.

Оценив экспертное заключение с точки зрения полноты, обоснованности и соответствия требованиям статей 86, 87 АПК РФ, арбитражные суды признали его надлежащим доказательством.

При этом истцом ни в суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции ходатайство о назначении по делу повторной либо дополнительной экспертизы заявлено не было. При указанных обстоятельствах доводы заявителя о том, что истец был лишен возможности опровергнуть выводы экспертов, оценены  и отклонены судом апелляционной инстанции, поскольку в силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Установив  по делу  обстоятельства,  оценив  доводы  и возражения  сторон  и представленные  доказательства,  в том числе  выводы экспертов о том, что проектные решения раздела ПОС на стадии Проектная документация выполнены ответчиком в полном объеме и соответствуют требованиям технических регламентов, в их совокупности, арбитражные суды пришли к  выводу  об отсутствии  оснований для  удовлетворения требований  истца о взыскании с ответчика убытков.

Истец также ссылался на то, что  предложенное ответчиком техническое решение по усилению шпунтового ограждения не представлялось возможным реализовать. Между тем в материалах дела отсутствуют доказательства уведомления истцом ответчика об этом. При этом на ответчика не могут быть возложены негативные последствия реализации истцом проекта без выполнения рекомендаций ответчика.

В силу  статьи  158  АПК РФ  отложение  рассмотрения  дела с учетом  ходатайства  истца в суде первой инстанции являлось правом  суда, а не обязанностью.

Участники  арбитражного спора должны  добросовестно пользоваться  своими  правами  и разумно  реализовывать свои  права на ознакомление  с  материалами  дела и  предоставлением возражений  и ходатайств.  Если  у истца  возникли  сомнения  в части достоверности  и полноты  экспертного заключения, он  имел  реальную возможность представить  свои возражения  и ходатайство о проведении  по делу  повторной  (дополнительной) экспертизы, заявить  о вызове экспертов и  задать  им  вопросы  для  устранения своих  сомнений.

Несогласие  с  выводами  экспертов  не может  являться достаточным  основанием  для  отмены  судебных актов.

Экспертное  заключение исследовано арбитражными судами и оценено   в  совокупности с  иными доказательствами и доводами,  представленными  сторонами.

Доводы кассационной жалобы изучены судом, однако, они подлежат отклонению, поскольку указанные в кассационной жалобе доводы не опровергают законность и обоснованность принятых по делу судебных актов и правильности выводов судов, а свидетельствуют о несогласии заявителя с установленными судами обстоятельствами и оценкой доказательств, и, по существу, направлены на их переоценку.

Переоценка доказательств и установление новых обстоятельств находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 АПК РФ.

Иная оценка заявителем жалобы установленных судами фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемых судебных актов судами нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемых судебных актов, кассационной инстанцией не установлено. Нормы материального права применены правильно.

Таким образом, на основании вышеизложенного суд кассационной инстанции считает, что оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01.02.2022 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2022 по делу № А65-8699/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке и сроки, установленные статьями 291.1., 291.2. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий судьяН.Ю. Мельникова

СудьиА.В. Топоров

М.З. Желаева