АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620000, 

<

...> стр. 1,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-33590/2025

09 октября 2025 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 сентября 2025 года

Полный текст решения изготовлен 09 октября 2025 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.С. Дёминой, при ведении протокола судебного заседания (до перерыва 10.09.2025) секретарем судебного заседания Е.И. Мартусовой, (после перерыва 23.09.2025) помощником судьи А.В. Исаевой, (после перерыва 25.09.2025) секретарем судебного заседания Е.И. Мартусовой рассмотрел в судебном заседании дело №А60-33590/2025 

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКС (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "УРАЛСТРОЙЭНЕРГО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 14 278 568 руб. 62 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 06.06.2025;

от ответчика: не явились.

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКС обратился в Арбитражный  суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "УРАЛСТРОЙЭНЕРГО" с требованием о взыскании 14 278 568 руб. 62 коп.

Определением от 18.06.2025 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение  всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству.

Определением от 23.07.2025 дело назначено к судебному разбирательству.

От ответчика 08.09.2025 поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего требований относительно предмета спора ФГУП ПО «Октябрь». Истец возражает.

В удовлетворении ходатайства судом отказано.

 В судебном заседании, начавшемся 10.09.2025, объявлен перерыв до 23.09.2025  Информация о перерыве была размещена на сайте арбитражного суда, дополнительные меры по извещению участвующих в деле лиц не принимались, что соответствует информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.09.2006 № 113 «О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». После окончания перерыва судебное заседание продолжено 23.09.2025 в том же составе суда при ведении протокола помощником судьи  А.В. Исаевой.

От истца 12.09.2025 поступило ходатайство об уточнении исковых требований.

В судебном заседании 23.09.2025, объявлен перерыв до 25.09.2025  Информация о перерыве была размещена на сайте арбитражного суда, дополнительные меры по извещению участвующих в деле лиц не принимались, что соответствует информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.09.2006 № 113 «О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». После окончания перерыва судебное заседание продолжено 25.09.2025 в том же составе суда при ведении протокола секретарем судебного заседания.

От истца 23.09.2025 поступило ходатайство об уточнении иска, согласно которому просит: 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку по Договору субподряда № 01- 22/усэ/КУ от 10.01.2022 г. за просрочку оплаты выполненных работ в размере 77 206 рублей за период с 10.01.2025 по 25.09.2025 г., с продолжением начисления неустойки в порядке ст. 395 по ставке ЦБ РФ по день фактической оплаты задолженности, но в размере не более 757 757, 17 рублей (10 % от цены Договора). 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку по Договору субподряда № 33- 23/усэ/КУ от 09.01.2023 г. за просрочку оплаты выполненных работ в размере 8 743,14 рублей за период с 10.01.2025 по 25.09.2025 г., с продолжением начисления неустойки в порядке ст. 395 по ставке ЦБ РФ по день фактической оплаты задолженности, но в размере не более 618 913, 20 рублей (10 % от цены Договора). 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку по Договору субподряда № 07- 23/усэ/КУ от 25.01.2023 г. за просрочку оплаты выполненных работ в размере 1 225 927,31 рублей за период с 10.01.2025 по 25.09.2025 г., с продолжением начисления неустойки в порядке ст. 395 по ставке ЦБ РФ по день фактической оплаты задолженности, но в размере не более 3 667 177, 08 рублей (10 % от цены Договора). 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку по Договору субподряда № 46- 23/усэ/КУ от 05.09.2023 г. за просрочку оплаты выполненных работ в размере 236 978,72 рублей за период с 10.01.2025 по 25.09.2025 г., с продолжением начисления неустойки в порядке ст. 395 по ставке ЦБ РФ по день фактической оплаты задолженности, но в размере не более 994 892, 04 рублей (10 % от цены Договора). 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку по Договору субподряда № 47- 23/усэ/КУ от 18.09.2023 г. за просрочку оплаты выполненных работ в размере 5 911,49 рублей за период с 10.01.2025 по 25.09.2025 г., с продолжением начисления неустойки в порядке ст. 395 по ставке ЦБ РФ по день фактической оплаты задолженности, но в размере не более 208 947,36 рублей (10 % от цены Договора). 

Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку по Договору субподряда № 07- 24/усэ/КУ от 26.02.2024 г. за просрочку оплаты выполненных работ в размере 375 593,93 рублей за период с 01.10.2024 по 25.09.2025 г., с продолжением начисления неустойки в порядке ст. 395 по ставке ЦБ РФ по день фактической оплаты задолженности, но в размере не более рублей 921 310, 92 рублей (10 % от цены Договора).

От ответчика 23.09.025 поступило ходатайство о назначении судебной экспертизы.

Истец возражает.

В  удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы судом отказано по основаниям, изложенным в мотивировочной части настоящего решения. 

Уточнение иска от 23.09.2025 принято судом на основании ст. 49 АПК РФ.  

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

установил:

Как следует из материалов дела, между истцом (подрядчик) и ответчиком (генподрядчик) заключены договоры: договор субподряда №01-22/уэ/КУ от 10.01.2022, Договор субподряда № 33-23/усэ/КУ от 09.01.2023, Договор субподряда № 07-23/усэ/КУ от 25.01.2023, Договор субподряда № 46-23/усэ/КУ от 05.09.2023, Договор субподряда № 47-23/усэ/КУ от 18.09.2023, Договор субподряда № 07-24/усэ/КУ от 26.02.2024. 

Согласно договору субподряда №01-22/уэ/КУ от 10.01.2022 (договор 1).

В соответствии с п. 1.1.         Подрядчик в установленные сроки, согласно Договору, обязуется выполнить все предусмотренные настоящим Договором работы и иные предусмотренные Договором мероприятия и передать их Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять их и уплатить определенную Договором цену.

В соответствии с п. 1.2.         Наименование работ: «... на объекте... в г. Каменск-Уральский».

В соответствии с п.1.3. Место нахождения: г. Каменск-Уральский, Свердловской области.

В соответствии с п. 1.4.         Настоящий договор субподряда заключен во исполнение государственного контракта... - ИГК 2023587200012000000000066, в интересах Заказчика ФГУП «ПО «Октябрь», заключенного на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с п. 2.1.         Объем и содержание работ определены проектно-сметной документацией (Приложения № 1, 2, 3,4 к Договору) и Договором.

В соответствии с п. 2.2.         Срок начала работ: с даты подписания настоящего договора Окончание работ: 30.06.2022 года.

В соответствии с п. 3.1. Цена Договора (цена работ) составляет: 6 784 291,30 (Шесть миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи двести девяносто один) рубль 30 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать процентов).

Срок выполнения работ – с момента подписания Договора до 30.08.2024 г. (п. 2.2 Договора в редакции п.3 Дополнительного соглашения № 5 от 20.11.2023 г. к Договору №01-22/усэ/КУ).

Пунктом 2 Дополнительного соглашения № 7 от 30.07.2024 г. к Договору внесены окончательные изменения в части стоимости работ, которая составила 7 577 571,74 руб. в том числе НДС 20%.

В материалы дела представлены следующие доказательства исполнения подрядчиком своих обязательств по договору: 

- КС-2 № 1от 21.11.2022 на сумму 451 716,00 руб.;

- КС-2 № 2 от 21.11.2022 на сумму 34 976,40 руб.;

- КС-2 № 3 от 21.11.22 на сумму 488 116,80 руб.;

- КС-2 № 4 от 21.11.2022 на сумму 636 007,20 руб.;

- КС-2 № 5 от 21.11.22 на сумму 418 069,20 руб.;

- КС-2 № 6 от21.11.22 на сумму 2 143 969,20 руб.;

- КС-2 № 7 от 21.11.22 на сумму 509 104,8 руб.;

- КС-2 № 8 от 21.11.22 на сумму 486 543,60 руб.;

- КС-2 № 9 от 30.10.2023 на сумму 68 833,20 руб.;

- КС-2 № 10 от 30.10.2023 на сумму 9 692,40 руб.;

- КС-2 № 11 от30.01.24 на сумму 189 894,00 руб.;

- КС-2 № 12от 30.01.24 на сумму 138 764,4 руб.;

- КС-2 № 13 от 30.07.2024 на сумму 1 096 938,70 руб.

- КС-2 № 14 от 30.07.24 на сумму 212677,84 руб.;

- КС-2 № 15 от 30.07.2024 на сумму 144 987,60 руб.;

- КС-2 № 16 от 30.07.24 на сумму 24028,80 руб.;

- КС-2 № 17 от 05.08.24 на сумму 139 060,8 руб.;

- КС-2 № 18 от30.08.2024 на сумму 26689,20 руб.;

- КС-2 № 19 от 30.08.2024 на сумму 8 653,20 руб.;

- КС-2 № 20 от 30.08.2024 на сумму 20534,40 руб.;

- Кс-2 № 21 от 30.08.2024 на сумму 7 298,40 руб.;

- КС-2 № 22 от 30.08.2024 на сумму 321015,6 руб.;

Справками о стоимости работ (по форме КС-3):

- КС-3 №1 от 21.11.22 на сумму 5168503,20 руб.;

- КС-3 № 2 от 30.10.2023 на сумму 78525,6 руб.;

- КС-3 № 3 от 30.01.24 на сумму 328658,40 руб.;

- КС-3№ 4 от 30.07.24 на сумму 1478632,94 руб.;

- КС-3№ 5 от 05.08.2024 на сумму 139060,8 руб.;

- Кс-3№ 6 от 30.08.2024 на сумму 384190,8 руб.

А также направленными в адрес Генподрядчика счетами-фактурами:

- Сч-ф № 40 от 21.11.22 на сумму 5168503,20 руб.;

- Сч-ф № 56 от 30.10.2023г. на сумму 78525,6 руб.;

- Сч-ф № 5 от 30.01.24 на сумму 328658,40 руб.;

- Сч-ф № 53 от 30.07.24 на сумму 1478632,94 руб.;

- Сч-ф № 54 от 05.08.24 на сумму 139060.8 руб.;

- Сч-ф № 64 от 30.08.2024 на сумму 384190,8 руб.

Указанные акты подписаны сторонами без возражений.

Как установлено Дополнительным соглашением № 9 от 30.08.2024 к договору 1:

- Согласно п.1, финансирование работ Подрядчику может осуществляться

Генподрядчиком за счет собственных средств.

- п.2, В случае финансирования Генподрядчиком Подрядчика собственными средствами, платежи осуществляются с расчетного счета Генподрядчика на расчетный счет Подрядчика. Также возможна оплата напрямую Подрядчику третьим лицом, минуя счет Генподрядчика.

- п.3, Оплата за выполненные Подрядчиком работы в размере 542 030,97 руб. осуществляется Генподрядчиком на указанный в настоящем пункте расчетный счет Подрядчика.

Таким образом, указанным Дополнительным соглашением № 9, зафиксирована задолженность Генподрядчика перед Подрядчиком (соответствующая подписанному между сторонами Акту сверки расчетов, актам КС-2 и справкам КС-3), а также предусмотрен альтернативный способ расчетов. С учетом положений п. 3.6, 4.1.4 (оплата в течение 30 рабочих дней), оплата работ Подрядчика должна была быть произведена в срок до 11.10.2024 г. включительно. Доказательств исполнение генподрядчиком своих обязательств в материалы дела не представлено. 

Истцом в адрес Ответчика во исполнение п.15 договора 1, направлена Претензия Исх. № 02-04 от 01.04.2025 г. с требованием произвести оплату задолженности по Договору, что подтверждается описью вложения к почтовому отправлению с номером почтового идентификатора № 62340803025702 и почтовой квитанцией (чеком) № 38160 от 02.04.2025 г. 

В ответ на Претензию Ответчик направил в адрес Истца Гарантийное письмо Исх. № 02-05/усэ-319 от 07.04.2025 г., в котором гарантировал полную оплату задолженности по Договору в срок до 20.05.2025 г. 

Согласно договору субподряда № 33-23/усэ/КУ от 09.01.2023 (договор 2).

В соответствии с п. 1.1.         Подрядчик в установленные сроки согласно Договору, обязуется выполнить все предусмотренные настоящим Договором работы и иные предусмотренные Договором мероприятия и передать их Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять их и уплатить определенную Договором цену.

В соответствии с п. 1.2.         Наименование работ: «... на объекте... в г. Каменск-Уральский»,

В соответствии с п. 1.3.         Место нахождения: г. Каменск-Уральский, Свердловской области.

В соответствии с п. 1.4.         Настоящий договор субподряда заключен во исполнение государственного контракта... - ИГК 2023587200012000000000066, в интересах Заказчика ФГУП «ПО «Октябрь», заключенного на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с п. 2.1.         Объем и содержание работ определены в Расчете цены договора (Приложение № 1 к Договору) и Договором.

В соответствии с п. 2.2.         Срок начала работ: с даты подписания настоящего договора Окончание работ: до «30» июля 2023 года.

В соответствии с п. 3.1. Цена Договора составляет: 4 751 084,40 рубля (в т.ч. НДС 20%). Объем, наименование и стоимость работ определена Расчетом цены договора (Приложение № 1 к настоящему договору), сформированного на основании Локальных сметных расчетов №№ № 02-01-02Р-АР арх.102211, 02-01-02Р-АР доп.4 (арх.102963), 02-01-02Р-АР доп.9 (арх.103279), 02-01-02Р-АР доп.Ю (арх.103302), 02-01-02Р-АР доп.15 (арх.103357).

Срок выполнения работ – с момента подписания Договора до 15.11.2024 г. (п.

2.2 Договора в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 30.10.2024 г.).

Пунктом 2 Дополнительного соглашения № 6 от 08.11.2024 г. к Договору 2 внесены изменения в части стоимости работ, которая составила 6 189 132 руб. в том числе НДС 20%.

В материалы дела представлены следующие доказательства исполнения подрядчиком своих обязательств по договору:

форме КС-2):

- КС-2 № 1 от 26.05.23 на сумму 324 051,60 руб.;

- КС-2 № 2 от 23.06.23 на сумму 1 877 096,40 руб.;

- КС-2 № 3 от 23.06.23 на сумму 139 042,8 руб.;

- КС-2 № 4 от 23.06. 2023 на сумму 46 280,40 руб.;

- КС-2 № 5 от 25.08.2023 г. на сумму 115 700,40 руб.;

- КС-2 № 6 от 25.08.2023 г. на сумму 1 298 521,20 руб.;

- КС-2 № 7 от 25.08.2023 г. на сумму 58 705,20 руб.;

- КС-2 № 8 от 27.12.2023г. на сумму 1 348 021,2 руб.;

- КС-2 № 9 от 27.12.2023г. на сумму 222 091,20 руб.;

- КС-2 № 10 от 27.12.2023г на сумму 46 257,60 руб.;

- КС-2 № 12 от 28.02.24 на сумму 243 702,00 руб.;

- КС-2 № 13 от28.02.24 на сумму 47 876,40 руб.;

- Кс-2 № 14 от 29.03.2024 на сумму 63 169,20 руб.;

- КС-2 № 15 от 28.06.2024 на сумму 71 668,80 руб.;

- КС-2 № 16 от 14.11.2024 на сумму 57930,00 руб.;

- КС-2 № 17 от 14.11.2024 на сумму 140 774,4 руб.;

- КС-2 № 18 от 14.11.2024 на сумму 81 541,20 руб.;

- КС-2 № 19 от 14.11.2024 на сумму 6 702,00 руб.;

Справками о стоимости работ (по форме КС-3):

- КС-3 № 1 от 26.05.23 на сумму 324051,60 руб.;

- КС-3 № 2 от 23.06.2023 на сумму 2062419,60 руб.;

- КС-3 № 3 от 25.08.23 на сумму 1472926,80 руб.;

- КС-3 № 4 от 27.12.2023г. на сумму 1616370,00 руб.;

- КС-3 № 5 от 28.02.24 на сумму 291578,40 руб.;

- КС-3 № 6 от 29.03.2024 на сумму 63169,20 руб.;

- КС-3 № 7 от 28.06.2024 на сумму 71668,80 руб.;

- КС-3 №8 от 14.11.2024 на сумму 286947,60 руб.;

А также направленными в адрес Генподрядчика счетами-фактурами:

- Сч-ф № 36 от 25.08.23 на сумму 1472926,80 руб.;

- Сч-ф № 9 от 29.02.24 на сумму 291578,40 руб.;

- Сч-ф № 16 от29.03.24 на сумму 63169,20 руб.;

- Сч-ф № 41 от 28.06.2024 на сумму 71668,80 руб.;

- Сч-ф № 83 от 14.11.2024 на сумму 286947,60 руб.

 Указанные акты подписаны сторонами без возражений.

Как установлено Дополнительным соглашением № 7 от 30.10.2024 г. к Договору 2 предусмотрено следующие:

- Согласно п. 1, финансирование работ Подрядчику может осуществляться

Генподрядчиком за счет собственных средств.

- п. 2, В случае финансирования Генподрядчиком Подрядчика собственными средствами, платежи осуществляются с расчетного счета Генподрядчика на расчетный счет Подрядчика. Также возможна оплата напрямую Подрядчику третьим лицом, минуя счет Генподрядчика.

- Оплата за выполненные Подрядчиком работы в размере 61 381,89 руб. осуществляется Генподрядчиком на указанный в настоящем пункте расчетный счет Подрядчика.

Таким образом, указанным Дополнительным соглашением № 7, зафиксирована задолженность Генподрядчика перед Подрядчиком (соответствующая подписанному между сторонами Акту сверки расчетов, актам КС-2 и справкам КС-3), а также предусмотрен альтернативный способ расчетов. С учетом положений п. 3.6, 4.1.4 (оплата в течение 20 рабочих дней), оплата работ Подрядчика должна была быть произведена в срок до 13.12.2024 г. включительно. 

Истцом в адрес Ответчика во исполнение п.14 Договора 2, Истец направил в адрес Ответчика Претензию Исх. № 04-04 от 01.04.2025 г. с требованием произвести оплату задолженности по Договору, что подтверждается описью вложения к почтовому отправлению с номером почтового идентификатора № 62340803025702 и почтовой квитанцией (чеком) № 38160 от 02.04.2025 г. В ответ на Претензию Ответчик направил в адрес Истца Гарантийное письмо Исх. № 02-05/усэ-321 от 07.04.2025 г., в котором гарантировал полную оплату задолженности по Договору в срок до 20.05.2025. 

Согласно договору субподряда № 07-23/усэ/КУ от 25.01.2023 (договор 3):

В соответствии с п. 1.1.         Подрядчик в установленные сроки согласно Договору, обязуется выполнить все предусмотренные настоящим Договором работы и иные предусмотренные Договором мероприятия и передать их Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять их и уплатит определенную Договором цену.

В соответствии с п. 1.2.         Наименование работ: «... на объекте... в г. Каменск-Уральский».

В соответствии с п. 1.3.         Место нахождения: г. Каменск-Уральский, Свердловской области.

В соответствии с п. 1.4.         Настоящий договор субподряда заключен во исполнение государственного контракта... - ИГК 2023587200012000000000066, в интересах Заказчика ФГУП «ПО «Октябрь», заключенного на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с п. 2.1.         Объем и содержание работ определены в Расчете цены договора (Приложение № 1 к Договору) и Договором.

В соответствии с п. 2.2.         Срок начала работ: с даты подписания настоящего договора Окончание работ: до «30» июля 2023 года.

В соответствии с п. 3.1. Цена Договора составляет: 29 814 104,40 рублей, (в т.ч. НДС 20%). Объем, наименование и стоимость работ определена Расчетом цены договора (Приложение № 1 к настоящему договору), сформированного на основании Локальных смет и Локальных сметных расчетов.

Срок выполнения работ – с момента подписания Договора до 30.10.2024 г. (п.

2.2 Договор 3 в редакции Дополнительного соглашения № 9 от 28.08.2024 г.).

Пунктом 2 Дополнительного соглашения № 10 от 07.10.2024 г. к Договору 3 внесены изменения в части стоимости работ, которая составила 36 671 770,80 руб. в том числе НДС 20%.

В материалы дела представлены следующие доказательства исполнения подрядчиком своих обязательств по договору:

- КС-2 № 1 от 15.09.2023 на сумму 344294,4 руб.;

- КС-2 № 2 от 15.09.23 на сумму 170768,40 руб.;

- КС-2 № 3 от 15.05.2023 на сумму 469593,60 руб.;

- КС-2 № 4 от 15.09.23 на сумму 2703979,20 руб.;

- КС-2 № 5 от15.09.23 на сумму 1040748,0 руб.;

- КС-2 № 6 от 15.09.23 на сумму 323662,80 руб.;

- КС-2 № 7 от 15.09.23 на сумму 4792100,4 руб.;

- КС-2 № 8 от 15.09.23 на сумму 255433,20 руб.;

- КС-2 № 9 от 15.09.23 на сумму 65055,6 руб.;

- КС-2 № 10 от 15.09.23 на сумму 472,80 руб.;

- КС-2 № 11 от 15.09.23 на сумму 128838,00 руб.;

- КС-2 № 12 от 15.09.23 на сумму 10207,20 руб.;

- КС-2 № 13 от 15.09.23 на сумму 15654,00 руб.;

- КС-2 № 14 от 22.09.23 на сумму 289458,00 руб.;

- КС-2 № 15 от 22.09.23 на сумму 64623,60 руб.

- КС-2 № 16 от 22.09.23 на сумму 945786,00 руб.;

- КС-2 № 17 от 30.01.24 на сумму 264252,00 руб.;

- КС-2 № 18 от30.0124 на сумму 939,60 руб.;

- КС-2 № 19 от30.01.24 на сумму 3962416,80 руб.;

- КС-2 № 20 от 31.01.24 на сумму 164528,40 руб.;

- Кс-2 № 21 от 29.03.24 на сумму 990883,2 руб.;

- КС-2 № 22 от 29.04.24 на сумму 454459,20 руб.;

- КС-2 № 23 от 29.0424 на сумму 244611,5 руб.;

- КС-2 № 24 от 29.04.24 на сумму 40440,00 руб.;

- КС-2 № 25 от 29.0424 на сумму 432542,40 руб.;

- КС-2 № 26 от 29.04.24 на сумму 24226,80 руб.;

- КС-2 № 27 от29.04.24 на сумму 31147,20 руб.;

- КС-2 № 28 от 30.05.24 на сумму 168222,00 руб.;

- КС-2 № 29 от 30.05.24 на сумму 27606,00 руб.;

- КС-2 № 30от 30.05.24 на сумму 383662,80 руб.;

- КС-2 № 31 от 30.05.24 на сумму 108490,8 руб.;

- КС-2 № 32 от 30.05.24 на сумму 2444004,00 руб.

- КС-2 № 33 от 30.05.24 на сумму 10662,00 руб.;

- КС-2 № 34 от 30.05.24 на сумму 337524,00 руб.;

- КС-2 № 35 от 28.06.24 на сумму 93038,40 руб.;

- КС-2 № 36 от 28.06.24 на сумму 10810,80 руб.;

- КС-2 № 37 от 28.06.24 на сумму 38973,60 руб.;

- КС-2 № 38 от 28.06.24 на сумму 64657,20 руб.;

- КС-2 № 39 от 28.06.24 на сумму 183788,40 руб.;

- КС-2 № 40 от 28.06.24 на сумму 72475,20 руб.;

- КС-2 № 41 от 28.06.24 на сумму 47338,80 руб.;

- КС-2 № 42 от 30.08.2024 на сумму 376669,20 руб.;

- КС-2 № 43 от 30.08.2024 на сумму 210337,20 руб.;

- КС-2 № 44 от 30.08.2024 на сумму 1350619,20 руб.;

- КС-2 № 45 от 30.08.2024 на сумму 332482,80 руб.;

- КС-2 № 46 от 30.09.2024 на сумму 1257718,80 руб.;

- КС-2 № 47 от 30.09.2024 на сумму 604519,20 руб.;

- КС-2 № 48 от 30.09.2024 на сумму 43906,80 руб.;

- КС-2 № 49 от 30.09.2024 на сумму 239535,60 руб.;

- КС-2 № 50 от 30.09.2024 на сумму 1406,40 руб.;

- КС-2 № 51 от 30.09.2024 на сумму 176335,20 руб.;

- КС-2 № 52 от 30.09.2024 на сумму 103780,80 руб.;

- КС-2 № 53 от 30.10.2024 на сумму 9693,60 руб.;

- КС-2 № 54 от 30.10.2024 на сумму 36412,80 руб.;

- КС-2 № 55 от 30.10.2024 на сумму 415396,80 руб.;

- КС-2 № 56 от 30.10.2024 на сумму 156304,8 руб.;

- КС-2 № 57 от 30.10.2024 на сумму 121728,00 руб.;

- КС-2 № 58 от 30.10.2024 на сумму 92708,4 руб.;

- КС-2 № 59 от 30.10.2024 на сумму 690308,40 руб.;

- КС-2 № 60 от 30.10.2024 на сумму 197148,00 руб.;

- КС-2 № 61 от 30.10.2024 на сумму 175547,60 руб.;

- КС-2 № 62 от 30.10.2024 на сумму 1721281,20 руб.;

- КС-2 № 63 от 30.10.2024 на сумму 22869,60 руб.;

- КС-2 № 64 от 30.10.2024 на сумму 412344,00 руб.;

- КС-2 № 65 от 30.10.2024 на сумму 1880,4 руб.;

- КС-2 № 66 от 30.10.2024 на сумму 42171,60 руб.;

- КС-2 № 67 от 30.10.2024 на сумму 15999,60 руб.;

- КС-2 № 68 от 30.10.2024 на сумму 55246,8 руб.;

- КС-2 № 69 от 30.10.2024 на сумму 75406,8 руб.;

- КС-2 № 70 от 30.10.2024 на сумму 670872,00 руб.;

- КС-2 № 71 от 30.10.2024 на сумму 213,6 руб.;

- КС-2 № 72 от 30.10.2024 на сумму 3807441,6 руб.;

- КС-2 № 73 от 30.10.2024 на сумму 1033107,60 руб.;

Справками (по форме КС-3):

- КС-3 № 1 от 15.09.2023 на сумму 10320807,60 руб.;

- КС-3 № 2 от 22.09.23 на сумму 1299867,60 руб.;

- КС-3 № 3 от 30.01.24 на сумму 4392136,80 руб.;

- КС-3 № 4 от 29.03.24 на сумму 990883,20 руб.;

- КС-3 № 5 от 29.04.24 на сумму 1227427,20 руб.;

- КС-3 № 6 от 30.05.24 на сумму 3480171,60 руб.;

- КС-3 № 7 от 28.06.24 на сумму 511082,40 руб.;

- КС-3 № 8 от 30.08.2024 на сумму 2270108,40 руб.;

- КС-3 № 9 от 30.09.2024 на сумму 2427202,80 руб.;

- КС-3 № 10 от 30.10.2024 на сумму 8718975,60 руб.;

- КС-3 № 11 от 30.10.2024 на сумму 1033107,60 руб.

А также направленными в адрес Генподрядчика счетами-фактурами:

- сч- ф № 38 от15.09.2023г. на сумму 10320807,6 руб.;

- Сч-ф № 44 от22.09.23 на сумму 1299867,60 руб.;

- Сч-ф № 4 от 31.01.24 на сумму 4392136,80 руб.;

- Сч-фактура № 17 от на сумму 29.03.24 990883,20 руб.;

- Сч-ф № 25 от 29.04.24 на сумму 1227427,20 руб.;

- Сч-фактура № 44 от на сумму 28.06.24 511082,40 руб.;

- Сч-ф № 63 от 30.08.2024 на сумму 2370108,40 руб.;

- Сч-ф № 74 от 30.09.2024 на сумму 2427202,80 руб.;

- Сч-фактура № 80 от 30,10.24 на сумму 8718975,6 руб.;

- Сч-фактура № 81 от 30,10.24 на сумму 1033107,6 руб.

Указанные акты подписаны сторонами без возражений.

Как установлено Дополнительным соглашением № 11 от 30.11.2024 г. к Договору 3 предусмотрено следующие:

 - Согласно п. 1, финансирование работ Подрядчику может осуществляться Генподрядчиком за счет собственных средств. 

- п. 2, В случае финансирования Генподрядчиком Подрядчика собственными средствами, платежи осуществляются с расчетного счета Генподрядчика на расчетный счет Подрядчика. Также возможна оплата напрямую Подрядчику третьим лицом, минуя счет Генподрядчика. 

- Оплата за выполненные Подрядчиком работы в размере 8 606 721,84 руб. осуществляется Генподрядчиком на указанный в настоящем пункте расчетный счет Подрядчика.

Таким образом, указанным Дополнительным соглашением № 11, зафиксирована задолженность Генподрядчика перед Подрядчиком (соответствующая подписанному между сторонами Акту сверки расчетов, актам КС-2 и справкам КС-3), а также предусмотрен альтернативный способ расчетов. С учетом положений п. 3.6, 4.1.4 (оплата в течение 20 рабочих дней), оплата работ Подрядчика должна была быть произведена в срок до 27.11.2024 г. включительно. Обязательства Генподрядчика по оплате исполнены не были.

Истцом в адрес Ответчика во исполнение п.14 договора 3, направлена претензия ю Исх. № 03-04 от 01.04.2025 г. с требованием произвести оплату задолженности по Договору, что подтверждается описью вложения к почтовому отправлению с номером почтового идентификатора № 62340803025702 и почтовой квитанцией (чеком) № 38160 от 02.04.2025 г. В ответ на Претензию Ответчик направил в адрес Истца Гарантийное письмо Исх. № 02-05/усэ-320 от 07.04.2025 г., в котором гарантировал полную оплату задолженности по Договору в срок до 20.05.2025. 

Согласно договору субподряда № 46-23/усэ/КУ от 05.09.2023 (договор 4):

В соответствии с п. 1.1.         Подрядчик в установленные сроки согласно Договору, обязуется выполнить все предусмотренные настоящим Договором строительные работы и иные предусмотренные Договором мероприятия и передать их Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять их и уплатить определенную Договором цену. 

В соответствии с п. 1.2.         Наименование работ: «... на объекте... в г. Каменск-Уральский».

В соответствии с п. 1.3.         Место нахождения: г. Каменск-Уральский, Свердловской области.

В соответствии с п. 1.4.         Настоящий договор субподряда заключен во исполнение государственного контракта... - ИГК 2023587200012000000000066, в интересах Заказчика ФГУИ «ПО «Октябрь», заключенного на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с п. 2.1.         Объем и содержание работ определены в Расчете цены договора (Приложение № 1 к Договору) и Договором.

В соответствии с п. 2.2.         Срок начала работ: с даты подписания настоящего договора Окончание работ: до «25» октября 2023 года.

В соответствии с п. 3.1. Цена Договора составляет: 8 116 186,80 рублей (в т.ч. НДС 20%). Объем,   наименование   и   стоимость   работ   определена   Расчетом   цены   договора (Приложение № 1 к настоящему договору), сформированного на основании Локальною сметного расчета № 02-02-01Р-АС ( выборка объемов - фасад, остатки) (Приложение №2).

Срок выполнения работ – с момента подписания Договора 4 до 30.10.2024 г. (п. 2.2 Договора 4 в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 22.10.2024 г.).

Пунктом 2 Дополнительного соглашения № 5 от 22.10.2024 г. к Договору 4 внесены изменения в части стоимости работ, которая составила 9 948 920,40 руб. в том числе НДС 20%.

В материалы дела представлены следующие доказательства исполнения подрядчиком своих обязательств по договору:

- КС-2 № 1 на суму 766742,40 от 25.09.2023

- КС-2 № 2 от 27.10.23 на суму 507800,40 руб.;

- КС-2 № 3 от 29.01.24 на суму 13333578 руб.;

- КС-2 № 4 от 29.01.24 на суму 228745,20 руб.;

- КС-2 № 5 от 28.02.24 на суму 813163,20 руб.;

- КС-2 № 6 от29.03.2024 на суму 701162,00 руб.;

- КС-2 № 7 от 26.04.24 на суму 1944907,2 руб.;

- КС-2 № 8 от 27.05.24 на суму 900 260,40 руб.;

- КС-2 № 9 от 28.06.2024 на суму 250224,00 руб.№

- КС-2 № 10 от 28.06.2024 на суму 45194,40 руб.;

- КС-2 № 11 от 31.07.2024 на суму 337522,8 руб.;

- КС-2 № 12 от 31.07.2024 на суму 52879,20 руб.;

- КС-2 № 13 от 31.08.2024 на суму 352486,8 руб.;

- КС-2 № 14 от 13.09.2024 на суму 716738,40 руб.;

- КС-2 № 15 от 30.09.24 на суму 551115,60 руб.;

- КС-2 № 16 от 30.10.2024 на суму 207339,60 руб.;

- КС-2 № 17 от 30.10.2024 на суму 70120,80 руб.;

- КС-2 № 18 от 30.10.2024 на суму 167940,00 руб.

Справками о стоимости работ (по форме КС-3):

- КС-3 № 1 на суму 766742,40 от 25.09

- КС-3 № 2 от 27.10.23 на суму 507800,40 руб.;

- КС-3 № 3 от 29.01.24 на суму 1562323,20 руб.;

- КС-3 № 4 от 28.02.24 на суму 813163,20 руб.;

- КС-3 № 5 от 29.03.2024 на суму 702162,00 руб.;

- КС-3 № 6 от 26.04.24 на суму 1944907,2 руб.;

- КС-3 № 7 от 27.05.24 на суму 900 260,40 руб.;

- КС-3 № 8 от 28.06.2024 на суму 295418,40 руб.;

- КС-3 № 9 от 31.07.2024 на суму 360402,00 руб.;

- КС-3 № 10 от 31.08.2024 на суму 352486,8 руб.;

- КС-3 № 11 от 13.09.2024 на суму 716738,40 руб.;

- КС-3 № 12 от 30.09.24 на суму 551115,6 руб.;

- КС-3 № 13 от 30.10.2024 на суму 445400,40 руб.

А также направленными в адрес Генподрядчика счетами-фактурами:

- Сч-ф № 42 от 25.09.23 на сумму 766 742,40 руб.;

- Сч -ф № 1 от 29.01.24 на сумму 1562323,20 руб.;

- Сч-ф № 10 от 28.02.24 на сумму 813163,2 руб.;

- Сч-ф № 14 от 29.03.2024 на сумму 702162,00 руб.;

- Сч-ф № 20 от26.04.24 на сумму 1944907,2 руб.;

- Сч-ф № 31 от 27.05.24 на сумму 900 260,40 руб.;

- Сч-ф № 40 от 28.06.2024 на сумму 295418,40 руб.;

- Сч-Ф№ 76 от 30.06.2024 на сумму 4447,88 руб.;

- Сч-ф № 47 от 31.07.2024 на сумму 53617,20 руб.;

- Сч-ф№ 48 от 31.07.24 на сумму 390402,00 руб.;

- Сч-ф № 61 от 30.08.24 на сумму 352486,80 руб.;

- Сч-ф № 73 от 31.09.24 на сумму 551115,6 руб.;

- Сч-ф №65 от 13.09.2024 на сумму 716738,40 руб.

Указанные акты подписаны сторонами без возражений.

Как установлено Дополнительным соглашением № 6 от 30.10.2024 г. к Договору 4 предусмотрено следующее: 

- Согласно п. 1, финансирование работ Подрядчику может осуществляться Генподрядчиком за счет собственных средств. 

- п. 2, В случае финансирования Генподрядчиком Подрядчика собственными средствами, платежи осуществляются с расчетного счета Генподрядчика на расчетный счет Подрядчика. Также возможна оплата напрямую Подрядчику третьим лицом, минуя счет Генподрядчика. 

- Оплата за выполненные Подрядчиком работы в размере 1 663 728 (Один миллион шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот двадцать восемь) руб. 28 коп руб. осуществляется Генподрядчиком на указанный в настоящем пункте расчетный счет Подрядчика.

Таким образом, указанным Дополнительным соглашением № 6, зафиксирована задолженность Генподрядчика перед Подрядчиком (соответствующая подписанному между сторонами Акту сверки расчетов, актам КС-2 и справкам КС-3), а также предусмотрен альтернативный способ расчетов. С учетом положений п. 3.6, 4.1.4 (оплата в течение 20 рабочих дней), оплата работ Подрядчика должна была быть произведена в срок до 27.11.2024 г. включительно. До настоящего момента доказательств исполнения ООО «Уралстройэнерго» обязательств по договору в материалы дела не представлено.

Истцом в адрес Ответчика во исполнение п. 14 договора 4 направлена претензия Исх. № 05-04 от 01.04.2025 г. с требованием произвести оплату задолженности по Договору, что подтверждается описью вложения к почтовому отправлению с номером почтового идентификатора № 62340803025702 и почтовой квитанцией (чеком) № 38160 от 02.04.2025.  

Согласно договору субподряда № 47-23/усэ/КУ от 18.09.2023 (договор 5):

В соответствии с п. 1.1.         Подрядчик в установленные сроки согласно Договору, обязуется выполнить все предусмотренные настоящим Договором строительные работы и иные предусмотренные Договором мероприятия и передать их Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять их и уплатить определенную Договором цену.

В соответствии с п. 1.2.         Наименование работ: «... на объекте... в г. Каменск-Уральский».

В соответствии с п. 1.3.         Место нахождения: г. Каменск-Уральский, Свердловской области.

В соответствии с п. 1.4.         Настоящий договор субподряда заключен во исполнение государственного контракта... - ИГК 2023587200012000000000066, в интересах Заказчика ФГУП «ПО «Октябрь», заключенною на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с п. 2.1.         Объем и содержание работ определены в Расчете цены договора (Приложение № I к настоящему Договору) и Договором.

В соответствии с п. 2.2.         Срок начала работ: с даты подписания настоящего договора Окончание работ: до «30» октября 2023 года.

В соответствии с п. 3.1. Цена Договора составляет: 2 100 000,00 (два миллиона сто тысяч) рублей (в т.ч. НДС 20%).

Объем, наименование и стоимость работ определена Расчетом цены договора (Приложение № 1 к настоящему договору), сформированного на основании Локального сметного расчета №02-01-02Р-АР (отделка) (Приложение №2 к настоящему договору), Локального сметного расчета №02-01-02Р-АР (полы) (Приложение №3 к настоящему договору), Локального сметного расчета № 02-01-02Р-АР доп.9 (Приложение №4 к настоящему договору).

Срок выполнения работ – с момента подписания Договора до 15.11.2024 г. (п. 2.2 Договора 5 в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 30.10.2024 г.).

Пунктом 2 Дополнительного соглашения № 5 от 08.11.2024 г. к Договору 5 внесены изменения в части стоимости работ, которая составила 2 089 473,60 руб. в том числе НДС 20%.

В материалы дела представлены следующие доказательства исполнения подрядчиком своих обязательств по договору:

- КС-2 № 1 от 27.10.2023 на сумму 633501,6 руб.;

- КС-2 № 2 от 28.02.24 на сумму 285417,60 руб.;

- КС-2 № 3 от 29.03.2024 на сумму 238580,4 руб.;

- КС-2 № 4 от 26.04.24 на сумму 102075,60 руб.;

- КС-2 № 5 от 26.04.24 на сумму 48753,60 руб.;

- КС-2 № 6 от 27.05.24 на сумму 200467,20 руб.;

- КС-2 № 7 от 27.05.24 на сумму 62283,60 руб.;

- КС-2 № 8 от 28.06.2024 на сумму 311769,60 руб.;

- КС-2 № 9 от28.06.2024 на сумму 11142,00 руб.;

- КС-2 № 10 от 31.07.24 на сумму 53617,20 руб.;

- КС-2 № 11 от 14.11.2024 на сумму 56652,00 руб.;

- КС-2 № 12 от 14.11.2024 на сумму 81559,20 руб.;

- КС-2 № 13 от 14.11.2024 на сумму 154098,00 руб.;

- КС-2 № 14 от 14.11.2024 на сумму 12674,4 руб.

Справками о стоимости работ (по форме КС-3):

- КС-3 № 1 от 27.10.2023 на сумму 633501,6 руб.;

- КС-3 № 2 от 28.02.24 на сумму 285417,60 руб.;

- КС-3 № 3 от 29.03.24 на сумму 238580,4 руб.;

- КС-3 № 4 от 26.04.24 на сумму 150829,20 руб.;

- КС-3 № 5 от 27.05.24 на сумму 262750,80 руб.

- КС-3 № 6 от 28.06.2024 на сумму 322911,60 руб.;

- КС-3 № 7 от 31.07.2024 на сумму 53617,20 руб.;

- КС-3 № 8 от 14.11.2024 на сумму 141865,20 руб.

А также направленными в адрес Генподрядчика счетами-фактурами:

- Сч-фактура № 50 от 27.10.2023 на сумму 633501,6 руб.;

- Сч-фактура № 11 от 28.02.24 на сумму 285417,60 руб.;

- Сч-фактура № 15 от 29.03.24 на сумму 238560,4 руб.;

- Сч-фактура № 24 от 26.04.24 на сумму 150829,20 руб.;

- Сч-фактура № 32 от 27.05.2024 на сумму 262750,80 руб.;

- Сч-фактура № 42 от 28.06.2024 на сумму 322911,60 руб.;

- Сч-фактура № 84 от 14.11.2024 на сумму 141865,20 руб.

Указанные акты подписаны сторонами без возражений.

Как установлено Дополнительным соглашением № 6 от 14.11.2024 г. к Договору 5 предусмотрено следующее: 

- Согласно п. 1, финансирование работ Подрядчику может осуществляться Генподрядчиком за счет собственных средств. 

- п. 2, В случае финансирования Генподрядчиком Подрядчика собственными средствами, платежи осуществляются с расчетного счета Генподрядчика на расчетный счет Подрядчика. Также возможна оплата напрямую Подрядчику третьим лицом, минуя счет Генподрядчика. 

- Оплата за выполненные Подрядчиком работы в размере 41 502,12 руб. осуществляется Генподрядчиком на указанный в настоящем пункте расчетный счет Подрядчика.

Таким образом, указанным Дополнительным соглашением № 6, зафиксирована задолженность Генподрядчика перед Подрядчиком (соответствующая подписанному между сторонами Акту сверки расчетов, актам КС-2 и справкам КС-3), а также предусмотрен альтернативный способ расчетов. С учетом положений п. 3.6, 4.1.4 (оплата в течение 20 рабочих дней), оплата работ Подрядчика должна была быть произведена в срок до 13.12.2024 г. включительно.

Истцом в адрес Ответчика во исполнение п. 14 Договора, направлена претензия Исх. № 06-04 от 01.04.2025 г. с требованием произвести оплату задолженности по Договору, что подтверждается описью вложения к почтовому отправлению с номером почтового идентификатора № 62340803025702 и почтовой квитанцией (чеком) № 38160 от 02.04.2025 г. В ответ на Претензию Ответчик направил в адрес Истца Гарантийное письмо Исх. № 02-05/усэ-323 от 07.04.2025 г., в котором гарантировал полную оплату задолженности по Договору в срок до 20.05.2025. 

Согласно договору субподряда № 07-24/усэ/КУ от 26.02.2024 (договор 6):

В соответствии с п. 1.1.         Подрядчик в установленные сроки согласно Договору, обязуется выполнить все предусмотренные настоящим Договором строительные работы и иные предусмотренные Договором мероприятия и передать их Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять их и

уплатить определенную Договором цену.

В соответствии с п. 1.2.         Наименование работ: «... на объекте... в г. Каменск-Уральский».

В соответствии с п. 1.3.         Место нахождения: г. Каменск-Уральский, Свердловской области.

В соответствии с п. 1.4.         Настоящий договор субподряда заключен во исполнение государственного контракта... - ИГК 2023587200012000000000066, в интересах Заказчика ФГУП «ПО «Октябрь», заключенною на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с п. 2.1.         Объем и содержание работ определены в Расчете цены договора (Приложение № I к настоящему Договору) и Договором.

В соответствии с п. 2.2. Срок начала работ: с даты подписания настоящего договора Окончание работ: до «30» августа 2024 года.

В соответствии с п. 3.1. Цена Договора составляет: 7 200 000,00 рублей (в т.ч. НДС 20%).

Объем, наименование и стоимость работ определена Расчетом цены договора (Приложение № 1 к настоящему договору), сформированного на основании Локального сметного расчета №02-02-02-12Р-ПС (Приложение №2 к настоящему договору), Локального сметного расчета №02-02-02-12Р-ПС (Приложение №3 к настоящему договору), Локального сметного расчета № 02-02-16Р-ПС доп.3 арх.№103342 (Приложение №4 к настоящему договору). Локального сметного расчета №02-02-16Р-ОС Арх.№ 102038 (Приложение №5 к настоящему договору).

Срок выполнения работ – с момента подписания Договора до 30.08.2024 г. (п. 2.2 Договора).

Пунктом 2 Дополнительного соглашения № 3 от 22.08.2024 г. к Договору 6 внесены изменения в части стоимости работ, которая составила 9 213 109,20 руб. в том числе НДС 20%.

В материалы дела представлены следующие доказательства исполнения подрядчиком своих обязательств по договору:

- КС-2 № 1 от 29.04.24 на сумму 203336,40 руб.;

- КС-2 № 2 от 29.04.24 на сумму 1233,60 руб.;

- КС-2 № 3 от29.0424 на сумму 1529362,80 руб.;

- КС-2 № 4 от 29.04.24 на сумму 1711,20 руб.;

- КС-2 № 5 от 30.05.2024 на сумму 76684,80 руб.;

- КС-2 № 6 от 30.05.2024 на сумму 2293111,20 руб.;

- КС-2 № 7 от 28.06.2024 на сумму 92096,40 руб.;

- КС-2 № 8 от 28.06.2024 на сумму 15686,40 руб.;

- КС-2 № 9 от 30.07.24 на сумму 1450417,20 руб.;

- Кс-2 № 10 от 30.07.24 на сумму 116048,40 руб.;

- Кс-2 № 11 от 30.07.24 на сумму 1104468,00 руб.;

- Кс-2 № 12 от 30.07.24 на сумму 2677,20 руб.;

- Кс-2 № 13 от 30.07.24 на сумму 10744,8 руб.;

- КС-2 № 14 от 30.07.24 на сумму 420694,8 руб.;

- КС-2 № 15 от 30.08.2024 на сумму 116755,20 руб.;

- КС-2 № 16 от 30.08.2024 на сумму 12975,6 руб.;

- КС-2 № 17 от 30.08.2024 на сумму 4068,00 руб.;

- КС-2 № 18 от 30.08.2024 на сумму 1443,6 руб.;

- КС-2 № 19 от 30.08.2024 на сумму 12037,20 руб.;

- КС-2 № 20 от 30.08.2024 на сумму 3700,8 руб.;

- КС-2 № 21 от 30.08.2024 на сумму 61525,20 руб.;

- КС-2 № 22 от 30.08.2024 на сумму 8229,6 руб.;

- КС-2 № 23 от 30.08.2024 на сумму 1674100,8 руб.;

А также справками (по форме КС-3):

- КС-3 № 1 от 29.04.24 на сумму 1735644,00 руб.;

- КС-3 № 2 от 30.05.24 на сумму 2369796,00 руб.;

- КС-3 № 3 от 28.06.24 на сумму 107782,80 руб.;

- КС-3 № 4 от 30.07.24 на сумму 3105050,4 руб.;

- КС-3 №5 от 30.08.2024 на сумму 1894836,00 руб.

А также следующими счетами-фактурами направленными в адрес Генподрядчика:

- Сч-ф № 26 от 29.04.24 на сумму 1735644,00 руб.;

- Сч-ф № 43 от 28.06.24 на сумму 107782,80 руб.;

- Сч-ф № 55 от 30.07.2024 на сумму 3105050,4 руб.;

- Сч-ф № 62 от 30.08.2024 на сумму 1894836,00 руб.

Указанные акты подписаны сторонами без возражений.

Как установлено Дополнительным соглашением № 4 от 30.08.2024 г. к Договору 6 предусмотрено следующее: 

- Согласно п. 1, финансирование работ Подрядчику может осуществляться Генподрядчиком за счет собственных средств. 

- п. 2, В случае финансирования Генподрядчиком Подрядчика собственными средствами, платежи осуществляются с расчетного счета Генподрядчика на расчетный счет Подрядчика. Также возможна оплата напрямую Подрядчику третьим лицом, минуя счет Генподрядчика. 

- Оплата за выполненные Подрядчиком работы в размере 1 888 090,63 руб. осуществляется Генподрядчиком на указанный в настоящем пункте расчетный счет Подрядчика.

Таким образом, указанным Дополнительным соглашением № 4, зафиксирована задолженность Генподрядчика перед Подрядчиком (соответствующая подписанному между сторонами Акту сверки расчетов, актам КС-2 и справкам КС-3), а также предусмотрен альтернативный способ расчетов. С учетом положений п. 3.6 (оплата в течение 20 рабочих дней), оплата работ Подрядчика должна была быть произведена в срок до 27.09.2024 г. включительно.

Истцом в адрес Ответчика во исполнение п. 14 Договора, направлена претензия Исх. № 01-04 от 01.04.2025 г. с требованием произвести оплату задолженности по Договору, что подтверждается описью вложения к почтовому отправлению с номером почтового идентификатора № 62340803025702 и почтовой квитанцией (чеком) № 38160 от 02.04.2025 г. В ответ на Претензию Ответчик направил в адрес Истца Гарантийное письмо Исх. № 02-05/усэ-318 от 07.04.2025 г., в котором гарантировал полную оплату задолженности по Договору в срок до 20.05.2025. 

Истец, с  учетом уточнений от 23.09.2025  просит: 

2.Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку по Договору субподряда № 01- 22/усэ/КУ от 10.01.2022 г. за просрочку оплаты выполненных работ в размере 79 641,43 рублей за период с 01.01.2025 по 23.09.2025 г., с продолжением начисления неустойки в порядке ст. 395 по ставке ЦБ РФ по день фактической оплаты задолженности, но в размере не более 757 757, 17 рублей (10 % от цены Договора). 

3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку по Договору субподряда № 33- 23/усэ/КУ от 09.01.2023 г. за просрочку оплаты выполненных работ в размере 9 018,93 рублей за период с 01.01.2025 по 23.09.2025 г., с продолжением начисления неустойки в порядке ст. 395 по ставке ЦБ РФ по день фактической оплаты задолженности, но в размере не более 618 913, 20 рублей (10 % от цены Договора). 

4. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку по Договору субподряда № 07- 23/усэ/КУ от 25.01.2023 г. за просрочку оплаты выполненных работ в размере 1 264 598,61 рублей за период с 01.01.2025 по 23.09.2025 г., с продолжением начисления неустойки в порядке ст. 395 по ставке ЦБ РФ по день фактической оплаты задолженности, но в размере не более 3 667 177, 08 рублей (10 % от цены Договора). 

5. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку по Договору субподряда № 46- 23/усэ/КУ от 05.09.2023 г. за просрочку оплаты выполненных работ в размере 244 454,10 рублей за период с 01.01.2025 по 23.09.2025 г., с продолжением начисления неустойки в порядке ст. 395 по ставке ЦБ РФ по день фактической оплаты задолженности, но в размере не более 994 892, 04 рублей (10 % от цены Договора). 

6. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку по Договору субподряда № 47- 23/усэ/КУ от 18.09.2023 г. за просрочку оплаты выполненных работ в размере 6 097,96 рублей за период с 01.01.2025 по 23.09.2025 г., с продолжением начисления неустойки в порядке ст. 395 по ставке ЦБ РФ по день фактической оплаты задолженности, но в размере не более 208 947,36 рублей (10 % от цены Договора). 

7. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку по Договору субподряда № 07- 24/усэ/КУ от 26.02.2024 г. за просрочку оплаты выполненных работ в размере 378 221,34 рублей за период с 27.09.2024 по 23.09.2025 г., с продолжением начисления неустойки в порядке ст. 395 по ставке ЦБ РФ по день фактической оплаты задолженности, но в размере не более рублей 921 310, 92 рублей (10 % от цены Договора).

Проанализировав условия представленных договоров, суд пришел к выводу, что по своей правовой природе они являются договорами подряда. Соответственно, правоотношения сторон по данным договорам регулируются нормами гл. 37 ГК РФ, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В материалы дела по каждому договору представлены акты КС-2 и КС-3, подписанные обеими сторонами без возражений.

Приемка ответчиком выполненных работ влечет возникновение обязанности по их оплате (ст. 711, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

Согласно п. 1 ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

В силу п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату.  

В  удовлетворении ходатайства ответчика о назначении судебной экспертизы судом отказано ввиду того, что предметом спора является взыскание долга за выполненные работы по договорам, факт выполнения работы ответчиком не оспорен, в гарантийных письмах ответчик гарантировал оплату выполненных работ по соответствующим договорам, доказательств обнаружения / фиксации каких-либо недостатков, предъявления требований к истцу об устранении недостатков ответчик не представил, доказательств наличия существенных и неустранимых недостатков в выполненных работах ответчиком не представлено, устранимые недостатки (в случае наличия таковых) не являются основанием для не оплаты выполненных и принятых работ. Ходатайство о назначении судебной экспертизы направлено на затягивание процесса рассмотрения спора.

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Факт выполнения работы ответчиком не оспорен, доказательств фиксации каких-либо недостатков, предъявления требований к истцу об устранении недостатков ответчик не представил.

В связи с этим, с ответчика в пользу истца  подлежит взысканию по договору №01-22/усэ/КУ от 10.01.2022: долг в сумме 542 030 руб. 97 коп.,  по договору №33-23/усэ/КУ от 09.01.2023: долг в сумме 61 381 руб. 89 коп., по договору №07-23/усэ/КУ от 25.01.2023: долг в сумме 8 606 721 руб. 84 коп., по договору №46-23/усэ/КУ от 05.09.2023: долг в сумме 1 663 728 руб. 28 коп., по договору №47-23/усэ/КУ от 18.09.2023: долг в сумме 41 502 руб. 12 коп., по договору №07-24/усэ/КУ от 26.02.2024: долг в сумме 1 888 090руб. 63 коп.

Истец также просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами по всем договорам.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность установленную законом или договором (ст. 401 ГК РФ).

На основании п. 10.1 Договоров субподряда, за невыполнение или ненадлежащее выполнение Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями Договора. 

Согласно правилам статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Согласно расчетам истца:

Неустойка по Договору субподряда № 01-22/усэ/КУ от 10.01.2022: Размер задолженности: 542 030 (Пятьсот сорок две тысячи тридцать) руб. 97 коп. Период начисления: 10.01.2025 – 25.09.2025 - Сумма неустойки составляет 77 206 рублей, с продолжением начисления неустойки по ключевой ставке до даты погашения суммы задолженности, но общим размером неустойки не более 757 757, 17 рублей (10 % от цены Договора).

Неустойка по Договору № 33-23/усэ/КУ от 09.01.2023: Размер задолженности: 61 381 (Шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят один) руб. 89 коп. Период начисления: 10.01.2025 – 25.09.2025 - Сумма неустойки составляет 8 743,14 рублей с продолжением начисления неустойки по ключевой ставке до даты погашения суммы задолженности, но общим размером неустойки не более 618 913, 20 рублей (10 % от цены Договора).

Неустойка по Договору № 07-23/усэ/КУ от 25.01.2023: Размер задолженности: 8 606 721 (Восемь миллионов шестьсот шесть тысяч семьсот двадцать один) руб. 84 коп. Период начисления: 10.01.2025 – 25.09.2025 - Сумма неустойки составляет 1 225 927,31 рублей с продолжением начисления неустойки по ключевой ставке до даты погашения суммы задолженности, но общим размером неустойки не более 3 667 177, 08 рублей (10 % от цены Договора).

Неустойка по Договору субподряда № 46-23/усэ/КУ от 05.09.2023: Размер задолженности: 1 663 728 (Один миллион шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот двадцать восемь) руб. 28 коп. Период начисления: 10.01.2025 – 25.09.2025 - Сумма неустойки составляет 236 978,72 рублей с продолжением начисления неустойки по ключевой ставке до даты погашения суммы задолженности, но общим размером неустойки не более 994 892, 04 рублей (10 % от цены Договора).

Неустойка по Договору субподряда № 47-23/усэ/КУ от 18.09.2023: Размер задолженности: 41 502 (Сорок одна тысяча пятьсот два) руб. 12 коп. Период начисления: 10.01.2025 – 25.09.2025 - Сумма неустойки составляет 5 911,49 рублей с продолжением начисления неустойки по ключевой ставке до даты погашения суммы задолженности, но общим размером неустойки не более 208 947,36 рублей (10 % от цены Договора).

Неустойка по Договору субподряда № 07-24/усэ/КУ от 26.02.2024: Размер задолженности: 1 888 090 (Один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч девяносто) руб. 63 коп. Период начисления: 01.10.2024 – 25.09.2025 - Сумма неустойки составляет 375 593,93 рублей с продолжением начисления неустойки по ключевой ставке до даты погашения суммы задолженности, но общим размером неустойки не более 921 310, 92 рублей (10 % от цены Договора).

Расчет процентов судом по каждому договору проверен и признан верным.

Ответчиком контррасчет в материалы дела не представлен.

Таким образом, требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в полном объеме:

- по договору №01-22/усэ/КУ от 10.01.2022: проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.01.2025 по 25.09.2025 в сумме 77 206 руб. Проценты за пользование чужими денежными средствами начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 26.09.2025, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды, но не более суммы 757 757 руб. 17 коп. (10% от цены договора);

- по договору №33-23/усэ/КУ от 09.01.2023: проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.01.2025 по 25.09.2025 в сумме 8743,14 руб. Проценты за пользование чужими денежными средствами начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 26.09.2025, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды, но не более суммы 618913 руб. 20 коп. (10% от цены договора);

- по договору №07-23/усэ/КУ от 25.01.2023: проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.01.2025 по 25.09.2025 в сумме 1 225 927 руб. 31 коп. Проценты за пользование чужими денежными средствами начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 26.09.2025, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды, но не более суммы 3 667 177 руб. 08 коп. (10% от цены договора);

- по договору №46-23/усэ/КУ от 05.09.2023: проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.01.2025 по 25.09.2025 в сумме 236978,72 руб. Проценты за пользование чужими денежными средствами начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 26.09.2025, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды, но не более суммы 994892 руб. 04 коп. (10% от цены договора);

- по договору №47-23/усэ/КУ от 18.09.2023: проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.01.2025 по 25.09.2025 в сумме 5911,49 руб. Проценты за пользование чужими денежными средствами начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 26.09.2025, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды, но не более суммы 208947 руб. 36 коп. (10% от цены договора);

- по договору №07-24/усэ/КУ от 26.02.2024: проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.10.2024 по 25.09.2025 в сумме 375593,93 руб. Проценты за пользование чужими денежными средствами начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 26.09.2025, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды, но не более суммы 921310 руб. 92 коп. (10% от цены договора);

На основании ч. 1 ст. 110 АПК РФ с ответчика пользу истца подлежит взысканию госпошлина в сумме 367 786 руб. с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию госпошлина в сумме 4 552 руб.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования  удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "УРАЛСТРОЙЭНЕРГО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКС (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 14 733 816,32 рублей, в том числе: 

- по договору №01-22/усэ/КУ от 10.01.2022: долг в сумме 542 030 руб. 97 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.01.2025 по 25.09.2025 в сумме 77 206 руб. Проценты за пользование чужими денежными средствами начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 26.09.2025, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды, но не более суммы 757 757 руб. 17 коп. (10% от цены договора);

- по договору №33-23/усэ/КУ от 09.01.2023: долг в сумме 61 381 руб. 89 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.01.2025 по 25.09.2025 в сумме 8743,14 руб. Проценты за пользование чужими денежными средствами начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 26.09.2025, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды, но не более суммы 618913 руб. 20 коп. (10% от цены договора);

- по договору №07-23/усэ/КУ от 25.01.2023: долг в сумме 8 606 721 руб. 84 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.01.2025 по 25.09.2025 в сумме 1 225 927 руб. 31 коп. Проценты за пользование чужими денежными средствами начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 26.09.2025, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды, но не более суммы 3 667 177 руб. 08 коп. (10% от цены договора);

- по договору №46-23/усэ/КУ от 05.09.2023: долг в сумме 1 663 728 руб. 28 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.01.2025 по 25.09.2025 в сумме 236978,72 руб. Проценты за пользование чужими денежными средствами начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 26.09.2025, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды, но не более суммы 994892 руб. 04 коп. (10% от цены договора);

- по договору №47-23/усэ/КУ от 18.09.2023: долг в сумме 41 502 руб. 12 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.01.2025 по 25.09.2025 в сумме 5911,49 руб. Проценты за пользование чужими денежными средствами начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 26.09.2025, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды, но не более суммы 208947 руб. 36 коп. (10% от цены договора);

- по договору №07-24/усэ/КУ от 26.02.2024: долг в сумме 1 888 090руб. 63 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.10.2024 по 25.09.2025 в сумме 375593,93 руб. Проценты за пользование чужими денежными средствами начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 26.09.2025, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды, но не более суммы 921310 руб. 92 коп. (10% от цены договора);

А также в возмещение расходов по уплате госпошлины 367 786 руб.

2.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "УРАЛСТРОЙЭНЕРГО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМПЛЕКС (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину 4 552 руб.

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» https://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда https://17aas.arbitr.ru.

4. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

Судья                                                                   А.С. Дёмина