РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 03 июля 2025 года    

по делу А33-37285/2023 Красноярск  

03 июля 2025 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Интэк» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 30.09.2025 устранить выявленные недостатки (дефекты) при сооружении детской спортивно-игровой зоны «Ромашка», находящейся по адресу: Иркутская область, Усольский район, с.Мальта, по муниципальному контракту № 47/2020 от 24.11.2020:  

- качалка-балансир (разборка качалки-балансира, замена фанеры на доску (D=50MM), грунтовка поверхности изделия, окраска поверхности изделия атмосферной краской (эмалью)).  

- качалка на пружине (изготовление фигурных накладок из влагостойкой фанеры (D=12 мм), грунтовка фигурных накладок, окраска фигурных накладок атмосферной краской (эмалью), монтаж накладок).  

- песочный дворик (демонтаж изделия «песочный дворик», удаление старой краски с изделия, грунтовка изделия, окраска изделия атмосферной краской (эмалью), разработка грунта вручную, бетонные работы, монтаж закладных для крепления, монтаж стоек изделия «песочный дворик» планировка территории изделия «песочный дворик»)  

- комплекс «Ривьера» (замена соединений цепей, соединительных болтов, усиление стоек уголковым креплением к бетону, зачистка окрашенных элементов, грунтовка деревянных конструкций, окраска деревянных конструкций атмосферной краской (эмалью))  

- щит информационный (разработка грунта вручную, бетонирование подставки под щит, с установкой закладных деталей, монтаж щита)  

- скамейка детская «касатка» - 2штуки (зачистка скамеек от краски, грунтовка скамеек, окраска деревянных конструкций атмосферной краской (эмалью).  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Интэк» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 90 505 руб. 94 коп. штрафа, в доход федерального бюджета 9 620 руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья С.А. Красовская