1192/2023-35010(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧА СТЬ РЕШЕНИЯ

Именем Российс кой Федерации  

15 мая 2023 года Дело № А33-7155/2023  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167 – 170, 177, 228, 229 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

отказать в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети  Сибирь» (ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327) о рассмотрении настоящего дела по  общим правилам искового производства.  

Удовлетворить ходатайство общества с ограниченной ответственностью  «Инфраструктурные решения» (ИНН 2466162473, ОГРН 1152468026501) об уточнении  исковых требований в части пени с учетом абзаца 2 пункта 20 договора об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.7343.21 от 07.12.2021,  - о начислении пени по день фактического исполнения обязательства из расчета  

161,02 руб. за каждый день просрочки, но не более чем за 205 дней. 

Удовлетворить ходатайство публичного акционерного общества «Россети Сибирь»  (ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327) о снижении судебной неустойки на основании  статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527,  ОГРН 1052460054327) в течение одного месяца со дня вступления в законную силу  судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  

 № 20.2400.7343.21 от 07.12.2021 и осуществить технологическое присоединение  энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью  «Инфраструктурные решения» (ИНН 2466162473, ОГРН 1152468026501) - «Опора  двойного назначения», расположенная (которая будет располагаться) по адресу:  

г. Красноярск, Советский район, в границах кадастрового квартала 24:50:0400058, в точке  присоединения:  

Код доступа к материалам дела - 

I точка присоединения: максимальная мощность 10 кВт.  

Линия (0,4) Проектируемая Ячейка ТП Яч. 6 ТП ТП -920 Ячейка ПС яч. 39 в ст. ТП-918 ПС ПС № 181 «Весна-2» 110/10 кВ Основной источник питания: ПС № 181 «Весна-2» 110/10 кВ Резервный источник питания: отсутствует, 

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая  

их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению  

энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае  

необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им  

объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов  

электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: - максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10 кВт; - категория надежности третья; 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  

присоединение 0,4 кВ; 

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств  

отсутствует; включая мероприятия согласно Техническим условиям № 8000477692: 

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе  

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, согласовать ее  

со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим  

законодательством; 

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до точки  

присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы,  

установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки,  

марку и сечение провода определить проектом; - определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ-04 кВ; 

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в  

соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных  

рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от  

04.05.2012 № 442). 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 25 763,66 руб.  пени за период с 02.10.2022 по 10.03.2023; с 11.03.2023 – пени по день фактического  исполнения обязательства из расчета 161,02 руб. за каждый день просрочки, но не более  чем за 205 дней, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 8 000 руб.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную  неустойку в размере 3 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда по  день его фактического исполнения.  

Во взыскании судебной неустойки в остальной сумме отказать. 

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в  течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного  решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме,  путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Красноярского края.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме  электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной  подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его  размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на  бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления  соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня  размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении  мотивированного решения.  

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в  суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.  

Судья О.И. Медведева  

 Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 13.03.2023 6:34:00Кому выдана Медведева Ольга Ивановна