Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-83629/22-14-605

г. Москва

22 июля 2022 года

Резолютивная часть объявлена 27 июня 2022 г.

Дата изготовления решения в полном объеме             22 июля 2022 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе 

председательствующего - судьи Лихачевой О.В. 

Судьей единолично 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Елиной А.С., с использованием средств аудиозаписи 

рассмотрел дело по исковому заявлению ООО "СК РИКО" (ИНН 7116154394) 

к ответчику ООО "ДЕВЕЛОПЕР БИЛДИНГ" (ИНН 7715596666) 

о взыскании 4 481 013,58 руб. 

в судебное заседание явились: 

от истца – Курбатов А.Е. по доверенности от 10.03.2022г. 

от ответчика – Кулевской А.А. по доверенности от 22.04.2022г. 

УСТАНОВИЛ:

ООО "Строительная компания РИКО" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Девелопер Билдинг" о взыскании суммы задолженности по договору подряда № 3-СМР от 17.04.2019 г. в размере 4 326 973,33 руб., неустойки в размере 155 338,34 руб. за период с 01.07.2021 по 24.06.2022 (с учётом уточнения заявленных требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

В судебном заседании представитель истца огласил пояснения по иску, поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика огласил отзыв на иск, с заявленными требованиями не согласился.

Судом обозревались подлинники актов КС-2, справок КС-3, приложенные в качестве приложений в обоснование заявленных требований.

Рассмотрев материалы дела, выслушав сторон, оценив представленные доказательства, суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 17.04.2019 между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор подряда № 3-СМР на выполнение комплекса строительно-монтажных работ.

В соответствии с п. 2.1 договора, подрядчик принимает на себя обязательство, в объеме и сроки установленные договором и приложениями к нему, выполнить строительные работы, а заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную договором цену. Работы по договору выполняются с использованием давальческих материалов и в зависимости от характеристики строительных работ, включают в себя: (i) выполнение всех строительных работ на объекте, принятие необходимых мер и необходимых формальностей, включая, но не ограничиваясь следующими: получение приказов, необходимых для выполнения строительных работ, разработка исполнительной документации.

(iii) исправление в кратчайшие согласованные сторонами сроки любых дефектов, выявленных в течение срока выполнения строительных работ и в течение гарантийного периода на безвозмездной для заказчика основе. Принятие на себя подрядчиком ответственности за качество выполняемых строительных работ и за любой ущерб, причиняемый заказчику, его имуществу, жизни и здоровью любого третьего лица вследствие действий (бездействий) подрядчика.

Согласно п. 4.1 договора, его цена составляет 19 717 142 руб.

Во исполнение принятых на себя обязательств по договору, истец выполнил работы, предусмотренные договором, что подтверждается подписанными сторонами без разногласий актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3: № 1 от 31.12.2019, № 2 от 31.01.2020, № 3 от 31.01.2020, № 4 от 30.06.2020, № 5 от 30.04.2020, № 6 от 30.04.2021, № 7 от 30.04.2021, № 8 от 30.04.2021.

В соответствии с п. 4.2.5 договора, расчет за выполненные строительные работы заказчик осуществляет в течение 60 дней, с даты подписания сторонами актов по форме КС-2 и КС-3, на основании счета и счета-фактуры выставленных подрядчиком.

В нарушение принятых на себя обязательств, ответчик оплату выполненных и принятых работ не произвел. Задолженность ответчика перед истцом составляет 4 326 973,33 руб.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Сложившиеся между сторонами правоотношения подлежат регулированию положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться в срок надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

При рассмотрении спора по настоящему делу, суд руководствуется ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, из которой следует, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422), и ст. 431 ГК РФ, согласно которой при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Доводы отзыва ответчика судом отклоняются, поскольку акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписаны сторонами без разногласий, а само по себе отсутствие исполнительной документации не может являться основанием для неоплаты выполненных работ, так как не доказано, что ее отсутствие препятствует эксплуатации полученных результатов работ.

Основанием для возникновения обязательства ответчика по оплате выполненных работ является сдача ему результата работ (ст. ст. 702, 711, 720, 726, 746, 753 ГК РФ), а также по смыслу ст. 726 ГК РФ, отказываясь оплачивать переданные результаты подрядных работ по причине не передачи подрядчиком исполнительной документации, заказчик обязан доказать, что отсутствие такой документации исключает возможность использования результата работ по прямому назначению, однако, такие доказательства ответчик в материалы дела не представил.

Ответчик наличие задолженности не оспорил, доказательств оплаты задолженности не представил.

При изложенных обстоятельствах, суд полагает, что исковое требования истца о взыскании с ответчика задолженности в размере 4 326 973,33 руб. являются обоснованными, подтверждены материалами дела и подлежат удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ в размере  155 338,34 руб. за период с 01.07.2021 по 24.06.2022.

Согласно п. 18.4 договора, в случае нарушения заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых заказчиком работ по вине заказчика, последний по требованию подрядчика уплачивает ему пени в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора.

В соответствии с п. 1 ст. 329, п. 1 ст. 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (штраф, пеня), под которой признается определенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен, признан составленным верно в соответствии с условиями Договора.

Судом установлено ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств, которое в соответствии с соглашением сторон влечет возникновение обязанности ответчика уплатить истцу соответствующую денежную сумму в качестве неустойки.

Принимая во внимание, что факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по договору подтвержден материалами дела, суд полагает, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 155 338,34 руб. за период с 01.07.2021 по 24.06.2022

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, признает обоснованными исковые требования.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ДЕВЕЛОПЕР БИЛДИНГ" (ИНН 7715596666) в пользу ООО "СК РИКО" (ИНН 7116154394) 4 326 973,33руб. – задолженности и 155 338,34руб. – неустойки. 

Взыскать с ООО "ДЕВЕЛОПЕР БИЛДИНГ" (ИНН 7715596666) в доход федерального бюджета РФ 45 412руб. – государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение. 

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. 

Исполнительный лист на взыскание денежных средств в доход бюджета направляется арбитражным судом в налоговый орган, иной уполномоченный государственный орган по адресу должника. 

 

Судья: О.В. Лихачева