АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-178/2022

г. Владивосток

19 октября 2024 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Овчинникова В.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ  КОМПАНИЯ СЕРВИСА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Городская компания  сервиса» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу  устранить следующие дефекты, выявленные в пределах гарантийного срока по  муниципальному контракту от 11.10.2018 № 120300001718000181-0511599-01, а именно:  Отделочный слой ж/б подпорных стен имеет многочисленные сколы, трещины,  отслоения и разрушения вплоть до оголения арматурного каркаса на площади 110 кв м;  ограждение территории в количестве 60 м.п. деформировано, наклонено повалено на  землю в размере 60 погонных метров; водосточная система с козырька главного входа в  осях А/6-9 не отводит дождевую воду, (льется мимо желоба водосточной системы);  дождевая вода из труб водосточных систем всех входов здания льется на крыльцо (9  мест); керамогранит отделочного слоя крыльца центрального входа в осях А/6-8  скользкий (не соответствует проектному по параметру коэффициента устойчивости к  скольжению); в углах окон - в местах примыкания ГВЛ отделки стен к подоконной доске  окон имеется разрушение слоя краски, шпатлевки и самого ГВЛ в следствии воздействия  влаги (6 мест в помещении 161 -Помещение для судей и 2 места в помещении 141- Буфет); в районе аварийных выходов из здания по оси 11, справа и слева от выходов (в  районе колонн каркаса), а также в районе колонны по оси 11 между осями Д и Е  (помещение № 161) имеются области грибковых поражений отделочного слоя из ГВЛ в  следствии воздействия влаги в зимний период по причине промерзания (наличия мостика  холода) в этих местах(5 мест намокания ГВЛ и грибка на нем в районе входов); в  подвале, отм. -3,300 по периметру монолитной конструкции чаши бассейна, по внешнему  периметру переливного ж/б лотка, имеется протечка воды в местах примыкания ж/б  плиты перекрытия на отм. -1,17 с внешней ж/б стенкой переливного лотка.; в здании  котельной имеется протечка кровли; котельная: участок перехода между «улиткой»  корпуса дымососа и корпусом дымовой трубы вышел из строя (прогрел); помещение   № 112 «Зал для подготовительных занятий» - отсутствует отделочный слой по стенам  выше отместки подвесной потолочной системы «Гильятто».  

В остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ГОРОДСКАЯ КОМПАНИЯ СЕРВИСА" в доход федерального бюджета 6 000 рублей  государственной пошлины.  

 Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение  месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный  суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  апелляционной инстанции.  

 Судья Овчинников В.В.