Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г.Москва

06 апреля 2018г.                                                                                       А40-32571/17-96-304

 

Решение объявлено 05.04.2018г.

Полный текст решения изготовлен 06.04.2018г.

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чекмарёва Г.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

с участием лиц, участвующих в деле: 

от истца: ФИО2, по доверенности от 31.03.2017 

от ответчика: ФИО3 дов. 01.03.18, ФИО4 дов. от 23.03.17

Рассмотрел в судебном заседании дело  А40-32571/17

по иску 

Государственного казенного учреждения города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» (ГКУ «УКРиС»)

к ответчику Общество с ограниченной ответственностью «МАНСТАР II»  

о взыскании по пункту 12.3.2 госконтракта неустойки в размере  4 256 684 руб.

УСТАНОВИЛ:

ГКУ «УКРиС» заявило иск к ООО «МАНСТАР II» о взыскании по пункту 12.3.2 госконтракта неустойки в размере 4.256.684 руб.

Решением суда от 12.05.17 в иске было отказано.

Решение оставлено в силе постановлением апелляционной инстанцией от 21.07.17.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 20.11.17 указанные решение суда и постановление апелляционной инстанции отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

Истец в суд явился, представил пояснения, огласил свои доводы.

Ответчик в суд явился против иска возражает.

Изучив материалы дела, выслушав представителей Истца и Ответчика, оценив в совокупности представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Из представленных в дело материалов следует, что между Государственным казенным учреждением города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» (Государственный заказчик) и ООО «Манстар И»  (Генподрядчик) был заключен Государственный контракт № 14Р19/0373200004215000120 от 10.08.15 на завершение работ по устранению дефектов и недостатков после проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Бестужевых, 

<

...> Куусинена, д. 4А, корп. 4.

В соответствии с п. 2.1. Контракта - Государственный заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по устранению дефектов и недостатков после проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, по адресам, согласно Адресному перечню, включая выполнение строительно-монтажных работ на каждом Объекте, сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, Оборудования, своевременное устранение Недостатков (дефектов), сдачу каждого Объекта по Акту о приемке законченных работ на Объекте, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Государственный заказчик принимает надлежащим образом выполненные Генподрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

Согласно п. 1.2 контракта, Акт о приемке законченных работ на Объекте - документ утвержденной формы, составляемый для приемки выполненных работ по одному Объекту и утверждаемый распорядительным документом Государственного заказчика.

Согласно п. 1.20 контракта, Объекты - совокупность Объектов, составляющая результат работы Генподрядчика по настоящему Контракту. Приемка работ производится по каждому из Объектов с составлением отдельного Акта о приемке законченных работ на Объекте.

12.10.16 ГКУ «УКРиС» совместно с ООО «Манстар II» были составлены Акты, в которых зафиксированы количество дней просрочки за несвоевременное предоставление Актов о приемке законченных работа на Объекта (Объектах) по Контракту, в том время как в соответствии с п. 7.9 Контракта Генподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента проведения приемочной комиссии обязан передать Государственному заказчику надлежащим образом оформленный Акт о приемке законченных работ на Объекте со всеми предусмотренными действующим законодательством приложениями в количестве 4 (четырех)  экземпляров. При невыполнении  данного обязательства Генподрядчик песет ответственность в соответствии с условиями Контракта.

Согласно п. 7.9 Контракта, Генподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента проведения приемочной комиссии обязан передать Государственному заказчику надлежащим образом оформленный Акт о приемке законченных работ на Объекте со всеми предусмотренными действующим законодательством приложениями в количестве 4 (четырех) экземпляров. При невыполнении данного обязательства Генподрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта.

Истец полагает, что обязательства Ответчика по передаче Государственному заказчику Акта о приемке законченных работ исполнены не в полном объеме.

Из содержания представленных в дело Актов от 12.10.16 Государственному заказчику не переданы Акты о приемке законченных работ по следующим Объектам: 

<

...>; 

<

...>, 

<

...>; 

<

...>.

Суд установил, что Ответчиком выполнены частично обязательства по передаче Актов о приемке законченных работ по следующим Объектам: 

<

...>; г. Москва, Рублевское г., д. 48/1; 

<

...>.

В соответствии с п. 12.3.2 контракта, Генподрядчик уплачивает Государственному заказчику неустойку за непередачу/несвоевременную передачу Государственному заказчику надлежащим образом оформленного в соответствии со ст. 7 настоящего Контракта Акта приемочной комиссии.

В соответствии с пунктом 12.3,2 контракта, за не передачу, несвоевременную передачу государственному заказчику надлежащим образом оформленного в соответствии со статьей 7 контракта Акта приемочной комиссии, генподрядчик уплачивает госзаказчику неустойку в размере, установленном пунктом 6 Постановления Правительства РФ от 25.11.2013г. № 1063.

В представленном расчете Истец указывает, что согласно формам КС-2, КС-3 по Государственному контракту фактическая стоимость работ составила 6.529.754,70 руб. Цена Контракта согласно п. 3.1 составляет 7 715 130,36 руб. Таким образом, сумма невыполненных работ по указанному Контракту составит:

7 715 130,36 - 6 529 754,70 = 1 185 375,66 руб.

Истец также указывает, что работы по Контракту Генподрядчиком исполнены не в полном объеме, что подтверждается ф. КС-2 и выполненные работы оплачены Заказчиком, что также подтверждается ранее представленными платежными поручениями об оплате, данные обстоятельства не являются основанием для Ответчика не исполнять свои обязательства в части не передачи или несвоевременной передачи Государственному заказчику надлежащим образом оформленных Актов приемочной комиссии по указанным объектам.

Истец представил расчет суммы неустойки за несвоевременное предоставление Акта о приемке законченных работ на Объектах:

1. 

<

...>

1 185 375,66 * 10% * 0,03 * 302 = 1 073 950,35 руб.

2. 

<

...>

1 185 375,66 * 10% * 0,03* 302 = 1 073 950,35 руб.

3. 

<

...>

1 185 375,66 * 10% * 0,03 * 297 = 1 056 169,71 руб.

4. 

<

...>

1 185 375,66 * 10% * 0,03 * 296 = 1 052 613,59

Итого общий размер неустойки по Контракту составил 4.256.684 руб.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Кроме того, в силу ст. 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Согласно ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - «Закон о контрактной системе») в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В силу ч. 7 ст. 34 названного закона пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Учитывая, что Ответчик не представил доказательства исполнения своих обязательств в части передачи спорных актов, суд приходи к выводу, что бездействие Ответчика свидетельствует о злоупотреблении им своим правом, что по правилам ст. 10 ГК РФ является недопустимым.

Учитывая, что Истец доказал обстоятельства, на которые он ссылается, а Ответчиком его доводы не опровергнуты, суд признает иск подлежащим удовлетворению.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 15, 307, 309, 310, 314, 395, 702, 758, 762, 931, 965 ГК РФ, ст. ст. 4, 27, 65, 71, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «МАНСТАР II» (ИНН 

<

***>) в пользу Государственного казенного учреждения города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» (ОГРН 

<

***>) по пункту 12.3.2 госконтракта № 14Р19/0373200004215000120 от 10.08.15 неустойку в размере 4.256.684 руб., госпошлину по иску в размере 44.283 руб., а также госпошлину за подачу апелляционной и кассационной жалоб в размере 6.000 руб.

Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия. 

Судья                                                                                                              Г.С. Чекмарёв