РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

   09 июля 2024 года    

по делу А33-10722/2024 Красноярск  

09 июля 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью СК "Альфа-строй" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 30 дней с момента вступления решения суда в  

законную силу исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту от  

20.09.2021 № 0319300015221000016, устранить недостатки, зафиксированные в актах  

комиссионного осмотра объекта от 27.10.2023 и от 14.05.2024, а именно: 

В части проезжей части: 

- произвести заделку выбоин на стыках асфальтобетонных покрытий площадью 10 м2. (в  

начале и в конце автодороги ПК 0+10, ПК 1+50); 

- произвести заделку швов между бортовыми камнями в размере 300 м.п.;  - убрать строительный мусор в размере 2 м3.  

В части тротуара: - выполнить бетонное основание под бортовой камень в объеме 2,3 м.п. (ПК 1+40); 

- выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия вокруг опор освещения в объеме 2,5  

м2. (5 опор освещения); 

- произвести замену покрытия тротуара в объеме 130 м2.  

В случае неисполнения настоящего решения в установленный решением срок взыскать с  общества с ограниченной ответственностью СК "Альфа-строй" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения "Управление  имущественным комплексом" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку  в размере 5 000 рублей за каждый календарный день просрочки исполнения решения суда,  начиная со дня, следующего за днем окончания установленного судом срока исполнения  решения и до его фактического исполнения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК "Альфа-строй" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 1 800 руб.  государственной пошлины.  

Возвратить муниципальному казенному учреждению "Управление имущественным  комплексом" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 6 000 руб.  государственной пошлины, уплаченной по поручению о перечислении на счет от 01.04.2024   № 217429.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья А.А. Горбатова