АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А57-29730/2023

город Саратов

15 января 2025 года

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 177, 181 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Обязать обществу с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой», Саратовская обл.,  

г.Энгельс (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить  

выявленные в пределах гарантийного срока недостатки работ, выполненных в рамках  

муниципального контракта № 01603000526220000220001 от 11.04.2022, а именно - Дефекты дверного полотна, а именно: 

Каб. № 1- деформация дверного полотна, щель между косяком и дверным полотном  

более 7 мм. Каб. № 2- деформация дверного полотна. Каб. № 3- деформация дверного полотна, дверь не закрывается. Каб. № 4- деформация дверного полотна. Каб. № 5- деформация дверного полотна. 

Каб. № 6- деформация дверного полотна, щель между косяком и дверным полотном  

более 20 мм. Каб. № 7- деформация дверного полотна. Каб. № 9- деформация дверного полотна. 

Каб. № 10- деформация дверного полотна, щель между косяком и дверным полотном  

более 11 мм. 

Туалет для мальчиков 1й этаж - деформация дверного полотна, щель между косяком и  

дверным полотном более 7 мм, задевает пол. 

Туалет для девочек 1й этаж - деформация дверного полотна, щель между косяком и  

дверным полотном более 10 мм, задевает пол. 

Кабинет директора - деформация дверного полотна, щель между косяком и дверным  

полотном более 10 мм, задевает пол. 

Мед.кабинет - деформация дверного полотна, щель между косяком и дверным  

полотном более 7 мм, задевает пол. Лыжная база - деформация дверного полотна. Туалет зам.директора по АХР- деформация дверного полотна. 

туалет для девочек 2й этаж спорт зала - деформация дверного полотна, щель между  

косяком и дверным полотном более 15 мм, задевает пол. 

туалет для мальчиков 2й этаж спорт зала - деформация дверного полотна, Щель  

между косяком и дверным полотном более 6 мм. 

раздевалка для мальчиков - деформация дверного полотна, щель между косяком и  

дверным полотном более 12 мм. 

Каб. № 11 - деформация дверного полотна, щель между косяком и дверным полотном более 12 мм.  

Каб. № 12 - деформация дверного полотна, щель между косяком и дверным полотном более 15 мм.  

Каб. № 13 - деформация дверного полотна, щель между косяком и дверным полотном более 7 мм, задевает пол.  

Каб. № 14 - деформация дверного полотна. Каб. № 15 - деформация дверного полотна. 

Кабинет дистанционного образования - трещина в дверном полотне. Каб № 16- деформация дверного полотна.  

Учительская - деформация дверного полотна. Каб. N° 17- деформация дверного полотна. 

Каб № 18 - деформация дверного полотна (винт). Каб. № 19 - деформация дверного полотна, щель между косяком и дверным полотном  

более 20 мм, задевает пол. Каб. № 20 - деформация дверного полотна. Каб. № 21- деформация дверного полотна. Туалет для мальчиков 2й этаж - деформация дверного полотна. 

Каб. № 22 - деформация дверного полотна (винт). Каб № 23 - деформация дверного полотна (винт). Кабинет соц.педагога - деформация дверного полотна.  

Туалет для девочек 2й этаж - деформация дверного полотна, щель между косяком и дверным полотном более 10 мм, задевает пол.  

Музей - деформация дверного полотна, задевает пол, не закрывается. Каб. № 24 - деформация дверного полотна.  

Каб. № 25 - деформация дверного полотна. Каб. № 26- деформация дверного полотна. Туалет для девочек Зй этаж - деформация дверного полотна. 

Каб. № 28- деформация дверного полотна (винт). Каб. № 29- деформация дверного полотна (винт). Каб. № 30- деформация дверного полотна, задевает пол.  

Каб. № 31- деформация дверного полотна (винт). Каб. № 32- деформация дверного полотна (винт). Каб. № 33- деформация дверного полотна.  

Каб. № 34- деформация дверного полотна (винт). Каб. № 35- деформация дверного полотна (винт). Каб. № 36- деформация дверного полотна (винт). Каб. № 37- деформация дверного полотна (винт). Каб. № 38- деформация дверного полотна (винт). кабинет логопеда - деформация дверного полотна (винт), аб. № 40- деформация  

дверного полотна (винт), задевает пол. аб- № 41 - деформация дверного полотна (винт), задевает пол.  

Итого- 55 шт. Всего дверей - 77 шт. (22 шт.имеют изъяны менее выраженные). На площадках лестничного марша, образовались трещины в штукатурке стен. - Не установлены капельники на 3 (трех) окнах большого спортивного зала.  

В кабинетах в следствии некачественного монтажа OSB плиты, крепежные дюбель - гвозди прорвали линолеум, вдоль стены OSB плита не зафиксирована к основанию (движение под линолеумом при надавливании), а именно:  

Каб. № 7- (53 м2) - вылезли ригеля. Каб. № 9 - (52,8 м2) - вылезли ригеля. 

Каб. № 11 - (34,8 м2) - играет основание.  

Каб. № 12 - (52,1 м ) - вылезли ригеля, линолеум в дырах, играет основание. Каб. № 13  

- (53,4 м“) - вылезли ригеля, лйнолеум в дырах, играет основание. Каб. № 14 - (51 м ) -  

вылезли ригеля, линолеум в дырах, играет основание. 

Каб. № 17 - (41,8 м") - при пайке шва, расплавленным шнуром испачкан весь  

линолеум, играет основание. 

Каб. № 18 - (55,7 м ) - при пайке шва, расплавленным шнуром испачкан весь  

линолеум, играет основание. Каб. № 21- (54 м2) вылезли ригеля. - Образовались трещины на фасаде, по периметру здания. 

- Качество крепления раковин (15 штук) в кабинетах 3 (третьего) этажа не  

обеспечивают жесткой фиксации, что приводит к их провисанию. - ФИО1 на раковине в туалете для девочек Зй этаж. 

- Туалет для мальчиков Зй этаж-слив на полу не герметичен - вода протекает на 2й  

этаж. 

- Устройство вывода ливневых вод не обеспечивает отвод воды за пределы здания,  

вода течет в подвал. 

- Стыки отливов парапета крыши не герметичны и выполнены с деформацией  

плоскости в сторону центра листа металла, что в свою очередь обеспечивает сбор и  

удержание дождевой воды на поверхности листа, которая в дальнейшем затекает под лист и  

утеплитель стен, а так же протекает внутрь здания школы. Периметр парапета крыши- 278  

м/п; Площадь отливов - 168,19 м2; Размер 1 шт. - 126,5x60,5 см; Количество ~ 220 шт. 

- Плитка ступеней центрального крыльца отошла от основания (10x8м).  

- От USB плиты исходит гнилостный запах плесени, что свидетельствует, о том, что  

USB плита была уложена на непросохшее основание (стяжка). 

Плитка короба, в туалете 3 (третьего этажа отошла от основания, на стенах  

образовались трещины. Площадь: короб (плитка 20x20 см)- 1,8 м2, 5*т м , стены 1 — 14,4 м2,  

стены 2-14,4 м2. 

Отмостка периметра здания, около запасного выхода столовой, под окном кабинета  

 № 6- провалилась (около столовой- 0,8 м2, каб. № 6- 0,5 м2). 

Возле запасного выхода столовой при дожде, протекает технологический люк в  

ливневом стояке. 

В подвесном потолке актового зала образовались щели, что может привести к  

падению плиток потолка (170 м2). 

Крепление подвесного потолка в туалете для девочек на первом ‘ этаже, не  

обеспечивает жесткость конструкции (8,4 м2). - Сколы углов на напольной плитке в кабинете № 2. 

В большом спортивном зале, при устранении недостатков, не качественно  

осуществлена покраска стен (29 м2). 

- трещины в бочках унитазов (11 штук) и текут все монтажные гофры. - Торец подшивки потолка перехода не заделан, имеется щель (35 м.п).  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой», Саратовская  

обл., г.Энгельс (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  

государственную Полину в сумме 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  

в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме, через  

Арбитражный суд Саратовской области. 

Судья А.Т. Сериккалиева