5_15448700 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-230916/16-5-2000

г. Москва

23 марта 2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи У. А. Болдунова,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в судебном разбирательстве дело по иску (заявлению)  

истца: ООО «АРТСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ответчику: Федеральному медико-биологическому агентству (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

об обязании заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в п. 3.1  государственного контракта от 07.10.2015 г. № 19/КС,  

с участием: 

от истца: ФИО2 (доверенность от 20.03.2017 г.), ФИО3 (доверенность от  20.03.2017 г.);  

от ответчика: ФИО4 (доверенность от 17.02.2017 г.), ФИО5  (доверенность от 07.09.2015 г.);  

РЕШИЛ:

Обязать Федеральное медико-биологическое агентство (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) заключить (подписать) дополнительное соглашение о внесении  изменений в п. 3.1 государственного контракта от 07.10.2015 г. № 19/КС на следующих  условиях:  

1. С учетом ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с  обнаружением не учтенных в технической документации дополнительных работ по  выполнению противооползневых мероприятий по укреплению склона с устройством  грунто-свайной стенки, Стороны пришли к соглашению увеличить Цену контракта,  указанную в 3.1. государственного контракта на 2.117.483.273,54 (два миллиарда сто  семнадцать миллионов четыреста восемьдесят три тысячи двести семьдесят три)  рублей 54 копейки, в том числе НДС 18 %, и изложить п. 3.1. государственного  контракта в следующей редакции: «Цена Контракта (общая стоимость выполняемых  Работ по Контракту) определена Сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к  Контракту) и составляет 3.093.440.758,44 (три миллиарда девяносто три миллиона  четыреста сорок тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 44 копейки, в т.ч. НДС 18 %  471.880.793,66 (четыреста семьдесят один миллион восемьсот восемьдесят тысяч  семьсот девяносто три) рубля 66 копеек) рублей, с распределением объема  финансирования:  

- на 2015 год не более 292.787.256 (двести девяносто два миллиона семьсот  восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС -  (18 %), что составляет 44.662.462,78 рубля  

- на 2016 год не более 2.800.653.502,44 (два миллиарда восемьсот миллионов  шестьсот пятьдесят три тысячи пятьсот два) рубля 44 копейки, в т.ч. НДС 18 %  

427.218.330,88 (четыреста двадцать семь миллионов двести восемнадцать тысяч триста  тридцать) рублей 88 копеек;  

2. Изложить Приложение № 2 к Государственному контракту «Сводный  сметный расчет» в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному  соглашению;  

3. Изложить пункт 5.1. Государственного контракта в следующей редакции:  «Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты  подписания и действует до 31 декабря 2017 года, а в части обязательств Сторон - до  полного их исполнения»;  

4. Пункт 5.3. Государственного контракта изложить в следующей редакции: «  Срок сдачи всех видов работ по Контракту - 20 декабря 2017 года».  

Взыскать с Федерального медико-биологического агентства (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «АРТСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы по  оплате государственной пошлины в размере 6.000 (шесть тысяч) рублей.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд  в течении одного месяца с даты его принятия.  

Судья У. А. Болдунов