Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А20-1749/2023

г. Нальчик

30 августа 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 августа 2023 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики

в составе судьи З.А. Хатухова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Управление дорожного хозяйства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нальчик

к обществу с ограниченной ответственностью «Урванское дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нарткала

о взыскании 1 256 504 рублей 21 копейки,

при участии в судебном заседании представителя истца – ФИО2 по доверенности от 04.04.2023,

У С Т А Н О В И Л:

государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Управление дорожного хозяйства» обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Урванское дорожное ремонтно-строительное управление» о взыскании 1 256 504 рублей 21 копейки,  в том числе 1 235 434 рубля 13 копеек - сумма неосновательного обогащения, 21 070  рублей 08 копеек проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.02.2023 по 24.04.2023. Также истец просит взыскать с ответчика проценты за период с 24.04.2023 по день вынесения судом решения - исчисленные исходя из размера ключевой ставки, установленной Банком России; за период со дня, следующего за днем вынесения судом решения, по день фактической уплаты долга истцу - исчисленные из расчета ключевой ставки, установленной Банком России на этот период. 

            В судебном заседании представитель истца поддержал уточненные исковые требования о взыскании с ответчика 1 235 434 рубля 13 копеек неосновательного обогащения и 21 070 рублей 08 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, а также процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 25.04.2023 по день фактической оплаты долга.

Согласно части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. В связи с этим суд принимает к рассмотрению уточненные исковые требования истца.

Поскольку, от ответчика не поступило возражений относительно рассмотрения дела в свое отсутствие, с согласия представителя истца, суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание арбитражного суда первой инстанции по правилам части 4 статьи 137 АПК РФ.

            Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

            22.02.2022 между ГКУ КБР «Управдор» и ООО «Урванское ДРСУ» заключен государственный контракт №1-КРА на выполнение работ по капитальному ремонту подъезда от автомобильной дороги Дейское-Н.Курп-граница с РСО Алания к с. В.Курп и Н.Курп км 0+000-км 6+650, км 18+190-км21+650 (1-я очередь км 5+940-км6+650, км 18+190-км 21+650) с последующим содержанием в течение 2022-2025 гг. для нужд Кабардино-Балкарской Республики (далее - государственный контракт).

            Согласно пункту 2.1. государственного контракта, цена контракта составляет:           117 406 057 рублей 59 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов из них:

            - по капитальному ремонту 115 387 471 рублей 51 копейка, в том числе НДС 20% 19 231 245,25 рублей 25 копеек; по содержанию:

в 2022 году 106 379 рублей 03 копейка, в том числе НДС 17 729 рублей 84 копейки;

в 2023 году 637 402 рубля 35 копеек, в том числе НДС 106 233 рубля 73 копейки;

в 2024 году 637 402 рубля 35 копеек, в том числе НДС 106 233 рубля 72 копейки;

в 2025 году 637 402 рубля 35 копеек, в том числе НДС 106 233 рубля 72 копейки.

В соответствии с пунктами 2.4, 2.6 государственного контракта ГКУ КБР «Управдор» перечисляет ООО «Урванское ДРСУ» аванс, в размере 30 % от цены государственного контракта, в течение 15 рабочих дней с даты его заключения на лицевой счет, открытый в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики. Оплата результатов работ будет осуществляться в рамках цены государственного контракта, в соответствии со сметой, в сроки и размерах, установленных государственным контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения государственного контракта) и в сроки не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания ГКУ КБР «У правд ор» документов о приемке.

21.12.2022 в связи с образовавшейся экономией ГКУ КБР «Управдор» и ООО «Урванское ДРСУ» пришли к обоюдному согласию уменьшить цену государственного контракта на 6 697 126 рублей 97 копеек, о чем составлено дополнительное соглашение №3 к государственному контракту (далее - дополнительное соглашение).

Одновременно с тем, в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, с учетом положительного заключения повторной государственной экспертизы ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации Кабардино-Балкарской Республики» от 07.12.2022 № 07-1-1-2-086192-2022 на основании сметы и расчета новой цены государственного контракта ГКУ КБР «Управдор» и ООО «Урванское ДРСУ» пришли к обоюдному согласию увеличить цену государственного контракта на 5 461 692 рубля 84 копейки.

В данной связи пункт 2.1 раздела 2 государственного контракта изложен в следующей редакции:

«цена Контракта составляет: 116 064 244 рубля 43 копейки, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов из них:

- по капитальному ремонту 114 152 037 рублей 38 копеек, в том числе НДС 20%         19 025 339 рублей 56 копеек; по содержанию:

в 2022 году 0 рублей 00 копеек, в том числе НДС 00,00 руб.;

в 2023 году 637 402 рубля 35 копеек, в том числе НДС 106 233 рубля 73 копейки;

в 2024 году 637 402 рубля 35 копеек, в том числе НДС 106 233 рубля 72 копейки;

в 2025 году 637 402 рубля 35 копеек, в том числе НДС 106 233 рубля 72 копейки» (пункт 2.1 дополнительного соглашения).

Согласно пункту 3 дополнительного соглашения, остаток средств в размере 1 235 434 рубля 13 копеек подлежать возврату ГКУ КБР «Управдор» в срок до 31.01.2023.

Ввиду того, что ООО «Урванское ДРСУ» в установленный пунктом 3 дополнительного соглашения срок не возвратило остаток средств в размере 1 235 434 рубля 13 копеек, в целях принятия мер по досудебному урегулированию спора, предусмотренных частью 5 статьи 4 АПК РФ, в их адрес 27.02.2023 (исх. № ЗО-УДХ/02-125) направлено требование перечислить остаток средств в течение 15 дней с момента получения требования, с указанием, что в случае неисполнения данных требований, материалы будут переданы в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики..

Поскольку ответ на претензию не поступил и указанная сума не была возвращена, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Уточненные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В силу пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Из изложенной нормы следует, что в предмет доказывания по кондикционному иску входят следующие обстоятельства: факт приобретения или сбережения ответчиком имущества за счет истца, отсутствие правовых оснований для такого приобретения или сбережения. В свою очередь ответчик должен доказать отсутствие на его стороне неосновательного обогащения за счет истца либо наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения.

Истец указывает, что непоступление денежных средств на расчетный счет ГКУ КБР «Управдор» (указанный в государственном контракте для расчетов между сторонами) подтверждается справкой, выданной главным бухгалтером ГКУ КБР «Управдор» ФИО3. То есть, ответчик без установленных законом и соглашениями оснований, удерживает денежные средства истца в размере 1 235 434 рубля 13 копеек.

Доказательства того, что остаток средств в размере 1 235 434 рубля 13 копеек были возвращены истцу, ответчиком не представлено. 

По правилам части 1 статья 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик будучи надлежащим образом извещенным о времени и месте судебного разбирательства в судебное заседание не явился, иск по существу и по сумме не оспорил.

При указанных обстоятельствах исковые требования в части взыскания неосновательного обогащения в сумме 1 235 434 рубля 13 копеек арбитражный суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению.

За пользование чужим  денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации истец предъявил к взысканию проценты за период с  01.02.2023 по 24.04.2023 в сумме 21 070 рублей 08 копеек.

Согласно пункту 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В пункте 58 постановления Пленума Верховного Суда российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено следующее: в соответствии с пунктом 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты, установленные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, с момента, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В пункте 3 дополнительного соглашения, было указано, что остаток средств в размере 1 235 434 рубля 13 копеек подлежать возврату ГКУ КБР «Управдор» в срок до 31.01.2023.

Таким образом, требование истца о взыскании процентов с 01.02.2023 по 24.04.2023 в сумме 21 070 рублей 08 копеек, суд признает правомерным и удовлетворяет в заявленном размере.

В силу пункта 3 статьи 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Поскольку более короткого срока для начисления процентов судом не установлено, требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 25.04.2023 по день фактической оплаты долга так же подлежит удовлетворению.

            Частью 3 статьи 110 АПК РФ предусмотрено, что государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

            Руководствуясь статьями 110, 167, 170 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Урванское дорожное ремонтно-строительное управление» в пользу государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Управление дорожного хозяйства» 1 235 434 (один миллион двести тридцать пять тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 13 копеек неосновательного обогащения и 21 070 (двадцать одну тысячу семьдесят) рублей 08 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 25.04.2023 по день фактической оплаты долга в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Урванское дорожное ремонтно-строительное управление» в бюджет Российской Федерации 25 565 (двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                               З.А. Хатухов