АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

арбитражного суда первой инстанции

Дело № А32-49982/2020

г. Краснодар

2 августа 2021 г.

Резолютивная часть решения объявлена 29 июня 2021 г.

Решение изготовлено в полном объеме 2 августа 2021 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Корейво Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «АГМ-СЕРВИС» г. Новосибирск к акционерному обществу «НЭСК-электросети» г. Краснодар об обязании осуществить технологическое присоединение.

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – директор ФИО2 (протокол №13 от 4 марта 2020 года)

от ответчика – ФИО3 (доверенность от 28 июня 2021 года №09.НС-27/21-318) 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «АГМ-СЕРВИС» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к акционерному обществу «НЭСК-электросети» об обязании осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «АГМ-СЕРВИС» расположенных 

<

...> №222 (кадастровый номер 23:43:0422001:1470). 

Представитель истца в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме. 

Представитель ответчика пояснил свою занимаемую правовую позицию по делу. 

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, суд установил

следующее. 

Между АО ««НЭСК-электросети» (сетевая организация) и ООО «АГМ-СЕРВИС» (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения № 4-38-18-1957 от 26.02.2019, по условиям которого сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом определенных договором характеристик.

Объектом технологического присоединения является производственная база, расположенная по адресу: 

<

...> №222, кадастровый номер  23:43:0422001:1470. 

Плата за технологическое присоединение, указанная в пункте 10 договора, уплачена истцом в полном размере. 

Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. 

Во исполнение технических условий истец выполнил свой объем обязательств, что подтверждается актом о выполнении технических условий от 03.02.2020 № 27/2020. 

В указанный договором срок сетевая организация свои обязательств не исполнила, что явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском о понуждении. 

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение исходя из следующего. Статьями 309, 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается и только надлежащее исполнение прекращает обязательство. Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, не включены в раздел IV «Отдельные виды обязательств» ГК РФ, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения. Такие нормы содержатся в статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об оказании услуг по технологическому присоединению (пункт 6 Правил N 861 и статья 26 Закона об электроэнергетике). 

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). 

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (п. 1 ст. 26 Закона N 35-ФЗ и пп. 16, 17 Правил N 861).

Договором об осуществлении технологического присоединения № 4-38-18-1957 от 26.02.2019 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев, то есть не позднее 27.08.2019. 

В соответствии с техническими условиями сетевая организация обязуется осуществить:

- организационно-технические мероприятия по техническому перевооружению, расширению, реконструкции  электрических сетей необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя;

- разработку схемы электроснабжения для присоединения и обеспечения передачи в сеть заявителя величины разрешенной к использованию мощности;

- строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1287 до границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заказчиком;

- обеспечение выполнения мероприятий раздела 10 технических условий, включая разработку проектной документации. 

В установленный договором срок сетевая организация не выполнила свои обязательства по договору.

Как разъяснено в пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7), согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства. При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения Гражданского кодекса Российской Федерации, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства. 

В пункте 16 Правил N 861 содержится императивная норма о том, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для категории заявителей, к которым относится истец, не может превышать 6 месяцев со дня заключения договора. 

При этом в случае если в ходе проектирования необходимость частичного отступления от технических условий, сетевая организация вносит соответствующие изменения в технические условия, выданные заявителю при условии, что такие изменения не повлекут необходимости корректировки указанных в заявке сведений, обязательств заявителя, определенных в технических условиях, а также рассчитанной для него платы за технологическое присоединение (пункт 23 Правил N 861).

Из материалов дела видно, что несмотря на возникшие в ходе выполнения мероприятий по технологическому присоединению препятствия ответчик не воспользовался предусмотренным пунктом 23 Правил N 861 порядком по внесению изменений в технические условия.

Суд считает, что обстоятельства, приведенные сетевой организацией в возражениях на иск в силу статей 309 и 310 ГК РФ не освобождали ответчика от исполнения принятых на себя в рамках договора обязанностей в установленный срок

При таких обстоятельствах заявленное истцом требование об обязании ответчика осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств является обоснованным и подлежит удовлетворению.

 Согласно пункту 27 Постановления N 7, удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 174 АПК РФ). При установлении указанного срока суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

Суд считает разумным установить сетевой организации срок для исполнения обязательств по договору в два месяца с момента вступления решения в законную силу. 

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются судом в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. 110, 167-171, 176, 180, 181, 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обязать акционерное общество «НЭСК-электросети» г. Краснодар                                                  (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в течение 2-х месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу исполнить договор №4-38-18-1957 от 26 февраля 2019 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «АГМ-СЕРВИС» г. Новосибирск (ИНН 

<

***>                            ОГРН 

<

***>) для производственной базы по ул. Уральской дом №222 в                           г. Краснодаре (кадастровый номер 23:43:0422001:1470).

Взыскать с акционерного общества «НЭСК-электросети» г. Краснодар                                  (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АГМ-СЕРВИС» г. Новосибирск (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) 6000 рублей – судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать в установленном порядке после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия, и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа через Арбитражный суд Краснодарского края в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу.

 

Судья                                                                                              Е.В. Корейво