АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

(р е з о л ю т и в н а я  ч а с т ь)

Дело №А13-3521/2022

город  Вологда

12 июля 2022 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

р е ш и л :

внести в договор от 29.04.2021 № 32110123156/2-ЭК, следующие изменения:

пункт 1.4 договора изложить в следующей редакции: «Начало выполнения работ: дата подписания Договора. Окончание срока выполнения работ: 02.02.2022».

внести в договор от 29.04.2021 № 32110128565/3-ЭК, следующие изменения: «Начало выполнения работ: дата подписания Договора. Окончание срока выполнения работ: 02.02.2022».

Взыскать с муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Вологдагорводоканал» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дорсервис» 2 327 978 руб. 40 коп. задолженности, а также 46 640 руб. возмещения уплаты государственной пошлины.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.

 

 

Судья                                                                                                      Л.А. Соколова