Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №  А40-155273/19-110-1310

15 января 2020 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 19 декабря 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 15 января 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ермоловой В.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "МОНТЕ-АВО" (105066, Москва город, улица Красносельская Нижн., дом 35, строение 9, комната 10 этаж 4, ОГРН: 1026403047758) к обществу с ограниченной ответственностью "СТОЛИЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - 19" (140054, Московская область, город Котельники, микрорайон Ковровый, дом 37, помещение №5, ОГРН: 1045005012095)  о взыскании 1 685 198,8 руб.,

при участии:

по протоколу,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "МОНТЕ-АВО" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СТОЛИЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - 19" о взыскании (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) 153 199,80 руб. неустойки за период с 14.02.2018 по 28.05.2019 по договору №17-17-01-7140-1П от 10.11.2017.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав представленные доказательства, оценив их, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между ООО «Столичная Строительная Компания-9» (ООО «ССК-19») (Подрядчик) и ООО «Монте-АВО» (Субподрядчик) были заключен договор № 17-17-01-7140-1II от 10.11.2017 г. на выполнение строительно-монтажных работ по титулу 03787 «Модернизация низкой пассажирской платформы № 2 вокзала Аткарск». Общая стоимость работ, согласно пункту 2.1 договора составляет сумму 1 531 998,72 руб. с учетом НДС 1 8%. Далее по тексту Договор.

В соответствии с принятыми обязательствами. Истец выполнил свои обязательства в полном объеме. О названном свидетельствуют подписанные сторонами Акт о приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ унифицированной формы № КС-3 за разные периоды. Никаких претензий по качеству и срокам выполненных работ от ответчика не поступало, все акты подписаны без оговорок.

Согласно условиям пункта 3.1 договора, заказчик производит оплату выполненных работ в порядке, установленном пунктом 3.2 договора в течение 60 (шести десяти) дней после подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставления счет-фактуры в пределах договорной цены объекта. Оплата выполненных работ производится до 95 % от стоимости выполненных работ. Оплата оставшихся 5% от стоимости выполненных работ производится подрядчиком в соответствии с п. 3.3 договора, а именно в течение 60 дней после подписания всех актов о приемке объекта в эксплуатацию.

Итоговый акт о приемке выполненных работ по договору 17-16-01-4937-1 от 23.09.2016 г. был подписан сторонами 15.12.2017 г.

Стоимость выполненных работ по договору 17-17-01-7140-1П от 10.11.2017 т. не оплачена в полном объеме.

Таким образом, сумма основного долга по выше названным договорам на дату подачи  иска составляла1 531 998 руб.72 коп.

В силу п. 1. ст. 711 ГК РФ. заказчик обязан производить своевременную оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.

Статьёй 309 и 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено ходатайство об изменении размера исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ, в связи с оплатой ответчиком суммы основного долга.

В соответствии с п. 17.13 договора 17-17-01-7140-1П от 10.11.2017 г., при задержке расчетов за выполненные работы субподрядчик в праве требовать уплаты штрафа в размере 0.01% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ, подлежащих оплате, что по расчету истца проверенному судом, составляет 153 199,80 руб.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-171 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "СТОЛИЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - 19"  в пользу  общества с ограниченной ответственностью "МОНТЕ-АВО" 153 199 руб. 80  коп. неустойки, 29 852 руб.  в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:      А.В. Мищенко