ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А40-136467/17-56-1076

г. Москва

31 октября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 24.10.2017 

Решение в полном объеме изготовлено 31.10.2017 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Пономаревой Т.В.

При ведении протокола секретарем ФИО1

рассмотрел в открытом судебном заседании дело 

по иску ООО ТД «ЧелябТрейд» (ОГРН:1067451072655, ИНН:7451231412, 454091, 

<

...>, дата регистрации 16.05.2006)

к АО «ГУОВ» (ОГРН:1097746390224, ИНН:7703702341, 119021, 

<

...>, дата регистрации 08.07.2009))

о взыскании денежных средств в размере 42 893 048, 66 руб.

третье лицо: Министерство Обороны РФ (119019, 

<

...>), временный управляющий ООО ТД «ЧелябТрейд» ФИО2

при участии

от истца: ФИО3 по доверенности от 10.04.2017, 

от арбитражного управляющего ООО ТД «ЧелябТрейд»: ФИО4 по доверенности от 20.06.2017

от ответчика: ФИО5. по доверенности от 29.11.2016 № Д-758

УСТАНОВИЛ:

ООО ТД «ЧелябТрейд» обратилось в суд с требованием о взыскании с АО «ГУОВ» задолженности в размере 41 139 226, 68 руб., процентов по состоянию на 24.10.2017 г. в размере 2 720 022, 43 руб., а также начиная с 25.10.2017 г. по день фактического исполнения обязательства (с учетом уточнения, принятого судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В судебное заседание не явился представитель Министерства Обороны РФ, извещен надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела. Суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав письменные доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению.

Из материалов дела усматривается, что между ООО «ТД «ЧелябТрейд»» (Подрядчик) и АО «ГУОВ» (Заказчик) был заключен Договор подряда № 2015/2-287 от 02 марта 2015 г.

В соответствии с пунктом 3.1. указанного Договора (в редакции дополнительного соглашения № 5) цена договора составляет 56 550 075 (рублей 87 копеек, в том числе НДС - 18 %, в том числе с разбивкой по объектам согласно Приложению № 1 «Реестр объектов»: ЦВО-Р-0651 - 6 012 268, 45 рублей; ЦВО-Р-0942 - 50 537 807,42 рублей.

Порядок сдачи-приемки работ установлен разделом 11 Договора.

В соответствии с пунктом 11.1.1. Договора сдача-приемка выполненных работ за текущий (отчетный) месяц осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма КС-ба), Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленным после окончания работ на объекте в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 года (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущие цены индексами изменения сметной стоимости строительства для всех субъектов РФ на дату заключения Договора.

Приемка результата выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства, а также в соответствии с нормативными требованиями строительных норм и правил (СНиП), правил устройства электроустановок (ПУЭ), правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ), правил пожарной безопасности, а также требований других нормативно-технических и санитарно-гигиенических документов.

Согласно п. 11.1.2. Договора Подрядчик представляет Генподрядчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 3 (трех) экземплярах, первичные учетные документы (заверенные копии счетов-фактур на оборудование и материалы, заверенные копии договоров по прочим затратам), оформленные надлежащим образом, с сопроводительным письмом.

В соответствии с п. 11.1.4. Договора Генподрядчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения указанных документов, рассматривает их и после согласования с районным представителем государственного Генподрядчика при отсутствии замечаний подписывает их со своей стороны и производит оплату выполненных работ или дает мотивированные замечания с перечнем необходимых к устранению недостатков и сроков их устранения.

Результаты работ по Договору истцом ответчику переданы, Акты формы КС-2, справки формы КС-3 подписаны сторонами (АО «ГУОВ» и ООО ТД «ЧелябТрейд»), в том числе по шифрам ЦВО-Р-0942: акт формы КС-2, справка формы КС-3, № 35/1 от 04.05.2016 на сумму 10 400 890 рублей 52 копейки; акт формы КС-2, справка формы КС-3, № 39/1 от 28.04.2016 на сумму 2 126 342 рубля 75 копеек; акт формы КС-2, справка формы КС-3, № 40/1 от 28.04.2016 на сумму 280 936 рублей 03 копейки; акт формы КС-2, справка формы КС-3, № 41/1 от 04.05.2016 на сумму 33 434 577 рублей 77 копеек; акт формы КС-2, справка формы КС-3, № 43/1 от 28.04.2016 на сумму 3 848 639 рублей 40 копеек, акт формы КС-2, справки формы КС-3: № 96/1 от 01.02.2017 на сумму 60 354 рубля 84 копейки; № 97/1 от 01.02.2017 на сумму 386 066 рублей 11 копеек. 

Сумма выполненных, предъявленных к приемке и принятых ответчиком работ по актам формы КС-2, справкам формы КС-3, итоговому акту приемки, по шифру ЦВО-Р-0942 составляет 50 537 807 рублей 42 копейки.

Согласно абзаца 4 п. 3.1. Договора окончательная цена Договора определяется по результатам подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также подписанного на их основании между Генподрядчиком и Государственным Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ по установленной Государственным Генподрядчиком форме в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 1614. В разделе 4 Договора (п. 4.3.) Стороны согласовали следующие сроки оплаты выполненных Подрядчиком работ по ремонту объектов - в течение 180 (сто восемьдесят) рабочих дней после подписания Генподрядчиком оформленных Подрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, передачи Подрядчиком оригиналов счета и счета-фактуры.

В соответствии с пунктом 4.4. Договора оплата выполненных Подрядчиком работ производится Генподрядчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора до предела, не превышающего 90 (девяносто) % от Цены Договора. Оставшаяся часть Цены Договора будет выплачена Подрядчику при окончательном расчете.

В соответствии с п. 11.2. Договора подписание Генподрядчиком Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подтверждает факт выполнения работ подрядчиком и определяет сумму промежуточного финансирования.

В соответствии с пунктом 4.5. Договора окончательный расчет по Договору производится в течение 90 (девяносто) рабочих дней с момента подписания сторонами Итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной приложением № 3 к Договору.

Итоговый акт приемки выполненных работ направлен Подрядчиком для рассмотрения и подписания Генподрядчиком по шифру ЦВО-Р-0942 на сумму 50 537 807,42 рублей - «13» февраля 2017 года исх. № 50/17 (получено АО «ГУОВ» 15.02.2017 вх. № вх-329).

В соответствии с пунктом 11.7. Договора Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Итогового акта рассматривает его, а также иные необходимые для окончательной приемки работ документы и направляет подписанный со своей стороны Итоговый акт приемки выполненных работ Подрядчику или предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата работ с перечнем необходимых к устранению Недостатков и сроков их устранения.

В соответствии с п. 11.8. Договора Генподрядчик после подписания итогового акта приемки выполненных работ производит окончательную оплату за выполненные работы.

В сроки, установленные п. 11.7. Договора, подписанные со стороны ответчика, итоговый акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания в адрес Истца не поступали.

Итоговый акт приемки выполненных работ по шифру ЦВО-Р-0942 подписан Подрядчиком в одностороннем порядке 03.03.2017 (по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента вручения Генподрядчику - 15.02.2017).

Финансирование по Договору (аванс, оплата выполненных работ) произведено Ответчиком в объеме:

- по шифру ЦВО-Р-0942 - 3 500 000 рублей 00 копеек.

- по шифру ЦВО-Р-0651 - 844 800 рублей 00 копеек.

В соответствии с п. 4.14. Договора вознаграждение Генподрядчика за услуги, связанные с координацией работ, выполняемых подрядчиком, и другие оказанные им услуги, составляет 10 % от суммы выполненных подрядчиком и принятых Генподрядчиком работ по договору.

Размер вознаграждения Генподрядчика за услуги, оказанные им в соответствии с п. 4.14. Договора, составил 5 053 780 рублей 74 копейки, в том числе НДС -18%.

Сумма задолженности ответчика составляет 41 139 226 рублей 68 копеек, в т.ч. НДС -18%. Доказательств обратного ответчиком не представлено, наличие задолженности не оспорено.

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допустим.

Согласно ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно ч. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Тот факт, что направленный в адрес АО «ГУОВ» итоговый акт приемки выполненных работ по шифру ЦВО-Р-0942 не подписан со стороны ответчика, не свидетельствует об освобождении его от оплаты выполненных работ, с учетом того, что ответчиком возражений по объему и качеству не заявлено.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ч.3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Оценив и исследовав в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, проанализировав условия договора, суд пришел к выводу о том, что работы  истцом выполнены, замечания в отношении объема и качества выполненных работ не представлены, оплата работ ответчиком добровольно не произведена, поэтому требования истца о взыскании задолженности в судебном порядке являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истец также просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 24.10.2017 г. в размере 2 720 022, 43 руб., а также начиная с 25.10.2017 г. по день фактического исполнения обязательства

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в редакции, действовавшей до 1 августа 2016 года, размер процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых за периоды просрочки исполнения денежного обязательства, имевшие место с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года включительно, если иной размер процентов не был установлен законом или договором, определяется в соответствии с существовавшими в месте жительства кредитора - физического лица или в месте нахождения кредитора - юридического лица опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц;

Если иной размер процентов не установлен законом или договором, размер процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых за периоды просрочки, имевшие место после 31 июля 2016 года, определяется на основании ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Расчет истца ответчиком не оспорен, судом проверен, арифметически и методологически выполнен верно.

Таким образом, требование истца о взыскании процентов в размере 2 720 022, 43 руб. является обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

В силу п. 3 ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

В этой связи требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения решения суда обоснованно и подлежит удовлетворению.

Доводы ответчика о необходимости снижения суммы процентов за пользование чужими денежными средствами на основании норм ст. 333 ГК РФ, отклоняются судом, поскольку истцом заявлено требование о взыскании процентов, начисленных на основании пункта 1 статьи 395 ГК РФ, при расчете применены минимальные ставки размера ответственности, предусмотренные указанной статьей за неисполнение денежного обязательства, оснований для применения статьи 333 ГК РФ не имеется.

В силу абз. 4 п. 48 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" к размеру процентов, взыскиваемых по п. 1 ст. 395 ГК РФ, по общему правилу, положения ст. 333 ГК РФ не применяются (п. 6 ст. 395 ГК РФ).

Поскольку при принятии искового заявления к производству, истцу была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины, на основании ст. 110 ГК РФ госпошлина в размере 200 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход Федерального бюджета Российской Федерации.

. На основании статей 309, 310, 330, 395, 702, 711, 740, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации  руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АО «ГУОВ» в пользу ООО ТД «ЧелябТрейд» долг 41 139 226, 68 руб., проценты 2 720 022, 43 руб. по состоянию на 24.10.2017, а также проценты начисленные на сумму долга по ключевым ставкам Банка России с 25.10.2017по день фактической оплаты долга.

Взыскать с АО «ГУОВ» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СудьяТ.В. Пономарева