Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-183207/17-12-1075

г. Москва

29 января 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 января 2018 года

Решение изготовлено в полном объеме 29 января 2018 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению 

ООО "ИнжГео" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ответчику: АО "31 ГПИСС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании задолженности по договору №1516187389642090942000000/009-ЗПЗ-78/16 от 22.01.2016 г. в размере 13.341.341,17 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 793.809,80 рублей,

в заседании приняли участие: согласно протоколу. 

УСТАНОВИЛ:

ООО «ИнжГео» (далее – истец, общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АО «31 ГПИСС» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору от 22.01.2016г. № 1516187389642090942000000/009-ЗПЗ-78/16 в размере 13.341.341,17 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 793.809,80 рублей.

Заявление мотивировано тем, что ответчик не оплатил в полном объеме работы, выполненные по договору.

Представитель истца в судебном заседании требования поддержал в полном объеме по доводам, изложенным в иске 

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Основанием иска является то, что в соответствии с условиями договора от 22.01.2016 г. № 1516187389642090942000000/009-ЗПЗ-78/16 истец выполнил проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство морского причала в п. Белушья Губа» на сумму в размере 37.630.487,38 рублей. Истец указывает, что достиг в полном объеме результат работ, подготовленная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Акты выполненных работ были переданы в адрес ответчика 13.12.2016 года. В установленный условиями договора срок мотивированный отказ от приемки работ от ответчика не поступил, в связи с чем истец считает работы принятыми и подлежащими оплате.

С учетом выплаченного авансового платежа по данным истца ответчиком не оплачены работы на сумму 13.341.341,17 рублей.

Впоследствии в ответе на претензию от 05.09.2017 г. Ответчик сообщил об уменьшении и согласовании исполнительной сметы в суме 30.693.342,83 рублей. Далее генпроектировщик направил в адрес исполнителя проект дополнительного соглашения № 1 от 30.05.2017 г., согласно которому ответчик предлагает изменить стоимость договора, уменьшив ее до 25.168.541,12 рублей.

Истец указывает, что уменьшение стоимости работ в одностороннем порядке не допустимо.

Поскольку задолженность ответчиком погашена не была, истцом также начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 793.809,80 рублей за период с 01.03.2017 по 26.09.2017 г.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу положений ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Кроме того, юридическое лицо, осуществляя предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством и вступая в новые договорные отношения, должно было предвидеть последствия совершения им юридически значимых действий. Являясь субъектом гражданских правоотношений, ответчик обязан не только знать нормы гражданского законодательства, но и обеспечить соблюдение этих норм.

Как следует из материалов дела, рассматриваемый договор был заключен во исполнение государственного контракта № 1516187389642090942000000 от 23.11.2015 г.

Согласно п. 4.1 договора цена за весь период выполнения работ составляет 37.630.487,38 рублей.

Ответчик указывает, что в данном случае цена работ определяется исполнительной сметой, согласованной непосредственно заказчиком этих работ, т.е. Министерством обороны РФ, и подтверждающей фактические объемы выполненных работ, что установлено п. 4.3 договора, согласно которому цена договора является приблизительной и подлежит уточнению после согласования исполнительных смет государственным заказчиком.

При этом, пунктом 5.2 договора предусмотрено, что оплата выполненных работ производится в течение 20 банковских дней после предоставления генпроектировщику оформленных актов о приемке выполненных работ, исполнительных смет, согласованных с государственным заказчиком, накладных на разработанную и переданную документацию, оригиналов счета и счета-фактуры в размере, не превышающем 82% от стоимости согласованной государственным заказчиком.

В ходе проверки исполнительных смет истца у государственного заказчика имелся ряд замечаний, которые были направлены исполнителю исх. № 20/2916 от 25.2016 г.

Частично откорректированная сметная документация с актом приемки выполненных работ были направлены исполнителем  13.12.2016 г.

В ответ на указанное письмо генпроектировщик исх. № 46/4104 от 27.12.2016 г. Отказал исполнителю в приемке и оплате работ в связи с отсутствием согласованных государственным заказчиком исполнительных смет и подписанного итогового акта между государственным заказчиком и генпроектировщиком.

11.01.2017 г. в адрес истца также было направлено письмо с замечаниями о необходимости исключить ряд необоснованно примененных расценок и коэффициентов, в частности коэффициент за работу в ночное время суток; стоимость проходки столба воды с установкой первой рабочей колонны с откачкой воды из нее; коэффициент 1,25 – специальный режим.

20.02.2017 г. государственный заказчик утвердил исполнительные сметы по работам, выполненным истцом, в сумме 30.693.342,83 рублей с учетом всех замечаний. С учетом положений п. 5.2 договора исполнителю подлежит к выплате сумма в размере 25.168.541,12 рублей.

При этом, согласно п. 6.2.2 договора генпроектировщик обязан произвести окончательный расчет за выполненные работы в установленном договором порядке при наличии одновременно двух условий: согласования госзаказчиком исполнительной счеты и подписания итогового акта приемки выполненных работ.

Ответчик указал, что итоговый акт приемки выполненных работ подписан не был, вследствие чего обязательство для окончательного расчета не наступило.

Кроме того, ответчик также указал, что положительное заключение государственной экспертизы по технической части документации получено 09.12.2016 г., положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства – 17.07.2017 г.

Таким образом, проектная документация считается прошедшей экспертизу 17.07.2017 г.

Руководствуясь п. 6.2.5 и п. 8.4 договора ответчик направил в адрес истца дополнительное соглашение к договора об изменении цены договора и акт приемки выполненных работ на сумму 25.168.541,12 рублей, что составляет 82% от стоимости согласованных исполнительных смет.

В соответствии с п. 5.11 договора оплата выполненных исполнителем работ производится до предела, не превышающего 95% от суммы, подлежащей оплате генпроектировщиком, то есть 23.910.114,06 рублей.

Таким образом, ответчик указывает на отсутствие на своей стороне задолженности по оплате выполненных работ в сумме, заявленной ко взысканию истцом.

Утверждение Истца о том, что он составил исполнительную смету в соответствии с условиями Договора и не допустил несанкционированного увеличения стоимости работы, противоречит фактическим обстоятельствам дела. 

Как следует из протокола закупочной комиссии № 3/15-2 от 30.12.2015 г., на основании которого и был заключен рассматриваемый Договор, Истец предложил выполнить работы по инженерным изысканиям за 37 630 487,38 рублей, что подтверждается коммерческим предложением Истца за исх. № 12/25-11 от 25.12.2015 г. При этом, как видно из указанного письма, объем и стоимость каждого вида работ в рамках данного Договора были распределены следующим образом:

- проведение инженерно-геологических изысканий на суше 6 944 102,79 руб.;

- проведение инженерно-геологических изысканий на акватории 15 006 648,10 руб.;

- мобилизационные работы стоимостью 14 879 736,49 руб.

Между тем, в ходе исполнения государственного контракта изменилась методика выполнения буровых работ на акватории, в связи с чем необходимость в проведении мобилизационных работ на объекте отпала, соответственно, указанные работы Истцом фактически не производились. При этом с согласия Ответчика, а также Государственного заказчика Истцом были выполнены работы по инженерно-геофизическим изысканиям, которые Истец оценивает в 4 828 830,05 руб., т.е. стоимость выполненных работ не могла превысить 6 944 102,79 + 15 806 648,10 + 4 828 830,05 = 27 579 580,94 руб.

Тем не менее, 13.12.2016 г. исх. № 12/13-04 от 13.12.2017 г. Истец представил в адрес Ответчика исполнительные сметы на общую сумму 46 107 345,57 рублей:

- смета № 1 на инженерно-геологические изыскания на суше на сумму 9 119 891,92 руб.;

- смета № 2 на инженерно-геологические изыскания на акватории на сумму 32 158 623,60 руб.;

- смета № 3 на инженерно-геофизические изыскания на суше на сумму 4 828 830,05 руб.

Таким образом, из представленных в материалы дела документов видно, что Истец увеличил сумму исполнительной сметы на выполнение инженерно-геологических изысканий на акватории с 15 006 648,10 руб. до 32 158 623,60 руб., т.е. более чем в два раза, без надлежащего согласования такого увеличения с Генпроектировщиком.

Более того, указанное увеличение суммы исполнительной сметы произошло не вследствие увеличения объема фактически выполненных работ, а вследствие применения Истцом необоснованных коэффициентов и расценок, ранее отсутствовавших в коммерческом предложении Истца при заключении Договора.

Так, Истец считает, что к выполненным работам должен быть применен коэффициент 1,35 за работу в ночное время суток, в связи с тем, что указанные работы проводились им с ведома Государственного заказчика и не привели к существенному превышению общей цены работ и цены, согласованной при заключении Договора. Однако данный довод Истца не соответствует действительности.

В ходе согласования исполнительных смет Истец не представил ни Ответчику, ни Государственному заказчику документы, подтверждающие понесенные им расходы за работу в ночное время суток, т.е. надбавки работникам не выплачивались, затраты у Истца отсутствуют. 

Приказ № 10/03-01 от 10.03.2016 г., во-первых, является односторонним документом, в составлении которого Генпроектировщик не учавствует, во-вторых, не является документом, подтверждающим наличие у Истца каких-либо затрат, таким образом, указанный коэффициент обоснованно не был принят Государственным заказчиком и не принимается Генпроектировщиком.

Более того, позиция Истца не является стабильной. Полагая, что он не должен согласовывать исполнительные сметы с Государственным заказчиком, Истец, тем не менее, ссылается, что применил коэффициент 1,35 с ведома Государственного заказчика. Таким образом, Истец не отрицает взаимодействия с Государственным заказчиком по вопросам ценообразования в тех случаях, где Истцу это выгодно. Однако впоследствии доказать Государственному заказчику обоснованность применения ночного коэффициента Истец не смог. При этом Истец никогда не согласовывал его применение с Ответчиком, следовательно, не вправе требовать его принятия и оплаты.

Полный перечень замечаний Государственного заказчика, неоднократно направлявшийся в адрес Истца, а также стоимость работ без учета необоснованно примененных коэффициентов и расценок приведен Ответчиком в Приложении № 1 к настоящим пояснениям.  

Истец ошибочно указывает, что проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства является дополнительной экспертизой, и что она была проведена исключительно по инициативе Ответчика. 

Приказом Минобороны России от 06.07.2012 г. № 1700 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством обороны Российской Федерации государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости капитального строительства объектов обороны и безопасности, являющихся объектами военной инфраструктуры Вооруженных сил Российской Федерации» установлен административный регламент предоставления Министерством обороны Российской Федерации государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости капитального строительства объектов обороны и безопасности, являющихся объектами военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - Регламент), который регулирует порядок предоставления Министерством обороны Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках установленной компетенции Министерства обороны Российской Федерации государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий (далее - государственная экспертиза); проверки достоверности определения сметной стоимости капитального строительства (далее - проверка сметной стоимости) для объектов обороны и безопасности, являющихся объектами военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - объекты капитального строительства), финансирование строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств федерального бюджета.

При этом, как установлено п. 51 Регламента, предметом проверки сметной стоимости является изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.

Таким образом, проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости является обязательной процедурой для объектов капитального строительства, финансирование строительства которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Вместе с тем, Истец считает, что оснований для применения п. 9.9 Договора не имеется в связи с тем, что просрочка исполнения обязательств произошла по не зависящим от Истца обстоятельствам, однако, указанный довод несостоятелен в силу следующего.

Как следует из положений п. 13.2 Договора о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней как с момента их возникновения, так и прекращения. 

В установленный Договором срок Исполнитель не уведомил Генпроектировщика о возникновении обстоятельств непреодолимой силы. Уведомление Истца за исх. № 04/21-03 от 21.04.2016 г. было направлено им за один день до окончания срока сдачи результата работ Генпроектировщику, что не может быть признано добросовестным исполнением своих обязательств.

При этом, если бы ООО «ИнжГео» своевременно приступило к выполнению работ, то о непригодной ледовой обстановке для их выполнения Истец узнал бы своевременно. Согласно п. 3.1 Договора датой начала выполнения работ является день подписания Договора – 22.01.2017 г., в то время как сообщение о препятствующих обстоятельствах было направлено 21.04.2017 г., следовательно, это сообщение носит формальный характер и является попыткой избежать ответственности.

Согласно п. 13.5 Договора если одна из сторон не направит или несвоевременно направит указанные документы, то такая сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.

Исходя из изложенного применение Ответчиком п. 9.9 Договора правомерно и обосновано, таким образом, требование Истца о взыскании неустойки за просрочку оплаты выполненных работ удовлетворению не подлежит. 

Из положений ст. 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств - выполнение работ и передача их результата заказчику.

В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Достаточных и допустимых доказательств, опровергающих установленные и фактические обстоятельства дела, а также доводы ответчика суду не было представлено.

Судом рассмотрены все доводы истца, однако они не могут служить основанием для удовлетворения иска, обратного в материалы дела истцом не представлено.

В нарушение требований ст. 65 АПК РФ, истец не обосновал размер взыскиваемой суммы: природа ее происхождения, обоснованность выполненных работ, расчет цены иска

Судом рассмотрены все доводы истца, однако они не могут служить основанием для удовлетворения иска, обратного в материалы дела истцом не представлено.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений. Истец не доказал наличие обстоятельств, на которых основаны его исковые требования.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и возлагается на истца.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 12, 309, 310, 314, 395, 1102, 1103, 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 1, 2, 4, 65, 71, 110, 123, 167 - 171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований ООО "ИнжГео" – отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия. 

Судья:  А.С.Чадов