Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-47844/19

07 августа 2019 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 06 августа 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 07 августа 2019 года.

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующий судья Т.Ю. Гришина ,

при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску АО "МОЭГ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТОМСТРОЙ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о понуждении

при участии в судебном заседании: согласно протоколу от 06.08.2019

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

Рассмотрев материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ:

АО "МОЭГ" (далее – истец)  обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском  к ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТОМСТРОЙ" (далее – ответчик) об обязании ответчика заключить с истцом предусмотренное договором о подключении к системе теплоснабжения от 12.10.2015 № 1-ТТП, дополнительное соглашение № 1 в редакции,     направленной  АО "МОЭГ" в адрес ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТОМСТРОЙ" сопроводительным письмом № И.152 от 15.02.2019, а именно:

«1.В связи с приведением устава Исполнителя в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившим силы отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ, изменилось наименование Закрытого акционерного общества «Мособлэнергогаз» (ЗАО «МОЭГ») на Акционерное общество «Мособлэнергогаз» (АО «МОЭГ»), о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана запись от 10.02.2017., Стороны пришли к соглашению об изменении наименования «Закрытое акционерное общество «Мособлэнергогаз» (ЗАО «МОЭГ»)» по тексту Договора №15-ТП от 04,08.2016 г. на   наименование «Акционерное общество «Мособлэнергогаз» (АО  «МОЭГ»)».

2. В разделе «Понятия, используемые в договоре» абзац 2 исключить.

3. В пункте 1.2 Договора:

3.1.абзац 2 изложить в новой редакции:

«- подключаемый объект: внутриплощадочная тепловая сеть жилой застройки, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, пос. Жилино-1. 1-й км Быковского шоссе, уч. 1,4,5».

3.2.абзац 7 изложить в новой редакции:

«- местоположение точек подключения к системе теплоснабжения: граница земельного участка, принадлежащего Заявителю;».

3.3.абзац 8 изложить в новой редакции:

«-дата подключения объекта: «31» декабря 2021 года, но не ранее подписания акта о готовности внутриплощадочных, внутридомовых сетей и теплопотребляющего оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.».

3.4.абзацы 9-12 исключить.

4.Пункт 1.4 Договора изложить в новой редакции:

«1.4. Исполнитель во исполнение настоящего Договора осуществляет следующие мероприятия:

- разработку проектной документации на магистральную тепловую сеть до границы земельного участка Заявителя;

- прокладку магистральной теплосети от энергоцентра «Томилино» до  границы земельного

-проверку   выполнения    Заявителем    Условий   подключения    в    порядке    и    на   условиях, предусмотренных настоящим Договором;

- осуществление фактического подключения к системе теплоснабжения;

- иные необходимые действия по подготовке эксплуатируемых источников тепловой энергии к подключению и подаче тепловой энергии на Объект Заявителя.»

5.Пункт 1.5 Договора изложить в новой редакции:

«1.5. Заявитель во исполнение настоящего Договора в границах своего земельного участка осуществляет следующие мероприятия:

- согласно Условиям подключения разрабатывает проектную документацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 на 40 жилых домов, 9 зданий общественного назначения, 3 здания коммунального назначения, на тепловую камеру с узлом учета на границе земельного участка Заявителя, внутриплощадочные тепловые сети;

- строительство тепловых камер;

-прокладку внутриплощадочных тепловых сетей от точки подключения к магистральной тепловой сети, расположенной на границе земельного участка до вновь строящихся жилых домов;

-строительство внутренних инженерных сетей зданий;

- обеспечить выполнение Условий подключения, предусмотренных Приложением № 1. к настоящему Договору;

- осуществить иные необходимые действия по выполнению условий настоящего Договора и подготовке Объекта к подключению».

6.Пункт 2.1 Договора изложить в новой редакции:

«2.1. Размер платы за подключение составляет 280 933 180 (двести восемьдесят миллионов девятьсот тридцать три тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек на основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 07.02.2018 № 11-Р. Кроме того, сверх указанной стоимости предъявляется НДС по ставке, установленной законодательством РФ. Цена Договора включает в себя мероприятия, указанные в п. 1.4 настоящего Договора.

7. Пункт 2.3 Договора исключить.

8. В пункте 3.2 Договора слова «действует до 31 декабря 2020 года» заменить словами «действует до 3 1 декабря 2021 года».

9.В пункт 4.1 Договора внести следующие изменения:

9.1.Подпункт 4.1.1 изложить в новой редакции:

«4.1.1. Своими силами или силами привлеченных третьих лиц осуществить предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Договора мероприятия;».

9.2.В подпункте 4.1.2 после слова «внутридомовых» дополнить словом «внутриплощадочных». Слово «оборудования» заменить на словосочетание «теплопотребляющего оборудования».

10. Пункт 4.1.4 Договора исключить.

11. В пункт 4.3 Договора внести следующие изменения:

 «4.3.1. В соответствии с Условиями подключения (Приложение № 1 в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению) разработать проектную документацию и представить Исполнителю 1 (один) экземпляр согласованной и утвержденной в установленном порядке документации»,

11.2.Подпункт 4.3.2 изложить в новой редакции:

«4.3.2. Выполнить выданные Исполнителем Условия подключения (Приложение № 1 в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению) по подготовке Объекта к подключению к системе теплоснабжения;».

11.3.В   подпункте   4.3.3    и   4.3.10   после   слова   «внутридомовых»   дополнить   словом «внутриплощадочных».

12.Пункт 5.2 Договора изложить в новой редакции:

«5.2. Односторонний отказ от исполнения Договора допускается в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.».

13.Принять Приложение № 1 к Договору в новой редакции, являющееся приложением № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

14. Принять Приложение № 2 «График платежей» к Договору в новой редакции, являющееся приложением X» 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

15. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

16. Настоящее  Дополнительное  соглашение   подписано   Сторонами   в  двух   идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

17. Во  всем  остальном, что не предусмотрено условиями  настоящего Дополнительного соглашения. Стороны руководствуются условиями Договора.

Приложения:

1. Приложение №  1  к Дополнительному соглашению «Приложение №  I   к Договору «Условия подключения», на 4 л. в 2 экз.

2. Приложение № 2 к Дополнительному соглашению «Приложение № 2 к Договору «График платежей», на 1 л. в 2 экз.

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 20/02/19/-ОТП    от 15.02.2019 внутриплощадочной тепловой сети жилой застройки по адресу: Московская область,

Люберецкий район, нос. Жилнно-1, 1-й км Быковского шоссе, уч. 1, 4, 5.

1.  Заявитель- Общество с ограниченной ответственностью «СЗ «ТомСтрой», 

2.    Объект - внутриплощадочная тепловая сеть жилой застройки, расположенной по адресу: Московская область, т.о. Люберцы, пос. Жилино-1. 1-й км Быковского шоссе, уч. 1,4,5».

3. Точка подключения внутриплощадочной тепловой сети жилой застройки ООО «СЗ «ТомСтрой» к магистральной тепловой сети от котельной Энергоцентра Томилино - т.91.

4. Сроки начала и окончания строительства—2015г.-2021 г.

Разрешённый максимум теплопотребления - 25,055 Гкал/час.

5. Располагаемый напор в точке присоединения определяется разрабатываемым проектом согласно пьезометрическому графику.

7.Давление сетевой воды па выходе из Эиергоцентра Томилино:

- давление в подающем трубопроводе -7,0 кгс/см2

- давление в обратном трубопроводе - 3,0 кгс/см2 Расчётные температуры наружного воздуха при проектировании принять для:

- отопления - Тн.в.=-25°С

- вентиляции Тн.в.=-15°С

8.Расчетный температурный график тепловой сети принять: 115-70 °С.

I.Мероприятии, выполняемые Исполнителем.

1.Разработать проект и выполнить строительство магистральной тепловой сети Ду 500 в ППУ изоляции в 2-х трубном исполнении от Эиергоцентра Томилино до точки подключения (т.91), являющейся границей балансовой и эксплуатационной принадлежности тепловых сетей. Способ прокладки определить проектом.

2.Осуществить    проверку    готовности    тепловых    сетей    и    теплопотребляющего оборудования Заявителя.

3.Оформить документы о подключении к системе теплоснабжения.

II.Мероприятия, выполняемые Заявителем.

1.Разработать проект и выполнить строительство внутриплощадочных тепловых сетей. Способ прокладки определить проектом.

2.Разработать проект и выполнить строительство тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения.

3.Разработать проект и установить коммерческий узел учёта тепловой энергии в точке подключения т.91.

4.При проектировании узла учета тепловой энергии выполнить следующие требования:

•    Построить отдельное надземное здание для узла учета, отвечающее требованиям СНиП 2.09.02-85 для данного климатического района.

• Разработку проекта и монтаж коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя осуществить с помощью организаций, имеющими разрешение (Свидетельство   СРО)   на   выполнение   таких   работ.   Копии    разрешающих документов (заверенные печатью организации «КОПИЯ ВЕРНА») предоставить в АО «МОЗГ».

• Монтаж коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя производить под техническим надзором представителя АО «МОЭГ».Щ

• Прием в эксплуатацию коммерческою узла учета тепловой энергии Vij теплоносителя производится с участием представителей АО «МОЭГ». абонента, монтажной организации.

• До приемки в эксплуатацию коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя в АО «МОЗГ'» передается проектная и исполнительная документация в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

• Коммерческий УУТЗ и Т должен иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию метрологии и внесен в Государственный реестр средств измерений.

• Выбор типа приборов коммерческого УУТЗ и Т. каналов передачи данных системы диспетчеризации и программного обеспечения осуществить на основании технического задания на автоматизацию и диспетчеризацию от АО «МОЭГ».

• Приборы коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, что должно быть подтверждено выпиской из программы испытаний СИ при получении Свидетельств на СИ.

• Остальные основные требования к коммерческому узлу учета тепловой энергий и теплоносителя, к метрологическим характеристикам, монтажу и эксплуатации выполнить согласно « Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя».

• В разделе «Узел учета тепловой энергии и теплоносителя» предусмотреть:

-Установку теплосчетчика МКТС ООО «Интелприбор».

-Теплосчетчик должен обеспечивать учет всей потребляемой тепловой энергии и расходуемого теплоносителя системами отопления, вентиляции и ГВС и соответствовать требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя»;

- Должна быть обеспечена техническая возможность удаленного сбора данных с теплосчетчика, а так же выдача месячных за отчетный период, суточных и часовых отчетов о потреблении на бумажном носителе;

- Обеспечивать контроль работы и показаний приборов путем включения теплосчетчика в систему диспетчеризации АО «МОЭГ» с возможностью передачи данных на сервер Энергоцентра Томилино;

- Узел ввода совместно с теплосчетчиком должен быть оборудован запорно-регулирующей арматурой для наладки режимов теплопотребления;

- Теплосчетчик должен обеспечивать учет потребленной тепловой энергии при отключении электропитания путем установки АВР и блока бесперебойного питания (не менее 24 часов).

5. Разработать проект и выполнить монтаж ИТП на тепловую нагрузку с учётом максимальной нагрузки на ГВС подключаемых жилых домов (по отдельному ТЗ АО «МОЗГ»).

6. Разработать проект и выполнить монтаж внутренних систем теплопотребления Объектов.

7. Разработать проект и выполнить установку коммерческих узлов учёта тепловой энергии во всех присоединяемых Объектах. Проект узлов учёта согласовать в АО «МОЭГ».

8. До начала строительства проектную документацию в 3-х экземплярах представить в АО «МОЭГ» для рассмотрения и согласования, при этом 2 экземпляра в бумажном виде, один экземпляр в электронном передаются в АО «МОЭГ».

9. Разработать и выполнить мероприятия, обеспечивающие бесперебойное теплоснабжение потребителей.

10. Осуществлять строительный контроль (технический надзор) за строительством внутриплощадочных теплосетей, тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения своими силами либо с привлечением лиц. имеющих допуск к осуществлению работ данного вида.

11. До начала подачи тепловой энергии вызвать представителей АО «МОЭГ» для проверки готовности внутриплощадочных, внутридомовых сетей и теплопотребляющего оборудования, ИТП.

12. Оформить в структурном подразделении Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор» по Московской области Акт-допуск в постоянную эксплуатацию тепловых сетей, тепловых пунктов и внутриплощадочных тепловых сетей.

III. Технические требования для подключения объекта

1. Проектные работы выполнить согласно требованиям действующих норм, правил и государственных стандартов СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», РД 10-400-01 «Нормы расчёта на прочность трубопроводов тепловых сетей». Федеральные нормы и Правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, па которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

2. Разработку проекта выполнить согласно Постановлению № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

3. В местах ввода теплотрассы в тепловые камеры, здания, ЦТП и ИТП установить газоуплотнительные сальники.

4. Схема теплоснабжения 2-х трубная закрытая, независимая с подключением через индивидуальный тепловой пункт. В тепловых пунктах предусмотреть пластинчатые теплообменники на отопление и вентиляцию в количестве 2-х единиц (1-рабочий. 1-резервный) на 100% нагрузку и теплообменники ГВС на максимальную нагрузку со схемой включения двухступенчатой, смешанной.

Здания или помещения для тепловых пунктов, коммерческого узла учёта предусмотреть согласно СП 41-101-95 («Проектирование тепловых пунктов») и требовании Госстроя РФ.

5.Работы по строительству тепловых сетей, тепловых пунктов должны производиться по проектам, разработанным специализированными организациями. Имеющими «Свидетельство о допуске к работам» (СРО). в соответствии с действующими СП н нормами проектирования, «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». «Техническими правилами проектирования, строительства и приемки в эксплуатацию водяных разводящих тепловых сетей и абонентских вводов в городах Московской области».

6. При монтаже тепловых пунктов на линиях отопления и вентиляции применять шаровую фланцевую запорную арматуру, исключить использование запорной арматуры, изготовленной из алюминиевых сплавов.

7. Тепловые узлы внутренней системы отопления и вентиляции зданий оборудовать авторегуляторами, запорной арматурой, приборами контроля температуры и давления

8.Стояки и отопительные приборы оборудовать стальной задорно-регулирующей арматурой

9. До ввода в эксплуатацию системы теплоснабжения обеспечить наличие обслуживающего персонала соответствующей квалификации и из числа ИТР приказом назначить ответственного за эксплуатацию теплоэнергетических установок и тепловых сетей.

10. Приемке в эксплуатацию подлежат тепловые пункты и абонентские вводы, которые были  построены по проектам, согласованным с ресурсоснабжающими организациями и утвержденным в установленном порядке.

11. 11.Прием в эксплуатацию законченных строительством тепловых пунктов ивнутриплощадочных тепловых сетей производится комиссией, созываемой заказчиком, всоставе представителей проектной, строительной, теплоснабжающей организаций.

12. При приемке в эксплуатацию внутриплощадочных тепловых сетей и тепловых пунктов в АО «МОЭГ» передается исполнительная документация, оформленная и согласованная в установленном порядке и объеме, предусмотренном СП 68.13330.2017 «Приёмка в эксплуатацию закопченных строительством объектов» и «Техническими правилами проектирования строительства и приемки в эксплуатацию водяных тепловых сетей и абонентских вводов в Московской области».

13. Системы отопления, вентиляций и горячего водоснабжения нежилых помещений подключается независимо от соответствующих систем теплоснабжения жилых домов с собственными коммерческими узлами учёта тепловой энергии. На обратных трубопроводах установить обратные клапаны.

IV. Срок действия технических условий

1.Настоящие условия подключения вступают в силу с момента их утверждения и согласования.

2. Срок действия настоящих условий подключения до 31.12.2021 г.

3. По истечении срока действия условий подключения или изменения условий заявки Заявитель обязан продлить или получить новые условия подключения.

4. Условия подключения являются неотъемлемой частью договора технологического присоединения и без договора технологического присоединения недействительны.

Приложение 2 к Дополнительному соглашению

№от «»201года

«Приложение № 2 к Договору № 1 -ТТП от «12» октября 2015 года

График оплаты

Заявитель оплачивает Исполнителю указанную в пункте 2.1 договора плату за подключения за подключение вносится в следующем порядке:

№

Дата оплаты

Сумма, подлежащая оплате, руб

1

До 31.12.18

130 000 000,00

2

До 31.01.19

80 000 000,00

3

До 28.02.19

40 000 000.00

4

До 31.03.19

14 000 000,00

5

До 30.04.19

14 000 000,00

6

До 31.05.19

14 000 000,00

7

До 30.06.19

14 000 000,00

8

До 31.07.19

14 000 000,00

9

До 31.08.19

11 501 152,40

ИТОГО

331 501 152,40

ИТОГО: триста тридцать один миллион пятьсот одна тысяча сто пятьдесят два рубля 40 копеек.».

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен, представил отзыв, в котором возражал против заявленных требований в полном объеме.

Рассмотрев представленные в материалы дела документы, заслушав представителя истца, суд установил следующее.

Между Истцом (АО «МОЭГ») и Ответчиком (ООО «СЗ «ТомСтрой») заключен Договор о подключении к системе теплоснабжения от 12.10.2015 № 1 -ТТП (далее - Договор).

В соответствии с пунктом 1.1 Договора Истец принял на себя обязательства по подготовке и осуществлению организационных и технических мероприятий, дающих возможность подключаемому объекту Ответчика потреблять тепловую энергию, производимую Истцом, а Ответчик обязуется выполнить действия по подготовке своего объекта к подключению и оплатит услуги Исполнителя.

Согласно пункту 2.1 Договора предварительный размер платы за подключение составляет 300 млн. рублей.

Абзацем 4 пункта 2.1 Договора установлено, что окончательный размер платы за подключение определяется уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов (Комитетом по ценам и тарифам Московской области - далее Мособлкомцен).

В соответствии с пунктом 2.5 Договора после установления уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов платы за подключение Истец направляет Ответчику дополнительное соглашение с указанием размера установленной платы за подключение и скорректированный «График платежей». Ответчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения дополнительного соглашения подписать его и направить один экземпляр Истцу.

Распоряжением Мособлкомцен от 07.02.2018 № 11-Р установлена плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Истца объекта капитального строительства Ответчика в индивидуальном порядке в размере 280 933,18 тыс. рублей (без НДС).

В свою очередь Ответчик не согласился с указанным выше распоряжением и обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением к Мособлкомцен о признании незаконным Распоряжения от 07.02.2018 № 11-Р.

Решением Арбитражного суда Московской области от 18.10.2018 по делу № А41-31202/18 в удовлетворении заявленных требований Ответчику отказано. Постановлением Десятого Арбитражного апелляционного суда от 05.02.2019 решение Арбитражного суда Московской области от 18.10.2018 по делу № А41-31202/18 оставлено без изменения.

Во исполнение обязательств по Договору письмом от 15.02.2019 № И. 152 Истец направил Ответчику дополнительное соглашение № 1 к Договору о согласовании установленной Распоряжением Мособлкомцен от 07.02.2018 № 11-Р цены Договора.

Ответчик письмом от 15.03.2019 № 138 направил в адрес Истца протокол разногласий к дополнительному соглашению № 1 к Договору.

Истец, в свою очередь, руководствуясь пунктом 2 статьи 445 Гражданского кодекса, письмом от 02.04.2019 № И.326 мотивированно отклонил протокол разногласий Ответчика за исключением пункта 8 раздела II условий подключения № 20/02/19/ОТП от 15.02.2019, который Истец принял в редакции Ответчика.

Кроме того, как пояснил Истец, ранее письмом от 23.03.2018 № И.295 уже направлялось в адрес Ответчика дополнительное соглашение № 1 к Договору о согласовании установленной Распоряжением Мособлкомцен от 07.02.2018 № 11-Р цены Договора. Указанное письмо осталось без ответа. 

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения с соответствующим иском в суд. 

Согласно статье 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии со статьей 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Согласно пункту 2 статьи 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Согласно пункту 2.5 договора после установления уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов платы за подключение Истец направляет Ответчику дополнительное соглашение с указанием размера установленной платы за подключение и скорректированный «График платежей». Ответчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения дополнительного соглашения подписать его и направить один экземпляр Истцу.

Плата за технологическое подключение  установлена Распоряжением Мособлкомцен от 07.02.2018 № 11-Р.

Вместе с тем, действия по подписанию дополнительного соглашения во исполнение п. 2.5 договора Ответчиком в установленном порядке осуществлены не были. Таким образом, Ответчиком был  нарушен пункт 2.5 договора.

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Каких- либо возражений по существу заявленных требований, а равно доказательств, исключающих удовлетворение требований истца, на рассмотрение суду представлено не было.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, судом отклоняются, поскольку в рамках рассмотрения дела А41-31202/2018, судом уже была дана им соответствующая оценка  и данные доводы были отклонены как не основанные на законе. Факты, установленные по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Судебные расходы по оплате госпошлины распределяются между сторонами в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Обязать ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТОМСТРОЙ" заключить с АО "МОЭГ" дополнительное соглашение № 1  к договору о подключении к системе теплоснабжения № 1-ТТП от 12.10.2015 в редакции,     направленной  АО "МОЭГ" в адрес ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТОМСТРОЙ" сопроводительным письмом № И.152 от 15.02.2019.

Взыскать с ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТОМСТРОЙ" в пользу АО "МОЭГ" государственную пошлину в размере 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья                                                                                            Т.Ю. Гришина