142/2017-20553(1) 

Арбитражный суд Тамбовской области  392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12  

 http://tambov.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

г. Тамбов «20» апреля 2017 г. Дело № А64-805/2017 

Резолютивная часть решения объявлена «18» апреля 2017 г. Полный текст решения изготовлен «20» апреля 2017 г. 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи А.В. Захарова  

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  помощником судьи Е.В. Китаевой  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  ООО «Стройпремьер-Сервис» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>), г. Тамбов,  

к МБУ «Спецдорсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Тамбов, о взыскании 3 223 577,07 руб. при участии в судебном заседании 

от истца – ФИО1, доверенность № 1 от 18.04.2017,  от ответчика – ФИО2, доверенность от 15.11.2016.  

Отводов суду не заявлено. 

установил:

ООО «Стройпремьер-Сервис», г. Тамбов, обратилось в Арбитражный суд  Тамбовской области с исковым заявлением к МБУ «Спецдорсервис», г. Тамбов, с  требованием о взыскании по контрактам: № 142-К от 22.11.2016г., № 143-К от 22.11.2016,   № 155-К от 12.12.2016, № 166-К от 12.12.2016, № 575039/161 от 12.12.2016, № 575049/157  от 12.12.2016, № 575067/156 от 12.12.2016, № 575081/159 от 12.12.2016, № 575091/160 от  12.12.2016 основного долга в размере 3 175 938 руб.; неустойки за просрочку исполнения  обязательств по оплате выполненных работ в размере 47 639,07 руб. за период с  01.01.2017 по 14.02.2017.  

Истец в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил исковые требования, просит взыскать  основной долг в размере 3 175 938 руб., пени за период с 01.01.2017 по 18.04.2017 в  размере 111 475,42 руб.  

Уточнение судом принято. Истец в заседании суда исковые требования с учетом уточнения поддержал. 

Ответчик в заседании суда сумму задолженности и пени не оспаривает, отзыв по  иску не представил.  

Исследовав материалы дела, заслушав доводы сторон, суд выяснил, что 22.11.2016  между МБУ "Спецдорсервис" (Заказчик) и ООО «Стройпремьер-Сервис» (Подрядчик) по  итогам запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки заявок на участии в запросе  котировок № 0164300016516000780 от 14.11.2016) был заключен контракту № 142-К на  

20 апреля 2017 года 

выполнение работ по установке опор под светофоры по адресу: г. Тамбов, перекресток ул.  Чичерина-Северо-Западная от 22.11.2016 (далее – Контракт № 142-К).  

П. 1.1 Контракта № 142-К установлено, что подрядчик обязуется по заданию  заказчика выполнить работы по установке опор под светофоры по адресу: г. Тамбов,  перекресток ул. Чичерина-Северо-Западная, а заказчик обязуется оплатить выполненные  работы на условиях, предусмотренных контрактом.  

П. 1.2 Контракта № 142-К установлено, что виды и объем работ, выполняемых по  контракту: в соответствии с локальным сметным расчетом на выполнение работ по  установке опор под светофоры по адресу: г. Тамбов, перекресток ул. Чичерина-Северо- Западная (приложение № 2 к контракту).  

Цена Контракта 102 711 рублей (п. 2.1 Контракта № 142-К). 

П. 2.3 Контракта № 142-К установлены порядок и сроки оплаты выполненных  работ:  

- оплата выполненных работ производится заказчиком в пределах выделенного  объема финансирования на 2016 год, в безналичной форме платежными поручениями  путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в статье  14 Контракта;  

- оплата выполненных работ производится заказчиком в течение 30 дней с момента  подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о  стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (но не ранее 31.12.2016) путем  перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.  

Сроки выполнения работ: в течение 20 дней с момента заключения контракта (п.  4.2 Контракта № 142-К).  

П. 7.3 Контракта № 142-К установлено, что в случае просрочки исполнения  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать  уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.  

Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует полного  исполнения сторонами своих обязательств (п. 12.1 Контракта № 142-К).  

Истцом работы по Контракту № 142-К были выполнены, в полном объеме на сумму  102 711 руб., что подтверждено Актом о приемке выполненных работ № 1 от 09.12.2016,  подписанным сторонами и скрепленным их печатями.  

Стоимость работ соответствует Справке о стоимости выполненных работ и затрат   № 1 от 09.12.2016 на сумму 102 711 руб.  

Ответчиком оплата выполненных по Контракту № 142-К работ на сумму 102 711  руб. не произведена.  

12.12.2016 между МБУ "Спецдорсервис" (Заказчик) и ООО «Стройпремьер- Сервис» (Подрядчик) по итогам аукциона в электронной форме (протокол рассмотрения  единственной заявки на участии в аукционе в электронной форме   № 0164300016516000805/1 от 29.11.2016) был заключен контракту № 575049/157 на  выполнение работ по установке светофорного объекта по адресу: г. Тамбов, перекресток  ул. Чичерина-Северо-Западная от 12.12.2016 (далее – Контракт № 575049/157).  

П. 1.1 Контракта № 575049/157 установлено, что подрядчик обязуется по заданию  заказчика выполнить работы по установке светофорного объекта по адресу: г. Тамбов,  перекресток ул. Чичерина-Северо-Западная, а заказчик обязуется оплатить выполненные  работы на условиях, предусмотренных контрактом.  

П. 1.2 Контракта № 575049/157 установлено, что виды и объем работ, выполняемых  по контракту: в соответствии с локальным сметным расчетом «Установка светофорного  

объекта по адресу: г. Тамбов, перекресток ул. Чичерина-Северо-Западная» (приложение   № 2 к контракту).  

Цена Контракта 871 737 рублей (п. 2.1 Контракта № 575049/157). 

П. 2.3 Контракта № 575049/157 установлены порядок и сроки оплаты выполненных  работ:  

- оплата выполненных работ производится заказчиком в безналичной форме  платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет  подрядчика, указанный в статье 15 Контракта на основании счета-фактуры и  подписанного сторонами акта выполненных работ;  

- оплата выполненных работ производится заказчиком с момента подписания  сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на  расчетный счет подрядчика до 31.12.2016.  

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 29.12.2016. срок  выполнения работ включает в себя приемку результатов выполненных работ и  подписание акта сдачи- приемки выполненных работ (п. 4.2 Контракта № 575049/157).  

П. 7.3 Контракта № 575049/157 установлено, что в случае просрочки исполнения  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать  уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.  

Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2016  (п. 13.1 Контракта № 575049/157).  

Истцом работы по Контракту № 575049/157 были выполнены, в полном объеме на  сумму 871 737 руб., что подтверждено Актом о приемке выполненных работ № 1 от  16.12.2016, подписанным сторонами и скрепленным их печатями.  

Стоимость работ соответствует Справке о стоимости выполненных работ и затрат   № 1 от 16.12.2016 на сумму 871 737 руб.  

Ответчиком оплата выполненных по Контракту № 575049/157 работ на сумму  871 737 руб. не произведена.  

12.12.2016 между МБУ "Спецдорсервис" (Заказчик) и ООО «Стройпремьер- Сервис» (Подрядчик) по итогам запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки  заявок на участии в запросе котировок № 0164300016516000816 от 29.11.2016) был  заключен контракту № 166-К на выполнение работ по установке опор под светофоры по  адресу: 

<

...> в районе дома 96 от 12.12.2016 (далее – Контракт № 166-К).  

П. 1.1 Контракта № 166-К установлено, что подрядчик обязуется по заданию  заказчика выполнить работы по установке опор под светофоры по адресу: 

<

...> в районе дома 96, а заказчик обязуется оплатить выполненные работы на  условиях, предусмотренных контрактом.  

П. 1.2 Контракта № 166-К установлено, что виды и объем работ, выполняемых по  контракту: в соответствии с локальным сметным расчетом на выполнение работ по  установке опор под светофоры по адресу: 

<

...> в районе дома 96  (приложение № 2 к контракту).  

Цена Контракта 255 373 рублей (п. 2.1 Контракта № 166-К). 

П. 2.3 Контракта № 166-К установлены порядок и сроки оплаты выполненных  работ:  

- оплата выполненных работ производится заказчиком в пределах выделенного  объема финансирования на 2016 год, в безналичной форме платежными поручениями  путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в статье  14 Контракта;  

- оплата выполненных работ производится заказчиком с момента подписания  сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на  расчетный счет подрядчика до 31.12.2016.  

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 29.12.2016 (п. 4.2  Контракта № 166-К).  

П. 7.3 Контракта № 166-К установлено, что в случае просрочки исполнения  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать  уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.  

Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует полного  исполнения сторонами своих обязательств (п. 12.1 Контракта № 166-К).  

Истцом работы по Контракту № 166-К были выполнены, в полном объеме на сумму  255 373 руб., что подтверждено Актом о приемке выполненных работ № 1 от 16.12.2016,  подписанным сторонами и скрепленным их печатями.  

Стоимость работ соответствует Справке о стоимости выполненных работ и затрат   № 1 от 16.12.2016 на сумму 255 373 руб.  

Ответчиком оплата выполненных по Контракту № 166-К работ на сумму 255 373  руб. не произведена.  

22.11.2016 между МБУ "Спецдорсервис" (Заказчик) и ООО «Стройпремьер- Сервис» (Подрядчик) по итогам запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки  заявок на участии в запросе котировок № 0164300016516000779 от 14.11.2016) был  заключен контракту № 143-К на выполнение работ по электроснабжению светофорного  объекта по адресу: г. Тамбов, перекресток ул. Чичерина-Северо-Западная от 22.11.2016  (далее – Контракт № 143-К).  

П. 1.1 Контракта № 143-К установлено, что подрядчик обязуется по заданию  заказчика выполнить работы по электроснабжению светофорного объекта по адресу:  г.Тамбов, перекресток ул. Чичерина-Северо-Западная, а заказчик обязуется оплатить  выполненные работы на условиях, предусмотренных контрактом.  

П. 1.2 Контракта № 143-К установлено, что виды и объем работ, выполняемых по  контракту: в соответствии с локальным сметным расчетом на выполнение работ по  электроснабжению светофорного объекта по адресу: г.Тамбов, перекресток ул. Чичерина- Северо-Западная (приложение № 2 к контракту).  

Цена Контракта 89 285 рублей (п. 2.1 Контракта № 143-К).  

П. 2.3 Контракта № 143-К установлены порядок и сроки оплаты выполненных  работ:  

- оплата выполненных работ производится заказчиком в пределах выделенного  объема финансирования на 2016 год, в безналичной форме платежными поручениями  путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в статье  14 Контракта;  

- оплата выполненных работ производится заказчиком в течение 30 дней с  момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (но не позднее  31.12.2016) путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.  

Сроки выполнения работ: в течение 20 дней с момента заключения контракта (п.  4.2 Контракта № 143-К).  

П. 7.3 Контракта № 143-К установлено, что в случае просрочки исполнения  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать  уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.  

Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует полного  исполнения сторонами своих обязательств (п. 12.1 Контракта № 143-К).  

Истцом работы по Контракту № 143-К были выполнены, в полном объеме на сумму  89 285 руб., что подтверждено Актом о приемке выполненных работ № 1 от 09.12.2016,  подписанным сторонами и скрепленным их печатями.  

Стоимость работ соответствует Справке о стоимости выполненных работ и затрат   № 1 от 09.12.2016 на сумму 89 285 руб.  

Ответчиком оплата выполненных по Контракту № 143-К работ на сумму 89 285 руб.  не произведена.  

12.12.2016 между МБУ "Спецдорсервис" (Заказчик) и ООО «Стройпремьер- Сервис» (Подрядчик) по итогам аукциона в электронной форме (протокол рассмотрения  единственной заявки на участии в аукционе в электронной форме   № 0164300016516000806/1 от 29.11.2016) был заключен контракту № 575049/157 на  выполнение работ по установке светофорного объекта на пешеходном переходе по адресу:  

<

...> в районе дома 96, от 12.12.2016 (далее – Контракт № 575067/156).  

П. 1.1 Контракта № 575067/156 установлено, что подрядчик обязуется по заданию  заказчика выполнить работы по установке светофорного объекта на пешеходном переходе  по адресу: 

<

...> в районе дома 96, а заказчик обязуется оплатить  выполненные работы на условиях, предусмотренных контрактом.  

П. 1.2 Контракта № 575067/156 установлено, что виды и объем работ, выполняемых  по контракту: в соответствии с локальным сметным расчетом «Установка светофорного  объекта на пешеходном переходе по адресу: 

<

...> в районе дома 96»  (приложение № 2 к контракту).  

Цена Контракта 599 848 рублей (п. 2.1 Контракта № 575067/156).  

П. 2.3 Контракта № 575067/156 установлены порядок и сроки оплаты выполненных  работ:  

- оплата выполненных работ производится заказчиком в безналичной форме  платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет  подрядчика, указанный в статье 15 Контракта на основании счета-фактуры и  подписанного сторонами акта выполненных работ;  

- оплата выполненных работ производится заказчиком с момента подписания  сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на  расчетный счет подрядчика до 31.12.2016.  

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 29.12.2016. Срок  выполнения работ включает в себя приемку результатов выполненных работ и  подписание акта сдачи- приемки выполненных работ (п. 4.2 Контракта № 575067/156).  

П. 7.3 Контракта № 575067/156 установлено, что в случае просрочки исполнения  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать  уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.  

Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2016  

Истцом работы по Контракту № 575067/156 были выполнены, в полном объеме на  сумму 599 848 руб., что подтверждено Актом о приемке выполненных работ № 1 от  16.12.2016, подписанным сторонами и скрепленным их печатями.  

Стоимость работ соответствует Справке о стоимости выполненных работ и затрат   № 1 от 16.12.2016 на сумму 599 848 руб.  

Ответчиком оплата выполненных по Контракту № 575067/156 работ на сумму  599 848 руб. не произведена.  

12.12.2016 между МБУ "Спецдорсервис" (Заказчик) и ООО «Стройпремьер- Сервис» (Подрядчик) по итогам запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки  заявок на участии в запросе котировок № 0164300016516000814 от 29.11.2016) был  заключен контракту № 155-К на выполнение работ по электроснабжению светофорного  объекта по адресу: 

<

...> в районе дома 96, от 12.12.2016 (далее –  Контракт № 155-К).  

П. 1.1 Контракта № 155-К установлено, что подрядчик обязуется по заданию  заказчика выполнить работы по электроснабжению светофорного объекта по адресу:  

<

...> в районе дома 96, а заказчик обязуется оплатить выполненные  работы на условиях, предусмотренных контрактом.  

П. 1.2 Контракта № 155-К установлено, что виды и объем работ, выполняемых по  контракту: в соответствии с локальным сметным расчетом на выполнение работ по  электроснабжению светофорного объекта по адресу: 

<

...> в районе дома  96 (приложение № 2 к контракту).  

Цена Контракта 46 138 рублей (п. 2.1 Контракта № 155-К).  

П. 2.3 Контракта № 155-К установлены порядок и сроки оплаты выполненных  работ:  

- оплата выполненных работ производится заказчиком в пределах выделенного  объема финансирования на 2016 год, в безналичной форме платежными поручениями  путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в статье  14 Контракта;  

- оплата выполненных работ производится заказчиком с момента подписания  сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на  расчетный счет подрядчика до 31.12.2016.  

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 29.12.2016 (п. 4.2  Контракта № 155-К).  

П. 7.3 Контракта № 155-К установлено, что в случае просрочки исполнения  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать  уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.  

Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует полного  исполнения сторонами своих обязательств (п. 12.1 Контракта № 155-К).  

Истцом работы по Контракту № 155-К были выполнены, в полном объеме на сумму  46 138 руб., что подтверждено Актом о приемке выполненных работ № 1 от 16.12.2016,  подписанным сторонами и скрепленным их печатями.  

Стоимость работ соответствует Справке о стоимости выполненных работ и затрат   № 1 от 16.12.2016 на сумму 46 138 руб.  

Ответчиком оплата выполненных по Контракту № 155-К работ на сумму 46 138 руб.  не произведена.  

12.12.2016 между МБУ "Спецдорсервис" (Заказчик) и ООО «Стройпремьер- Сервис» (Подрядчик) по итогам аукциона в электронной форме (протокол рассмотрения  

единственной заявки на участии в аукционе в электронной форме   № 0164300016516000807/1 от 29.11.2016) был заключен контракту № 575081/159 на  выполнение работ по установке светофорного объекта Т7 в районе детского сада «Умка»  (г. Тамбов, ул.Победы, д. 6), от 12.12.2016 (далее – Контракт № 575081/159).  

П. 1.1 Контракта № 575081/159 установлено, что подрядчик обязуется по заданию  заказчика выполнить работы по установке светофорного объекта Т7 в районе детского  сада «Умка» (

<

...>), а заказчик обязуется оплатить выполненные  работы на условиях, предусмотренных контрактом.  

П. 1.2 Контракта № 575081/159 установлено, что виды и объем работ, выполняемых  по контракту: в соответствии с локальным сметным расчетом «Установка светофорного  объекта Т7 в районе детского сада «Умка» (

<

...>)» (приложение № 2  к контракту).  

Цена Контракта 428 702 рублей (п. 2.1 Контракта № 575081/159). 

П. 2.3 Контракта № 575081/159 установлены порядок и сроки оплаты выполненных  работ:  

- оплата выполненных работ производится заказчиком в безналичной форме  платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет  подрядчика, указанный в статье 15 Контракта на основании счета-фактуры и  подписанного сторонами акта выполненных работ;  

- оплата выполненных работ производится заказчиком с момента подписания  сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на  расчетный счет подрядчика до 31.12.2016.  

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 29.12.2016. Срок  выполнения работ включает в себя приемку результатов выполненных работ и  подписание акта сдачи- приемки выполненных работ (п. 4.2 Контракта № 575081/159).  

П. 7.3 Контракта № 575081/159 установлено, что в случае просрочки исполнения  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать  уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.  

Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2016  (п. 13.1 Контракта № 575081/159).  

Истцом работы по Контракту № 575081/159 были выполнены, в полном объеме на  сумму 428 702 руб., что подтверждено Актом о приемке выполненных работ № 1 от  26.12.2016, подписанным сторонами и скрепленным их печатями.  

Стоимость работ соответствует Справке о стоимости выполненных работ и затрат   № 1 от 26.12.2016 на сумму 428 702 руб.  

Ответчиком оплата выполненных по Контракту № 575081/159 работ на сумму  428 702 руб. не произведена.  

12.12.2016 между МБУ "Спецдорсервис" (Заказчик) и ООО «Стройпремьер- Сервис» (Подрядчик) по итогам аукциона в электронной форме (протокол рассмотрения  единственной заявки на участии в аукционе в электронной форме   № 0164300016516000799/1 от 29.11.2016) был заключен контракту № 575039/161 на  выполнение работ по установке светофорного объекта Т7 на перекрестке ул. Васильковой  и ул. М.Н. Мордасовой (школа № 1), от 12.12.2016 (далее – Контракт № 575039/161).  

П. 1.1 Контракта № 575039/161 установлено, что подрядчик обязуется по заданию  заказчика выполнить работы по установке светофорного объекта Т7 на перекрестке  ул.Васильковой и ул. М.Н. Мордасовой (школа № 1), а заказчик обязуется оплатить  выполненные работы на условиях, предусмотренных контрактом.  

П. 1.2 Контракта № 575039/161 установлено, что виды и объем работ, выполняемых  по контракту: в соответствии с локальным сметным расчетом «Установка светофорного  объекта Т7 на перекрестке ул. Васильковой и ул. М.Н. Мордасовой (школа № 1)»  (приложение № 2 к контракту).  

Цена Контракта 535 244 рублей (п. 2.1 Контракта № 575039/161). 

П. 2.3 Контракта № 575039/161 установлены порядок и сроки оплаты выполненных  работ:  

- оплата выполненных работ производится заказчиком в безналичной форме  платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет  подрядчика, указанный в статье 15 Контракта на основании счета-фактуры и  подписанного сторонами акта выполненных работ;  

- оплата выполненных работ производится заказчиком с момента подписания  сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на  расчетный счет подрядчика до 31.12.2016.  

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 29.12.2016. Срок  выполнения работ включает в себя приемку результатов выполненных работ и  подписание акта сдачи- приемки выполненных работ (п. 4.2 Контракта № 575039/161).  

П. 7.3 Контракта № 575039/161 установлено, что в случае просрочки исполнения  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать  уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.  

Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2016  (п. 13.1 Контракта № 575039/161).  

Соглашение от 26.12.2016 (далее - Соглашение) стороны пришли к взаимному  согласию о расторжении контракта № 575039/161 от 12.12.2016 (п. 1 Соглашения).  

П. 2 Соглашения установлено, что подрядчик выполнил работы на сумму 462 225  рублей; задолженность заказчика по оплате на момент подписания соглашения  составляет 462 225 руб.  

Контракт считается расторгнутым после полной оплаты заказчиком поставленного  товара (п. 4 Соглашения).  

Истцом работы по Контракту № 575039/161 были выполнены, в полном объеме на  сумму 462 225 руб., что подтверждено Актом о приемке выполненных работ № 1 от  26.12.2016, подписанным сторонами и скрепленным их печатями.  

Стоимость работ соответствует Справке о стоимости выполненных работ и затрат   № 1 от 26.12.2016 на сумму 462 225 руб.  

Ответчиком оплата выполненных по Контракту № 575039/161 работ на сумму  462 225 руб. не произведена.  

12.12.2016 между МБУ "Спецдорсервис" (Заказчик) и ООО «Стройпремьер- Сервис» (Подрядчик) по итогам аукциона в электронной форме (протокол рассмотрения  единственной заявки на участии в аукционе в электронной форме   № 0164300016516000798/1 от 29.11.2016) был заключен контракту № 575091/160 на  выполнение работ по установке светофорного объекта Т7 на ул. Энгельса, д. 10 (д/с  «Ручеек»), от 12.12.2016 (далее – Контракт № 575091/160).  

П. 1.1 Контракта № 575091/160 установлено, что подрядчик обязуется по заданию  заказчика выполнить работы по установке светофорного объекта Т7 на ул. Энгельса, д. 10  (д/с «Ручеек»), а заказчик обязуется оплатить выполненные работы на условиях,  предусмотренных контрактом.  

П. 1.2 Контракта № 575091/160 установлено, что виды и объем работ, выполняемых  по контракту: в соответствии с локальным сметным расчетом «Установка светофорного  объекта Т7 на ул. Энгельса, д. 10 (д/с «Ручеек»)» (приложение № 2 к контракту).  

Цена Контракта 319 919 рублей (п. 2.1 Контракта № 575091/160). 

П. 2.3 Контракта № 575091/160 установлены порядок и сроки оплаты выполненных  работ:  

- оплата выполненных работ производится заказчиком в безналичной форме  платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет  подрядчика, указанный в статье 15 Контракта на основании счета-фактуры и  подписанного сторонами акта выполненных работ;  

- оплата выполненных работ производится заказчиком с момента подписания  сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на  расчетный счет подрядчика до 31.12.2016.  

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 29.12.2016. Срок  выполнения работ включает в себя приемку результатов выполненных работ и  подписание акта сдачи- приемки выполненных работ (п. 4.2 Контракта № 575091/160).  

П. 7.3 Контракта № 575091/160 установлено, что в случае просрочки исполнения  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать  уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.  

Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2016  (п. 13.1 Контракта № 575091/160).  

Истцом работы по Контракту № 575091/160 были выполнены, в полном объеме на  сумму 319 919 руб., что подтверждено Актом о приемке выполненных работ № 1 от  26.12.2016, подписанным сторонами и скрепленным их печатями.  

Стоимость работ соответствует Справке о стоимости выполненных работ и затрат   № 1 от 26.12.2016 на сумму 319 919 руб.  

Ответчиком оплата выполненных по Контракту № 575091/160 работ на сумму  319 919 руб. не произведена.  

Общая задолженность за выполненные по Контрактам работы составляет 3 175 938  руб.  

Истец претензией № 6 от 12.01.2017, полученной ответчиком 12.01.2017 (л.д. 22),  просил ответчика погасить задолженность.  

Ссылаясь на то, что претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения,  выполненные истцом работы не были оплачены в полном объеме, истец обратился в  арбитражный суд с требованием о взыскании с ответчика задолженности за выполненные  работы в размере 3 175 938 руб.  

Кроме того, в связи с тем, что условие по оплате выполненных работ ответчиком не  исполнено, выполненные по Контрактам работы не были оплачены в полном объеме,  истцом начислены пени в размере 111 475,42 руб. за период с 01.01.2017 по 18.04.2017.  

Оценив представленные документы, суд находит иск подлежащим удовлетворению  в полном объеме.  

При этом суд руководствовался следующим. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации  гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и  иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя  и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла  гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В  

соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в частности из  договоров.  

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу  обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)  определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу,  внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от  определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его  обязанности  

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными  обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения  обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.  

Обязательства сторон возникают из контрактов: 

 № 142-К на выполнение работ по установке опор под светофоры по адресу:  г.Тамбов, перекресток ул. Чичерина-Северо-Западная от 22.11.2016;  

 № 575049/157 на выполнение работ по установке светофорного объекта по адресу:  г.Тамбов, перекресток ул. Чичерина-Северо-Западная от 12.12.2016;  

 № 166-К на выполнение работ по установке опор под светофоры по адресу:  

<

...> в районе дома 96 от 12.12.2016;  

 № 143-К на выполнение работ по электроснабжению светофорного объекта по  адресу: г. Тамбов, перекресток ул. Чичерина-Северо-Западная от 22.11.2016;   

 № 575049/157 на выполнение работ по установке светофорного объекта на  пешеходном переходе по адресу: 

<

...> в районе дома 96, от 12.12.2016;   

 № 155-К на выполнение работ по электроснабжению светофорного объекта по  адресу: 

<

...> в районе дома 96, от 12.12.2016;   

 № 575081/159 на выполнение работ по установке светофорного объекта Т7 в районе  детского сада «Умка» (

<

...>), от 12.12.2016;  

 № 575039/161 на выполнение работ по установке светофорного объекта Т7 на  перекрестке ул. Васильковой и ул. М.Н. Мордасовой (школа № 1), от 12.12.2016;  

 № 575091/160 на выполнение работ по установке светофорного объекта Т7 на  ул.Энгельса, д. 10 (д/с «Ручеек»), от 12.12.2016.  

Данные контракты являются договорами подряда, правовая регламентация которых  предусмотрена гл. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - также  Гражданский кодекс РФ, ГК РФ).  

Контракты № 142-К от 22.11.2016; № 575049/157 от 12.12.2016; № 166-К от  12.12.2016; № 143-К от 22.11.2016; № 575049/157 от 12.12.2016; № 155-К от 12.12.2016;   № 575081/159 от 12.12.2016; № 575039/161 от 12.12.2016; № 575091/160 от 12.12.2016  заключены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).  

Согласно ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ государственный контракт,  муниципальный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации,  субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального  образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным  заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных  нужд.  

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору  подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика)  выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется  принять результат и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд,  

строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ,  подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим  параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об  этих видах договорах.  

Ч.1 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что  подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья  758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд,  осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на  выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.  

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных  работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или  муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и  другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и  непроизводственного характера работы и передать их государственному или  муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется  принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (ч.2 ст. 763  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не  предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов,  заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи  результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в  согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

На основании п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые  предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять  выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора,  ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об  этом подрядчику.  

Истцом работы были выполнены, в полном объеме на сумму 3 175 938 руб., что  подтверждено актами о приемке выполненных работ, подписанными сторонами и  скрепленными их печатями:  

- по Контракту № 142-К - № 1 от 09.12.2016 на сумму 102 711 руб.,  - по Контракту № 575049/157 - № 1 от 16.12.2016 на сумму 871 737 руб.,  

- по Контракту № 166-К - № 1 от 16.12.2016 на сумму 255 373 руб.,  - по Контракту № 143-К - № 1 от 09.12.2016 на сумму 89 285 руб.,  - по Контракту № 575067/156 - № 1 от 16.12.2016 на сумму 599 848 руб.,  

- по Контракту № 155-К - № 1 от 16.12.2016 на сумму 46 138 руб.,  - по Контракту № 575081/159 - № 1 от 26.12.2016 на сумму 428 702 руб.,  

- по Контракту № 575039/161 - № 1 от 26.12.2016 на сумму 462 225 руб.,  - по Контракту № 575091/160 - № 1 от 26.12.2016 на сумму 319 919 руб.  

Стоимость работ соответствует Справкам о стоимости выполненных работ и  затрат:  

- по Контракту № 142-К - № 1 от 09.12.2016 на сумму 102 711 руб.,  - по Контракту № 575049/157 - № 1 от 16.12.2016 на сумму 871 737 руб.,  

- по Контракту № 166-К - № 1 от 16.12.2016 на сумму 255 373 руб.,  - по Контракту № 143-К - № 1 от 09.12.2016 на сумму 89 285 руб.,  - по Контракту № 575067/156 - № 1 от 16.12.2016 на сумму 599 848 руб.,  

- по Контракту № 155-К - № 1 от 16.12.2016 на сумму 46 138 руб.,  - по Контракту № 575081/159 - № 1 от 26.12.2016 на сумму 428 702 руб.,  

- по Контракту № 575039/161 - № 1 от 26.12.2016 на сумму 462 225 руб.,  - по Контракту № 575091/160 - № 1 от 26.12.2016 на сумму 319 919 руб.  

Ответчик оплату работ, выполненных по Контрактам на общую сумму 3 175 938  руб. не произвел.  

Ответчик факт выполнения работ, объем, качество работ и наличие задолженности  не оспорил, доказательств уплаты задолженности в сумме 3 175 938 руб. не представил.  

Кроме того, задолженность ответчика перед истцом в сумме 3 175 938 руб.  подтверждается представленными в материалы дела актами сверки взаимных расчетов  (т.2 л.д. 79,80).  

В соответствии с ч.3 ст. 70 АПК РФ, признание стороной обстоятельств, на  которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает  другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.  

Исковые требования в части взыскания основного долга в размере 3 175 938 руб.  заявлены обоснованно, и подлежат удовлетворению в полном объеме.  

Истцом начислены пени в размере 111 475,42 руб. за период с 01.01.2017 по  18.04.2017.  

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации  взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного права.  

В силу п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой  (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма,  которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

П. 7.3 Контрактов установлено, что в случае просрочки исполнения заказчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты пени.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контракта срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в  размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.  

Истец претензией № 6 от 12.01.2017, полученной ответчиком 12.01.2017 (л.д. 22),  просил ответчика погасить основной долг в размере 3 175 938 руб.  

П. 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса  Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" установлено, что  если кредитором подан иск о взыскании исключительно процентов на основании статьи  395 ГК РФ в связи с неисполнением или просрочкой денежного обязательства, в  отношении которого действуют правила о претензионном порядке, установленные  законом или договором, рассмотрение такого иска по существу возможно лишь после  соблюдения правил о претензионном порядке.  

Если кредитором соблюден претензионный порядок в отношении суммы основного  долга, считается соблюденным и претензионный порядок в отношении процентов,  взыскиваемых на основании статьи 395 ГК РФ.  

Аналогичные правила применяются при взыскании неустоек, процентов,  предусмотренных статьей 317.1 ГК РФ и т.п.  

Поскольку ответчиком оплата выполненных по Контрактам работ произведена не в  полном объеме, истцом правомерно были начислены пени в размере 111 475,42 руб. за  период с 01.01.2017 по 18.04.2017.  

Расчет неустойки ответчиком не оспорен, заявлений, ходатайств не заявлено. 

Исковые требования в части взыскания пени в размере 111 475,42 руб. заявлены  обоснованно, подлежат удовлетворению в полном объеме.  

В соответствии с ч.1 ст.71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  

Исследовав обстоятельства дела, оценив в соответствии со статьей 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в  

материалы дела доказательства, арбитражный суд приходит к выводу, что исковые  требования подлежат удовлетворению в полном объеме.  

Руководствуясь статьями 49, 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Взыскать с Муниципального бюджетного учреждения «Спецдорсервис»,  

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата  регистрации 22.07.2011) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Стройпремьер-Сервис» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>), г.Тамбов,  задолженность в размере 3175938 руб. – основной долг, 111475,42 руб. - пени; расходы по  уплате государственной пошлины в размере 39437 руб.  

2. Истцу выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.  

3. Истцу выдать справку на возврат из федерального бюджета государственной  пошлины в размере 11 руб.  

4. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу 394006,  

<

...> через Арбитражный суд Тамбовской области.  

Судья А.В. Захаров