АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-6918/2024

16 августа 2024 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения изготовлена 15 июля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 16 августа 2024 года.

 

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Лариной Е.А., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЕвроТехСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании,

без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ЕвроТехСтрой» (далее – ООО «ЕвроТехСтрой», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Омскэлектро» (далее – АО «Омскэлектро», ответчик) о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по договорам № 312-156/21 от 09.12.21, 312-154/21 от 07.12.21, №312-26/21 от 01.04.2021 в размере 231 939,35  руб. (с учетом уточнений от 01.07.2024 в порядке статьи 49 АПК РФ, принятых судом).

Определением Арбитражного суда Омской области от 24.04.2024 указанное исковое заявление принято к производству, дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

24.05.2024 от ответчика поступил письменный отзыв на иск, в котором приведен контррасчет.

10.07.2024 от ответчика поступил отзыв на заявление об уменьшении исковых требований.

Определением Арбитражного суда Омской области от 17.06.2024 указанное исковое заявление назначено к рассмотрению без перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства на 02.07.2024.

Решением Арбитражного суда Омской области, принятым 15.07.2024 путем подписания его резолютивной части, уточненные исковые требования удовлетворены частично.

18.07.2024 от ответчика поступило заявление о составлении мотивированного решения.

05.08.2024 от акционерного общества «Омскэлектро» поступила апелляционная жалоба.

В связи с подачей акционерным обществом «Омскэлектро» заявления и  апелляционной жалобы,  мотивированное решение подлежит изготовлению на основании абзаца 3 части 2 статьи 229 АПК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

Если судья, подписавший резолютивную часть решения, отсутствует в день поступления заявления о составлении мотивированного решения или апелляционной жалобы, вопрос о составлении мотивированного решения указанным судьей разрешается в пятидневный срок, начинающий исчисляться с момента возобновления исполнения указанным судьей своих обязанностей.

Учитывая дату выхода судьи из отпуска 12.08.2024, судом в установленный срок изготовлено настоящее мотивированное решение.

Принимая решение, суд учел следующие обстоятельства.

Между АО «Омскэлектро» и ООО «ЕвроТехСтрой» заключены договоры №312-156/21 от 09.12.2021, №312-154/21 от 07.12.2021, №312-26/21 от 01.04.2021, по условиям которых Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству (далее по тексту - Работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Согласно договору №312-156/21 от 09.12.2021 заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации и выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция здания ТП-4794, расположенной по адресу: 

<

...>» (далее по тексту - Работы) и обязуется принять и оплатить образом выполненные Подрядчиком работы в срок, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре, а Подрядчик обязуется выполнить порученные Заказчиком работы с надлежащим качеством в объеме и срока, предусмотренные договором.

Подрядчик обязуется выполнить работы в полном объеме и в следующие сроки: начало работ: с момента заключения Договора, окончание работ: не позднее 24.12.2021.

Цена Договора составляет 2 334 734 руб. 40 коп., в том числе НДС (20%) 

Согласно договору №312-154/21 от 07.12.2021 заказчик поручает Подрядчику выполнить работы по разработке проектно-сметной документации и выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция здания распределительной подстанции № 402, расположенной по адресу: 

<

...>» (далее по тексту - Работы) и обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренные в настоящем договоре, а Подрядчик обязуется выполнить порученные Заказчиком работы с надлежащем качеством в объеме и сроки, предусмотренные договором.

Подрядчик обязуется выполнить работы в полном объеме и в следующие сроки: начало работ: с момента заключения договора, окончание работ: не позднее 24.12.2021.

Цена Договора составляет 5 901 619 руб. 24 коп., в том числе НДС (20%). 

Согласно договора №312-26/21 от 01.04.2021 заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству ЛЭП0,4кВ (кабельная линия 0,4кВ) от 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-8081 до границы участка заявителя на объекте: «Торгово-остановочный комплекс, местоположение установлено: 

<

...>, ООТ «Технический университет» (НТО 676)» (далее по тексту - Работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Подрядчик обязуется выполнить Работы в полном объеме и в следующие сроки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора Заказчик обязан предоставить Подрядчику земельные участки для выполнения работ, с оформлением акта передачи земельных участков под строительство. 1 этап: В течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта передачи земельных участков под строительство Подрядчик обязан выполнить работы и восстановлению асфальтобетонного покрытия в зимнем варианте, включающем в себя устройство основания из щебня. 2 этап: В срок не позднее 01 июня 2021г. Подрядчик обязан выполнить работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, после полного оттаивания грунта. Сетевой график предоставляется Подрядчиком в течение 1 рабочего дня с момента подписания сторонами акта передачи земельных участков под строительство.

В соответствии с п. 3.5. договоров подряда №312-156/21 от 09.12.2021, №312-154/21 от 07.12.2021 оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания документов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки стоимости выполненных работ по форме КС-3 (в соответствии с требованиями п. 14(3) ч. 1 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352).

В соответствии с п. 3.5. договоров подряда №312-26/21 от 01.04.2021 оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты подписания документов о приемке выполненных работ по форме (КС-2), и справки стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Как указывает истец, ответчиком допущено ненадлежащее исполнение обязательств по оплате за выполненные работы.

В соответствии с п. 9.2. настоящего договоров подряда №312-156/21 от 09.12.2021, №312-154/21 от 07.12.2021, №312-26/21 от 01.04.2021 в случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных договором, имущественная ответственность Заказчика определяется только в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требования истца об оплате процентов за пользование чужими денежными средствами за нарушение срока оплаты выполнения работ остались ответчиком без исполнения, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Оценив представленную совокупность доказательств в порядке статьи 71 АПК РФ, суд усматривает основания для частичного удовлетворения исковых требований в связи со следующим.

В силу статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договора и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ).

В силу статьи 720 ГК РФ основанием для оплаты выполненных работ является факт принятия результата работ, доказательством передачи результата работ является акт приема-передачи или иной приравненный к нему документ.

Согласно разъяснениям, данным Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 8 Информационного письма от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - Информационное письмо № 51), основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В подтверждение выполнения работ истец представил акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанные сторонами.

Согласно статье 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Поскольку истцом доказано неисполнение ответчиком обязанности по оплате выполненных работ в установленный срок, ООО «ЕвроТехСтрой» вправе требовать уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ответчик, не озвучивая возражений в части наличия оснований для начисления процентов за пользование чужими денежными средствами, высказал несогласие с расчетом истца в части периода начисления процентов, что нашло свое отражение в отзыве на исковое заявление и приведенном контррасчёте.

Истец с возражениями в части процентов, начисленных в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате работ, выполненных по договорам подряда №312-156/21 от 09.12.2021, №312-154/21 от 07.12.2021, согласился, в связи с чем, представил заявление об уменьшение исковых требований в указанной части, которые судом приняты.

Разногласия сторон касаются порядка начисления процентов в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате работ в рамках договора подряда №312-26/21 от 01.04.2021.

По указанному договору работы выполнялись в два этапа, по окончанию выполнения работ составлены акты КС-2 от 19.05.2021 (1 этап), от 30.05.2021 (2 этап).

Вместе с тем, указанные акты получены и подписаны ответчиком 15.07.2024, о чем свидетельствует имеющееся в деле письмо ООО «ЕвроТехСтрой» от 15.07.2024, на основании которого обозначенные выше акты направлены ответчику для их согласования и подписания.

Принимая во внимание буквальное толкование условий договора подряда №312-26/21 от 01.04.2021, обязанность по оплате возникает в течение 15 календарных дней с даты подписания актов по форме КС-2.

Соответственно, обязанность по оплате у ответчика наступила 05.08.2021, в связи с чем, с 06.08.2021 возникла просрочка на стороне ответчика.

Суд в указанной части соглашается с возражениями ответчика и представленным контррасчётом.

Размер процентов по договору №312-26/21 от 01.04.2021 за период с 06.08.2021 по 01.02.2022 составляет 22 324,81 руб.

Тем самым, общая сумма процентов за пользование чужими денежным средствами составляет 222 573,74 руб. (контррасчет ответчика).

Таким образом, требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит частичному удовлетворению.

Настоящим решением уточненные исковые требования удовлетворены частично, в связи с чем, истец имеет право на взыскание с ответчика понесенных в ходе рассмотрения дела судебных расходов пропорционально удовлетворенным требованиям.

Учитывая уменьшение исковых требований, а также их частичное удовлетворение, расходы по уплате государственной пошлине по правилам статьи 110 АПК РФ подлежат распределению следующим образом:

- 7 330,38 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины – взысканию с ответчика в пользу истца;

-1 036 руб. госпошлины подлежат возвращению из федерального бюджета обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроТехСтрой».

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-171, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

принять уточнения исковых требований от 01.07.2024.

Взыскать с акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЕвроТехСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) проценты за пользование чужими денежными средствами по договорам №312-156/21 от 09.12.2021, №312-154/21 от 07.12.2021, №312-26/21 от 01.04.2021 в общем размере 222 573,74 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 330,38 руб.

Исковые требования в оставшейся части оставить без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроТехСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 036 руб., уплаченную по платежному поручению №94 от 16.04.2024.

По заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если иное не вытекает из особенностей, установленных названной главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Это решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Омской области.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                          Е.А. Ларина